РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-266829/23-110-2080

г. Москва

09 июля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 09 июля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" (107078, 

<

...>, СТР.1, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ" (129626, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 9 513 492,93 руб., а также встречный иск

 

при участии:

от истца – ФИО1 по дов.  от 27.12.2023,

от ответчика- ФИО2 по дов.  от  27.03.2024, 

 

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" обратилось с иском к акционерному обществу "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 15 550 112,19 руб. неустойки по этапу 4 Договора ИГК 1522730103532217000241016 № 20/18 от 31.01.2019.

Ответчик иск не признал по основаниям , изложенным в отзыве, предъявил встречный иск (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 88 898 589,63 руб. задолженности по 2, 4 этапам работ по договору от 31.01.2019 № 20/18 ИГК 1522730103532217000241016, 20 370 816,72 руб. неустойки, неустойки на сумму 88 898 589,63 руб., исход из 1/300 ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды, с 22.06.2024 по дату фактического исполнения обязательства.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (Заказчик) и АО «НПП «Квант» (Исполнитель) был заключен Договор ИГК 1522730103532217000241016 № 20/18 от 31.01.2019 на выполнение СЧ ОКР на тему: «Разработка батареи фотоэлектрической для космического аппарата (КА) «Метеор-М».

Согласно Ведомости исполнения в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 30.12.2022 срок выполнения этапа 4 - 15.10.2020. При этом Заказчик осуществляет поставку каркасов БФ по этапам 2, 4 за 6 месяцев до окончания работ по этапу. В случае задержки поставки каркасов срок выполнения работ окончания работ по этапам переносится на время задержки.

В письме АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 09.11.2022 исх. № АЧ-02/6858/х указано, что дефекты давальческого сырья устранены 08.11.2022, ошибки устранены 08.12.2022, что подтверждается Извещением. Следовательно, АО «Корпорация «ВНИИЭМ» допущена задержка поставки каркасов БФ длительностью 969 дней, в связи с чем срок окончания выполнения работ по этапу 4 Договора продлевается до 11.06.2023.

Однако обязательства по этапу 4 Исполнителем  в срок не выполнены.

В соответствии с п. 8.5 Договора в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает неустойку (пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Поскольку отчетные документы по этапу 4 Договора поступили в адрес истца 09.01.2024 с письмом от 25.12.2023 исх. №04-5450 (вх. №46/В/э от 09.01.2024), сумма неустойки составляет 15 550 112,19 руб.

Вместе с тем, согласно п. 2.1. Договора (в редакции п. 1.1. дополнительного соглашения от 30.12.2022 № 3), Работы по выполнению ОКР выполнялись Исполнителем в несколько этапов в полном соответствии с требованиями Технического задания ОМ30.02.00.000ТЗ1 (Приложение № 1 к Договору в редакции Дополнения № 4 – 6 к техническому заданию на разработку батареи фотоэлектрической) и Ведомостью исполнения (Приложение № 2 к Договору в редакции приложения № 1 к дополнительному соглашению от 30.12.2022 № 3 к Договору – далее по тексту Уточнённая ведомость исполнения).

Согласно Уточненной ведомости исполнения, срок выполнения Работ по 4 этапу – 15.10.2020. Работы выполнялись с применением изделий (каркасов) предоставленных Заказчиком на давальческой основе.

В связи с этим, Заказчик берёт на себя обязательства по поставке каркасов БФ в срок, не превышающий 6 месяцев до окончания Работ по этапу, а именно не позднее 15.04.2020. В случае задержки поставки каркасов, срок окончания выполнения работ, переносится на количество дней задержки (п. 4.3. Договора).

Перечень, количество изделий, передаваемых Заказчику в качестве давальческого сырья, указан в приложении № 1 к протоколу разногласий к Договору.

Изделия ОМ30.02.00.000 Каркас БФ, ОМ30.02.00.000-01 Каркас БФ для КА «Метеор-М» № 2-4 в количестве 2 шт. поставлены Заказчиком по накладной от 29.08.2022 № 219 с нарушением срока поставки и требований по качеству.

Дефекты давальческих изделий устранены Заказчиком в полном объёме - 08.12.2022 (письмо от 09.11.2022 № АЧ-02/6858/х, извещение от 08.12.2022). Просрочка поставки составила 968 календарных дней.

Следовательно, срок окончания выполнения Работ по 4 этапу, продлился до 10.06.2023.

В результате проведённого совещания, стороны перенесли дату окончания выполнения Работ по 4 этапу с 10.06.2023 на 10.09.2023, действительная воля сторон отражена в письмах от 24.082023 № 04-3676, от 25.08.2023 № АЖ-24/3903/х, 07.09.2023 № АВ-97/4144/х.

При таких обстоятельствах, из расчёта неустойки необходимо исключить период с 11.06.2023 по 10.09.2023 на который стороны договорились продлить срок выполнения Работ по 4 этапу.

Согласно п. 4.4. Договора Работы по этапу считаются выполненными с момента Утверждения Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу.

Акт сдачи-приёмки выполненных работ от 29.12.2023 № 1522730103532217000241016/48 по 4 этапу, утверждён Заказчиком – 29.12.2023.

Расчёт неустойки выполнен Истцом до 09.01.2024 (момент предоставления Ответчиком отчётных документов).

Таким образом крайний срок, исполнения Ответчиком обязанности по выполнению Работ не соответствует условиям Договора и определён Истцом не верно.

Вместе с тем суд не усматривает  из представленных доказательств перенос срока   в установленном порядке до 10.09.2023,  в связи с чем  начала периода неустойки следует считать верным 11.06.2023.

Однако, суд считает  подлежащим начислению неустойку по дату акта выполненных работ,  то есть по  29.12.2023

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств п. 8.5. Договора, предусмотрена неустойка в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки исполнения.

Размер договорной неустойки за период с 11.06.2023 по 29.12.2023 составляет   17 747 054,75 руб.

В остальной части суд считает  доводы ответчика несостоятельными,  поскольку при расчете неустойки  Заказчиком был исключен период его просрочки выполнения встречных обязательств.

Вместе с тем суд считает несоразмерным неустойку последствиям нарушения  обязательства и считает необходимым снизить ее   в два раза(с учетом высокой  ставки рефинансирования -16%) до суммы  7 373 527,37 руб.

При  этом суд отмечает, что неустойка является специальной мерой гражданской ответственности, способствующей исполнению обязательств, которая носит как карательный, так и компенсационный характер. Неустойка, как и другие способы исполнения обязательств, направлена на гарантированное исполнение основного обязательства и на стимулирование должника к надлежащему поведению.

Пунктом 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ» определены критерии установления несоразмерности взыскиваемой неустойки.

Такими критериями в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Также пунктом 42 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что при оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма договора).

При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежит частичному удовлетворению.

При этом встречный иск также подлежит частичному удовлетворению, исходя из следующего.

В целях выполнения государственного оборонного заказа между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (Заказчик) и АО «НПП Квант» (Исполнитель) заключён договор на выполнение опытно-конструкторской работы (далее – ОКР) от 31.01.2019 № 20/18 ИГК 1522730103532217000241016 в редакции п. 1 дополнительного соглашения от 23.03.2021 № 2 (далее – Договор) по разработке батареи фотоэлектрической для космического аппарата «Метеор-М».

Согласно п. 2.1. Договора (в редакции п. 1.1. дополнительного соглашения  от 30.12.2022 № 3), Работы по выполнению ОКР выполнялись Исполнителем в несколько этапов в полном соответствии с требованиями Технического задания ОМ30.02.00.000ТЗ1 (Приложение № 1 к Договору в редакции Дополнения № 4 – 6 к техническому заданию на разработку батареи фотоэлектрической) и Ведомостью исполнения (Приложение № 2 к Договору в редакции приложения № 1 к дополнительному соглашению от 30.12.2022 № 3).

Авансирование по Договору производится поэтапно в размере 80% от цены Договора в процентном соотношении равном полученному Заказчиком авансу по соответствующему этапу Государственного контракта № 016-8564/15/353 от 25.12.2015 (п. 3.2. Договора).

Согласно Актам от 07.12.2022 №№ 1522730103532217000241016/24, 1522730103532217000241016/25, от 29.12.2023 № 1522730103532217000241016/48 фиксированная стоимость Работ по 1 этапу составила - 55 372 613,56 руб., по 2 этапу составила - 177 371 338,66 руб., по 4 этапу составила – 136 884 790,37 руб.

Сумма предварительной оплаты по этапам составила:

- этап 1 – 47 509 378,53 руб.;

- этап 2 - 115 849 707,10 руб.;

- этап 4 – 109 507 832,30 руб.

Оплата подтверждается платёжными поручениями №№ 2277, 2278, 2279 от 07.05.2019.

Сумма задолженности по этапам составила:

55 372 613,56 - 47 509 378,53 = 7 863 235,03 – 1 этап;

177 371 338,66 - 115 849 707,10 = 61 521 631,56 – 2 этап;

136 884 790,37 - 109 507 832,30 = 27 376 958,07 – 4 этап;

7 863 235,03 + 61 521 631,56 + 27 376 958,07 = 96 761 824,66

В итоге, размер задолженности по оплате 1, 2, 4 этапов Работ составил в сумме 96 761 824,66 руб.

Окончательный расчёт за выполнение Исполнителем по Договору Работы, осуществляется с учётом ранее выплаченного аванса в течение 30 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приёмки этапа СЧ ОКР (п. 3.4. Договора в редакции дополнительного соглашения от 30.12.2022 № 3).

Отлагательных условий для оплаты Работ, Договором не установлено.

Акты сдачи-приёмки выполненных работ 1 этапа № 1522730103532217000241016/24, 2 этапа № 1522730103532217000241016/25 утверждены Заказчиком - 07.12.2022.

Акты сдачи-приёмки выполненных работ 4 этапа № 1522730103532217000241016/48 утверждён Заказчиком – 29.12.2023.

Таким образом, у АО «Корпорации «ВНИИЭМ» с 09.01.2023 возникла обязанность по оплате выполненных АО «НПП Квант» Работ по 1, 2 этапам. Обязанность по оплате выполненных АО «НПП Квант» Работ по 4 этапу возникла у АО «Корпорации «ВНИИЭМ» с 30.01.2024.

Однако, обязанность по оплате вышеуказанных Работ, АО «Корпорации «ВНИИЭМ» не исполнена.

В силу ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную соглашением сторон цену, после окончательной сдачи результатов работы.

Согласно положениям ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства сторон должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком взятых на себя обязательств, п. 8.6. Договора, предусмотрена неустойка в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Размер неустойки на 09.02.2024 составил – 20 568 500,6 руб.

В ходе судебного разбирательства истцом по встречному иску заявлено ходатайство об изменении встречных исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ.

19.03.2024 ответчиком по встречному иску п/п №1368 от 18.03.2024 оплачена задолженность по 1 этапу работ.

Вместе с тем,  исходя из условий  договора с учетом всех дополнительных соглашений и проколов разногласий,  срок оплаты зависит  от поступления денежных средств от Роскосмоса по госконтракту (п.3.4  в редакции п.2.2 протокола разногласий к дополнительному соглашению №3  от 30.12.2022). Денежные средства перечислены  22.02.2024.

Кроме того,  согласно п.  3.4 договора(п.4.6 допсоглашения №2), оплаты производится на основании ,  в том числе счета. При отсутствии такового Заказчик оплату не производит.

Учитывая даты поступления средств,   выставления счетов неустойка подлежит взысканию в размере 4 929 281,80 руб., исходя из следующего расчета, учитывая что  23.02.2024  выходной день:

1 этап с  24.02.2024  по  19.03.2024-104 843,13 руб.;

2этап с  24.02.2024  по  21.06.2024  в размере 3 904 572,88 руб.

4  этап с  20.04.2024(учитывая дату выставления счета)  по  21.06.2024  в размере 919 865,79  руб.

Так же подлежит начислению неустойку  по день фактической оплаты, исходя из  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату оплаты,  которая соразмерна последствиям нарушения обязательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично- в размере 7 373 527, 37 руб. неустойки. Встречный иск удовлетворить частично-88 898 589,63 руб. задолженности,4 929 281,80 руб. неустойки.

В удовлетворении остальной части исков  отказать.

Произвести зачет.

Взыскать с  акционерного общества "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу  акционерному обществу "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ" (ОГРН: 

<

***>)  86 454 354 руб. 06 коп. задолженности,  неустойку на сумму 86 454 354 руб. 06 коп., исходя из 1/300  ключевой ставки ЦБ РФ на дату оплаты,  с  22.06.2024  по день фактической оплаты, 103 070 руб.   в возмещение расходов по госпошлине.

Взыскать с  акционерного общества "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" (ОГРН: 

<

***>) в федеральный бюджет госпошлину в размере 10 204 руб.

Взыскать с  акционерного общества "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ" (ОГРН: 

<

***>)  ) в федеральный бюджет госпошлину в размере 19 983 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко