АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.(3852) 29-88-01, http://www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Барнаул Дело № А03-6488/2016 Резолютивная часть решения оглашена 25 апреля 2018 года. Решение в полном объеме изготовлено 03 мая 2018 года. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сайчука А.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  Староалейского сельсовета Третьяковского района Алтайского края, с. Староалейское, к  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дедал», г. Рубцовск, о  безвозмездном устранении недостатков многоквартирного жилого дома,  

при участии в заседании представителей сторон: от истца – ФИО2, глава сельсовета, паспорт 

Установил:

В Арбитражный суд Алтайского края обратилась Администрация Староалейского  сельсовета Третьяковского района Алтайского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  (далее по тексту – истец), с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительная компания Дедал», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  (далее по тексту – ответчик), о безвозмездном устранении недостатков многоквартирного  жилого дома.  

Определением от 01.12.2016, суд назначил по делу судебную строительно-техническую  экспертизу, проведение которой поручил эксперту общества с ограниченной  ответственностью «Центр независимой профессиональной экспертизы «Алтай-Эксперт»  ФИО3.  

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для приостановления  производства по делу, производство по делу было возобновлено.  

Определением от 30.11.2017 суд назначил по делу дополнительную судебную  строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручил эксперту общества с  ограниченной ответственностью «Центр независимой профессиональной экспертизы  «Алтай-Эксперт» ФИО3, в связи с чем производство по делу было  приостановлено.  

Определением от 26.03.2018 в связи с устранением обстоятельств, послуживших  основанием для приостановления производства по делу, производство по делу возобновлено.  

В судебное заседание представитель ответчика не явился. 

В соответствии с ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее по тексту – АПК РФ) суд приступил к рассмотрению спора по существу в  отсутствие не явившегося представителя ответчика.  

В обоснование заявленного по делу требования истец указал, что между ним и  ответчиком 29.07.2013 был заключен муниципальный контракт № 2013.125489 на  приобретение у застройщика жилых помещений в строящихся малоэтажных домах в рамках  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из зданий аварийного  жилищного фонда Староалейского сельсовета» на 2013 год, при исполнении которого  ответчиком допущены отступления от рабочей документации, которые привели к  

недостаткам выполненных работ и не выполнению работ в полном объеме на объекте - 2-х  этажный 16 квартирный жилой дом в селе Староалейское по ул. Строительная, 54  Третьяковского района Алтайского края. Ответчик, гарантировав устранение недостатков  работ и выполнение работ в полном объеме, фактически свои обязательства не исполнил, что  послужило основанием для обращения с настоящем иском в суд.  

Ответчиком представлен письменный отзыв на исковое заявление, в котором ответчик  указал, что в момент подписания акта приема-передачи 2-х этажного 16 квартирного жилого  дома в 

<

...> Третьяковского района Алтайского края,  истец не заявлял о наличии каких-либо недостатков выполненных работ. Также ответчик  указал, что не получал от истца письменных претензий по поводу обнаруженных  недостатков выполненных работ, а представленный истцом акт о выявленных недостатках от  16.12.2015, по мнению ответчика, является недопустимым доказательством выполнения  работ с недостатками.  

К моменту судебного заседания истцом представлено уточненное исковое заявление, в  соответствии с которым истец просит обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки  многоквартирного жилого дома в 

<

...>  Третьяковского района Алтайского края определив в этом уточненном исковом заявлении  виды и объемы работ, подлежащие выполнению ответчиком, в соответствии с заключением  судебной строительно-технической экспертизы.  

Принимая во внимание право истца, предусмотренное ч.1 ст. 49 АПК РФ суд принял к  рассмотрению уточненные исковые требования в соответствии с уточненным исковым  заявлением исх. № 165 от 20.04.2018, зарегистрированным арбитражным судом 23.04.2018.  

Уточненные исковые требования представитель истца в судебном заседании  поддержал.  

Выслушав представителя истца и исследовав материалы дела, суд установил  следующее.  

29.07.2013 между истцом, как заказчиком, и ответчиком, как застройщиком, по  результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт   № 2013.125489 на приобретение у застройщика жилых помещений в строящихся  малоэтажных жилых домах в рамках муниципальной адресной программы «Переселение  граждан из зданий аварийного жилищного фонда Староалейского сельсовета» на 2013 год  (далее по тексту – муниципальный контракт).  

В рамках муниципального контракта ответчик обязался передать истцу жилые  помещения в построенном ответчиком малоэтажном многоквартирном жилом доме в  соответствии с условиями контракта, техническим заданием (Приложение № 1). Общая  площадь жилых помещений по условиям муниципального контракта определена в размере  780,94 кв.м., количество жилых помещений для расселения граждан - 16, площадь жилых  помещений для расселения, качественные, функциональные и технические требования,  предъявляемые к ним, определены в техническом задании (приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью муниципального контракта (пункты 1.1, 1.2).  

Стоимость работ по муниципальному контракту определена в размере 21 124 427 руб.  без НДС. Цена за 1 кв.м. рассчитана исходя из цены фактической площади каждого жилого  помещения, но не более максимальной площади, указанной в техническом задании и  составляет 27 050 руб.  

Пунктами 4.1, 4.4, 4.5 муниципального контракта предусмотрено, что передача жилых  помещений заказчику осуществляется застройщиком путем подписания акта приема- передачи, с даты подписания которого жилые помещения считаются сданными  застройщиком и принятыми заказчиком. Жилое помещение не соответствующее  требованиям, указанным в техническом задании (Приложение № 1) считается не переданным.  

Пунктом 5.2 муниципального контракта определено, что жилые помещения должны  соответствовать требованиям контракта, действующим строительным номам и правилам,  

требованиям технических регламентов, проектной документации, а также иным  обязательным требованиям.  

В соответствии с п. 8.1 муниципального контракта, гарантийный срок на жилые  помещения составляет 5 лет со дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи  жилых помещений. Все обнаруженные в течение этого срока недостатки, которые не могли  быть выявлены при осмотре жилых помещений на дату подписания акта приема-передачи,  должны быть устранены застройщиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.  Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения  дефектов.  

09.12.2013 между сторонами муниципального контракта подписан акт о приемке  законченного строительном объекта – 2-х этажного 16 квартирного жилого дома в 

<

...> Третьяковского района Алтайского края.  

10.12.2013 выдано разрешение на ввод вышеуказанного объекта в эксплуатацию. 

По акту от 21.01.2014 приема-передачи 2-х этажного 16 квартирного жилого дома в  

<

...> Третьяковского района Алтайского края  ответчик, применительно к условиям муниципального контракта (пункты 4.1, 4.4, 4.5),  передал истцу в собственность вышеуказанный объект.  

Из представленных в материалы дела платежных поручений (л.д. 22 – 28, том 1)  следует, что истец исполнил предусмотренную муниципальным контрактом обязанность по  оплате переданных ему ответчиком жилых помещений на сумму 21 124 427 руб.  

16.12.2015 истцом составлен комиссионный акт о выявленных недостатках результата  выполненных работ по муниципальному контракту № 2013.125489 от 29.07.2015, в котором  указано на наличие недостатков и дефектов выполненных ответчиком работ, обнаруженных  в периоде 2014 – 2015 г.г. в процессе эксплуатации жилых квартир и мест общего  пользования жилого дома, с учетом заявлений проживающих в этом доме граждан (л.д. 29,  том 1), в частности недостатков (дефектов) по жилым помещениям №№ 9, 11, 13, 15, 16,  подвалу, подъезду и прилегающей территории (нарушение уровня асфальтированного  покрытия площадки для парковки и подъезда к дому, отсутствие благоустройства  прилегающей к дому территории).  

Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российский Федерации (далее по тексту – ГК  РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не  допускается.  

Давая оценку отношениям сторон по муниципальному контракту, суд приходит к  выводу о том, что между сторонами в рамках этого контракта сложились отношения,  вытекающие, в частности, из договора подряда, регулируемые главой 37 ГК РФ.  

В силу п.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии с п.1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный  объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику  необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить  обусловленную цену.  

В соответствии с п.1 ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740),  проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения  государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного  или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или  муниципальных нужд.  

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не  урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных  или муниципальных нужд (ст. 768 ГК РФ).  

Пунктом 1 ст. 721 ГК РФ определено, что качество выполненной подрядчиком работы  должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте  условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.  Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат  выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными  в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах  разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если  такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата  работы такого рода.  

В силу п.1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с  отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными  недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре  использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности  для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или  договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения  недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены;  возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их  предусмотрено в договоре подряда (статья 397).  

Истец предъявил ответчику требование о безвозмездном устранении недостатков в  разумный срок.  

В соответствии с п.3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные  с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.  

Предусмотренный муниципальным контрактом (пункт 8.1) гарантийный срок  продолжительностью 5 лет не истек, поскольку, применительно к условиям муниципального  контракта, акт приема-передачи 2-х этажного 16 квартирного жилого дома в 

<

...> Третьяковского района Алтайского края подписан  21.01.2014, соответственно истечение гарантийного срока приходится на 21.01.2019  

В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

В соответствии с ч.2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Ответчик при рассмотрении дела заявил довод о том, что на момент подписания  вышеуказанного акта приема-передачи от 21.01.2014, истец как заказчик, не предъявлял  каких-либо замечаний по качеству выполненных работ. Кроме того ответчик представил в  материалы акты осмотра жилых помещений №№ 9, 11, 13, 15, 16 2-х этажного 16  квартирного жилого дома в 

<

...> Третьяковского  района Алтайского края от 13.03.2014, в которых также отсутствуют замечания со стороны  заказчика по указанным жилым помещениям.  

Между тем, в пунктах 12 и 13 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации № 51 от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения  споров по договору строительного подряда» разъяснено, что наличие акта приемки работ,  подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по  объему, стоимости и качеству работ.  

В силу п.5 ст. 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон  должна быть назначена экспертиза.  

Определением от 01.12.2016 суд назначил по делу судебную строительно-техническую  экспертизу, проведение которой поручил эксперту общества с ограниченной  ответственностью «Центр независимой профессиональной экспертизы «Алтай-Эксперт»  Сушкову Ю.В.  

Определением от 30.11.2017 суд назначил по делу дополнительную судебную  строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручил эксперту общества с  ограниченной ответственностью «Центр независимой профессиональной экспертизы  «Алтай-Эксперт» ФИО3  

Во исполнение указанных определений экспертной организацией в материалы дела  представлены заключения эксперта ФИО3 № 38С/17 от 24.04.2017 (по определению  от 01.12.2016) и № 670С/17 от 15.02.2018 (по определению от 30.11.2017).  

Согласно указанных выше заключений эксперта, при проведении по делу судебной  экспертизы установлено, что в квартирах и инженерном оборудовании жилого дома в 

<

...> Третьяковского района Алтайского края имеются  недостатки, указанные истцом в исковом заявлении, за исключением следующих  недостатков; «появились трещины в местах соединения перегородок и потолка в жилых  помещениях квартиры № 15»; батареи отопления с существующим количеством регистров в  квартирах № 9, № 11, № 15, № 16 не прогревают температуру в угловых квартирах до  соответствия санитарным нормам»; «в каждой квартире отсутствуют полотенцесушители».  

Согласно выводам эксперта по результатам проведенной по делу судебной  строительно-технической экспертизы, из всего перечня недостатков, выявленных на дату  проведения экспертного осмотра, недостатками, причиной возникновения которых является  ненадлежащее выполнение ответчиком строительно-монтажных работ названы:  «образовывается конденсат на стенах квартир, граничащих с подъездом, так как имеющиеся  радиаторы отопления на 1 этаже подъездов на входе не обогревают подъезд в требуемом  объеме»; «канализация первого подъезда требует устранений серьезных недоработок (прогиб  канализационных труб и соответственно расстыковка соединений провоцирует слив  жидкостных масс в подвал дома)»; «нарушена частичная герметичность крыши – после  дождя вода бежит с потолка квартиры № 15»; «в каждой квартире отсутствуют  водонагреватели».  

Также экспертом установлено, что на дату проведения экспертного осмотра  зафиксировано наличие всех недостатков, указанных в исковом заявлении, касающихся  состояния прилегающей территории жилого многоквартирного дома в 

<

...> Третьяковского района Алтайского края.  

В соответствии с поставленным на разрешение эксперта вопросом, последним  определены виды и объемы работ, которые необходимо выполнить для устранения  недостатков (дефектов) многоквартирного жилого дома в 

<

...> Третьяковского района Алтайского края. Данные виды и объемы работ  приведены экспертом в экспертном расчете видов работ и материалов, а также их объемов,  необходимых для устранения выявленных недостатков (дефектов) и приведения в  технически исправное состояние прилегающей территории многоквартирного жилого дома  в 

<

...> Третьяковского района Алтайского края, а  также в экспертном расчете видов работ и материалов, а также их объемов, необходимых для  возведения узлов входа в подъезды № 1 и № 2 согласно представленной проектной  документации многоквартирного жилого дома в 

<

...>  Третьяковского района Алтайского края (л.д. 120 – 130, том 2).  

Согласно п. 1 ст. 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за  допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в  обязательных для сторон строительных нормах и правилах.  

Истец по настоящему делу просит обязать ответчика выполнить работы по устранению  недостатков (дефектов) выполненных последним работ в многоквартирном жилом доме в  

селе Староалейское по ул. Строительная, 54 Третьяковского района Алтайского края в  соответствии с вышеуказанными экспертными расчетами.  

Ответчик при рассмотрении дела представленные в его материалы заключения эксперта  ФИО3 № 38С/17 от 24.04.2017 (по определению от 01.12.2016) и № 670С/17 от  15.02.2018 (по определению от 30.11.2017) способами, установленными законом, не оспорил  и не опроверг.  

Доводы ответчика о том, что он не получал от истца письменных претензий по поводу  обнаруженных недостатков выполненных работ, судом во внимание не принимаются,  поскольку как следует из представленного в материалы дела письма ответчика исх. № 142 от  15.08.2014, адресованного главному контролеру – ревизору Рубцовского территориального  отдела МТУ Росфиннадзора в Алтайском крае ФИО4 (л.д. 41, том 1), ответчику  было достоверно известно о невыполнении им объемов работ в части благоустройства  территории многоквартирного жилого дома в 

<

...>  Третьяковского района Алтайского края, при этом ответчик гарантировал завершение  соответствующих работ в срок до 05.09.2014.  

В соответствии с письмом истца № 334 от 21.10.2015 (л.д. 40, том 1) ответчику было  предъявлено требование об устранении недостатков работ на спорном объекте, в том числе  указанных в исковом заявлении.  

Таким образом, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ совокупность представленных  в материалы дела доказательств, суд приходит к выводу о том, что истцом доказана  законность и обоснованность уточненного требования об обязании ответчика устранить  недостатки выполненных работ, в связи с чем суд удовлетворяет это требование в полном  объеме.  

При этом, применительно к видам и объемам работ, которые ответчику необходимо  будет выполнить для устранения указанных истцом недостатков выполненных работ, суд  приходит к выводу о том, что разумным сроком устранения таких недостатков будет  являться срок в течение 60-ти календарных дней с даты вступления решения в законную  силу.  

Поскольку истец от уплаты государственной пошлины освобожден в силу закона,  государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь ст. 49, ст.ст. 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса  РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дедал» в  срок в течение 60 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу  безвозмездно выполнить следующие виды работ, необходимые для устранения недостатков  (дефектов) многоквартирного жилого дома и прилегающей территории по ул.Строительная,  54 с.Староалейское Алтайского края, а именно:  

1) Устранить образование конденсата на стенах квартир, граничащих с подъездом:  

- выполнить узлы входа в подъезды № 1 и № 2 согласно следующему перечню видов работ,  материалов и их объемов:  

 № п/п 

Наименование работ и затрат 

Ед.изме рения 

Кол-во на вход № 1 

Кол-во на  вход № 2  

Кол-во  общее  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Земляные работы 

1 

Произвести разработку грунта при  подводе, смене или усилении фундаментов,  грунты: 1-2 группы, без крепления, в том  числе  

1. осуществить разработку грунта вручную  2. осуществить обратную засыпку грунта  

куб.м. грунта 

14 

14 

28 

2 

Произвести устройство ленточного  бетонного фундамента, в том числе  

1. осуществить раскрой и установку досок  2. осуществить установку щитов опалубки  

3. осуществить крепление элементов  опалубки проволокой и гвоздями  строительными  

4. осуществить установку арматуры  5. осуществить укладку бетонной смеси  

куб.м.  

бетона, 

бутобетон а и  

железобет она в деле  

1,8 

1,8 

3,6 

Использовать для этого: 

1. проволоку горячекатаную в мотках,  диаметром 6,3-6,5 мм  

т 

0,0005 

0,0005 

0,001  

2. рогожу 

кв.м. 

1,588 

1,588 

3,176  

3. гвозди строительные 

т 

0,0003 

0,0003 

0,0006  

4. доски обрезные хвойных пород длиной  4-6,5 м, длиной 75-150 мм, толщиной 44 мм  и более, 3 сорта  

куб.м. 

0,004 

0,004 

0,008  

5. щиты из досок толщиной 25 мм  

кв.м. 

0,8064 

0,8064 

1,6128  

6. бетон тяжелый, крупность заполнения  более 40 мм, класс В 7,5 (М 100)  

куб.м. 

1,836 

1,836 

3,672  

7. известь строительную негашеную  комовую, сорт 1  

т 

0,0005 

0,0005 

0,001  

8. воду 

куб.м. 

0,0051 

0,0051 

0,0102  

3 

Осуществить установку блоков стен  подвалов массой до 0,5 т, в том числе  

1. заполнение бетоном вертикальных  каналов  

2. промазка раствором вертикальных и  горизонтальных швов  

шт. сборных 

конструкц ий  

11 

11 

22 

Использовать для этого: 

1. бетон тяжелый, крупность заполнителя  10 мм, класс В 12,5 (М150)  

куб.м. 

0,0451 

0,0451 

0,0902  

2. раствор готовый кладочный цементный  марки 100  

куб.м. 

0,132 

0,132 

0,264  

3. конструкции сборные железобетонные 

шт. 

11 

11 

22 

4. блоки бетонные стен подвалов сплошные  (ГОСТ 13579-78): ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5  (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры  0,76 кг/  

шт. 

11 

11 

22 

4 

Произвести гидроизоляцию стен,  фундаментов: горизонтальную оклеечную  в 2 слоя, в том числе  

1. осуществить выравнивание изолируемой  поверхности раствором  

2. осуществить наклейку рулонных  материалов с разогреванием мастики  

кв.м.  

изолируем ой  

поверхнос ти  

1,8 

1,8 

3,6 

Использовать для этого: 

1. битумы нефтяные строительные марки  БН-90/10  

т 

0,0003 

0,0003 

0,0006  

2. керосин для технических целей марок  КТ-1, КТ-2.  

т 

0,0004 

0,0004 

0,0008  

3. мастику битумную кровельную горячую  

т 

0,0076 

0,0076 

0,0152  

4. толь с крупнозернистой посыпкой  гидроизоляционной марки ТГ-350  

кв.м. 

3,96 

3,96 

7,92 

5. раствор готовый кладочный цементный  марки 25  

куб.м. 

0,045 

0,045 

0,09 

6. рубероид морозостойкий РПМ-300  

кв.м. 

3,96 

3,96 

7,92 

5 

Произвести устройство основания под  фундамент гравийный, в том числе  

1. осуществить выравнивание и  трамбование основания  

куб.м. 

основания  

2,34 

2,34 

4,68 

Использовать для этого: 

1. гравий для строительных работ марки  Др.16, фракция 20-40 мм  

куб.м. 

2,995 

2,995 

5,99 

2. воду 

куб.м. 

0,351 

0,351 

0,702  

3. смесь песчано-гравийную природную  

куб.м. 

3 

3 

6 

6 

Произвести устройство фундаментных  плит железобетонных плоских, в том числе  1. осуществить раскрой и установку досок  

2. осуществить установку щитов опалубки  

3. осуществить крепление элементов  опалубки проволокой и гвоздями  строительными  

4. осуществить установку арматуры  5. осуществить укладку бетонной смеси  

куб.м.  

бетона, 

бутобетон а и  

железобет она в деле  

1,57 

1,57 

3,14 

Использовать для этого: 

1. проволоку горячекатаную в мотках,  диаметром 6,3-6,5 мм  

т 

0,0002 

0,0002 

0,0004  

2. электроды диаметром: 4 мм Э42  

т 

0,0001 

0,0001 

0,0002  

3. рогожку 

кв.м. 

0,471 

0,471 

0,942  

4. гвозди строительные 

т 

5. доски обрезные хвойных пород длиной:  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44  мм и более, III сорта  

куб.м. 

0,0006 

0,0006 

0,0012  

6. щиты из досок толщиной 40 мм  

кв.м. 

0,0565 

0,0565 

0,113  

7. горячекатаную арматурную сталь  гладкую класса А-I, диаметром: 6 мм  

т 

0,1272 

0,1272 

0,2544  

8. бетон тяжелый, крупность заполнителя:  20 мм, класс В15 (М200)  

куб.м. 

1,594 

1,594 

3,188  

9. известь строительная: негашеная  комовая, сорт I  

т 

0,0002 

0,0002 

0,0004  

10. воду 

куб.м. 

0,0115 

0,0115 

0,023  

11. бетон тяжелый, крупность заполнителя  20 мм, класс В12,5 (М150)  

куб.м. 

1,6 

1,6 

3,2 

12. Горячекатаную арматурную сталь  гладкую класса А-I, диаметром: 6 мм  

т 

0,03185 

0,03185 

0,0637  

7 

Произвести установку закладных деталей  весом до 4 кг, в том числе  

1. осуществить вырезку и заделку  отверстий в опалубке (при необходимости),  установку и закрепление закладных  деталей  

т 

0.0247 

0,0247 

0,0494  

Использовать для этого:  

1. детали закладные и накладные  изготовленные: с применением сварки,  гнутья, сверления (пробивки) отверстий  (при наличии одной из этих операций или  всею перечня в любых сочетаниях)  поставляемые отдельно  

т 

0.0247 

0,0247 

0,0494  

Стены 

8 

Произвести кладку стен кирпичных  наружных простых при высоте этажа до 4  

куб.м. кладки 

0,4 

0,4 

0,4 

м, в том числе  

1. осуществить кладку конструкций из  кирпича  

2. осуществить устройство ниш для  отопления, вентиляционных и дымовых  каналов с разделками борозд, осадочных и  температурных швов, архитектурных и  конструктивных деталей.  

3. осуществить расшивку швов кладки  наружных стен.  

Использовать для этого: 

1. бруски обрезные хвойных пород длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм, IV сорта  

куб.м. 

0,0002 

0,0002 

0,0004  

2. раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 25  

куб.м. 

0,096 

0,096 

0,192 

3. кирпич керамический одинарный,  размером 250х120х65 мм, марки 100  

шт. 

157,6 

157,6 

315,2 

4. воду 

куб.м. 

0,176 

0,176 

0,352 

5. раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 50  

куб.м. 

0,096 

0,096 

0,192 

9 

Произвести кладку стен кирпичных  наружных простых при высоте этажа до 4  м, в том числе  

1. осуществить кладку конструкций из  кирпича  

2. осуществить устройство ниш для  отопления, вентиляционных и дымовых  каналов с разделками борозд, осадочных и  температурных швов, архитектурных и  конструктивных деталей.  

3. осуществить расшивку швов кладки  наружных стен.  

куб.м. кладки 

2,6 

2,6 

5,2 

Использовать для этого: 

1. бруски обрезные хвойных пород длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм, IV сорта  

куб.м. 

0,0013 

0,0013 

0,0026  

2. раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 25  

куб.м. 

0,624 

0,624 

1,248 

3. кирпич керамический одинарный,  размером 250х120х65 мм, марки 100  

шт. 

1024 

1024 

2048 

4. воду 

куб.м. 

1,144 

1,144 

2,288 

5. раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 50  

куб.м. 

0,5616 

0,5616 

1,1232  

6. Кирпич силикатный полнотелый  утолщенный, размером 250х120х88 мм,  марка: 100  

шт. 

789 

789 

1578 

10 

Произвести укладку перемычек массой до  0,3 т, в том числе  

1. осуществить установку сборных  конструкций  

2. осуществить сварку закладных изделий 

3. осуществить заполнение швов раствором  

шт. сборных конструкций 

4 

4 

8 

Использовать для этого: 

1. раствор готовый кладочный цементный  марки 100  

куб.м. 

0,01 

0,01 

0,02 

2. конструкции сборные железобетонные  

шт. 

4 

4 

8 

3. перемычку брусковую: 8ПБ10-1 /бетон  В15 (М200), объем 0,011 м3, расход  арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)  

шт. 

2 

2 

4 

4. перемычку брусковую: 8ПБ16-1 /бетон  В15 (М200), объем 0,017 м3, расход  арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)  

шт. 

2 

2 

4 

Металлокаркас 

11 

Произвести установку закладных деталей  весом до 4 кг, в том числе  

1. осуществить вырезку и заделку  отверстий в опалубке (при необходимости),  установку и закрепление закладных  деталей.  

 т 

0,00336  

0,00336  

0,0067 2  

Использовать для этого:  

1. детали закладные и накладные  изготовленные: с применением сварки,  гнутья, сверления (пробивки) отверстий  (при наличии одной из этих операций или  всею перечня в любых сочетаниях)  поставляемые отдельно  

т 

0,0034 

0,0034 

0,0068  

12 

Произвести монтаж колонн одноэтажных и  многоэтажных зданий и крановых эстакад  высотой до 25 м цельного сечения массой  до 1,0 т, в том числе  

1. осуществить установку и крепление  стальных колонн.  

2. осуществить устройство подмостей.  

3. осуществить антикоррозийное покрытие  сварных швов.  

т 

конструкц ий  

0,06538  

0,06538  

0,1307 6  

Использовать для этого: 

1. кислород технический газообразный  

куб.м. 

0,0458 

0,0458 

0,0916  

2. швеллеры № 40 из стали марки: Ст0  

т 

0,0001 

0,0001 

0,0002  

3. пропан-бутан, смесь техническая  

кг 

0,0137 

0,0137 

0,0274  

4. бруски обрезные хвойных пород длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм, I сорта  

куб.м. 

0,0001 

0,0001 

0,0002  

5. канат двойной свивки типа ТК,  конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.,  оцинкованный из проволок марки В,  маркировочная группа: 1770 н/мм2,  диаметром 5,5 мм  

м 

0,012 

0,012 

0,024  

6. конструкции стальные 

т 

0,06538  

0,06538  

0,1307 6  

7. отдельные конструктивные элементы  зданий и сооружений с преобладанием:  горячекатаных профилей, средняя масса  сборочной единицы до 0,1 т  

т 

0,06538  

0,06538  

0,1307 6  

13 

Произвести монтаж балок, ригелей  перекрытия, покрытия и под установку  оборудования многоэтажных зданий при  высоте здания до 25 м, в том числе  

1. осуществить установку и крепление  стальных колонн.  

2. осуществить устройство подмостей.  

3. осуществить антикоррозийное покрытие  

т 

конструкц ий  

0,342 

0,342 

0,684  

сварных швов. 

Использовать для этого: 

1. кислород технический газообразный  

куб.м. 

0,6669 

0,6669 

1,3338  

2. швеллеры № 40 из стали марки: Ст0  

т 

0,0007 

0,0007 

0,0014  

3. электроды диаметром 4 мм Э42  

т 

0,0011 

0,0011 

0,0022  

4. болты с гайками и шайбами  строительные  

т 

0,0011 

0,0011 

0,0022  

5. пропан-бутан, смесь техническая 

кг 

0,2018 

0,2018 

0,4036  

6. растворитель марки Р-4 

т 

0,0002 

0,0002 

0,0004  

7. бруски обрезные хвойных пород длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм, I сорта  

куб.м. 

0,0004 

0,0004 

0,0008  

8. грунтовку ГФ-021 красно-коричневую  

т 

0,0001 

0,0001 

0,0002  

9. отдельные конструктивные элементы  зданий и сооружений с преобладанием  горячекатаных профилей, средняя масса  сборочной единицы до 0,1 т  

т 

0,0002 

0,0002 

0,0004  

10. канат двойной свивки типа ТК,  конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.,  оцинкованный из проволок марки В,  маркировочная группа: 1770 н/мм2,  диаметром 5,5 мм  

м 

0,064 

0,064 

0,128  

11. конструкции стальные 

т 

0,342 

0,342 

0,684  

12. отдельные конструктивные элементы  зданий и сооружений с преобладанием  горячекатаных профилей, средняя масса  сборочной единицы до 0,1 т  

т 

0,342 

0,342 

0,684  

14 

Произвести огрунтовку металлических  поверхностей за один раз грунтовкой ГФ- 

021, в том числе 

1. осуществить подготовку окрасочных  агрегатов.  

2. осуществить приготовление  грунтовочных составов.  

3. осуществить нанесение грунта.  

4. осуществить промывку, очистку  окрасочных агрегатов и шлангов.  

5. осуществить контроль качества.  

м2  окрашивае 

мой 

поверхнос 

ти  

20 

20 

40 

Использовать для этого: 

1. Грунтовку ГФ-021 красно-коричневая  

т 

0,0024 

0,0024 

0,0048  

2. ксилол нефтяной марки А 

т 

0,0004 

0,0004 

0,0008  

15 

Произвести окраску металлических  огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 

115 (на 2 раза) 

(ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2), в том числе  

1. осуществить подготовку окрасочных  агрегатов.  

2. осуществить приготовление состава.  

3. осуществить нанесение окрасочного  состава.  

4. осуществить промывку, очистку  окрасочных агрегатов и шлангов.  

5. осуществить онтроль качества.  

м2  окрашивае 

мой 

поверхнос 

ти  

20 

20 

40 

Использовать для этого: 1. уайт-спирт 

т 

0,0006 

0,0006 

0,0012  

2. эмаль ПФ-115 серия 

т 

0,0076 

0,0076 

0,0152  

Кровля 

16 

Произвести установка стропил, в том числе  1. осуществить изготовление элементов  стропил из досок и брусьев.  

2. осуществить контрольную сборку  стропил на бойке.  

3. осуществить укладку мауэрлатов с  антисептированием пастами и  обертыванием толем.  

4. осуществить установку стропил с  креплением.  

м3 древеси  ны в  конструкц 

ии 

0,062 

0,062 

0,124  

Использовать для этого: 

1. поковки из квадратных заготовок, масса  1,8 кг  

т 

0,0024 

0,0024 

0,0048  

2. проволоку горячекатаную в мотках,  диаметром 6,3-6,5 мм  

т 

0,0003 

0,0003 

0,0006  

3. толь с крупнозернистой посыпкой  гидроизоляционный марки ТГ-350  

кв.м. 

0,2096 

0,2096 

0,4192  

4. гвозди строительные 

т 

0,0004 

0,0004 

0,0008  

5. бруски обрезные хвойных пород длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм, II сорта  

куб.м. 

0,0099 

0,0099 

0,0198  

6. бруски обрезные хвойных пород длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной  100,125 мм, II сорта  

куб.м. 

0,0037 

0,0037 

0,0074  

7. доски обрезные хвойных пород длиной:  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44  мм и более, I сорта  

куб.м. 

0,0515 

0,0515 

0,103  

8. пасту антисептическую 

т 

0,0001 

0,0001 

0,0002  

17 

Произвести устройство обрешетки с  прозорами из досок и брусков под кровлю:  из листовой стали  

кв.м. 

22,8 

22,8 

45,6 

Использовать для этого: 1. гвозди строительные 

т 

0,0014 

0,0014 

0,0028  

2. доски необрезные хвойных пород  длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32- 40 мм, III сорта  

куб.м. 

0,4104 

0,4104 

0,8208  

18 

Произвести огнебиозащитное покрытие  деревянных конструкций составом  "Пирилакс" любой модификации при  помощи аэрозольно-капельного  распыления для обеспечивания: первой  группы огнезащитной эффективности по  НПБ 251, в том числе  

1. осуществить подготовку поверхности. 

2. осуществить заполнение аппарата  составом.  

3. осуществить нанесение состава на  подготовленную поверхность при помощи  аппарата-распылителя.  

4. осуществить визуальную оценку  качества огнезащитного покрытия.  

м2  

обрабатыв аемой  

поверхнос ти  

35 

35 

70 

Использовать для этого: 1. ветошь 

кг 

0,35 

0,35 

0,7 

2. воду 

куб.м. 

0,0035 

0,0035 

0,007  

3. антисептик-антипирен 

кг 

11,27 

11,27 

22,54  

4. антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС»  для древесины  

кг 

11,27 

11,27 

22,54  

19 

Произвести монтаж кровли из  профилированного листа для объектов  непроизводственного назначения простой  

кв.м. 

22,8 

22,8 

45,6 

Использовать для этого:  

1. винты самонарезающие для крепления  профилированного настила и панелей к  несущим конструкциям  

т 

0,0003 

0,0003 

0,0006  

2. заклепки комбинированные для  соединения профилированного стального  настила и разнообразных листовых деталей  

т 

0,0001 

0,0001 

0,0002  

3. профилированный настил окрашенный:  С10-1000-0,6  

т 

0,152395 

0,152395 

0,3047 9  

4. дополнительные элементы  металлочерепичной кровли: коньковый  элемент, разжелобки, профили с  покрытием  

кв.м. 

1,2 

1,2 

2,4 

5. дополнительные элементы  металлочерепичной кровли: планка для  карниза длиной 2000 мм  

шт. 

4 

4 

8 

5. дополнительные элементы  металлочерепичной кровли: планка для  стыков швов длиной 2000 мм  

шт. 

2 

2 

4 

Внутренняя отделка 

20 

Произвести устройство подвесных  потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)  по системе "КНАУФ": одноуровневых (П  113), в том числе  

1. осуществить разметку проектного  положения металлического каркаса.  

2. осуществить наклейку уплотнительной  ленты на направляющие профили.  

3. осуществить установку и крепление  дюбелями направляющих профилей.  

4. осуществить установку подвесов с  зажимами и тягами.  

5. осуществить установку основных и  несущих профилей.  

6. осуществить соединение профилей  между собой одноуровневыми  соединителями.  

7. осуществить наклейку разделительной  ленты в местах сопряжения с  поверхностью стен и перегородок.  

8. осуществить обшивку каркаса  гипсокартонными листами с креплением их  самонарезающими винтами.  

9. осуществить заделку продольных швов  шпаклевкой с применением армирующей  ленты, поперечных швов и углублений от  винтов - без ленты.  

10. осуществить грунтование поверхности.  

кв.м. потолка 

6,08 

6,08 

12,16  

Использовать для этого: 

1. грунтовку Тифенгрунд, КНАУФ  

кг 

0,608 

0,608 

1,216  

2. шпаклевку "Унифлот", КНАУФ  

кг 

0,2432 

0,2432 

0,4864  

3. шпаклевку "Фугенфюллер", КНАУФ  

кг 

2,554 

2,554 

5,108  

4. ленту бумажную для повышения  трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ  

м 

4,134 

4,134 

8,268  

5. ленту разделительную для сопряжения  потолка из ЛГК со стеной  

м 

8,208 

8,208 

16,416  

6. листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм  

кв.м. 

6,749 

6,749 

13,498  

7. шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм  

шт. 

23 

23 

46 

7. шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм  

шт. 

135 

135 

270 

8. дюбель-гвоздь 6/39 мм 

шт. 

5 

5 

10 

9. дюбель с шурупом 6/35 мм 

шт. 

20 

20 

40 

10. ленту эластичную самоклеящуюся для  профилей направляющих "Дихтунгсбанд":  30/30000 мм  

м 

8,208 

8,208 

16,416  

11. профиль направляющий ПН 28/27/0,6 

м 

8,269 

8,269 

16,538  

12. профиль потолочный ПП 60/27/0,6  

м 

18,6 

18,6 

37,2 

13. подвес с зажимом для ПП-профиля  60*27 мм  

шт. 

5 

5 

10 

14. соединители профилей: одноуровневые  ПП  

шт. 

12 

12 

24 

15. ПП- удлинитель профилей 60*27 

шт. 

5 

5 

10 

16. тяга подвесов 

шт. 

5 

5 

10 

17. тяга подвеса : 350 мм 

шт. 

5 

5 

10 

18. профнастил оцинкованный с  покрытием: полиэстер С8-1150-0,5  

кв.м. 

6,688 

6,688 

13,376  

21 

Произвести штукатурку внутренних  поверхностей наружных стен, цементно- 

известковым или цементным раствором по  камню и бетону, когда остальные  поверхности не оштукатуриваются:  улучшенная, в том числе  

1. осуществить набивку полос штукатурной  сетки в местах примыканий.  

2. осуществить нанесение раствора на  поверхности с разравниванием и затиркой  накрывочного слоя.  

3. осуществить оштукатуривание откосов  ниш отопления.  

4. осуществить обмазку раствором  коробок, наличников и плинтусов.  

м2  

оштукатур иваемой  

поверхнос ти  

22,5 

22,5 

45 

Использовать для этого: 

1. гвозди строительные с плоской  головкой: 1,6х50 мм  

т 

0 

1. сетку тканую с квадратными ячейками   № 05 без покрытия  

кв.м. 

1,247 

1,247 

2,494  

2. доски обрезные хвойных пород длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25  мм, IV сорта  

куб.м. 

0,0135 

0,135 

0,027  

3. раствор готовый отделочный тяжелый  цементно-известковый 1:1:6  

куб.м. 

0,4208 

0,4208 

0,8416  

4. гипсовые вяжущие, марки Г3 

т 

0,0014 

0,0014 

0,0028  

22 

Произвести окраску поливинилацетатными  водоэмульсионными составами  улучшенную: по штукатурке стен, в том  числе  

1. осуществить очистку 

2. осуществить сглаживание торцом дерева  

кв.м. 

окрашивае мой  

поверхнос ти  

22,5 

22,5 

45 

3. осуществить расшивку трещин  

4. осуществить проолифку 

5. осуществить частичную подмазку с  проолифкой подмазанных мест  

6. осуществить шлифовку подмазанных  мест  

7. осуществить первую сплошную  шпатлевку  

8. осуществить шлифовку 9. осуществить огрунтовку 

10. осуществить флейцевание  11. осуществить шлифовку  

12. осуществить первую окраску  13. осуществить флейцевание  

14. осуществить шлифовку 

15. осуществить вторую окраску  

16. осуществить флейцевание или  торцевание  

17. осуществить вытягивание филенок  

Использовать для этого: 

1. шкурку шлифовальную двухслойную с  зернистостью 40-25  

кв.м. 

1,89 

1,89 

3,78 

2. шпатлевку клеевую 

т 

0,0115 

0,0115 

0,023  

3. ветошь 

кг 

0,0698 

0,0698 

0,1396  

4. краску водоэмульсионную ВЭАК-1180  

т 

0,0142 

0,0142 

0,0284  

Полы 

23 

Произвести устройство покрытий  бетонных толщиной 30 мм, в том числе:  

1. осуществить подготовку оснований.  2. осуществить устройство покрытий.  3. осуществить уход за покрытиями.  

кв.м. 

покрытия  

6,08 

6,08 

12,16  

Использовать для этого:  1. бетон тяжелый, крупность заполнителя  

40 мм, класс В15 (М200)  

куб.м. 

0,186 

0,186 

0,372  

2. воду 

куб.м. 

0,2128 

0,2128 

0,4256  

24 

Произвести устройство покрытий: на  каждые 5 мм изменения толщины  покрытия добавлять или исключать к  расценке 11-01-015-01  

(ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2), в том числе  

1. осуществить устройство покрытий.  

кв.м. 

покрытия  

6,08 

6,08 

12,16  

Использовать для этого:  1. бетон тяжелый, крупность заполнителя  

40 мм, класс В15 (М200)  

куб.м. 

0,062 

0,062 

0,124  

25 

Произвести шлифовку бетонных или  металлоцементных покрытий, в том числе  

1. осуществить шлифовку покрытий.  

кв.м. 

покрытия  

6,08 

6,08 

12,16  

Использовать для этого: 1. карборунд 

кг 

0,1216 

0,1216 

0,2432  

2. воду 

куб.м. 

0,1216 

0,1216 

0,2432  

Проемы 

26 

Произвести Установка в жилых и  общественных зданиях оконных блоков из  ПВХ профилей: глухих с площадью проема  до 2 м2, в том числе  

кв.м. проемов 

0,396 

0,396 

0,792  

1. осуществить подготовку рамы к  предварительной установке в проем.  

2. осуществить установку рамы на  технологические клинья в проем и  выставление в горизонтальной плоскости.  

3. осуществить устройство на раме отметок  для сверления отверстий под дюбель.  

4. осуществить извлечение рамы.  

5. осуществить сверление отверстий под  дюбеля (снаружи внутрь рамы).  

6. осуществить установку рамы в проем с  выставлением по уровню в горизонтальной  и вертикальной плоскостях и закреплением  в проеме клиньями.  

7. осуществить сверление стены под  дюбеля по имеющимся отверстиям.  

8. осуществить установку дюбелей.  

9. осуществить заполнение зазора между  рамой и стеной монтажной пеной.  

10. осуществить установку стеклопакетов.  

11. осуществить устройство наружного  водоизоляционного паропроницаемого  слоя.  

12. осуществить устройство внутреннего  пароизоляционного слоя.  

13. осуществить установку фурнитуры. 

Использовать для этого: 1. ленту бутиловую 

м 

1,374 

1,374 

2,748  

2. ленту бутиловую ПСУЛ 

м 

0,8474 

0,8474 

1,6948  

3. ленту бутиловую диффузионную  

м 

0,2812 

0,2812 

0,5624  

4. герметик пенополиуретановый (пена  монтажная) типа Makrofleks, Soudal в  баллонах по 750 мл  

шт. 

1 

1 

2 

5. дюбели монтажные 10х130 (10х132,  10х150)мм  

шт. 

2 

2 

4 

6. клинья пластиковые монтажные  

шт. 

4 

4 

8 

7. блоки оконные из поливинилхлоридных  профилей с листовым стеклом и  стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9,  площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)  

кв.м. 

0,396 

0,396 

0,792  

8. блок оконный пластиковый: глухой,  одностворчатый с двухкамерным  стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5  м2  

кв.м. 

0,396 

0,396 

0,792  

27 

Произвести установку металлических  дверных блоков в готовые проемы  

кв.м. проема 

2,73 

2,73 

5,46 

Использовать для этого: 

1. электроды диаметром 4 мм Э42  

т 

0,0003 

0,0003 

0,0006  

2. пену монтажную для герметизации  стыков в баллончике емкостью 0,85 л  

шт. 

1 

1 

2 

3. детали закладные и накладные  изготовленные без применения сварки,  гнутья, сверления (пробивки) отверстий  поставляемые отдельно  

т 

0,0082 

0,0082 

0,0164  

4. блоки дверные металлические  

кв.м. 

2,73 

2,73 

5,46 

5. блок дверной стальной наружный  

кв.м. 

2,73 

2,73 

5,46 

двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2  (ГОСТ 31173-2003)  

6. скобяные изделия для блоков входных  дверей в здание двупольных  

компл. 

1 

1 

2 

28 

Произвести установку дверного доводчика  к металлическим дверям  

1 шт. 

1 

1 

2 

Использовать для этого: 

1. электроды диаметром 4 мм Э42  

т 

0,0001 

0,0001 

0,0002 

2. винты самонарезающие с  уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм  

шт. 

6 

6 

12 

3. Доводчик дверной гидравлический TS-68  с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)  

шт. 

1 

1 

2 

2) Устранить дефекты трубопроводов канализации: 

- выполнить ремонт существующих креплений трубопроводов канализации в подвальном  помещении дома в количестве 42 шт.;  

- установить дополнительные элементы крепления трубопроводов канализации в подвальном  помещении дома – 46 шт.  

3) Восстановить герметичность крыши в местах примыкания кровли к вентиляционным  шахтам:  

- осуществить демонтаж узлов примыкания кровли к вентиляционной шахте в осях «9/В-Г»  4,4 м.п.;  

- осуществить демонтаж кирпичной кладки вентиляционных каналов до уровня кровли  «9/ВГ» 0,9 куб.м.;  

- выполнить кирпичную кладку вентиляционного канала в соответствии с проектной  документацией «9/ВГ» 0,92 куб.м.;  

- осуществить устройство узлов примыкания кровли к вентиляционным шахтам в осях  «9/ВГ» 4,4 м.п.  

4) Установить в ванных комнатах квартир электрические накопительные водонагреватели  N=1,5квт марки TERMEX IF 50V в количестве 16 шт.  

5) Устранить выявленные недостатки и привести в технически исправное состояние  прилегающую территорию многоквартирного жилого дома по ул.Строительная, 54 в  следующих объемах работ:  

 №  п/п  

Наименование работ и затрат  

Единица  измерения  

Кол-во  общее  

Разборка существующих покрытий 

1 

Произвести снятие асфальтобетонных покрытий самоходными  холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной  

слоя: до 50 мм 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить очистку поверхности покрытия щетками навесными  

дорожными на тракторе. 2. осуществить фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 

3. осуществить зачистку отшлифованного покрытия от а/б лома,  образующегося при ручной разборке вокруг люков.  

 м2 

покрытия  

598 

2 

Произвести разборку асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить разборку покрытия.  

2. осуществить сгребание материала, полученного от разборки.  

 м2 

93,5 

3 

Произвести разборку отмостки цементно-бетонной (прим.) 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить разборку покрытия и основания.  

2. осуществить сгребание материала, полученного от разборки.  

 м3 

конструкц ий  

6,5 

Асфальтобетонное покрытие отмостки 

4 

Произвести уплотнение грунта щебнем  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1. осуществить планировку основания.  2. осуществить поливку грунта водой.  

3. осуществить раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт. 

 м2 

площади  уплотнени я  

130 

4.1  

Использовать для этого: 1. щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм 

м3 

6,63 

2. воду 

м3 

0,286 

5 

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить планировку и прикатку земляного полотна с поливом  

водой. 

2. осуществить россыпь и разравнивание материалов.  3. осуществить уплотнение россыпей с поливкой водой.  

м3  

материала  основания  (в плотном  

теле) 

15,6 

5.1  

Использовать для этого: 1. воду 

м3 

1,092 

2. смесь песчано-гравийную природную 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

м3 

18,72 

6 

Произвести розлив вяжущих материалов 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить розлив вяжущих материалов.  

 т 

0,065 

6.1  

Использовать для этого: 1. битумы нефтяные дорожные жидкие, класс  МГ, СГ  

т 

0,067 

7 

Произвести устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и  

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной  смеси толщиной 3 см  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить очистку основания.  

2. осуществить смазку вяжущими разжиженными материалами стыков  и мест примыканий.  

3. осуществить укладку асфальтобетонной смеси с разравниванием и  уплотнением.  

4. осуществить засыпку песком. 5. осуществить уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 

6. осуществить укатку асфальтобетонной смеси катками.  

 м2 

покрытия  

130 

7.1  

Использовать для этого: 1 битумы нефтяные дорожные жидкие, класс  МГ, СГ  

т 

0,078 

2. песок природный для строительных работ средний  

м3 

0,65 

3. асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон  (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и  

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

т 

9,282 

Асфальтобетонное покрытие тротуара 

8 

Произвести уплотнение грунта щебнем  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1. осуществить планировку основания.  2. осуществить поливку грунта водой.  

3. осуществить раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия  или щебня в грунт.  

м2 

площади  уплотнени я  

31 

8.1 

Использовать для этого: 1. щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм 

м3 

1,581 

2. воду 

м3 

0,0682 

9 

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить планировку и прикатку земляного полотна с поливом  

водой. 

2. осуществить россыпь и разравнивание материалов.  3. осуществить уплотнение россыпей с поливкой водой.  

м3  

материала  основания  (в плотном  

теле) 

3,72 

9.1 

Использовать для этого: 1. воду 

м3 

0,2604 

2. смесь песчано-гравийную природную 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

м3 

4,464 

10 

Произвести розлив вяжущих материалов 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить розлив вяжущих материалов.  

 т 

0,0155 

10.1  

Использовать для этого: 1. битумы нефтяные дорожные жидкие, класс  МГ, СГ  

т 

0,016 

11 

Приоизвести устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и  

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной  смеси толщиной 3 см  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить очистку основания.  

2. осуществить змазку вяжущими разжиженными материалами стыков  и мест примыканий.  

3. осуществить зкладку асфальтобетонной смеси с разравниванием и  уплотнением.  

4. осуществить засыпку песком. 5. осуществить уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 

6. осуществить укатку асфальтобетонной смеси катками.  

м2 

покрытия  

31 

11.1  

Использовать для этого: 1. битумы нефтяные дорожные жидкие, класс  МГ, СГ  

т 

0,0186 

2. песок природный для строительных работ средний  

м3 

0,155 

3. асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон  (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и  

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

т 

2,2134 

12 

Произвести установку бортовых камней бетонных при других видах  покрытий  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить устройство бетонного основания с уплотнением,  установкой и снятием опалубки.  

2. осуществить установку бортовых камней с подтеской, заливкой  швов и их расшивкой.  

3. осуществить очистку гранитных бортов. 

м 

бортового  камня  

30 

12.1  

Использовать для этого: 1. гвозди строительные  

т 

0,0003 

2. брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины,  толщиной 100, 125 мм, IV сорта  

м3 

0,051 

3. бетон тяжелый, класс В15 (М200) 

м3 

1,77 

4. раствор готовый кладочный цементный марки 100  

м3 

0,018 

5. камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/  (ГОСТ 6665-91)  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

30 

Асфальтобетонное покрытие проезда 

13 

Произвестьи планировку площадей бульдозерами мощностью 132 кВт  (180 л.с.)  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить предварительную (грубую) планировку площадей со  

срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин.  

м2  

спланиров анной  

поверхнос ти за 1  

проход 

бульдозера  

844,7 

14 

Произвести разработку грунта с перемещением до 10 м бульдозерами  мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить разработку грунта с перемещением.  

м3 грунта  

441 

15 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к  расценке 01-01-031-02  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15;  ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)  

1. Разработка грунта с перемещением. 

м3 грунта  

441 

15.1  

Использовать для этого: 1. грунт песчаный, супесчаный  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

м3 

441 

16 

Произвести уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа  грунтов 1-2  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить уплотнение грунта.  

м3 

уплотненн ого грунта  

441 

17 

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить ланировку и прикатку земляного полотна с поливом  

водой. 

2. осуществить россыпь и разравнивание материалов.  3. осуществить уплотнение россыпей с поливкой водой.  

м3  

материала  основания  (в плотном  

теле) 

84,47 

17.1  

Использовать для этого: 1. воду 

м3 

4,224 

2. песок природный для строительных работ средний  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

м3 

97,1405  

18 

Произвести устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с  пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до  1000 кгc/см2) верхнего слоя двухслойных  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить россыпь и разравнивание щебня.  

2. осуществить профилирование и планировку щебня.  3. осуществить укатку щебня с поливкой водой.  

4. осуществить уход за покрытием. 

м2 

покрытия  

844,7 

18.1  

Использовать для этого: 1. щебень из природного камня для 

строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм  

м3 

8,447 

2. щебень из природного камня для строительных работ марка 800,  фракция 10-20 мм  

м3 

12,67 

3. щебень из природного камня для строительных работ марка 800,  фракция 40-70 мм  

м3 

159,6 

19 

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к  

расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15;  ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)  

1. Россыпь и разравнивание щебня. 2. Профилирование и планировка щебня. 3. Укатка щебня с поливкой водой. 4. Уход за покрытием. 

м2 

покрытия  

844,7 

19.1  

Использовать щебень из природного камня для строительных работ  марка 800, фракция 40-70 мм  

м3 

31,93 

20 

Произвести розлив вяжущих материалов 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить оозлив вяжущих материалов.  

1 т 

0,42235  

20.1  

Использовать для этого: 1. битумы нефтяные дорожные жидкие, класс  МГ, СГ  

т 

0,435 

21 

Произвести устройство покрытия толщиной 4 см из горячих  

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,  плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить очистку основания.  

2. осуществить укладку асфальтобетонной смеси с обрубкой краев,  

устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.  3. осуществить укатку.  

4. осуществить вырубку образцов и заделка вырубок.  

м2 

покрытия  

844,7 

21.1  

Использовать для этого: 1. поковки из квадратных заготовок, масса 1,8  кг  

т 

0,0052 

2. битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130  

т 

0,0091 

3. бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150  мм, толщиной 40-75 мм, III сорта  

м3 

0,1267 

4. асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон  (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и  

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

т 

81,59802  

22 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или  исключать к расценке 27-06-020-01  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15;  ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)  

м2 

покрытия  

844,7 

22.1  

Использовать: 1. битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД  90/130  

т 

0,0071 

2. асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон  (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и  

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

т 

61,32522  

23 

Произвести установку бортовых камней бетонных при других видах  покрытий  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить устройство бетонного основания с уплотнением,  установкой и снятием опалубки.  

2. осуществить установку бортовых камней с подтеской, заливкой  швов и их расшивкой.  

3. осуществить очистку гранитных бортов. 

м 

бортового  камня  

254 

23.1  

Использовать для этого: 1. гвозди строительные 

т 

0,0025 

2. брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины,  толщиной 100, 125 мм, IV сорта  

м3 

0,4318 

3. бетон тяжелый, класс В15 (М200) 

м3 

14,99 

4. раствор готовый кладочный цементный марки 100  

м3 

0,1524 

5 камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/  (ГОСТ 6665-91)  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

254 

Асфальтобетонное покрытие площадки для сбора мусора 

24 

Произвести уплотнение грунта щебнем  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1. осуществить планировку основания.  2. осуществить поливку грунта водой.  

3. осуществить раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия  или щебня в грунт.  

м2 

площади  уплотнени я  

13,5 

24.1  

Использовать для этого: 1. щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм 

м3 

0,6885 

2. воду 

м3 

0,0297 

25 

Произвести устройство подстилающих слоев бетонных  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1. осуществить планировку основания. 

2. осуществить устройство подстилающего слоя с разравниванием и  уплотнением.  

3. осуществить устройство деформационных швов. 4. осуществить уход за подстилающими слоями. 

м3  

подстилаю щего слоя  

2,025 

25.1  

Использовать для этого: 1. мастику битумно-латексную кровельную  

т 

0,0041 

2. доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины,  толщиной 32-40 мм, IV сорта  

м3 

0,002 

3. воду 

м3 

0,7088 

4. бетон тяжелый, класс В15 (М200) 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

м3 

2,0655 

26 

Произвести розлив вяжущих материалов 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить розлив вяжущих материалов.  

1 т 

0,00675  

26.1  

Использовать для этого: 1. битумы нефтяные дорожные жидкие, класс  МГ, СГ  

т 

0,007 

27 

Произвести устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и  

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной  смеси толщиной 3 см  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить очистку основания.  

2. осуществить смазку вяжущими разжиженными материалами стыков  и мест примыканий.  

3. осуществить укладку асфальтобетонной смеси с разравниванием и  уплотнением.  

4. осуществить засыпку песком. 5. осуществить уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 

6. осуществить укатку асфальтобетонной смеси катками.  

м2 

покрытия  

13,5 

27.1  

Использовать для этого: 1. битумы нефтяные дорожные жидкие, класс  МГ, СГ  

т 

0,0081 

2. песок природный для строительных работ средний  

м3 

0,0675 

3. асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон  (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и  

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

т 

0,9639 

28 

Произвести установку бортовых камней бетонных при других видах  покрытий  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить устройство бетонного основания с уплотнением,  

установкой и снятием опалубки. 

2. осуществить установку бортовых камней с подтеской, заливкой  швов и их расшивкой.  

3. осуществить очистку гранитных бортов. 

м 

бортового  камня  

15 

28.1  

Использовать для этого: 1. гвозди строительные  

т 

0,0002 

2. брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины,  толщиной 100, 125 мм, IV сорта  

м3 

0,0255 

3. бетон тяжелый, класс В15 (М200) 

м3 

0,885 

4. раствор готовый кладочный цементный марки 100  

м3 

0,009 

5. камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/  (ГОСТ 6665-91)  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

15 

Покрытие тротуара сборной бетонной плиткой 

29 

Произвести уплотнение грунта щебнем  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1. осуществить планировку основания.  2. осуществить поливку грунта водой.  

3. осуществить раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия  или щебня в грунт.  

м2 

площади  уплотнени 

я 

412 

29.1  

Использовать для этого: 1. щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм 

м3 

21,01 

2. воду 

м3 

0,9064 

30 

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить планировку и прикатку земляного полотна с поливом  

водой. 

2. осуществить россыпь и разравнивание материалов.  3. осуществить уплотнение россыпей с поливкой водой.  

м3  

материала  основания  (в плотном  

теле) 

49,44 

30.1  

Использовать для этого: 1. воду 

м3 

3,461 

2. смесь песчано-гравийную природную 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

м3 

59,328 

31 

Произвести устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением  швов песком  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить устройство выравнивающего слоя из пескоцементной  

смеси. 

2. осуществить укладку плит с пригонкой и проверкой по уровню.  3. осуществить заполнение и расшивку швов цементным раствором  

или песком. 

м2 

тротуара  

412 

31.1  

Использовать для этого: 1. плиты бетонные и цементно-песчаные для  тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм  

м2 

412 

2. смесь пескоцементную (цемент М 400) 

м3 

20,6 

3. песок природный для строительных работ средний  

м3 

0,206 

32 

Произвести установку бортовых камней бетонных при других видах  покрытий  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить устройство бетонного основания с уплотнением,  

установкой и снятием опалубки. 

м 

бортового  камня  

449 

2. осуществить установку бортовых камней с подтеской, заливкой  швов и их расшивкой.  

3. осуществить очистку гранитных бортов. 

32.1  

Использовать для этого: 1. гвозди строительные  

т 

0,0045 

2. брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины,  толщиной 100, 125 мм, IV сорта  

м3 

0,7633 

3. бетон тяжелый, класс В15 (М200) 

м3 

26,49 

4. раствор готовый кладочный цементный марки 100  

м3 

0,2694 

5. камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/  (ГОСТ 6665-91)  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

449 

Гравийно-песчаное покрытие площадок 

33 

Произвести уплотнение грунта щебнем  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1. осуществить планировку основания.  2. осуществить поливку грунта водой.  

3. осуществить раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия  или щебня в грунт.  

м2 

площади  уплотнени 

я 

37,8 

33.1  

Использовать для этого: 1. щебень из природного камня для  строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм  

м3 

1,928 

2. воду 

м3 

0,0832 

34 

Произвестьи устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить планировку и прикатку земляного полотна с поливом  

водой. 

2. осуществить россыпь и разравнивание материалов.  3. осуществить уплотнение россыпей с поливкой водой.  

м3  

материала  основания  (в плотном  

теле) 

3,78 

34.1  

Использовать для этого: 1 воду 

м3 

0,2646 

2. смесь песчано-гравийную природную 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

м3 

4,536 

Песчаное покрытие детских площадок 

35 

Произвести уплотнение грунта щебнем  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1. осуществить планировку основания.  2. осуществить поливку грунта водой.  

3. осуществить раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия  или щебня в грунт.  

м2 

площади  уплотнени 

я 

56,6 

35.1  

Использовать для этого: 1. щебень из природного камня для  строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм  

м3 

2,887 

2. воду 

м3 

0,1245 

36 

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить планировку и прикатку земляного полотна с поливом  

водой. 

2. осуществить россыпь и разравнивание материалов.  3. осуществить уплотнение россыпей с поливкой водой.  

м3  

материала  основания  (в плотном  

теле) 

22,64 

2. песок природный для строительных работ средний  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

м3 

26,036 

Раздел 2. Озеленение 

37 

Произвести подготовку стандартных посадочных мест для деревьев и  кустарников с квадратным комом земли механизированным способом  размером 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 100%  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том чисде  1. осуществить копание ям экскаватором с зачисткой вручную.  

2. осуществить отвозку грунта на тачках. 

3. осуществить подвозку на тачках растительной земли и перегноя.  4. осуществить приготовление смеси.  

5. осуществить подготовку ям к посадке. 

яма 

3 

37.1  

Использовать для этого: 1. удобрения органо-минеральные  торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2  

м3 

0,279 

2. землю растительную механизированной заготовки  

м3 

5,28 

38 

Произвести посадку деревьев и кустарников с комом земли размером  0,8x0,8x0,5 м  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить установку деревьев в ямы автокраном.  

2. осуществить засыпку земли с трамбованием. 

3. осуществить установку кольев и укрепление деревьев.  4. осуществить полив.  

5. осуществить обрезку крон. 

10  деревьев  

или 

кустарник 

ов  

0,3 

38.1  

Использовать для этого: 1. ткань мешочнаую 

10 м2 

0,045 

2. шпагат из пенькового волокна 

т 

0,0001 

3. колья деревянные посадочные 2200x60 мм 

шт. 

6 

4. воду 

м3 

1,05 

5. Ель сибирскую (до 1 м) с закрытой корневой системой  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

3 

39 

Произвести уход за деревьями или кустарниками с комом земли  

размером 0,8x0,8x0,5м 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1.осуществить открытие и закрытие лунок.  2. осуществитть полив из шланга поливомоечной машины.  

3. осуществить прополку и рыхление лунок.  4. осуществить смену подвязок.  

5. осуществить обрезку крон и вырезку суши. 6. осуществить удаление поросли. 

дерево 

3 

39.1  

Использовать для этого: 1. ткань мешочную 

10 м2 

0,045 

2. шпагат из пенькового волокна 

т 

3. колья деревянные посадочные 2200x60 мм 

шт. 

1,2 

40 

Произвести подготовку стандартных посадочных мест для деревьев- 

саженцев с оголенной корневой системой механизированным  способом с добавлением растительной земли до 100%  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить копание ям механическим способом.  

2. осуществить копание ям вручную. 

3. осуществить окучивание грунта, выброшенного из ям.  

4. осуществить отвозку грунта на тачках.  5. осуществить подвозку на тачках растительной земли и удобрений.  

6. осуществить приготовление смеси. 

7. осуществить подготовку ям к посадке.  

яма 

17 

40.1  

Использовать для этого: 1. удобрения органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2 

м3 

0,544 

2. землю растительную механизированной заготовки  

м3 

10,18 

41 

Произвести посадку деревьев-саженцев с оголенной корневой  системой в ямы размером 0,7x0,7 м  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить временную прикопку на месте посадки.  

2. осуществить установку кольев. 

3. осуществить установку деревьев в ямы вручную.  

4. осуществить засыпку земли с трамбованием и устройством  приствольных лунок.  

5. осуществить подвязывание деревьев к кольям.  6. осуществить полив.  

7.осуществить обрезку крон. 

дерево 

17 

41.1  

Использовать для этого: 1. ткань мешочную 

 м2 

2,55 

2. шпагат из пенькового волокна 

т 

0,0003 

3. колья деревянные посадочные 2200x60 мм 

шт. 

17 

4. воду 

м3 

1,7 

5. деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа,  орех, ясень):  

шт. 

17 

Береза 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

8 

ФИО5 сибирская 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

9 

42 

Произвести уход за саженцами с оголенной корневой системой  

деревьев 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить открытие и закрытие приствольных лунок и канавок.  

2. осуществить полив из поливомоечных машин.  

3. осуществить прополку и рыхление лунок или канавок.  4. осуществить подкормку органическими удобрениями.  5. осуществить обрезку крон и вырезку суши.  

саженцы  деревьев  или  

кустарник ов  

17 

42.1  

Использовать для этого: 1. удобрения органические  торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1  

м3 

0,102 

43 

Произвести подготовку стандартных посадочных мест для однорядной  

живой изгороди механизированным способом с добавлением  растительной земли до 100%  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить копание траншей многоковшовым экскаватором.  2. осуществить зачистку траншей вручную.  

3. осуществить отвозку грунта на тачках. 

4. осуществить подвозку на тачках растительной земли.  5. осуществить подготовку траншей к посадке.  

м траншей  

140,8 

43.1  

Использовать для этого: 1. Землю растительную механизированной  заготовки  

м3 

35,2 

44 

Произвести посадку кустарников-саженцев в живую изгородь  однорядную и вьющихся растений  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить временную прикопку кустарников на месте посадки.  2. осуществить установку кустарников, засыпку с трамбованием и  устройством лунок.  

3. осуществить полив. 4. осуществить стрижку живой изгороди. 

м живой  изгороди  

140,8 

44.1  

Использовать для этого: 1. воду 

м3 

8,87 

2. кизильник блестящий 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

352 

45 

Произвести уход за саженцами кустарников с оголенной корневой  системой в живой изгороди однорядной и вьющимися растениями  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  

1. осуществить открытие и закрытие приствольных лунок и канавок.  2. осуществить полив из поливомоечных машин.  

3. осуществить прополку и рыхление лунок или канавок.  4. осуществить подкормку органическими удобрениями.  5. осуществить обрезку крон и вырезка суши.  

м живой  изгороди  

140,8 

45.1  

Использовать для этого: 1. удобрения органические  торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1  

м3 

0,5632 

2. воду 

м3 

11,83 

46 

Произвести подготовку стандартных посадочных мест для  

кустарников-саженцев в группы механизированным способом с  добавлением растительной земли до 100%  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить копание ям механизированным способом.  

2. осуществить окучивание грунта, выброшенного из ям.  3. осуществить зачистку ям вручную.  

4. осуществить отвозку грунта на тачках.  5. осуществить подвозку на тачках растительной земли.  

6. осуществить подготовку ям к посадке.  

яма 

23 

46.1  

Использовать для этого: 1. землю растительную механизированной  заготовки  

м3 

4,37 

47 

Произвести посадку кустарников-саженцев в группы, размер ямы  0,5x0,5 м  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить временную прикопку на месте посадки.  

2. осуществить установку кустарников, засыпку земли с трамбованием  и устройством лунок.  

3. осуществить полив. 4. осуществить обрезку крон. 

кустарник- саженец  

23 

2. Сирень сортовую 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

23 

48 

Произвести уход за саженцами с оголенной корневой системой  

кустарников в групповых посадках 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить открытие и закрытие приствольных лунок и канавок.  2. осуществить полив из поливомоечных машин.  

3. осуществить прополку и рыхление лунок или канавок.  4. осуществить подкормку органическими удобрениями.  

10  

саженцев  деревьев  

или 

кустарник ов  

2,3 

48.1  

Использовать для этого: 1. удобрения органические  торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1  

м3 

0,069 

2. воду 

м3 

0,92 

49 

Произвести подготовку почвы для устройства партерного и  

обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см  механизированным способом  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15, в том числе)  

1. осуществить планировку площади механизированным способом.  2. осуществить вспашку почвы трактором.  

3. осуществить подвозку и насыпку растительной земли с  разравниванием.  

м2 

1919 

49.1  

Использовать для этого: 1. землю растительную механизированной  заготовки  

м3 

287,9 

50 

Произвести посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных  вручную  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить посев вручную.  

2. осуществить прикатывание газонов после посева легкими катками.  3. осуществить полив.  

м2 

1919 

50.1  

Использовать для этого: 1. воду 

м3 

191,9 

2. Газон "АМЕРИКАН ГРИН" 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

кг 

38,38 

51 

Произвести подготовку почвы под цветники толщиной слоя насыпки  20 см  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить планировку и штыковку основания цветников с  

разравниванием земли. 2. осуществить подвозку растительной земли. 

3. осуществить разравнивание растительной земли.  

м2 

цветников  

10 

51.1  

Использовать для этого: 1. землю растительную механизированной  заготовки  

м3 

2 

52 

На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или  исключать к расценке 47-01-049-01  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15;  ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  

1. Планировка и штыковка основания цветников с разравниванием  земли.  

2. Подвозка растительной земли. 3. Разравнивание растительной земли. 

м2 

цветников  

10 

53 

Произвести посадку многолетних цветников при густоте посадки 1,6  

тыс. шт. цветов 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1. осуществить планировку и штыковку почвы с разравниванием  граблями.  

2.осуществить нанесение рисунка. 3. осуществить посадку цветов. 4. осуществить изготовление колышков. 5. осуществить поливку. 6. осуществить мульчирование перегноем с подноской. 

7. осуществить посадку цветов в местах отпада.  

м2 

цветников  

10 

53.1  

Использовать для этого: 1. шпагат из пенькового волокна 

т 

0,0001 

2. доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150  мм, толщиной 16 мм, IV сорта  

м3 

0,0008 

3. воду 

м3 

3 

4. луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые  первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия,  

тюльпан и т.д.) 

шт. 

168 

5. перегной 

м3 

0,2 

Раздел 3. Малые архитектурные формы 

54 

Произвести установку мелких конструкций (подо конников, сливов,  парапетов и др.) массой до 0,5 т  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15), в том числе  1.осуществить установку сборных конструкций.  

2. осуществить заполнение швов раствором. 

шт. сборных 

конструкц ий  

40 

54.1  

Использовать для этого: 1. раствор готовый кладочный цементный  марки 100  

м3 

1,386 

2. Урну железобетонную прямоугольную с фактурной отделкой  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

11 

3. Скамью бульварную без спинки БС-1 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

13 

4. Стойк1 для выбивания СВ-1 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

1 

5. Стойкау для сушки СТ-1 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

2 

6. Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической  тележке  

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

компл. 

2 

7. Беседку (стол со скамьями и навесом) 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

1 

8. Песочницу тип "Ромашка" 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

1 

9. Лаз Лиана ИО-Л2 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

1 

10. Качели балансирные малые, размеры 2000х410 мм 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

2 

11. Горка ИО-Г2 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

1 

12. Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

1 

13. Рукоход с одним брусом, размеры 2250х400 мм 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

1 

14. Стенку-турник 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

1 

15. Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 800 мм, высота 1500 мм 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт. 

1 

16. Ступени ИО-Р6 

(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15)  

шт 

1 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

Дедал» в пользу Администрации Староалейского сельсовета Третьяковского района  Алтайского края расходы по оплате судебной экспертизы, проведенной ООО «Центр  независимой профессиональной экспертизы «Алтай-Эксперт» в размере 50 000 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Дедал» в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок  не позднее месяца со дня его принятия.  

Судья А.В. Сайчук