Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-13649/2019

03 декабря 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  08 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  03 декабря 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи  Пономаревой О.С.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» (адрес:  197022, 

<

...>, лит. А, эт. 4, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 21.02.2003, ИНН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» (адрес:  199406, 

<

...>, лит. А, пом. 23-Н, каб. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2002, ИНН: 

<

***>);

третье лицо: временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» Цыбульский Алесксей Анатольевич

об обязании передать оформленную надлежащим образом исполнительную документацию и о взыскании неустойки,

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 25.09.2019;

- от ответчика: не явился, извещен;

- от третьего лица: не явился, извещен. 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» (далее – Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском (измененным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» (далее – Компания, ответчик) о взыскании 49.699 руб. 01 коп. неустойки за нарушение сроков предоставления исполнительной документации по договору генерального подряда от 14.04.2017 № 121-5094-ДПд-17 (далее – Договор) и об обязании в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать оформленную надлежащим образом исполнительную документацию по объекту «Обустройство дополнительных помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» г. Санкт-Петербурге по адресу: Лиговский пр-кт. Д. 61, лит. А (БЦ «Ренессанс Форум» 1 этаж)»:

№ п/ п

Шифр РД

Наименование и номер комплекта исполнительной документации но видам работ/ конструктивны м элементам / инженерным системам

Номер папки

Содержание папки

Наличие замечаний, отраженных в письмах ООО «Газпром

социнвест», по результатам проверки переданной ООО «Капитал стройиндустрия» исполнительной документации

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО «Газпром социнвест» на бумажном носителе (с учетом устранения замечаний)

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО «Газпром социнвест» на электронном носителе (с учетом устранения замечаний)

1

Разрешительная документация

-

1/2

Разрешительная документация

исх. № 741 от 02.02.2018

2

0

2

Разрешительная документация

-

1/6

Разрешительная документация

исх. № 1524 от 02.03.2018

2

0

3

Разрешительная документация

-

1/8

Разрешительная документация

исх. № 741 от 02.02.2018

2

а

4

Журнал производства сварочных работ

-

2/2-5

Журнал производства сварочных работ

исх. № 3788 от 30.05.2018

4

0

5

Журнал

антикоррозионно й зашиты сварных соединений.

-

2/2-6

Журнал антикоррозионно й защиты сварных соединений.

исх. № 3788 от 30.05.2018

4

0

6

Общий журнал работ

-

2/3-1

Общий журнал работ

 

2

0

7

Общий журнал работ

(Демонтаж)

-

2/4-3

Общий журнал работ (Демонтаж)

 

3

1

8

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АР

Архитектурные решения

3/1-1.1

Рабочая документация

исх. №741 от 02.02.2018

4

1

9

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АР

3/1-2.1

 

исх. № 741 от 02.02,2018

3

0

10

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АР

3/1-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 741 от 02.02.2018

3

0

11

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЛР

3/1-2.3

Рабочая документация

исх. № 1524 от 02.03.2018

3

1

12

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-КР

Конструктивные решения

3/3-1.1

Рабочая документация

исх. №741 от 02.02.2018

4

1

13

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-КР

3/3-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №4832 от 03.07.2018

4

0

14

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ЭОМ

Система электроснабжения

3/4-1.1

Рабочая документация

исх. № 4832 от 03.07.2018

4

1

15

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЭОМ

3/4-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №4832 от 03.07.2018

4

и

16

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЭОМ

3/4-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №4832 от 03.07.2018

4

0

17

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЭОМ

3/4-2.4

Технический отчет ЭОМ

исх. № 4832 от 03.07.2018

4

 

18

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЭОМ

3/4-2.5

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы на демонтаж

исх. №4832 от 03.07.2018

4

0

19

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ВК

Водоснабжение и канализация

3/5-1.1

Рабочая документация

исх. № 741 от 02.02.2018

4

1

20

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ВК

3/5-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 741 от 02.02.2018

0

1

21

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-0П-ОВ1

-

3/6-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02.2018

1

0

22

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ОВЗ

Кондиционирование

3/8-1.1

Рабочая документация

исх.№ 1524 от 02.03.2018

4

0

23

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АИС

Автоматизация инженерных систем

3/9-1.1

Рабочая документация

исх. № 2147 от 28.03.2018

исх. №3788 от 30.05.2018

4

0

24

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АИС

3/9-1.2

Рабочая документация изм.5

 

0

1

25

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ЛИС

3/9-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 3788 от 30.05.2018

4

0

26

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АИС

3/9-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 3788 ог 30.05.2018

4

0

27

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ДИС

Диспетчеризация инженерных систем

 

3/10-1.1

Рабочая документация изм. 3

исх. №2147 от 28.03.2018

4

1

28

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ДИС.2. Часть 1.

3/10-1.1.1

Рабочая документация

 

0

1

29

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ДИС.2. Часть 2.

3/10-

1.1.1

Рабочая документация

 

3

1

30

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ДИС

3/10-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 4832 от 03.07.2018

4

0

31

ОШС-2016-БЦ-СПБ-011-СОУЭ

Система оповещения и управления эвакуацией

3/11-1.1

Рабочая документация

исх. №2147 от 28.03.2018

4

1

32

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-СОУЭ

3/11-2.1

Акты, документы, удостоверя ющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 2147 от 28.03.2018

4

0

33

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АУПС

Автоматическая установка пожарной сигнализации

3/12-1.1

Рабочая документация

исх. № 2147 от 28.03.2018

4

1

34

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АУПС

3/12-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

35

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АГПТ

Система автоматического

газового

пожаротушения

 

3/13-1.1

Рабочая документация

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

36

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АГПТ

3/13-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

37

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АГПТ

3/13-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 2147 от 28.03.2018

4

0

38

ОПГС-2016-БЦ-

СПБ-011-

ЛУВПТ

Система автоматического

водяного пожаротушения

 

 

3/14-1.1

Рабочая документация

исх. №2147 от 28.03.2018

4

1

39

ОПГС-2016-БЦ-

СПБ-011-

АУВПТ

3/14-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

1

40

ОПГС-2016-БЦ-

СПБ-011-

АУВПТ

3/14-21

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

41

OIII'C-2016-БЦ-СПБ-011-ПВ

Система внутреннего противопожарного водопровода. Технологическая часть

 

 

3/15-1.1

Рабочая документация

исх. №2147 от 28.03.2019

4

1

42

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ПВ

3/15-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

43

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ПВ

3/15-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

44

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЛР

Архитектурные решения

 

 

 

3/16-1.1

Рабочая документация

исх. № 1524 от 02.03.2018

4

1

45

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АР

3/16-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02.2018

1

0

46

О111С-2016-БЦ-СПБ-011-АР

3/16-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02.2018

1

1

47

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АР

3/16-2.3

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02.2018

1

1

48

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АР

3/16-2.4

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02,2018

1

1

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.07.2019 по делу № А56-58832/2019 в отношении ответчика введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО3. 

В связи с вышеизложенным определением от 04.10.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» ФИО3.

В судебном заседании 08.11.2019 присутствовал представитель истца. Ответчик, третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направили, что в порядке статьи 156 АПК РФ не препятствует для рассмотрения дела в их отсутствие.

В ранее направленном отзыве ответчик требования в части обязания передать документацию не оспаривал, против взыскания 49.699 руб. возражал.

Исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства:

14.04.2017 между сторонами заключен Договор в редакции дополнительных соглашений, согласно условиям которого ответчик (генподрядчик) обязуется выполнить на объекте строительные и отделочные работы по инженерно-техническому оснащению, пусконаладочные работы (включая индивидуальные испытания и комплексное опробование), предусмотренные рабочей документацией, выданной в производство работ, в объеме и в сроки, определенные в договоре, а также иные работы и услуги, необходимые для строительства объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а истец (заказчик) обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в предусмотренном договором порядке. 

В силу пункта 3.1 Договора срок начала и окончания выполнения работ по Договору, включая промежуточные сроки, определяются графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), согласованным обеими сторонами с учетом выделенного лимита капитальных вложений на строительство инвестором. 

При этом согласно графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) исполнительная документация должна быть переедена не позднее 19.12.2017. 

Согласно пункту 4.1 Договора стоимость работ составила 205.100.000 руб. 

В силу пункта 6.1.11 Договора генподрядчик обязан оформлять своевременно и надлежащим образом исполнительную документацию (в 4 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в формате pdf) в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов, иных обязательных требований и условий договора. 

Генподрядчик обязан к моменту приемки выполненных в полном объеме работ передать заказчику по акту приема-передачи, полный комплект исполнительной документации (оригинал в 4 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе) и иных документов, относящихся к деятельности генподрядчика, необходимой для поставки объекта на баланс инвестору, в том числе оригиналы: исполнительных чертежей, актов скрытых и иных работ, технических паспортов на все технологическое оборудование, изделий, материалов и конструкций, изготовляемых по отдельным заказам, а также 2 экз. копий, заверенных генподрядчиком, сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции (пункт 6.1.46 Договора).

К установленному в графике производства работ сроку (19.12.2017) ответчик обязательства по передаче истцу исполнительной документации не выполнил, однако письмом от 20.12.2017 № 17-3347 гарантировал его исполнение к 29.12.2017, которые также не выполнил.

Истец направил ответчику претензию от 26.03.2018 № 2107 о передаче исполнительной документации, которая не была удовлетворена в полном объеме, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со статьей 702  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Условие Договора о передаче истцу надлежащим образом оформленной (в соответствии с требованиями Договора) исполнительной документации ответчик не выполнил. 

Исполнительная документация включает в себя документы, свидетельствующие об объеме и качестве выполненных работ, сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемые при производстве работ, акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственным конструкций, акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, журналы производства работ и иные материалы, без которых невозможно сдать и эксплуатировать объект. 

В соответствии с пунктами 3 и 5 Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных и введенных в действие приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ; исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. 

В силу части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации.

В силу части 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, исковые требования подлежат удовлетворению в части обязания передачи исполнительной документации истцу.

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока за нарушение сроков предоставления исполнительной документации в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 17.2 Договора генподрядчик уплачивает по письменному требованию заказчика штрафы и неустойки за непредставление в установленные договором сроки планов, графиков, отчетов, иной информации – неустойку в размере 5.000 руб. за каждый день просрочки, но не более 0,03% от цены работ. 

Истребуемая истцом документация может быть отнесена к категории иной информации, в связи с чем доводы ответчика подлежат отклонению.

Размер неустойки судом проверен, признан обоснованным, правильным. 

Учитывая, что исковые требования удовлетворены в полном объеме, расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» оформленную надлежащим образом исполнительную документацию по объекту «Обустройство дополнительных помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: Лиговский пр-кт. д. 61, лит. А (БЦ «Ренессанс Форум» 1 этаж)»:

№ п/ п

Шифр РД

Наименование и номер комплекта исполнительной документации но видам работ/ конструктивны м элементам / инженерным системам

Номер папки

Содержание папки

Наличие замечаний, отраженных в письмах ООО «Газпром

социнвест», по результатам проверки переданной ООО «Капитал стройиндустрия» исполнительной документации

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО «Газпром социнвест» на бумажном носителе (с учетом устранения замечаний)

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО «Газпром социнвест» на электронном носителе (с учетом устранения замечаний)

1

Разрешительная документация

-

1/2

Разрешительная документация

исх. № 741 от 02.02.2018

2

0

2

Разрешительная документация

-

1/6

Разрешительная документация

исх. № 1524 от 02.03.2018

2

0

3

Разрешительная документация

-

1/8

Разрешительная документация

исх. № 741 от 02.02.2018

2

а

4

Журнал производства сварочных работ

-

2/2-5

Журнал производства сварочных работ

исх. № 3788 от 30.05.2018

4

0

5

Журнал

антикоррозионной зашиты сварных соединений.

-

2/2-6

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

исх. № 3788 от 30.05.2018

4

0

6

Общий журнал работ

-

2/3-1

Общий журнал работ

 

2

0

7

Общий журнал работ

(Демонтаж)

-

2/4-3

Общий журнал работ (Демонтаж)

 

3

1

8

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АР

Архитектурные решения

3/1-1.1

Рабочая документация

исх. №741 от 02.02.2018

4

1

9

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АР

3/1-2.1

 

исх. № 741 от 02.02,2018

3

0

10

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АР

3/1-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 741 от 02.02.2018

3

0

11

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЛР

3/1-2.3

Рабочая документация

исх. № 1524 от 02.03.2018

3

1

12

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-КР

Конструктивные решения

3/3-1.1

Рабочая документация

исх. №741 от 02.02.2018

4

1

13

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-КР

3/3-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №4832 от 03.07.2018

4

0

14

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ЭОМ

Система электроснабжения

3/4-1.1

Рабочая документация

исх. № 4832 от 03.07.2018

4

1

15

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЭОМ

3/4-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №4832 от 03.07.2018

4

и

16

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЭОМ

3/4-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №4832 от 03.07.2018

4

0

17

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЭОМ

3/4-2.4

Технический отчет ЭОМ

исх. № 4832 от 03.07.2018

4

 

18

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЭОМ

3/4-2.5

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы на демонтаж

исх. №4832 от 03.07.2018

4

0

19

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ВК

Водоснабжение и канализация

3/5-1.1

Рабочая документация

исх. № 741 от 02.02.2018

4

1

20

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ВК

3/5-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 741 от 02.02.2018

0

1

21

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-0П-ОВ1

-

3/6-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02.2018

1

0

22

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ОВЗ

Кондиционирование

3/8-1.1

Рабочая документация

исх.№ 1524 от 02.03.2018

4

0

23

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АИС

Автоматизация инженерных систем

3/9-1.1

Рабочая документация

исх. № 2147 от 28.03.2018

исх. №3788 от 30.05.2018

4

0

24

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АИС

3/9-1.2

Рабочая документация изм.5

 

0

1

25

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ЛИС

3/9-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 3788 от 30.05.2018

4

0

26

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АИС

3/9-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 3788 ог 30.05.2018

4

0

27

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ДИС

Диспетчеризация инженерных систем

 

3/10-1.1

Рабочая документация изм. 3

исх. №2147 от 28.03.2018

4

1

28

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ДИС.2. Часть 1.

3/10-1.1.1

Рабочая документация

 

0

1

29

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ДИС.2. Часть 2.

3/10-

1.1.1

Рабочая документация

 

3

1

30

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ДИС

3/10-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 4832 от 03.07.2018

4

0

31

ОШС-2016-БЦ-СПБ-011-СОУЭ

Система оповещения и управления эвакуацией

3/11-1.1

Рабочая документация

исх. №2147 от 28.03.2018

4

1

32

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-СОУЭ

3/11-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 2147 от 28.03.2018

4

0

33

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АУПС

Автоматическая установка пожарной сигнализации

3/12-1.1

Рабочая документация

исх. № 2147 от 28.03.2018

4

1

34

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АУПС

3/12-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

35

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АГПТ

Система автоматического

газового

пожаротушения

 

3/13-1.1

Рабочая документация

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

36

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АГПТ

3/13-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

37

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АГПТ

3/13-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. № 2147 от 28.03.2018

4

0

38

ОПГС-2016-БЦ-

СПБ-011-

ЛУВПТ

Система автоматического

водяного пожаротушения

 

 

3/14-1.1

Рабочая документация

исх. №2147 от 28.03.2018

4

1

39

ОПГС-2016-БЦ-

СПБ-011-

АУВПТ

3/14-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

1

40

ОПГС-2016-БЦ-

СПБ-011-

АУВПТ

3/14-21

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

41

OIII'C-2016-БЦ-СПБ-011-ПВ

Система внутреннего противопожарного водопровода. Технологическая часть

 

 

3/15-1.1

Рабочая документация

исх. №2147 от 28.03.2019

4

1

42

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ПВ

3/15-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

43

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-ПВ

3/15-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №2147 от 28.03.2018

4

0

44

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-ЛР

Архитектурные решения

 

 

 

3/16-1.1

Рабочая документация

исх. № 1524 от 02.03.2018

4

1

45

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-ОП-АР

3/16-2.1

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02.2018

1

0

46

О111С-2016-БЦ-СПБ-011-АР

3/16-2.2

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02.2018

1

1

47

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АР

3/16-2.3

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02.2018

1

1

48

ОПГС-2016-БЦ-СПБ-011-АР

3/16-2.4

Акты, документы, удостоверяющие

качество, исполнительные схемы

исх. №741 от 02.02,2018

1

1

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» 49.699 руб. 01 коп. неустойки; 8.000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Пономарева О.С.