Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-6637/2020

05 октября 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГИДРОЩИТСТРОЙ" (198095, Санкт-Петербург город, улица Швецова, дом 23, корпус 10 литер Б, помещение 21-Н, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-МОНОЛИТ" (198216, Санкт-Петербург город, проспект Народного Ополчения, дом 10, литер А, помещение 25-Н ОФИС 10, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности  

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 25.07.2019

установил:

Общество с ограниченной ответственностью НПО "ГИДРОЩИТСТРОЙ" (далее – ООО НПО "ГИДРОЩИТСТРОЙ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СОЮЗ-МОНОЛИТ" (далее – ООО "СОЮЗ-МОНОЛИТ") о взыскании 1751940,54 руб. задолженности 122990,76 руб. неустойки за период с 31.01.2019 по 14.01.2020, а также неустойку по дату фактической оплаты долга по договору от 16.11.2018 № А-260ПГ (далее – Договор).  

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Представитель ответчика поддержал возражения против заявленных требований. 

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО НПО "ГИДРОЩИТСТРОЙ" (подрядчиком) и ООО "СОЮЗ-МОНОЛИТ" (заказчиком) заключен Договор, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию заказчика своими силами и материалами подрядчика комплекс строительно-монтажных работ «Горизонтальная гидроизоляция фундаментов. Устройство вертикальной гидроизоляции» на объекте: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроено-пристроенный гараж по адресу: Санкт-Петербург, Петергофской шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

По п. 2.1. Договора стоимость работ по настоящему договору 8 712 590,80 руб., определяется на основании расчета договорной цены (приложение № 1) на основании фактически выполненных подрядчиком объемов работ, подтвержденных заказчиком на основании подписанного акта по форме заказчика. В случае увеличения объемов работ, такие работы подлежат оплате на основании фактически выполненных работ по единичным расценкам, определенным в приложении 1.

Согласно п. 2.2. Договора общая стоимость выполненных работ по настоящему Договору определяется по фактически выполненным и принятым заказчиком работам, согласно подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме заказчика.

В случае если стоимость работ, принятых заказчиком согласно подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимость выполненных работ и затрат по форме № КС-3 будет меньше цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, то оплате подлежат только принятые заказчиком работы, и подрядчик не вправе требовать уплаты соответствующей разницы между ценой договора и принятых заказчиком работ.

В силу пункта 2.3 договора заказчик производит оплату работ ежемесячно на основании выставленного подрядчиком счета, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или иной форме заказчика в течение 30 календарных дней с момента подписания заказчиком всего комплекта документов, предусмотренного пунктом 4.1.1 договора, с удержанием гарантийного обеспечения в размере 5% от суммы выполненных работ.

В силу п. 2.7. Договора заказчик, не позднее срока, указанного в п. 2.3., обязан уплатить подрядчику сумму, указанную в справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3) за выполненные работы, на основании счета, выставляемого подрядчиком. В случае более позднего получения всего комплекта документов, предусмотренного п. 4.1.1. Договора срок оплаты сдвигается на соответствующее количество дней.

В соответствии с п. 3.1. Договора начало выполнения работ не позднее 5 календарных дней с даты подписания Договора при условии передачи заказчиком фронта работ (строительной площадки) по акту передачи фронта работ; окончание выполнения работ: по Графику, согласованному сторонами, соответствующему графику общестроительных (монолитных) работ на объекте (приложение № 2).

Согласно п. 4.1.1. Договора не позднее 30-го числа текущего месяца подрядчик передает заказчику справку по форме № КС-3 по работам, выполненным в отчетном месяце, акт по форме № КС-2, акты скрытых работ (если такие работы проводились), акты приемки ответственных конструкций и необходимую промежуточную исполнительную документацию, в том числе комплект действующих сертификатов на использованные в производстве работ материалы, не менее чем в 3-х экземплярах в печатном виде, а также 1 экземпляр в электронном виде в формате EXEL на электронную почту или на съемной носителе. Акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 составляются подрядчиком за отчетный период.

Указанные документы, переданные в печатном виде, должны быть подписаны уполномоченным представителем заказчика, утверждены руководителем подрядчика.

По п. 4.1.2. Договора заказчик в течение 5-ти рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает справку по форме № КС-3, акт по форме № КС-2. Заказчик имеет право не подписывать указанные в настоящем пункте акт и справку до предоставления подрядчиком исполнительной документации, актов скрытых работ, накопительной ведомости, необходимых для их подписания. 

В соответствии с абз. 2 п. 4.1.3. договора при несогласии заказчика с качеством выполненных подрядчиком работ, заказчик возвращает подрядчику справку по форме № КС-3 и акт по форме № КС-2 и составляет в порядке, предусмотренном в п. 7.3. Договора рекламационный акт с указанием перечня некачественно выполненных работ и сроками их устранения. При этом подрядчик устраняет недостатки в выполненных работах в установленный заказчиком срок и после устранения представляет на подпись заказчику справку по форме № КС-3 и акт по форме № КС-2.

В п. 4.2.1 Договора установлено, что окончательная сдача работ по Договору, включая работы по дополнительным соглашениям к Договору, осуществляется подрядчиком в сроки, указанные в п. 3.1. Договора и/или сроки, установленные дополнительным соглашением. Для этого подрядчик производит подготовку исполнительной документации за 5 рабочих дней до окончательной сдачи работ и сдает выполненные работы заказчику. Исполнительная документация подтверждается ответственным работником заказчика и передается заказчику в 3-х бумажных экземплярах и в электронном виде.

Согласно п. 4.2.2. Договора подрядчик оформляет и подписывает у заказчика итоговый акт сдачи-приемки, подтверждающий выполнение всего комплекса работ согласно подписанным сторонами актам выполненных работ по форме КС-2 и передачи заказчику полного пакета исполнительной документации по выполненным работам, а также иной документации по соответствующему виду работ, предусмотренной нормативными документами. 

В соответствии с пунктом 5.1 договора заказчик оставляет гарантийное обеспечение в размере 5% стоимости выполненного объема и выплачивает эту сумму в течение 180 дней после передачи подрядчиком по итоговому акту комплекса завершенных надлежащим образом работ.

В силу пункта 6.3.38. Договора подрядчик обязан безвозмездно устранить все дефекты и недоделки, допущенные по доказанной вине подрядчика и выявленные в период строительства и гарантийного срока эксплуатации в течение 2 недель. В случае причинения повреждений существующим конструкциям объекта, ведомственным инженерным сетям и сооружениям по вине подрядчика или вне субподрядчика, произвести в разумный срок за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление уполномоченному лицу заказчика. Производство восстановительных работ не должно влиять на конечный срок производства работ по Договору.

Согласно п. 6.4.41. Договора подрядчик обязан передать заказчику полный комплект исполнительной документации.

За просрочку заказчиком оплаты выполненных работ подрядчик вправе предъявить требование об оплате неустойки в размере 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Подрядчик выполнил работы по Договору на сумму 4997051,20 руб. согласно актам о приемке выполненных работ от 31.12.2018 № 1 на сумму 121845,50 руб., 31.01.2019 № 2 на сумму 305211,50 руб., 28.02.2019 № 3 на сумму 339126 руб., 31.03.2019 № 4 на сумму 1111859 руб., 30.04.2019 № 5 на сумму 1526896,60 руб., 31.05.2019 № 6 на сумму 1292889 руб., 30.06.2019 № 7 на сумму 299223,60 руб., справкам о стоимости выполненных работ и затрат.

Поскольку ООО "СОЮЗ-МОНОЛИТ" частично оплатило работы на сумму 3245110,66 руб., ООО НПО "ГИДРОЩИТСТРОЙ" направило претензию от 21.10.2019 с требованием оплаты долга.

Отказ ООО "СОЮЗМОНОЛИТ" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО НПО "ГИДРОЩИТСТРОЙ" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Материалами дела подтверждается, что подрядчик надлежащим образом выполнил предусмотренные договором работы, которые приняты заказчиком без возражений. 

Доказательств оплаты работ на сумму 1751940,54 руб. ответчик в материалы дела не представил. 

Между тем исходя из пунктов 2.4, 5.1 и 4.2 договора условия оплаты гарантийного обеспечения в размере 5% стоимости выполненного объема не соблюдены подрядчиком.

Доказательств того, что истец итоговый акт составил, направил его ответчику, а ответчик необоснованно отказался от подписания акта, материалы дела не содержат. Следовательно, заказчик правомерно задерживает окончательный расчет по договору в размере 5% гарантийного обеспечения в сумме 249 852,56 руб., которые не подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, поскольку срок его выплаты не наступил. 

Суд удовлетворяет требование в части 1 502 087,98 руб. задолженности.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

ООО НПО "ГИДРОЩИТСТРОЙ" начислило 122990,76 руб. неустойки за период с 31.01.2019 по 14.01.2020 на основании пункта 9.2 договора, а также просило взыскать неустойку по дату фактической оплаты долга.

Поскольку при расчете пени истцом учтена сумма гарантийного обеспечения, срок по оплате которой не наступил, по расчету суда размер неустойки за указанный период составил 105 450,46 руб. 

Требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в части 105 450,46 руб. с начислением ее до даты оплаты долга.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СОЮЗ-МОНОЛИТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "ГИДРОЩИТСТРОЙ" 1502087,98 руб. задолженности, 105450,46 руб. неустойки, а также неустойку в размере 0,03% от суммы основного долга за каждый день просрочки, начиная с 15.01.2020 по дату фактического исполнения обязательства по оплате долга, 27221 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Научно Производственное Объединение "ГИДРОЩИТСТРОЙ" из федерального бюджета 1 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.