128/2018-51731(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-1249/2018

г. Тамбов

20 сентября 2018 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Комаровой А.Д.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Муниципального казенного учреждения «Дирекция городских дорог» г. Тамбов,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  

Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект» г. Тамбов, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о расторжении муниципального контракта, взыскании неустойки и штрафа  Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

1. Расторгнуть муниципальный контракт № 161053 на выполнение проектных и  изыскательских работ для муниципальных нужд городского округа - город Тамбов по  разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги и  тротуаров по ул. Астраханской от ул. Советской до МЖК города Тамбова» от 03.02.2015,  заключённый между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция городских  дорог и Обществом с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект».  

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект», 

г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального казенного  учреждения «Дирекция городских дорог», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) неустойку за просрочку исполнения обязательства по муниципальному  контракту № 161053 от 03.02.2015 за период с 02.12.2015 по 28.11.2016, в размере 295 712  руб., штраф в размере 168 892,78 руб.  

В остальной части исковые требования о взыскании неустойки оставить без  удовлетворения.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехпроект» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 666 руб.  

4. Выдать истцу и налоговому органу исполнительные листы после вступления  решения в законную силу.  

5. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с  уведомлением о вручении.  

6. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  

20 сентября 2018 года 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья А.В. Истомин