АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

05 февраля 2025 года

Дело № А33-21360/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 22 января 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено 05 февраля 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дубровинский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 10.12.2021)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, дата регистрации 03.09.2018)

о взыскании задолженности,

в присутствии от истца: ФИО2, по доверенности от 25.04.2024 № 60,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания С.В. Альтерготом, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дубровинский» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании стоимости неизрасходованных и невозвращенных материалов по договору подряда №1 от 30.03.2023 в размере 1 806 087,94 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 27.08.2024 возбуждено производство по делу. Судебное разбирательство по делу откладывалось. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей ответчика.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на исковых требованиях по основаниям, изложенным в исковом заявлении и пояснениях.

В судебном заседании, состоявшемся 16.01.2025, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 22.01.2025. После перерыва стороны явку представителей не обеспечили. Сведения размещены в сети Интернет.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дубровинский» (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) заключены договоры № и №2 от 30.03.2023. 

Согласно пункту 2.1 договора № 1 заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить дорожные работы на объекте: "Жилой комплекс № 6 в III квартале жилого района "Новоостровский" г.Красноярск. Жилой дом №6.1 и инженерное обеспечение", расположенный по адресу: 

<

...>. 3 на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0200196:3065 и 24:50:0200196:3071. РнС №24-КЦ243080П0-23-2022 от 11.02.2022 (шифр проекта 510-01-21-АР1).

В соответствии с пунктом 2.1.1 договора № 1 подрядчик выполняет работы из своих материалов и из материалов заказчика. Заказчик передает материалы по заявке подрядчика по накладной (форма М-15). Подрядчик обязан провести приемку полученных материалов в момент их получения и не вправе ссылаться после приемки на недостатки материалов, за исключением случая, если недостатки материала могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала. Подрядчик обязан использовать полученные материалы экономно и расчетливо, одновременно с предоставлением форм КС-2, КС-3 и отчета об использовании материалов.

На основании пункта 2.1.2 договора № 1 подрядчик обязуется до 25-го числа текущего месяца предоставлять заказчику заявку на получение материалов на следующий месяц с указанием наименования, единицы измерения и необходимого количества материалов в соответствии с договором и проектной документацией. В пределах объемов, указанных заявке на месяц, подрядчик обязуется еженедельно, до 15 часов четверга каждой недели, подавать заказчику заявку на получение материалов на следующую неделю, с указанием наименования материалов, единицы измерения к необходимого количества материалов.

В силу пункта 2.1.3 договора № 1 подрядчик обязуется предоставить заказчику до 25 -го числа текущего месяца доверенность на получение материалов по унифицированной форме М-2 на лицо, уполномоченное принимать материалы, а также обеспечить на весь период выполнения договорных обязательств постоянное присутствие указанного лица на объекте.

Пунктом 2.1.5 договора № 1 установлено, что полученные подрядчиком и не использованные в процессе выполнения работ материалы остаются у подрядчика. Подрядчик обязуется оплатить полученные материалы по цене, указанной в счете-фактуре заказчика.

Согласно пункту 2.1 договора № 2 заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить дорожные работы на объекте: "Жилой комплекс №6 в Ш квартале жилого района "Новоостровский" г.Красноярск. Жилой дом №6.2 и инженерное обеспечение", расположенный по адресу: Красноярский край. г.Красноярск, ул .Профсоюзов. 3 на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0200196:3065. РнС №24~КЦ243 08000-23-2022 от 11.02.2022 (шифр проекта 510-01-21-АР2).

В соответствии с пунктом 2.1.1 договора № 2 подрядчик выполняет работы из своих материалов и из материалов заказчика. Заказчик передает материалы по заявке подрядчика по накладной (форма М-15). Подрядчик обязан провести приемку полученных материалов в момент их получения и не вправе ссылаться после приемки на недостатки материалов, за исключением случая, если недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала. Подрядчик обязан использовать полученные материалы экономно и расчетливо, одновременно с предоставлением форм КС-2, КС-3 и отчета об использовании материала. 

На основании пункта 2.1.2 договора № 2 подрядчик обязуется до 25-го числа текущего месяца предоставлять заказчику заявку на получение материалов на следующий месяц с указанием наименования, единицы измерения и необходимого количества материалов в соответствии с договором и проектной документацией. В пределах объемов, указанных заявке на месяц, подрядчик обязуется еженедельно, до 15 часов четверга каждой недели, подавать заказчику заявку на получение материалов на следующую неделю, с указанием наименования материалов, единицы измерения и необходимого количества.

В силу пункта 2.1.3 договора № 2 подрядчик обязуется предоставить заказчику до 25-го числа текущего месяца доверенность на получение материалов по унифицированной форме М-2 на лицо, уполномоченное принимать материалы, а также обеспечить на весь период выполнения договорных обязательств постоянное присутствие указанного лица на объекте.

Пунктом 2.1.5 договора № 2 предусмотрено, что полученные подрядчиком и не использованные в процессе выполнения работ материалы остаются у подрядчика. Подрядчик обязуется оплатить полученные материалы по цене, указанной в счете-фактуре заказчика.

В рамках договоров заказчик передал подрядчику по накладной на отпуск материалов 510 тонн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II (договор № 1 от 30.03.2023) и по накладной №ДББН-000506 на отпуск материалов на сторону - 650 тонн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II (договор № 2 от 30.03.2023). 

Всего подрядчику передано 1160 тонн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II.

Согласно строке 15 (столбец 8) Отчета о списании материалов по форме М-29 по объекту: Жилой комплекс №6 в III квартале жилого района «Новоостровский» г. Красноярск. Жилые дома № 6.1, 6.2 и инженерное обеспечение по ОСВ 6.2 (договор подряда №2 от 30.03.2023) подрядчиком использовано 

по ОСВ 6.1 (договор подряда №1 от 30.03.2023) подрядчиком использовано отчитался за 25,57 тн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II, 

по ОСВ 6.2 - 650 тн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II. 

Отчет об использовании асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка в количестве 484,43 тн. подрядчиком не представлен.

Стоимость неиспользованного материала составила: 484,43 тонн х 5 571,57 руб. = 3 238 842,79 руб., с учетом НДС 20%.

По накладным № ДББН-00325 от 01.07.2023 заказчик передал подрядчику поддоны в количестве 24 штуки, № ДББН-00585 от 31.10.2023 в количестве 12 штук.

Отчет об использовании материалов заказчику подрядчиком не предоставлен.  

В претензии № 70 от 22.04.2024 заказчик просил подрядчика возместить стоимость полученных материалов в общей сумме 1 806 087,94 руб. Претензия направлена подрядчику Почтой России 22.04.2024 (список внутренних почтовых отправлений).

Претензия оставлена без исполнения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких - условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Отказ от исполнения обязательств, изменение условий обязательств в одностороннем порядке статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается. 

Между обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дубровинский» (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) заключены договоры № и №2 от 30.03.2023. 

В силу пункта 2.1 договора № 1 заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить дорожные работы на объекте: "Жилой комплекс № 6 в III квартале жилого района "Новоостровский" г. Красноярск. Жилой дом №6.1 и инженерное обеспечение", расположенный по адресу: 

<

...>. 3 на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0200196:3065 и 24:50:0200196:3071. РнС №24-КЦ243080П0-23-2022 от 11.02.2022 (шифр проекта 510-01-21-АР1).

Пункту 2.1 договора № 2 установлено, что заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить дорожные работы на объекте: "Жилой комплекс №6 в Ш квартале жилого района "Новоостровский" г.Красноярск. Жилой дом №6.2 и инженерное обеспечение", расположенный по адресу: Красноярский край. г.Красноярск, ул .Профсоюзов. 3 на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0200196:3065. РнС №24~КЦ243 08000-23-2022 от 11.02.2022 (шифр проекта 510-01-21-АР2).

Заключенные между сторонами договоры по своей правовой природе являются договорами подряда, правоотношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

На основании пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Согласно пункту 1 статьи 704 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. В силу пункта 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала. В соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. 

В соответствии с пунктами 2.1.1 договоров № 1 и № 2 подрядчик выполняет работы из своих материалов и из материалов заказчика. Заказчик передает материалы по заявке подрядчика по накладной (форма М-15). Подрядчик обязан провести приемку полученных материалов в момент их получения и не вправе ссылаться после приемки на недостатки материалов, за исключением случая, если недостатки материала могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала. Подрядчик обязан использовать полученные материалы экономно и расчетливо, одновременно с предоставлением форм КС-2, КС-3 предоставить отчет об использовании материалов.

На основании пунктов 2.1.2 договоров № 1 и № 2 подрядчик обязуется до 25-го числа текущего месяца предоставлять заказчику заявку на получение материалов на следующий месяц с указанием наименования, единицы измерения и необходимого количества материалов в соответствии с договором и проектной документацией. В пределах объемов, указанных заявке на месяц, подрядчик обязуется еженедельно, до 15 часов четверга каждой недели, подавать заказчику заявку на получение материалов на следующую неделю, с указанием наименования материалов, единицы измерения к необходимого количества материалов.

В силу пунктов 2.1.3 договоров № 1 и № 2 подрядчик обязуется предоставить заказчику до 25-го числа текущего месяца доверенность на получение материалов по унифицированной форме М-2 на лицо, уполномоченное принимать материалы, а также обеспечить на весь период выполнения договорных обязательств постоянное присутствие указанного лица на объекте.

В рамках договоров заказчик передал подрядчику по накладной на отпуск материалов 510 тонн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II (договор № 1 от 30.03.2023) и по накладной №ДББН-000506 на отпуск материалов на сторону - 650 тонн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II (договор № 2 от 30.03.2023). 

Всего подрядчику передано 1160 тонн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II.

Согласно строке 15 (столбец 8) Отчета о списании материалов по форме М-29 по объекту: Жилой комплекс №6 в III квартале жилого района «Новоостровский» г. Красноярск. Жилые дома № 6.1, 6.2 и инженерное обеспечение по ОСВ 6.2 (договор подряда №2 от 30.03.2023) подрядчиком использовано 

по ОСВ 6.1 (договор подряда №1 от 30.03.2023) подрядчиком использовано отчитался за 25,57 тн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II, 

по ОСВ 6.2 - 650 тн асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка II. 

Отчет об использовании асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б марка в количестве 484,43 тн. подрядчиком не представлен.

Стоимость неиспользованного материала составила: 484,43 тонн х 5 571,57 руб. = 3 238 842,79 руб., с учетом НДС 20%.

По накладным № ДББН-00325 от 01.07.2023 заказчик передал подрядчику поддоны в количестве 24 штуки, № ДББН-00585 от 31.10.2023 в количестве 12 штук.

Отчет об использовании материалов заказчику подрядчиком не предоставлен.  

Пунктами 2.1.5 договоров № 1 и № 2 установлено, что полученные подрядчиком и не использованные в процессе выполнения работ материалы остаются у подрядчика. Подрядчик обязуется оплатить полученные материалы по цене, указанной в счете-фактуре заказчика. 

Ответчику выставлена счет-фактура № 42 от 20.03.2024 - стоимость невозвращенного материала определена истцом в размере 1 806 087,94 руб. Таким образом, с учетом условий договоров ответчик обязан возвратить истцу указанную сумму. 

С учетом бремени доказывания по заявленным требованиям факт использования материала без остатка либо наличия неизрасходованного материала и возможности его возврата в натуре подлежит доказыванию подрядчиком, на которого нормой статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагается обязательство представить отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.

Ответчик наличие невозвращенных давальческих материалов и их стоимость не оспорил. Доказательств передачи истцу неиспользованных материалов - не представил. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (пункт 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Соблюдение претензионного порядка подтверждается претензией № 70 от 22.04.2024, направленной ответчику Почтой России 22.04.2024.

На основании изложенного, суд считает требование истца подлежащим удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 31 061,00 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, дата регистрации 03.09.2018) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дубровинский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 10.12.2021) 1 806 087,94 руб. задолженности, 31 061,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щёлокова