И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-218692/23-63-998

04 декабря 2023г.

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 04 декабря 2023 года

 

Арбитражный суд  г. Москвы

в составе судьи Ликшикова Э.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ", 107031, 

<

...>, СТР.5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2002, ИНН: 

<

***>

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР", 123103, 

<

...>, КАБИНЕТ 203, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2006, ИНН: 

<

***>

о взыскании 1628903 руб. 14 коп.

при участии: согласно протоколу 

 

У С Т А Н О В И Л:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ", 107031, 

<

...>, СТР.5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2002, ИНН: 

<

***> обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР", 123103, 

<

...>, КАБИНЕТ 203, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2006, ИНН: 

<

***> о взыскании суммы задолженности в размере 43049 руб. 26 коп., неустойки за период с 02.10.2022 по 22.11.2023 в размере 469498 руб. 69 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.10.2022 по 27.09.2023 в размере 3464 руб. 58 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.09.2023 по дату фактического исполнения обязательств ( с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ). 

В судебном заседание объявлялся перерыв до 29.11.2023 до 14 час. 30 мин.

Представиетль ответчика в судебное заседание после перерыва не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в связи с чем, спор рассматривается в отсутствие представителя овтетчика в порядке ст.ст.123,156 АПК РФ.

До вынесения судом решения по делу истец заявил ходатайство просил принять отказ от части требования о взыскании суммы основного долга в размере 1125896 руб. 15 коп.

Рассмотрев заявление о частичном отказе от исковых требований, суд руководствуясь статей 49, 150 АПК РФ, принимает отказ от части требования о взыскании суммы основного долга в размере 1125896 руб. 15 коп.

В остальной части истец поддержал исковые требования в полном объеме с учетом уточнения исковых требований.

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителя истца, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материала дела между ООО «Комплекс «Серебряный бор», выступавшим на стороне заказчика, и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», выступавшим на стороне генерального подрядчика, был заключен Договор от 01.02.2022 № НС-21, по которому АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» приняло обязательства выполнить электромонтажные работы на новом павильоне ресепшн и прилегающем к нему парковочном пространстве конноспортивного комплекса и передать результат таких электромонтажных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор», а ООО «Комплекс «Серебряный бор» приняло обязательства принять такой результат электромонтажных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и оплатить выполненные электромонтажные работы АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается самим Договором от 01.02.2022 № НС-21 и Дополнительным соглашением от 01.08.2022 № 1.

Во исполнение Договора от 01.02.2022 № НС-21: выполнило электромонтажные работы на денежную сумму, равняющуюся 1 721 970,7 рубля, и передало такие электромонтажные работы ООО «Комплекс «Серебряный бор», что подтверждается Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.04.2022 № 1, Актом о приемке выполненных работ и затрат от 31.07.2022 № 2 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 31.08.2022 № 3; выставило соответствующие счета и счета-фактуры ООО «Комплекс «Серебряный бор», что подтверждается Счетом от 30.04.2022 № 61, Счетом от 31.07.2022 № 113, Счетом от 31.08.2022 № 119, Счетом-фактурой от 30.04.2022 № 102, Счетом-фактурой от 31.07.2022 № 161 и Счетом-фактурой от 31.08.2022 № 172.

ООО «Комплекс «Серебряный бор»: приняло электромонтажные работы на денежную сумму, равняющуюся 1 721 970,7 рубля, от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» без указания на существование отступлений Договора от 01.02.2022 № НС-21 и на иные недостатки в выполненных электромонтажных работах, что подтверждается Актом о приемке выполненных  работ и затрат от 30.04.2022 № 1, Актом о приемке выполненных работ и затрат от 31.07.2022 № 2 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 31.08.2022 №3; приняло результат выполненных электромонтажных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Актом приемки сетей электромонтажных работ новый ресепшн от 26.08.2022.

С принятием электромонтажных работ на денежную сумму, равняющуюся 1 721 970,7 рубля, от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникли обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1 721 970,7 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ. Причем в силу пункта 4.3. Договора от 01.02.2022 № НС-21, соответствующие части такой денежной суммы подлежали уплате АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ООО «Комплекс «Серебряный бор» в оплату выполненных электромонтажных работ в течение 10 календарных дней со дней, следующих за днями выставления, соответственно, Счета от 30.04.2022 № 61, Счета от 31.07.2022 № 113 и Счета от 31.08.2022 № 119 ООО «Комплекс «Серебряный бор» АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ».

ООО «Комплекс «Серебряный бор» прекратило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1721970,7 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ, которые несло ООО «Комплекс «Серебряный бор», в части, равняющейся 86 098,53 рубля, удержав денежную сумму, равняющуюся 86 098,53 рубля, у АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в качестве гарантийного резерва, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.04.2022 № 1, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.07.2022 № 2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2022 №3, которые прилагаются к данному Исковому заявлению. После таких удержаний ООО «Комплекс «Серебряный бор» продолжило нести обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1 635 872,17 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» прекратило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1 635 872,17 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ, которые несло ООО «Комплекс «Серебряный бор», в части, равняющейся 509 976,02 рубля, уплатив денежную сумму, равняющуюся 509 976,02 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ, что подтверждается Платежным поручением от 16.06.2022 № 4733, которое прилагается к данному Исковому заявлению. После такого платежа ООО «Комплекс «Серебряный бор» продолжило нести обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1125 896,15 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ.

По состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1 125 896,15 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ. Как следствие, по состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» имеет долг, равняющийся 1125 896,15 рубля, перед АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Калькуляцией величины долга по оплате выполненных электромонтажных работ от 27.09.2023.

Приняв электромонтажные работы на денежную сумму, равняющуюся 1 721 970,7 рубля, от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» без указания на существование отступлений Договора от 01.02.2022 № НС-21 и на иные недостатки в выполненных работах, ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, согласилось с тем, что АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» выполнило электромонтажные работы на денежную сумму, равняющуюся 1 721 970,7 рубля, и передало такие электромонтажные работы и результат этих электромонтажных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор». Следовательно, на основании пункта 1 статьи 746 ГК РФ  ООО «Комплекс «Серебряный бор» стало должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 1 721 970,7 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ в сроки, определенные в пункте 4.3. Договора от 01.02.2022 № НС-21.

Прекратив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1 721 970,7 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ только в части, равняющейся 596 074,55 рубля, и не исполнив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1  125 896,15 рубля, АО    «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ»     в     оплату     выполненных электромонтажных работ по состоянию на 27.09.2023, ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, односторонне отказалось от исполнения обязательства, что является недопустимым в силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ. Следовательно, согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 1125 896,15 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ.

Между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» достигнуто согласие о сроке оплаты выполненных работ.

Оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется. Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом, пропорционально суммы, авансового платежа. (пункт 4.3. Договора от 01.02.2022 № НС-21).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом, или договором.» (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» существует согласие о договорной неустойке, которую ответчик должно уплатить истцу в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, выполненных работ по настоящему Договору на срок более тридцати дней Генеральный подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Генеральному подрядчику неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.» (подпункт 19.3.1. Договора от  01.02.2022 № НС-21).

С принятием выполненных электромонтажных работ на денежную сумму, равняющуюся 1721 970,7 рубля, от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникли обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1721 970,7 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 01.02.2022 № НС-21, а именно - в течение 10 календарных дней со дней, следующих за днями выставления, соответственно, Счета от 30.04.2022 № 61, Счета от 31.07.2022 №113 и Счетом от 31.08.2022 №119, ООО «Комплекс «Серебряный бор» АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до, соответственно, 10.05.2022,10.08.2022 и 10.09.2022, что подтверждается Договором от 01.02.2022 № НС-21, Счетом от 30.04.2022 № 61, Счетом от 31.07.2022 № 113 и Счетом от 31.08.2022 № 119.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 1721970,7 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 01.02.2022 № НС-21. Не существует никаких доказательств обратного.

В заключенном между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» Договоре от 01.02.2022 № СС22КПП предусматривается договорная неустойка, которую ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в случае нарушения сроков оплаты выполненных электромонтажных работ, что подтверждается подпунктом 19.3.1. Договора от 01.02.2022 № НС-21.

По состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 456 255,5 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату предусмотренной в пункте 19.3.1. Договора от 01.02.2022 № НС-21 договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных электромонтажных работ в течение периода времени, начиная с 11.05.2022 и заканчивая 27.09.2023, что подтверждается Калькуляцией величины договорной неустойки от 27.09.2023,

Не исполнив обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся 1721970,7 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 01.02.2022 № НС-21, на основании пункта 1 статьи 329 и пункта 1 статьи 330 ГК и подпункта 19.3.1. Договора от 01.02.2022 № НС-21 ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 456 255,5 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных электромонтажных работ в течение периода времени, начиная с 11.05.2022 и заканчивая 27.09.2023.

Кроме того, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить исчисляемую, исходя из ставки, равняющейся 0,1% за каждый день просрочки, денежную сумму АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» за просрочку оплаты выполненных электромонтажных работ в течение периода времени, начиная с 28.09.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 1 12.5 896,15 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных электромонтажных работ.

Также, между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» существует согласие о сроке возвращения 1-й части гарантийного резерва.

Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:

в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) - в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

оставшаяся часть в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.» (пункт 4.2. Договора от 01.02.2022 №НС-21).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим. Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.» (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приняло результат выполненных электромонтажных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Актом приемки сетей электромонтажных работ новый ресепшн от 26.08.2022.

С принятием результата выполненных электромонтажных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникла обязанность уплатить денежную сумму, равняющуюся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва. Причем в силу пункта 4.2. Договора от 01.02.2022 № НС-21, такая денежная сумма подлежала уплате АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ООО «Комплекс «Серебряный бор» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта приемки сетей электромонтажных работ новый ресепшн от 26.08.2022 между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до 05.09.2022.

По состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва и, как следствие, ООО «Комплекс «Серебряный бор» имеет долг, равняющийся 43 049,26 рубля, перед АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Калькуляцией величины долга по возвращению 1-й части гарантийного резерва от 27.09.2023.

Приняв        результат        выполненных        электромонтажных       работ        от        АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, согласилось с тем, что АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» передало результат выполненных электромонтажных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор». Следовательно, в силу пункта 4.2. Договора от 01.02.2022 № НС-21 ООО «Комплекс «Серебряный бор» стало должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, определенный в пункте 4.2. Договора от 01.02.2022 № НС-21, а именно - в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта приемки сетей электромонтажных работ новый ресепшн от 26.08.2022 между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до 05.09.2022.

Не исполнив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-й части гарантийного резерва по состоянию на 27.09.2023, ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, односторонне отказалось от исполнения обязательства, что является недопустимым в силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ. Следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 310 ГК, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-й части гарантийного резерва.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приняло результат выполненных электромонтажных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Актом приемки сетей электромонтажных работ новый ресепшн от 26.08.2022.

С принятием результата выполненных электромонтажных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИЬЖИНИРИНГ» у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникла обязанность уплатить денежную сумму, равняющуюся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва. Причем в силу пункта 4.2. Договора от 01.02.2022 № НС-21, такая денежная сумма подлежала уплате АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ООО «Комплекс «Серебряный бор» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта приемки сетей электромонтажных работ новый ресепшн от 26.08.2022 между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до 05.09.2022.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, предусмотренный в пункте 4.2. Договора от 01.02.2022 № НС-21. Не существует никаких доказательств обратного.

В гражданском законодательстве предусматриваются проценты за пользование чужими деньгами, которые ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в случае нарушения срока возвращения 1-й части гарантийного резерва.

По состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 3 702,23 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 06.09.2022 и заканчивая 27.09.2023, что подтверждается Калькуляцией величины процентов за незаконное пользование чужими деньгами от 27.09.2023.

Кроме того, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить исчисляемую, исходя из ключевой ставки, денежную сумму АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва, начиная с 28.09.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой часта гарантийного резерва

АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» считает, что АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» вправе требовать присуждения ООО «Комплекс «Серебряный бор» к уплате денежной суммы, равняющейся 3 702,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 06.09.2022 и заканчивая 27.09.2023, и к уплате исчисляемой исходя из ключевой ставки, денежной суммы АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 28.09.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 43 049,26 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-й части гарантийного резерва.

Ответчик ссылается на пункт 9.1 и 17.2 Договора, приводит довод о том, что по мнению АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» сдача результата работ в окончательном виде является Акт приемки электромонтажных работ от 26.08.2022.

Согласно пункту 15.1 Договора, сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленных за отчетный период на основании исполнительной документации и локальных смет к исполнительной документации. АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» осуществляли сдачу-приемку выполненных работ согласно пункту 15.1 Договора, что подтверждается подписанными Актами по форме № КС-2, КС-3, что подтверждает принятие ООО «Комплекс «Серебряный бор» выполненных АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» комплекс строительно-монтажных работы на объекте КПП на территории «Конноспортивного комплекса» по адресу: Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, владение «Изумрудный лес». Следовательно, такой довод ООО «Комплекс «Серебряный бор» не содержит основания для оставления иска без удовлетворения.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приводит довод о том, что с учетом положений пункта 19.3.1 Договора, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» неправильно указало начало течения сроков возникновения задолженности. Однако, оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально суммы авансового платежа.» (пункт 4.3 Договора). В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по Договору на срок более тридцати дней Генеральный подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Генеральному подрядчику неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки (пункт 19.3.1 Договора). Иными словами, оплата выполненных работ должна быть произведена в течение десяти календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально суммы авансового платежа, но у Заказчика есть не более тридцати дней на оплату выполненных строительно-монтажных работ без начисления процентов. Если в течение тридцати дней Заказчик не оплатит выполненные работы, проценты начисляются с 11 дня, следующего за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально суммы авансового платежа. Соответственно, такой довод ООО «Комплекс «Серебряный бор» не содержит основания для оставления иска без удовлетворения.

  Также ответчик ссылается на то, что подпадает под мораторий, введенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497, при этом не ссылается ни на одно доказательство того, что ООО «Комплекс «Серебряный бор» пострадало от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497. 

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приводит довод о том, что АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» не провело испытаний инженерных систем, которые АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» должно было провести в соответствии с Договором. Согласно Акту приемки сетей электромонтажных работ Новый ресепшн от 26.08.2022, ООО  «Комплекс «Серебряный бор» провело приемку сетей наружного освещения совместно с инженером-энергетиком, и сеть наружного освещения выполнена согласно утверждённому проекту. Соответственно такой довод   ООО «Комплекс «Серебряный бор» не содержит основания для оставления иска без удовлетворения.

Также ООО «Комплекс «Серебряный бор», ссылаясь на пункты 4.2. и 19.8. Договора, приводит довод о том, что на гарантийный резерв проценты не подлежат начислению. ООО «Комплекс «Серебряный бор» неправильно толкует пункты 4.2 и 19.8 Договора, которые касаются только процентов за законное пользование чужими деньгами и не касаются процентов за незаконное пользование чужими деньгами. Более того, обязанность должника уплачивать проценты за незаконное пользование чужими деньгами не может быть отменена соглашением сторон, поскольку пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не является диспозитивным. В иске АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» просит суд, в частности, присудить ООО «Комплекс «Серебряный бор» к уплате процентов за незаконное пользование чужими деньгами, а не процентов за законное пользование чужими деньгами. Следовательно, такой довод ООО «Комплекс «Серебряный бор» не содержит основания для оставления иска без удовлетворения.

             Учитывая вышеизложенное, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

             В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине.    

Руководствуясь ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 395, 702, 711  ГК РФ, ст. ст. 41, 49, 65, 68, 71, 75, 110, 123, 150, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

                   

Р Е Ш И Л:

Производство по делу №А40-218692/2023-63-998 в части взыскания задолженности в размере 1125896 руб. 15 коп., прекратить.

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР", 123103, 

<

...>, КАБИНЕТ 203, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2006, ИНН: 

<

***> в пользу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ", 107031, 

<

...>, СТР.5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2002, ИНН: 

<

***> сумму задолженности в размере 43049 (Сорок три тысячи сорок девять) руб. 26 коп., неустойку за период с 02.10.2022 по 22.11.2023 в размере 469498 (Четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 69 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.10.2022 по 27.09.2023 в размере 3464 (Три тысячи четыреста шестьдесят четыре) руб. 58 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28.09.2023 по дату фактического исполнения обязательств, а также расходы по госпошлине в размере 29289 (Двадцать девять тысяч двести восемьдесят девять рублей 00 копеек) руб.  00 коп.

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР", 123103, 

<

...>, КАБИНЕТ 203, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2006, ИНН: 

<

***> в доход федерального бюджета расходы по госпошлине в размере 130 (Сто тридцать) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

 

      СУДЬЯ                                                                                            Э.Б. Ликшиков