Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-5559/2019

г. Хабаровск

30 мая 2019 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 29.05.2019.

Арбитражный  суд  Хабаровского  края  в  составе  судьи Е.Е. Яцышиной,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.Н. Картавой,  

рассмотрев дело по иску министерства строительства Хабаровского края (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>, место нахождения:  680000, 

<

...>)

к  федеральному  государственному  унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление №6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680000, 

<

...>)

о расторжении договоров №20 от 01.08.2018, №13 от 16.12.2009 и о взыскании 429 656 080 руб.,

третье лицо – временный управляющий ФИО1, 

при  участии  в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 24.09.18 №24,       

установил:

Министерство строительства Хабаровского края обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к федеральному  государственному  унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление №6» о расторжении договоров №13 от 16.12.2009 и №20 от 01.08.2008, а также о взыскании оплаты по договорам №13 от 16.12.2009 и №20 от 429 656 080 руб.

        Определением суда от 29.04.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора,  привлечен арбитражный управляющий ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» ФИО3.

Ответчик третье лицо, надлежащим образом уведомленные о месте и времени  судебного заседания явку  своих представителей не обеспечили, возражений относительно заявленных требований не представили.

Исследовав  материалы  дела, доводы истца, суд  установил  следующее.

08.08.2008 между истцом (инвестор) и ответчиком (заказчик-застройщик) был заключен №20, предметом которого в соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 15.03.2005 №61 и на основании п.25 перечня объектов капитального строительства краевой государственной собственности, финансируемых за счет средств краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства хабаровского края от 15.09.2007 №179-пр, является инвестирование доли строительства «Ливневого коллектора» и «Очистных сооружений поверхностного стока производительностью 2400 м3/сутки» в объекте капитального строительства «Жилые дома с объектами соцкульбыта по ул. Краснореченская – ул. Ипподромная- ул. ФИО4 в Индустриальном районе г. Хабаровска» (раздел 1 договора). 

Цена договора не подлежит изменению в течение его срока действия и составляет 150 003 880 руб. (п.2.1).

Инвестор обязуется оплатить цену договора путем перечисления заказчику-застройщику на его банковские реквизиты денежных средств в сумме 150 003 880 руб. в срок до 10 августа 2018 года (п.2.2).

Согласно пункту 2.4 срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2009.

В соответствии с пунктом 3.2.3 заказчик-застройщик подготавливает и направляет в течение 14 рабочих дней после подписания сторонами передаточного акта инвестору соглашение об исполнении договора в доле средств инвестора и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (или нотариально удостоверенные копии этого разрешения) в 2-х экземплярах.

Обязательства заказчика-застройщика считаются исполненными с момента передачи инвестору результатов инвестирования по договору и документов, предусмотренных пунктом 3.2.3 договора (п.4.1).

16.12.2009 между  истцом (инвестор) и ответчиком (заказчик-застройщик) был  заключен №13, предметом которого является инвестирование доли строительства объекта:  «Очистные сооружения поверхностных стоков с территории в границах улиц Индустриальная, Краснореченская, ФИО4, им. Павла Морозова, Юнгов – Амурской протоки и районов, прилегающих к ней» в целях реализации мероприятий краевой целевой программы  «Жилище» на 2007-2010 гг., утвержденной законом Хабаровского края от 29 ноября 2006 г. №74, в порядке, установленном  Постановлением Губернатора Хабаровского края от 15 марта 2005 г. №61 «О порядке предоставления жителям хабаровского края государственной поддержки при строительстве жилья на условиях ипотеки, с привлечением бюджетных средств" и»на основании п.16 Перечня объектов капитального строительства краевой государственной собственности, финансируемых за счет средств краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 12.09.2008 №215-пр. (раздел 1 договора). 

Цена договора  ориентировочно составляет 250 000 000 руб. и подлежит уточнению после утверждения проектно-сметной документации(п.2.1).

Инвестор обязуется оплатить аванс путем перечисления заказчику-застройщику на его банковские реквизиты денежных средств в сумме 129 652 200 руб. в срок до 25 декабря 2009 года. Оставшуюся часть инвестор обязуется оплатить в срок до 01 апреля 2010 года (п.2.2).

Согласно пункту 2.4 договора срок завершения строительства объекта не позднее декабря 2012 года. Срок получения разрешения на ввод  в эксплуатацию декабрь 2012 года.

В соответствии с пунктом 3.2.3 заказчик-застройщик передает объект после подписания сторонами передаточного акта инвестору, соглашение об исполнении договора в срок не позднее 1-го квартала 2013 г. и копию разрешения на ввод в эксплуатацию в 2-х экземплярах.

Обязательства заказчика-застройщика считаются исполненными с момента передачи инвестору результатов инвестирования по договору и документов, предусмотренных пунктом 3.2.3 договора (п.4.1).

28.05.2010 сторонами подписано дополнительное соглашение к договору №13 от 16.12.2009, согласно которому пункт 2.1 договора изложен в следующей редакции: «Цена договора составляет 279 652 200 руб. Оставшуюся часть цены договора в размере 150 000 000 руб. инвестор обязуется оплатить в срок до 01 июля 2010 года».

       Истец в рамках исполнения договоров №13 от 16.12.2009 и №20 от 01.08.2008 перечислил ответчику денежные средства по платежным поручениям от №126 от 17.06.2010 на сумму 150 000 000 руб., №379 от 29.12.2009 на сумму 129 652 200 руб., №217 от 05.08.2008 на сумму 150 003 880 руб.

       Нарушение сроков исполнения обязательств по договорам послужило основанием обращения в адрес ответчика предложения о расторжении  договоров и претензию о возврате денежных средств от 19.02.2019 исх. №06.2.14-1485. 

        Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  

 Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).

Установленный статьей 452 ГК РФ досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден.

        Представленные суду истцом доказательства свидетельствуют о том, что предусмотренные договором обязательства в установленный срок в полном объеме не выполнены. Ответчиком позиция истца не оспорена.

        Учитывая установленные обстоятельства, нарушение ответчиком условий договоров (п.п.2.4, 3.2, 4.1) а следует признать существенным нарушением. 

        В связи с этим исковое требование истца о расторжении договоров является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании статей 309, 310, 450, 452 ГК РФ.

        Кроме того истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в виде перечисления денежных средств, перечисленных в рамках договоров №13 от 16.12.2009 и №20 от 429 656 080 руб.

        Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 09.06.2017 в отношении ФГУП «ГВСУ № 6» введена процедура наблюдения. Определением (резолютивная часть от 28.02.2018) в отношении ФГУП «ГВСУ № 6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>) введено внешнее управление сроком на 18 месяцев.

        В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», денежное обязательство должника по возврату или возмещению стоимости неосновательного обогащения для целей квалификации в качестве текущего платежа считается возникшим с момента фактического приобретения или сбережения имущества должником за счет кредитора (статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

        Согласно разъяснениям, данным в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63, при расторжении договора, исполнение по которому было предоставлено кредитором до возбуждения дела о банкротстве, в том числе, когда такое расторжение произошло по инициативе кредитора в связи с допущенным должником нарушением, все выраженные в деньгах требования кредитора к должнику квалифицируются для целей Закона о банкротстве как требования, подлежащие включению в реестр требований кредиторов.

      Таким образом, требование, основанное на передаче должнику денежных средств, имеющих характер предварительной оплаты и произведенное до возбуждения дела о банкротстве, подлежит квалификации в качестве реестрового и подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве должника, что является, согласно п.4 ч.1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием оставления требования без рассмотрения.

          Руководствуясь статьями 148, 284, 286 – 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договоры №13 от 16.12.2009 и №20 от 01.08.2008, заключенный между  министерством строительства Хабаровского края (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>, место нахождения:  680000, 

<

...>) и федеральным  государственным  унитарным  предприятием «Главное военно-строительное управление №6».

       Требование о взыскании  неосновательного обогащения оставить без рассмотрения.

       Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

      Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

                Судья                                                      Е.Е. Яцышина