Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А32-46945/2022

г. Краснодар

08 июня 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2023 года

Полный текст решения изготовлен 08 июня 2023 года

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Администрации муниципального образования «Город Адыгейск», Республика Адыгея, г. Адыгейск (ИНН 

<

***>), 

к обществу с ограниченной ответственностью "АрхСтройМонтажИнвест", г. Краснодар (ИНН 

<

***>), 

об обязании, 

 

при участии в арбитражном процессе: 

от истца: ФИО2, по доверенности, 

от ответчика: ФИО3, по доверенности,

при ведении аудиозаписи,

 

                                                           У С Т А Н О В И Л:

 

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» (далее – истец, администрация) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АрхСтройМонтажИнвест» (далее – ответчик, общество) 

об обязании по муниципальному контракту № А.2021.00601 от 26.03.2021 года на выполнение работ по объекту «Строительство сетей водоотведения (канализации) на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейска (ул. Ким, Краснодарская, ФИО4, Мира, ФИО5, Советская)»: Устранить недостатки работ: По улице Мира в городе Адыгейске:

возле домовладения № 11/2 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 12 кв.м.;

возле домовладения № 9/2 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 10 кв.м.;

возле домовладения № 9/1 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 9 кв.м.;

возле домовладения № 7/1 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 8 кв.м.;

возле домовладения № 1/2 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 6 кв.м.;

возле многоквартирного дома № 12 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 15 кв.м.

По улице ФИО4 в городе Адыгейске:

возле домовладения № 27 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 4 кв.м.;

на пересечении ул. ФИО4 и ул. Богузоковой - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 6 кв.м.;

на пересечении ул. ФИО6 и ул. Коммунистическая - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 6 кв.м.

По улице Краснодарская в городе Адыгейске:

возле домовладения № 44 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 7 кв.м.;

возле домовладения № 38 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 8 кв.м.;

возле домовладения № 34 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 6 кв.м.;

пересечение ул. Краснодарская и Советская - разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 6 кв.м.

По ул. Ким в городе Адыгейске:

возле домовладения № 70 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 4,6 кв.м.;

возле домовладения № 64 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 7,25 кв.м.;

возле домовладения № 60 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 2 кв.м.;

возле домовладения № 56 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 3 кв.м.;

возле домовладения № 50 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 6,7 кв.м.;

возле домовладения № 46 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 9.4 кв.м.;

возле домовладения № 40 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 9.5 кв.м.

возле домовладения № 36 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 3 кв.м.

возле домовладения № 30 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 4,5 кв.м.

возле домовладения № 26 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 9,7 кв.м.

возле домовладения № 22 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 6 кв.м.;

возле домовладения № 18 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 4 кв.м.;

возле домовладения № 12 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 5 кв.м.;

возле домовладения № 6 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 3 кв.м.;

возле домовладения № 2 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 2 кв.м.;

возле домовладения № 7 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 3 кв.м.;

возле домовладения № 1 - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 4 кв.м.;

на пересечении ул. Ким и ул. Ленинохабльская - разборка асфальтобетона 10 см, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 9 кв.м.;

на пересечении ул. Ким и ул. Ленинохабльская - разборка бетонных плит дорожных, разборка основания щебеночного 30 см, устройство основания щебеночного 30 см, устройство асфальтобетона в 2 слоя общей толщиной 10 см. Общая площадь участка ремонтно-восстановительных работ 9 кв.м.

Устранить застой воды глубиной до 40 см в канализационных колодцах № № 10, 11,13,14/1,15,16,18, 21, 21/2, 22, 23,24, 25,28, 49.

Представитель истца настаивает на удовлетворении исковых требований. В материалы дела поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы; поставлены следующие вопросы:

1. Соответствует ли качество выполненных строительно-монтажных работ строительным правилам и нормам? Если нет, то какие имеются отступления от требований, ухудшающих качество работ? 

2. Являются ли выполненные отступления следствием нарушения технологии выполнения указанных работ в процессе строительства или эти недостатки вызваны другими причинами? 

3. Определить состояние сетей водоотведения (канализации) на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейска ( ул.Ким, Краснодарская, Коммунистическая, ФИО4, Мира).

Представитель ответчика возражает против удовлетворения исковых требований.

В судебном заседании 22.05.2023 указанное ходатайство принято к рассмотрению, объявлен перерыв до 29.05.2023 до 14-05 часов.

После перерыва заседание продолжено.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 29.05.2023 объявлен перерыв до 05.06.2023 до 10-20 часов.

После перерыва заседание продолжено.

Представитель истца заявил ходатайство о частичном отказе от исковых требований в части обязания устранить недостатки работ по разборке и восстановлению асфальтобетонного покрытия на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейска (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая, ФИО4, Мира, ФИО5, Советская)»:

В части обязания выполнения работ по устранению застоя воды глубиной до 40 см в канализационных колодцах № № 10, 11, 13, 14/1, 15, 16, 18, 21, 21/2, 22, 23, 24, 25, 28, 49 на требования настаивает.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Настоящий отказ принимается судом, так как не нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле, и третьих лиц. Производство по делу в указанной части подлежит прекращению применительно к ст. 150 АПК РФ.

Ответчик представил правовую позицию по делу, указал, что признает обязанность в рамках гарантийных обязательств устранить застой воды глубиной до 40 см в канализационных колодцах № № 10, 11,1 3, 14/1, 15, 16, 18, 21, 21/2, 22, 23, 24, 25, 28, 49.

Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично (ч. 3 ст. 49 АПК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, установил следующее. 

Между администрацией муниципального образования «Город Адыгейск» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «АрхСтройМонтажИнвест» (Подрядчик) 26.03.2021 был заключен муниципальный контракт № А.2021.00601 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство сетей водоотведения (канализации) на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейска (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая, ФИО4, Мира, ФИО5, Советская)» (далее - Контракт), в соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательства выполнить все предусмотренные проектной документацией строительно-монтажные работы и иные предусмотренные Контрактом мероприятия по строительству объекта капитального строительства, указанного в пункте 1.2 Контракта (далее - работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязался принять Объект и уплатить определенную Контрактом цену.

В силу пункта 9.1. Контракта подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 9.3 Контракта.

Согласно п. 3.1 Контракта установлена цена Контракта - 49 903 645 руб.

Пунктом 5 локальных сметных расчетов № 02-01-01 и № 02-01-02, являющихся Приложением № 1 к Контракту, предусмотрена разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия: участок № 1 (уд. Ким, ул. Советская (от ул. Ким до ул. Брантова), ул. Краснодарская), участок № 2 (ул. Коммунистическая, ул. ФИО4, ул. Л. Богузоковой, ул. Мира).

В силу п. 2.2 Контракта срок начала строительства Объекта с даты подписания акта о передаче строительной площадки. Срок окончания строительства Объекта (конечный срок) - в течение 91 календарного дня с даты подписания акта о передаче строительной площадки.

Пунктом 9.3 Контракта установлен гарантийный срок:

- на инженерные системы и технологические сооружения - 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта;

- на строительно-монтажные работы - 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

В период гарантийной эксплуатации объекта в ходе визуального осмотра объекта на предмет выполнения работ специалистами МУП «Водоканал» были выявлены недостатки (дефекты), в связи с чем, администрацией подрядчику были направлены претензионные письма с требованиями об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств (08.09.2021 исх. № 01.26-1307, 23.11.2021г. исх. № 01.26-1634, 29.11.2021 № 01.26-1656, 30.11.2021 исх. № 01.26-1659).

К исполнению обязательств по устранению недостатков, выявленных в гарантийный период, Подрядчик не приступил, недостатки в добровольном порядке не устранил.

Администрацией Подрядчику неоднократно направлялись письма о направлении представителя для совместного обследования Объекта (от 13.04.2011г. № 01.26-944, от 08.06.2022 № 01.26-1263, от 15.06.2022 № 01.26-1295).

22 июля 2022 года Комиссией по обследованию автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Адыгейск» произведен визуальный осмотр технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Мира, ФИО4, ФИО6, Краснодарской, Кима. По результатам осмотра составлен акт обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Адыгейск». Согласно акту выявлены повреждения, а именно, просадочность и сетка трещин в местах прокладки канализационной сети по улицам: Мира, ФИО4, ФИО6, Краснодарская и Ким.

11 августа 2022 года Комиссией из работников администрации муниципального образования «Город Адыгейск» и МУП «Водоканал» произведен осмотр состояния канализационных сетей по улицам: Ким, Краснодарская, ФИО4. По результатам осмотра составлен акт обследования технического состояния системы канализации по ул. Ким, ул. Краснодарская в г. Адыгейске. Согласно акту установлено, что в канализационных колодцах № № 10, 11, 13, 14/1, 15, 16, 18, 21, 21/2, 22, 23, 24, 25, 28, 49 имеется застой воды глубиной до 40 см. При заливе дополнительного объема из автоцистерны в канализационную систему наблюдается свободное движение воды, что указывает на отсутствие засоров в трубах и наличие отклонения уклонов на отдельных участках. Эксплуатация с указанными отклонениями невозможна из-за заиливания участков в местах застоя стоков.

В адрес администрации муниципального образования «Город Адыгейск» поступило представление Межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» о принятии мер по устранению выявленных в ходе обследования состояния улично-дорожной сети города Адыгейска нарушений, а именно: устранить дефект проезжей части в соответствии с п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» в городе Адыгейске, в том числе на улицах Мира, ФИО4, ФИО6, Краснодарская и Ким.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Проверив и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы

• (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статье 768 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия (ст. 754 ГК РФ). 

Пунктом 2 статьи 737 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен.

Согласно пункту 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Статьей 722 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Согласно пункту 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

--безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

--соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

--возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Согласно пункту 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В силу статьи 756 Гражданского кодекса Российской Федерации при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет. 

В соответствии с п. 9.1 Контракта подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных а пределах гарантийного срока, установленного пунктом 9.3 Контракта.

Согласно пункту 9.3 Контракта, гарантийный срок устанавливается:

- на инженерные системы и технологические сооружения - 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта; 

- на строительно-монтажные работы 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

В соответствии с п. 9.5 контракта, подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, надлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Из материалов дела следует, что Подрядчиком нарушены условия муниципального контракта; согласно акту обследования технического состояния системы канализации по ул. Ким, ул. Краснодарская в г. Адыгейске, в канализационных колодцах № № 10, 11, 13, 14/1, 15, 16, 18, 21, 21/2, 22, 23, 24, 25, 28, 49 имеется застой воды глубиной до 40 см. При заливе дополнительного объема из автоцистерны в канализационную систему наблюдается свободное движение воды, что указывает на отсутствие засоров в трубах и наличие отклонения уклонов на отдельных участках. 

Гарантийные обязательства ответчиком по контракту не исполнены.

В рассматриваемом случае, недостатки проведенных работ выявлены в пределах гарантийного срока, предложения об их устранении предъявлены также в рамках гарантийного срока. 

Представленными истцом в материалы дела документами подтвержден факт наличия недостатков, и возложения обязанности по их устранению на подрядчика.

Согласно правовой позиции, отраженной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 8127/13, лица, участвующие в деле обязаны соблюдать принципы арбитражного процесса по опровержению доказательств, представленных другой стороной.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком доводы, на которые ссылается истец, не опровергнуты, доказательств устранения недостатков работ не представлено.

При таких обстоятельствах, исковые требования истца об обязании ООО «АрхСтройМонтажИнвест» исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту путем устранения недостатков работ по устранению застоя воды глубиной до 40 см в канализационных колодцах № № 10, 11,13,14/1,15,16,18, 21, 21/2, 22, 23,24, 25,28, 49 являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истец на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины.

Размер подлежащей уплате государственной пошлины, с учетом заявленных требований, составляет 6 000 руб.

Таким образом, государственная пошлина в размере 6 000 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Кроме того, истцом представлено платежное поручение о перечислении на депозитный счет Арбитражного суда Краснодарского края за проведение экспертизы денежных средств в размере 150 000 руб. (платежное поручение от 26.05.2023 № 831926), однако данные денежные средства, согласно указанному платежному поручению на депозитный счет суда не поступили, по причине неверного указания в платежном поручении «кода». В связи с чем, указанную сумму вернуть плательщику – истцу по делу не представляется возможным.

Поскольку экспертиза не проводилась, указанные денежные средства подлежат возврату истцу.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 41, 49, 82, 110, 150-151, 156, 163, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца о частичном отказе от исковых требований в части обязания устранить недостатки работ по разборке и восстановлению асфальтобетонного покрытия на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейска (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая, ФИО4, Мира, ФИО5, Советская)» - удовлетворить.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "АрхСтройМонтажИнвест" (ИНН 

<

***>) исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту №А.2021.00601 от 26.03.2021 путем устранения недостатков работ, а именно: устранить застой воды глубиной до 40 см в канализационных колодцах № № 10, 11,13,14/1,15,16,18, 21, 21/2, 22, 23,24, 25,28, 49.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АрхСтройМонтажИнвест" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

 

Судья                                                                                                           Д.Ю. Поляков