АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-26340/2023

г. Уфа

26 марта 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Проскуряковой С. В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску Администрации городского поселения город Ишимбай  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инфодор-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании ответчика устранить недостатки в виде шелушения и просадки  асфальтобетонного покрытия, разрушения обочин, выбоин асфальтного покрытия,  продольных и поперечных трещин, разрушение бортовых камней (141 шт.) по указанной в  контракте улице;  

о взыскании штрафа в сумме 579 963 руб. 92 коп. 

третье лицо акционерное общество «Башкиравтодор» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации городского поселения город Ишимбай  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Инфодор-Строй» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента вступления  в законную силу решения суда, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному  контракту № 0101200002319000397_164749 от 06.01.2020 устранить следующие  недостатки:  

- колея глубиной более 3 см. на площади 525 кв.м, путем фрезерования покрытия  на толщину до 5 см с розливом вяжущих материалов и укладкой нового слоя  асфальтобетонного покрытия;  

- выбоины, проломы на покрытии проезжей части общей площадью 78 кв.м,  одиночные трещины общей длиной 495 м, путем проведения ямочного ремонта покрытия  

асфальтобетонной смесью и заделкой трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную  битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением;  

- разрушение бортовых камней в количестве 139 шт., путем их демонтажа и  установкой новых бортовых камней на бетонном основании, с восстановлением  асфальтобетонного покрытия в местах замены бортовых камней.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инфодор-Строй» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации городского поселения город  Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф в размере 579 963 руб. 92 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инфодор-Строй» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 20 599 руб. 00 коп.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья С.В. Проскурякова