1710/2022-69452(3) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-4020/2022 

от 14 июля 2022 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "АС-Групп" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 14 дней со дня вступления решения суда в  законную силу устранить недостатки работ по проведению капитального ремонта фасада  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, по договору на выполнение работ по капитальному ремонту №  FKR17031700058/82 от 10.08.2017, а именно: произвести следующие виды работ:  

 №  пп  

Вид работ 

 

Едм. 

 

Кол. 

 

изм. 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

Ремонт фасада 

1 

отбивка штукатурки (отслоение на участках низа цоколя на углах  

 

м2 

 

4 

 

около подъезда № 1 дворовой фасад и главный фасад)  

 

2 

штукатурка (отслоение на участках низа цоколя на углах около  

 

м2 

 

4 

 

подъезда № 1 дворовой фасад и главный фасад) 

 

3 

грунтовка (участки отслоения шпаклевки и окраски по периметру  

 

м2 

 

15 

 

цоколя, тяги над цоколем, и главном фасаде справа от подъезда № 1  

 

над 1 этажом) 

 

4 

шпаклевка (участки отслоения шпаклевки и окраски по периметру  

 

м2 

 

15 

 

цоколя, тяги над цоколем, и главном фасаде справа от подъезда № 1  

 

над 1 этажом) 

 

5 

 

Окраска (участки отслоения шпаклевки и окраски по периметру  

 

м2 

 

15 

 

цоколя, тяги над цоколем, и главном фасаде справа от подъезда № 1  

 

над 1 этажом) 

 

6 

 

Окраска балконных плит (нижние и боковые поверхности 

 

м2 

 

9 

 

балконов 2 и 3 этажей над подъездом № 2 дворовой фасад и  

 

балкона 3 этажа главный фасад слева от входа в подъезд № 2) 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АС-Групп" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение расходов по государственной  пошлине, 70 руб. 80 коп. судебных издержек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АС-Групп" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку на случай неисполнения в  установленный срок судебного акта в размере 700 руб. за каждый день неисполнения.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.А. Козлова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 6:23:27

Кому выдана Козлова Мария Андреевна