РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 30 июля 2025 года по делу А33-13142/2025 Красноярск  

«30» июля 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.6719.23 от 09.01.2024,  

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта «Земельный участок с нежилыми зданиями»:  

- нежилое здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 48 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>;  

- нежилое здание (гараж для легковых автомобилей с бытовыми помещениями и комнатами отдыха для водителей), общей площадью 1236,8 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500254:220, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, путем выполнения следующих действий:  

Организационные мероприятия: Подготовка технических условий на технологическое присоединение. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя. 

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.  

Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную Документацию в соответствии с Положением о составе разделе проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с Действующим законодательством.  

Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ Березовская (КЭС) с установкой 3 (третьего) силового трансформатора (ЗТ) 110/35/6 кВ номиналом не менее 40 МВА. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом.  

1-я точка присоединения (основная, существующая): 

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

2-я точка присоединения (резервная, проектируемая): Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки 16 резерв РУ-6 кВ РП-76, до границы, установленной правоустанавливающими Документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.  

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО 20/40» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В случае неисполнения решения суда взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО 20/40» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 500 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья М.Ю. Винокурова