Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-8353/2019

г. Рязань

24 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17 июля 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 24 июля 2020 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Кураксиной О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (ОГРН 

<

***>, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Промышленные коммуникации" (ОГРН 

<

***>, г. Рязань, район Южный промузел, д.6А)

о взыскании по договору № 09-10/0416/102 от 15.04.2016 штрафов в общем размере 5512 руб. и неустойки в размере 4988 руб. 68 коп., по договору № 10/0815-16/239 от 10.08.2016 неустойки в размере 24515 руб. 79 коп. и штрафа в размере 205170 руб., по договору № 10/0115/8 от 22.01.2016 штрафа в размере 5000 руб.,

в судебном заседании 16.07.2020 было объявлено о перерыве до 17.07.2020 до 16 час. 20 мин., после перерыва судебное заседание продолжено,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2   -представитель по доверенности от 04.12.2019 (срок действия доверенности 1 год), диплом Московского института экономики, менеджмента  и права, БВС 1621907 квалификация юрист по специальности "Юриспруденция", регистрационный номер 14678 от 16.02.2007, 

от ответчика: ФИО3 -  директор ООО "Промышленные коммуникации" на основании протокола общего собрания участников общества № 16 от 31.08.2016,

установил:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области обратился в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Промышленные коммуникации" с требованием о взыскании по договору № 09-10/0416/102 от 15.04.2016 штрафов в общем размере 5512 руб. и неустойки в размере 4988 руб. 68 коп., по договору № 10/0815-16/239 от 10.08.2016 неустойки в размере 24515 руб. 79 коп. и штрафа в размере 205170 руб., по договору № 10/0115/8 от 22.01.2016 штрафа в размере 5000 руб.

Определением суда от 17.09.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования.

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства.

Наличие данного основания подтверждается следующими обстоятельствами: от ответчика в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, в котором общество с ограниченной ответственностью "Промышленные коммуникации" просит суд отказать в удовлетворении исковых требований, поясняя, что несвоевременная сдача работ произошла по вине истца, по причине предоставления проектной документации с нарушением срока и ненадлежащего качества. 

Ответчиком в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации заявлено о снижении неустойки.

Определением от 11.11.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Истец в судебном заседании поддержал требования в полном объеме.

Ответчик по заявленным требованиям возражал, поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, оценив и исследовав представленные в дело доказательства, заслушав доводы представителей истца и ответчика, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению частично. При этом суд исходит из следующего.

15 апреля 2016 года между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Промышленные коммуникации" (подрядчик) заключен договор №09-10/0416/102 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  (т.1, л.д. 12-17), по условиям которого в соответствии с результатами проведенного отбора (итоговый протокол №2 проведения отбора №86 и подведения итогов отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области от 07 апреля 2016), заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - объект(ы) по адресам и видам работ, указанным в Приложении №1 к настоящему договору (пункт 1.1 договора).

В силу пункта 1.3 договора наименование, объемы и содержание работ определяется техническими заданиями (приложение №1) и сметами (приложение №2), прилагаемыми к договору, являющимися его неотъемлемой частью.

В пунктах 1.4, 1.4.1 договора указано, что подписывая настоящий договор, подрядчик подтверждает, что несет полную ответственность за выполнение работ по договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ определяется сметами, проверенными органом, уполномоченным на проведение проверки сметной стоимости, являющимися неотъемлемой частью договора (приложение №2  и составляет 2756000 руб., без налога НДС и изменению не подлежит. Стоимость работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях №1 и №2. Проверка сметы в уполномоченном органе возлагается на подрядчика. Цена договора включает в себя стоимость материалов и оборудования, все расходы, которые могут возникнуть у подрядчика при выполнении работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством. Источники финансирования работ определяются заказчиком в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016гг., утвержденным постановлением Правительства Рязанской области № 10 от 28.01.2015 г. 

В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 25.07.2016 общая стоимость работ по настоящему договору определяется сметами, проверенными органами, уполномоченными на проведение проверки сметной стоимости, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2) и составляет 2494346 руб. 72 коп. Стоимость работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях №1 и №2.

Согласно пункту 2.2 договора расчет по настоящему договору производится на основании согласованных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчет производится не позднее 30 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ сторонами, и согласования его с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и с представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома, в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ, и акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества - рабочей (приемочной) комиссией, по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме, в соответствии с п. 5 ч.2 ст. 182 ЖК РФ , на основании счета, выставленного подрядчиком.

Согласование акта о приемке выполненных работ с лицами, указанными в п.2.2 настоящего договора производится подрядчиком (пункт 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора дата начала выполнения работ: с даты заключения договора 15.04.2016. Срок выполнения работ - 107 календарных дней. Сроки выполнения работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указаны в графиках производства работ (приложение №4).

01.08.2016 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ №05 на сумму 169010 руб. 93 коп. и №04 на сумму 2325335 руб. 79 коп. (т. 1, л.д.19-26).

Согласно пункту 9.1 договора, в случае нарушения срока выполнения работ по договору, подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту каждого объекта, предусмотренного приложением №1 к договору, по которому нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные п. 3.1 договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

14.03.2018 истец направил ответчику претензию №3/2244 от 12.03.2018 (т. 1, л.д. 27-28) с требованием оплатить неустойку, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

В соответствии с пунктом 3.2 договора изменение сроков выполнения отдельных видов, указанных в графиках производства работ (Приложение №4), согласовывается с заказчиком. Изменение подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в графиках производства работ (Приложение №4) без согласования с заказчиком влечет применение заказчиком мер, предусмотренных п. 9.6 и п. 9.8 настоящего договора.

Согласно пункта 9.6 договора в случае нарушения требований, предусмотренных п. 3.2 настоящего договора, подрядчик обязуется уплатить заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора, по письменному требованию заказчику.

19.03.2018 истец направил ответчику претензии №3/2478 от 16.03.2018 и №3/2474 от 16.03.2018 с требованием об уплате штрафа в общей сумме 5512 руб.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

10 августа 2016 года между Фондом капитального ремонта много-квартирных домов Рязанской области (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Промышленные коммуникации" (подрядчик) заключен договор №10/0815-16/239 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  (т.1, л.д. 53-59), по условиям которого в соответствии с результатами проведенного отбора (итоговый протокол №2 проведения отбора №113 и подведения итогов отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области от 19 июля 2016), заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - объект(ы) по адресам и видам работ, указанным в Приложении №1 к настоящему договору (пункт 1.1 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 10.11.2016 общая стоимость работ по настоящему договору определяется сметами, проверенными органами, уполномоченными на проведение проверки сметной стоимости, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2) и составляет 6463027 руб. 44 коп. Стоимость работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях №1 и №2.

В силу пункта 1.3 договора наименование, объемы и содержание работ определяется техническими заданиями (приложение №1) и сметами (приложение №2), прилагаемыми к договору, являющимися его неотъемлемой частью.

В пунктах 1.4, 1.4.1 договора указано, что подписывая настоящий договор, подрядчик подтверждает, что несет полную ответственность за выполнение работ по договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ определяется сметами, проверенными органом, уполномоченным на проведение проверки сметной стоимости, являющимися неотъемлемой частью договора (приложение №2) и составляет 6839000 руб., без налога НДС и изменению не подлежит. Стоимость работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях №1 и №2. Проверка сметы в уполномоченном органе возлагается на подрядчика. Цена договора включает в себя стоимость материалов и оборудования, все расходы, которые могут возникнуть у подрядчика при выполнении работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством. Источники финансирования работ определяются заказчиком в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016гг., утвержденным постановлением Правительства Рязанской области № 10 от 28.01.2015 г. 

В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 10.11.2016 общая стоимость работ по настоящему договору определяется сметами, проверенными органами, уполномоченными на проведение проверки сметной стоимости, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2) и составляет 6463027 руб. 44 коп. Стоимость работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях №1 и №2.

Согласно пункту 2.2 договора расчет по настоящему договору производится на основании согласованных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчет производится не позднее 30 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ сторонами, и согласования его с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и с представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома, в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ, и акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества - рабочей (приемочной) комиссией, по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме, в соответствии с п. 5 ч.2 ст. 182 ЖК РФ, на основании счета, выставленного подрядчиком.

Согласование акта о приемке выполненных работ с лицами, указанными в п.2.2 настоящего договора производится подрядчиком (пункт 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора дата начала выполнения работ: с даты заключения договора 10.08.2016. Срок выполнения работ - 67 календарных дней. Сроки выполнения работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указаны в графиках производства работ (приложение №4).

18.11.2016 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ №10 на сумму 1306686 руб. 15 коп. и №10 на сумму 1505793 руб. 80 коп., №08 на сумму 1337281 руб. 17 коп., №07 на сумму 1239378 руб. 40 коп., №06 на сумму 1036255 руб. 06 коп. (т. 1, л.д. 61-71). 

Согласно пункту 9.1 договора, в случае нарушения срока выполнения работ по договору, подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту каждого объекта, предусмотренного приложением №1 к договору, по которому нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные п. 3.1 договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

14.03.2018 истец направил ответчику претензию №3/2225 от 12.03.2018 (т. 1, л.д. 72-73) с требованием уплатить неустойку, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

В соответствии с пунктом 3.2 договора изменение сроков выполнения отдельных видов, указанных в графиках производства работ (Приложение №4), согласовывается с заказчиком. Изменение подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в графиках производства работ (Приложение №4) без согласования с заказчиком влечет применение заказчиком мер, предусмотренных п. 9.6 и п. 9.8 настоящего договора.

Согласно пункта 9.6 договора в случае использования подрядчиком материалов, не соответствующих характеристикам, указанным в техническом задании и (или) проектной документации и (или) имеющих ограничения к применению по температурно-влажному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения. Заказчик инициирует составление акта о нарушении подрядчиком требований технологического задания, являющегося неотъемлемой частью договора. Подрядчик обязуется уплатить заказчику штраф в размере 3% от стоимости договора и немедленно приостановить выполнение данного вида работ.

19.03.2018 истец направил ответчику претензию №3/2473 от 16.03.2018 с требованием об уплате штрафа в сумме 205170 руб.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

22 января 2016 года между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Промышленные коммуникации" (подрядчик) заключен договор №10/0115/8  на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  (т.1, л.д. 83-88), по условиям которого в соответствии с результатами проведенного отбора (протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе №70 и определения претендентов, допущенных к участию в отборе (признание претендента участником отбора) от 14 января 2016), заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - объект(ы) по адресам и видам работ, указанным в Приложении №1 к настоящему договору (пункт 1.1 договора).

В силу пункта 1.3 договора наименование, объемы и содержание работ определяется техническими заданиями (приложение №1) и сметами (приложение №2), прилагаемыми к договору, являющимися его неотъемлемой частью.

В пунктах 1.4, 1.4.1 договора указано, что подписывая настоящий договор, подрядчик подтверждает, что несет полную ответственность за выполнение работ по договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ определяется сметами, проверенными органом, уполномоченным на проведение проверки сметной стоимости, являющимися неотъемлемой частью договора (приложение №2), и составляет 2740000 руб. без налога НДС и изменению не подлежит. Стоимость работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях №1 и №2. Проверка сметы в уполномоченном органе возлагается на подрядчика. Цена договора включает в себя стоимость материалов и оборудования, все расходы, которые могут возникнуть у подрядчика при выполнении работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством. Источники финансирования работ определяются заказчиком в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016гг., утвержденным постановлением Правительства Рязанской области № 10 от 28.01.2015 г. 

В соответствии с дополнительным соглашением №2 от 07.06.2016 общая стоимость работ по настоящему договору определяется сметами, проверенными органами, уполномоченными на проведение проверки сметной стоимости, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2) и составляет 2229735 руб. 87 коп. Стоимость работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях №1 и №2.

Согласно пункту 2.2 договора расчет по настоящему договору производится на основании согласованных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчет производится не позднее 30 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ сторонами, и согласования его с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и с представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома, в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ, и акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества - рабочей (приемочной) комиссией, по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме, в соответствии с п. 5 ч.2 ст. 182 ЖК РФ , на основании счета, выставленного подрядчиком.

Согласование акта о приемке выполненных работ с лицами, указанными в п.2.2 настоящего договора производится подрядчиком (пункт 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора дата начала выполнения работ: с даты заключения договора 22.01.2016. Срок выполнения работ - 145 календарных дней. Сроки выполнения работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указаны в графиках производства работ (приложение №4).

В соответствии с пунктом 5.1.9 договора подрядчик обязан не менее, чем за два дня уведомлять заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль на основании договора с заказчиком, о необходимости освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Приступать к выполнению последующих работ только после надлежаще оформленного акта освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Согласно пункта 6.2.1 договора скрытые работы, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения подлежат приемке перед производством последующих работ, после надлежащего уведомления за 2 рабочих дня заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль на основании договора с заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта заказчику. Акты подписываются представителями подрядчика, лица, осуществляющего строительный контроль на основании договора с заказчиком и (или) заказчика.

В случае нарушений требований, предусмотренных п. 5.1.9 настоящего договора, подрядчик обязуется уплатить заказчику штраф в размере 5000 руб. по письменному требованию заказчика (пункт 9.4 договора).

14.06.2016 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ №01 на сумму 2229735 руб. 87 коп. (т.1, л.д. 90-95).

14.03.2018 истец направил ответчику претензию №3/2252 от 12.03.2018 (т.1, л.д. 96-97) с требованием уплатить штраф в сумме 5000 руб., которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком требований истца в добровольном порядке послужило основанием для обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в Арбитражный суд Рязанской области с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходит из следующего.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Обязательства сторон возникли из договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах №09-10/0416/102 от 15.04.2016, №10/0815-16/239 от 10.08.2016, №10/0115/8  от 22.01.2016,  которые являются договорами подряда и регулируются нормами главы 37 ГК РФ, а также общими нормами об обязательственных отношениях и договорах.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

Из содержания статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  следует, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В пункте 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

  Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки начисленной за период с 16.10.2016 по 28.10.2016 в сумме 24515 руб. 79 коп. по договору №10/0815-16/239 от 10.08.2016

В соответствии с пунктом 3.1 договора  №10/0815-16/239 от 10.08.2016 дата начала выполнения работ: с даты заключения договора 10.08.2016. Срок выполнения работ - 67 календарных дней. 

Ответчик должен был выполнить работы в соответствии с  пунктом 3.1 договора  №10/0815-16/239 от 10.08.2016 в течении 67 календарных дней, то есть по 15.10.2016 включительно.

Как усматривается из материалов дела, работы по указанному договору выполнены с нарушением срока, установленного договором, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (№10 от 18.11.2016 на сумму 1306686 руб. 15 коп., №10 от  18.11.2016 на сумму 1505793 руб. 80 коп., №08 от 18.11.2016 на сумму 1337281 руб. 17 коп., №07 от 18.11.2016 на сумму 1239378 руб. 40 коп., №06 от 18.11.2016 на сумму 1036255 руб. 06 коп.) Количество дней просрочки составляет 34 дня.

Согласно пункту 9.1 договора, в случае нарушения срока выполнения работ по договору, подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту каждого объекта, предусмотренного приложением №1 к договору, по которому нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные п. 3.1 договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Расчет неустойки судом проверен и признан неверным, в связи с неверным указанием периода начисления.

По расчету суда размер неустойки составляет 24515 руб. 79 коп. за период с 16.10.2016 по 18.11.2016.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в сумме 205170 руб. по договору №10/0815-16/239 от 10.08.2016.

Согласно пункта 9.6 договора в случае использования подрядчиком материалов, не соответствующих характеристикам, указанным в техническом задании и (или) проектной документации и (или) имеющих ограничения к применению по температурно-влажному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения. Заказчик инициирует составление акта о нарушении подрядчиком требований технологического задания, являющегося неотъемлемой частью договора. Подрядчик обязуется уплатить заказчику штраф в размере 3% от стоимости договора и немедленно приостановить выполнение данного вида работ.

В соответствии с пунктом 5.1.6 договора №10/0815-16/239 от 10.08.2016 подрядчик обязан в течении трех рабочих дней с даты подписания настоящего договора согласовать с заказчиком все материалы, используемые подрядчиком для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором в письменном виде.

10.08.2016, 16.08.2016, 19.08.2016, 23.08.2016 ответчиком в Фонд капитального ремонта направлялись письма (№166, №173,  №177, №180) с перечнем материалов и их технических характеристик, планируемых к использованию в процессе капитального ремонта.

Письмом №11/5936 от 24.08.2016 фонд полностью согласовал марки и технические характеристики материалов.

Иных документальных доказательств, подтверждающих довод истца об использовании материалов не соответствующих характеристикам, указанным в техническом задании, в материалы дела не представлено.

Акты приемки подписаны истцом без замечаний.

В связи с чем, в удовлетворении требования о взыскании штрафа по договору №10/0815-16/239 от 10.08.2016 в сумме 205170 руб. следует отказать.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки начисленной за период с 31.07.2016 по 01.08.2016 в сумме 4988 руб. 68 коп. по договору №09-10/0416/102 от 15.04.2016.

В соответствии с пунктом 3.1 договора  №09-10/0416/102 от 15.04.2016 дата начала выполнения работ: с даты заключения договора 15.04.2016. Срок выполнения работ - 107 календарных дней.

Ответчик должен был выполнить работы в соответствии с  пунктом 3.1 договора  №09-10/0416/102 от 15.04.2016 в течении 107 календарных дней, то есть по 01.08.2016 включительно.

01.08.2016 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ №05 на сумму 169010 руб. 93 коп. и №04 на сумму 2325335 руб. 79 коп.

Согласно расчета ответчика неустойка начислена за период с 31.07.2016 по 01.08.2016. Просрочка выполнения работ составляет 2 дня.

Проверив расчет неустойки по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах №09-10/0416/102 от 15.04.2016, суд считает его неверным, поскольку по условиям договора ответчик должен был выполнить работы не позднее 01.08.2016 г., однако последний день срока исполнения обязательства (31.07.2016 г.) является воскресеньем, то есть нерабочим днем. 

Согласно пунктам  3,4 статьи 114 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. В случаях, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

Таким образом, ответчик должен был выполнить работы не позднее 01.08.2016 г.

В связи с чем в удовлетворении требования о взыскании неустойки по договору №09-10/0416/102 от 15.04.2016 в сумме 4988 руб. 68 коп. следует отказать.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 5512 руб. по договору №09-10/0416/102 от 15.04.2016.

В соответствии с пунктом 3.2 договора изменение сроков выполнения отдельных видов, указанных в графиках производства работ (Приложение №4), согласовывается с заказчиком. Изменение подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в графиках производства работ (Приложение №4) без согласования с заказчиком влечет применение заказчиком мер, предусмотренных п. 9.6 и п. 9.8 настоящего договора.

Согласно пункта 9.6 договора в случае нарушения требований, предусмотренных п. 3.2 настоящего договора, подрядчик обязуется уплатить заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора, по письменному требованию заказчику.

Из представленных истцом документов не усматривается какие нарушения, указанные в пункте 3.2 договора, были выявлены истцом в ходе приемки выполненных работ либо после 01.08.2016.

В связи с чем в удовлетворении требования о взыскании штрафа по договору №09-10/0416/102 от 15.04.2016 в сумме 5512 руб. следует отказать.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в сумме 5000 руб. по договору №10/0115/8 от 22.01.2016.

В соответствии с пунктом 5.1.9 договора №10/0115/8 от 22.01.2016 подрядчик обязан не мене, чем за два дня уведомлять заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль на основании договора с заказчиком, о необходимости освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Приступать к выполнению последующих работ только после надлежаще оформленного акта освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Согласно пункта 6.2.1 договора скрытые работы, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения подлежат приемке перед производством последующих работ, после надлежащего уведомления за 2 рабочих дня заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль на основании договора с заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта заказчику. Акты подписываются представителями подрядчика, лица, осуществляющего строительный контроль на основании договора с заказчиком и (или) заказчика.

В случае нарушений требований, предусмотренных п. 5.1.9 настоящего договора, подрядчик обязуется уплатить заказчику штраф в размере 5000 руб. по письменному требованию заказчика (пункт 9.4 договора).

14.06.2016 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ №01 на сумму 2229735 руб. 87 коп.

Ответчику предложено представить доказательств согласования объема и стоимости скрытых работ, проведения соответствующих работ, их сдачи истцу. Однако соответствующие доказательства не были представлены, факт проведения скрытых работ ответчик не отрицает.

Представленный истцом расчет штрафа признан судом верным.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что исковые требования в части взыскания штрафа в сумме 5000 руб. обоснованы и подлежат удовлетворению.

Ссылка истца на письма от августа 2016 судом не принимается, поскольку письма направлены ответчиком по истечении срока выполнения работ.

Ответчиком заявлено о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пунктов 1, 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Как разъяснено в пунктах 69, 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Кодекса).

В силу определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.01.2011 N 11680/10, снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и другое. Оценка соразмерности заявленной к взысканию суммы неустойки и возможности ее уменьшения является правом суда.

Начисление неустойки за нарушение сроков выполненных работ по договору №10/0815-16/239 от 10.08.2016 произведено в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту каждого объекта, предусмотренного приложением №1 к договору, что предусмотрено пунктом 9.1 договора. Указанный размер неустойки не превышает размер штрафных санкций обычно применяемых в гражданском обороте при неисполнении гражданско-правовых обязательств.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Учитывая изложенное, с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 24515 руб. по договору №10/0815-16/239 от 10.08.2016  и штраф в сумме 5000 руб. по договору №10/0115/8 от 22.01.2016.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промышленные коммуникации" (ОГРН 

<

***>, г. Рязань, район Южный промузел, д.6А) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) денежные средства в сумме 29515 руб. 79 коп. и судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 951 руб. 64 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Судья О.В. Кураксина