Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-75/2021

г. Благовещенск

09 марта 2021 года

в соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 09 марта 2021 года. Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2021 года.

Арбитражный суд в составе судьи Чумакова Павла Анатольевича,

рассмотрев в судебном заседании заявление 119 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации

к

обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о привлечении к административной ответственности,

третье лицо: Федеральное казенное учреждение «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

протокол вел: секретарь судебного заседания Максимова А.Н.

при участии в заседании: от ФКУ «Восточный» - ФИО1, по дов. №7 от 11.01.2021, паспорт; ФИО2 генеральный директор, приказ №541-к от 22.09.2020, паспорт; остальные лица - не явились, извещены,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации (далее – заявитель, 119 отдел ГАСН МО РФ, административный орган) с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ответчик, общество, ООО «ПСО «Казань») к административной ответственности по части 3 статьи 9.5 КоАП РФ в виде административного приостановления строительной деятельности на срок до 90 суток.

Требование мотивировано тем, что в ходе проведения проверки ответчика в период с 09.11.2020 по 03.12.2020 выявлены многочисленные факты продолжения строительно-монтажных работ на Объекте до составления актов об устранении выявленных нарушений по ранее выданным предписаниям об устранении нарушений.

Совокупность выявленных нарушений в ходе проведения проверки являются существенными, их наличие влияет на несущую способность конструкций сооружений и может повлиять на надежность и безопасность зданий и сооружений и объекта в целом.

Выявленные нарушения также создают угрозу доступа России в космос со своей территории, формирование и поддержание необходимого состава орбитальных группировок космических средств, средств выведения объектов наземной космической инфраструктуры, обеспечивающих предоставление в требуемом объеме и надлежащего качества услуг в интересах социально-экономической сферы РФ, а также негативно влияют на обороноспособность и безопасность РФ.

119 отдел сослался на наличие отягчающих ответственность общества обстоятельств.

Заявитель дополнительно уточнил требования, просил приостановить строительную деятельность ООО «ПСО «Казань» за нарушения, допущенные при строительстве объекта: Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», Площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный.

Уточнения требований приняты судом к рассмотрению.

119 отдел просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Ответчик в письменном отзыве указал, что обществом предпринимаются все возможные меры по устранению нарушений, указанных в предписаниях 119 отдела ГАСН МО РФ №157/55 от 02.12.2019, №23/15 от 20.03.2020, №42/28 от 23.07.2020, №92/70 от 03.12.2020, ведется работа по выполнению предписаний.

ООО «ПСО «Казань» в настоящее время разработан График предоставления исполнительной документации для проверки заказчику ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А», а также План-график устранения замечаний по предписаниям  119 отдела ГАСН МО РФ.

Объект «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А» является стратегическим объектом и приостановление работ на данном объекте недопустимо, поскольку приостановление работ на строительной площадке может привести к    неблагоприятным последствиям, затягиванию сроков строительства космодрома «Восточный», срыву сроков выполнения и окончания работ.

Ответчик указал, что предписание 119 отдела ГАСН МО РФ №157/55 от 02.12.2019 содержит   22   пункта   нарушений, из   них   18   пунктов   устранены,   по устранению пунктов 4, 14,17 предписания направлено извещение 119 отдела ГАСН МО РФ исх.4130 от 17.09.2020.

Предписание 119 отдела ГАСН МО РФ №23/15 от 20.03.2020 содержит 31 пункт нарушений, из них 1 пункт устранен.

Предписание 119 отдела ГАСН МО РФ №42/28 от 23.07.2020 содержит 47 пунктов нарушений. По устранению пункта 11 предписания направлено извещение в 119 отдел ГАСН МО РФ исх.0424 от 08.02.2021. В адрес Заказчика направлены акты об устранении нарушений по пунктам 23, 24, 25, 26, 47 за исх. 0716 от 02.03.2021, исх.0737 от 03.03.2021.

Предписание 119 отдела ГАСН МО РФ №92/70 от 03.12.2020 содержит 152 пункта нарушений. По устранению пунктов 14, 30, 43, 48, 88, 92, 113, 138, 139, 141, 143, 145 направлены извещения в 119 отдел ГАСН МО РФ за исх. 0403 от 05.02.2021, исх. 0423 от 08.02.2021, исх. 0467 от 10.02.2021, исх. 0494 от 11.02.2021, исх. 0609 от 19.02.2021. В адрес Заказчика направлены акты об устранении нарушений по пунктам 13, 23, 24, 25, 26, 66, 93, 103, 108, 117, 137, 140 за исх. 0410 от 05.02.2021, исх. 0492 от 11.02.2021, исх. 0577 от 17.02.2021, исх. 0716 от 02.03.2021, исх. 0746 от 03.03.2021, исх. 0747 от 03.03.2021. После подписания Заказчиком данных актов об устранении нарушений по предписаниям, ООО «ПСО «Казань» будут направлены извещения об устранении нарушений в 119 Отдел ГАСН МО РФ.

Третье лицо в письменном отзыве указало на то, что создание стартового космического ракетного комплекса «Ангара» является задачей особой государственной важности. Государственными заказчиками комплекса «Ангара» являются Государственная корпорация «РОСКОСМОС» и Минобороны России. Сроки создания объектов первой и второй очереди Космодрома установлены Указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. № 1473с (в редакции от 20 апреля 2020 г. № 278с). Порядок реализации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2016 № 230, утверждена Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы.

Выполнение Федеральной космической программы России разделено на два этапа: 1 этап (2016-2020 годы) и 2 этап (2021-2025 годы). Одним из основных элементов 2 этапа Федеральной космической программы России является создание на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов, а также развертывание работ, связанных с ракетой-носителем тяжелого класса для выведения тяжелых автоматических космических аппаратов, пилотируемых кораблей и орбитальных модулей на траектории полета к Луне, облета Луны и лунных орбит.

Третье лицо указало, что приостановление деятельности ООО «ПСО «Казань», а вместе с тем и строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1» на длительный срок затруднит выполнение приоритетных задач государственной политики в области космической деятельности.

При этом ООО «ПСО Казань» частично устранило нарушения градостроительного законодательства, указанные в предписаниях. Всего в период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года в адрес ООО «ПСО «Казань» 119 отделом ГАСН МО РФ выдано 271 замечание, из них устранено 39 замечаний, не устранено 233 замечания.

В период с января по февраль 2021 г. ООО «ПСО «Казань» предоставила 13 актов об устранении замечаний 119 отдела ГАСН в части неведения общих и специальных журналов работ.

Основная часть замечаний касается отсутствия исполнительной документации, а именно производятся последующие строительно-монтажные работы без составления актов скрытых работ на предыдущие вида работ, в связи с чем 119 отделом ГАСН МО РФ выданы замечания о том, что требуется выполнить работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений в срок до 28.02.2021. По состоянию на сегодняшний день ООО «ПСО «Казань» мероприятия по обследованию не выполнила.

В судебное заседание представители заявителя и ответчика не явились. О времени и месте проведения судебного заседания извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представители третьего лица просили назначить обществу наказание согласно санкции части 3 статьи 9.5 КоАП РФ. Пояснили, что между ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» и ООО «ПСО «Казань» актуализированный график не согласован и не подписан, что является показателем ненадлежащего исполнения со стороны ООО « ПСО «Казань» своих обязательств. Из чего следует, что реальных действий по исполнению исполнительной документации не предпринято.

Заявитель письменно ходатайствовал об отложении судебного заседания в связи с непредставлением третьим лицом письменного отзыва на заявление.

Суд, на основании статьи 159 АПК РФ отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания, поскольку ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» представило письменный отзыв.

В соответствии с положениями статьи 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие заявителя и ответчика.

Заслушав представителей третьих лиц, исследовав материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 04.10.2018 ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» (Заказчик) и ООО «ПСО   «Казань»   (Головной   исполнитель) заключили государственный контракт № 413-СМР003/2018 на выполнение   работ для федеральных государственных нужд  по  объекту:  «Строительство  стартового  комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» Площадка 1».

Из положений государственного контракта следует, что ООО «ПСО «Казань» (Головной исполнитель) является лицом, осуществляющим строительство.

Согласно пункту 7.2.1 Контракта Головной исполнитель обязан выполнять все Работы по настоящему Контракту в соответствии с Техническим заданием, Проектной и Рабочей документацией, условиями Контракта, а также требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных документов в области проектирования и строительства.

На основании приказа начальника 119 отдел ГАСН МО РФ от 19.10.2020 №108 проведена проверка в отношении ООО «ПСО «Казань» при строительстве объекта капитального строительства: «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1».

Согласно уведомлению о вручении, о проведении проверки ООО «ПСО «Казань» уведомлено 27.10.2020.

Проверка проведена в период с 09.11.2020 по 03.12.2020.

В ходе проведения указанной проверки выявлены факты продолжения строительно-монтажных работ на Объекте до составления актов об устранении выявленных нарушений, указанных в предписаниях №157/55 от 02.12.2019, №23/15 от 20.03.2020, №42/28 от 23.07.2020.

Согласно предписанию 119 отдела ГАСН МО РФ №157/55 от 02.12.2019, ООО «ПСО «Казань» допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:

1) В подготовительный период, до начала основного периода строительства, не завершено строительство временного ограждения площадки строительства для предотвращения несанкционированного проникновения в зону производства работ людей и животных, нанесения вреда экологической обстановке, в том числе животному миру. Отсутствует круглосуточная сторожевая охрана.

2) Высота строящегося временного инвентарного ограждения площадки строительства составляет 2м, не соответствует высоте (2,6м) по проектной документации.

3) В подготовительный период, до начала основного периода строительства, не осуществлено строительство сооружения 24Б (установка очистки дождевых сточных вод УСВ-М-20) и сбросного коллектора во избежание нанесения вреда экологической обстановке, в том числе животному и растительному миру, загрязнению подземных и поверхностных вод.

4) Отсутствуют резервуары (объемом 10м3) на противопожарные нужды строящихся сооружений.

5)  Не соблюдаются санитарно-гигиенические требования, на строительной площадке отсутствует фельдшерский пункт, отсутствует питьевая вода.

6) Не исполнено предписание заказчика (ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный») об устранении нарушений при складировании грунта 24: №24 от 18.11.2019.

7) Сооружение 1. По периметру котлована отсутствует временное ограждение.

8) Сооружение 3. По периметру котлована отсутствует временное ограждение.

9) Сооружение 3. Не выполнены мероприятия по защите дна котлована по  периметру сооружения от промерзания. Дефект критический (классификация дефектов по ГОСТ 14467-79).

10) Сооружение 3. Не представлена исполнительная документация на строительно-монтажные работы по сооружению в отметках с-10.450 до-5.250). Строительные работы выполняются до освидетельствования предыдущих этапов работ.

11) Сооружение 3. Не исполнены предписания заказчика (ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный») об устранении нарушений при строительстве сооружения 3: №16 от 07.10.2019, №19 от 14.10.2019, №28 от 20.11.2019, №40 от 21.11.2019.

12) Сооружение 3.1. По периметру котлована отсутствует временное ограждение.

13) Сооружение 3.1. Не выполнены мероприятия по защите дна котлована от промерзания. Дефект критический (классификация дефектов по ГОСТ 14467-79).

14) Сооружение 3.1. Не представлена исполнительная документация на строительно- монтажные работы по сооружению. Строительные работы выполняются до освидетельствования предыдущих этапов работ.

15) Сооружение 3.2. По периметру котлована отсутствует временное ограждение.

16) Сооружение 3.2. Не выполнены мероприятия по защите дна котлована от промерзания. Дефект критический (классификация дефектов по ГОСТ 14467-79).

17) Сооружение 3.2. Не представлена исполнительная документация на строительно-монтажные работы по сооружению. Строительные работы выполняются до освидетельствования предыдущих этапов работ.

18) Сооружение 4. По периметру котлована отсутствует временное ограждение.

19) Сооружение 4. Не выполнены мероприятия по защите дна котлована сооружения от промерзания в осях 1-22/А-П. Дефект критический (классификация дефектов по ГОСТ 14467-79).

20)  Сооружение 4. Не представлена исполнительная документация на армирование фундаментов в осях 1-24/А-П в отметках с - 5.150 до - 0.800, бетонирование фундаментов в  осях 1-27/А-П (по всему сооружению). Строительные работы выполняются до освидетельствования предыдущих этапов работ.

21) Сооружение 4. Не исполнены предписания заказчика (ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный») об устранении нарушений при строительстве сооружения 4: №17 от 07.10.2019, №19 от 14.10.2019, №29 от 21.11.2019.

22) Сооружение 27. Уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти (119 отдел ГАСН МО РФ) не извещен об изменении сроков завершения работ, которые подлежат проверке, в соответствии программы проверок от 30.09.2019.

Срок устранения выявленных нарушений определен предписанием №157/55 в период с 28.12.2019 по 28.02.2020.

Согласно предписанию 119 отдела ГАСН МО РФ №23/15 от 20.03.2020, ООО «ПСО «Казань» допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:

1) Продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1 А» до составления актов об устранении выявленных нарушений (п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20) по предписанию № 157/55 от 02.12.2019.

2) Сооружение 1. Выполняются последующие строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

3) Сооружение 1. Отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки котлована.

4)  Сооружение 3,  3.1,  3.2. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы на сооружении 3 по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (плита перекрытия на отм.-5.650, стены на отм.-5.250, плита перекрытия на отм.-0.450, стены на отм.-0.050, плита покрытия на отм.4.350); на сооружении 3.1 и 3.2 выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по устройству  фундаментной плиты на отм.-11.250, по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (стены в отметках с -10.750 до -2.600, перекрытия на отм.-2.600, тоннели к сооружению 3, стены на отм.-2.000) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность  объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

5) Сооружение 3, 3.1,  3.2. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по сооружению в отметках с -10.450 до -0.450).

6)  Сооружение 4. Выполняются последующие строительно-монтажные работы по монтажу металлоконструкций в осях А-П/11-27 до отм.10.060) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 

7) Сооружение 4. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментов.

8)  Сооружение 7. Выполняются последующие строительно-монтажные работы по обратной засыпке фундаментов до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

9) Сооружение 7. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментов.

10) Сооружение 7.1. Выполнены последующие строительно-монтажные работы по обратной засыпке фундаментов, монтажу резервуаров хранения кислорода и азота до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

11) Сооружение 7.1. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментов ФМ10, ФМ13, Флм1.

12) Сооружение 9Д. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная бетонная плита на отм.-0.400, стены, колоны), устройству опалубки плиты покрытия резервуара до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

13) Сооружение 9Д. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы.

14) Сооружение 24. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментов, обратной засыпке фундаментов до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

15) Сооружение 24. Отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки котлована.

16)  Сооружение Т1. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию железобетонных конструкций (балки на отм.-5.100, стены до отм.-0.250) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

17) Сооружение Т1. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству стен, колон и балок до отм.-4.650.

18) Сооружение Т2. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-13.050, стены, колоны и балки до отм.-9.950, стены до отм.-0.500), гидроизоляции до отм.-10.200 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

19) Сооружение Т2. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы.

20) Сооружение Т3. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (стены, колоны и балки до отм.-6.100 до отм.-6.350, стены до отм.-0.250), гидроизоляции до отм.-6.350 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

21)  Сооружение Т3. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон и балок до отм.-6.100. 

22)  Сооружение Т4. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-7.750, стены, колоны и балки до отм.-4.950, стены до отм.-0.250), гидроизоляции до отм.-5.200 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

23) Сооружение Т4. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы.

24) Сооружение Т5. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-9.150, стены, колоны и балки до отм.-6.250, стены до отм.-0.250), гидроизоляции до отм.-6.500 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

25) Сооружение Т5. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы.

26) Сооружение Т6. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментнаяплита на отм.-7.250, стены, колоны и балки до отм.-4.450, стены до отм.-0.250),гидроизоляции до отм.-4.650 до освидетельствования с составлением соответствующих  актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

27) Сооружение Т6. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы.

28) Сооружение Т7. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-9.250, стены, колоны и балки до отм.-6.150, стены до отм.-0.250) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

29) Сооружение Т7. Выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-9.250, стены, колоны и балки до отм.-6.150, стены до отм.-0.250) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

30) Сооружение Т8. Выполнены последующие строительные работы по разработке котлована до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты  которых влияют на безопасность объекта, но в  соответствии с принятой  технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

31) Сооружение Т8. Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы.

Устранение выявленных предписанием №23/15 нарушений определено в срок до 30.04.2020.

Согласно предписанию 119 отдела ГАСН МО РФ №42/28 от 23.07.2020, ООО «ПСО «Казань» допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:

1) Продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1 А» до составления актов об устранении выявленных нарушений (п.п. 3, 4, 10, 14, 17, 20) по предписанию № 157/55 от 02.12.2019.

2) Продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1 А» до составления актов об устранении выявленных нарушений (п.п. 1-31) по предписанию № 23/15 от 20.03.2020.

3) Сооружение 1: Блок А: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм.-20.750;

Блок Б: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки работ по армированию и бетонированию  железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм.-26.600;

Блок В: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемке работ по армированию и бетонированию  железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм.-24.190.

4) Сооружение 1: 

Блок А: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен до отм.-14.800 до освидетельствованияс составлением соответствующих актов приемки армирования и бетонирования конструкций фундаментной плиты до отм.-20.750, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой  технологией      становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Блок Б: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм.-24.600 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки армирования ибетонирования конструкций фундаментной плиты до отм.-26.600, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся  недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Блок В: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм.-23.590 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки армирования и бетонирования конструкций  фундаментной плиты до отм.-24.190, результаты которых влияют на объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

5) Сооружение 2: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане.

6) Сооружение 2: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию  железобетонных конструкций приямков до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане,  результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований  ст. 53 п. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с. 47 (лист 34).

7) Сооружение 3, 3.1, 3.2: Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по сооружению отм.-0.450 до отм.+4.950 (сооружение 3) и с отм.-2.000 до отм.+2.400 (сооружения 3.1, 3.2).

8) Сооружение 3, 3.1, 3.2.

На сооружении 3: выполнены последующие  строительно-монтажные  работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций плиты покрытия на отм.+4.350 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций стен, выполняются последующие строительно-монтажные работы по обратной засыпке сооружения до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по  армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций стен,  результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

На сооружении 3.1 и 3.2: выполнены последующие строительно-монтажные работы поармированию и бетонированию железобетонных конструкций стен на отм.-2.000 до отм.+1.900 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемкиработ по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций плитыперекрытия на отм.-2.600, выполнены последующие строительно-монтажные работы поармированию и бетонированию железобетонных конструкций плиты покрытия на отм.+1.900 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по  армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций стен с отм.-2.000 до отм.+1.900, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии спринятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

9) Сооружение 4: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по монтажу металлических конструкций каркаса и железобетонной противопожарной стены (Нарушение Требований ст. 52 п. 6, ст. 53 п. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»).

10) Сооружение 4: выполняются последующие строительно-монтажные работы по монтажу  металлоконструкций в осях А-П/1-27 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций фундаментов, устройства гидроизоляции фундаментов, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

11) Сооружение 6: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане.

12) Сооружение 6: выполняются последующие строительно-монтажные работы  по бетонированию фундаментов, обмазочной гидроизоляции, обратной засыпке котлована до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки геодезической разбивки осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

13) Сооружение 9А, 9.1: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане.

14) Сооружение 9А, 9.1:  выполнены последующие строительно-монтажные работы: 9А - по армированию и  бетонированию фундаментной плиты, стен и плиты перекрытия, 9.1 – устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по геодезической разбивки осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с  принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

15) Сооружение 9Б: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане.

16) Сооружение 9Б: выполнены последующие строительно-монтажные работы   по армированию и бетонированию фундаментной плиты, стен, армированию плиты перекрытия  до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по геодезической разбивки осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

17) Сооружение 9Б: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане.

18) Сооружение 9В: выполнены последующие строительно-монтажные работы   по армированию и бетонированию фундаментной плиты, стен и плиты  перекрытия  до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по геодезической разбивки осей, земляных работ выполненных в  котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся  недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

19) Сооружение 9Г: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане.

20) Сооружение 9Г: выполнены последующие строительно-монтажные работы   по устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки геодезической разбивки осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст. 53 п. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с. 47 (лист 34).

21) Сооружения 11/1-11-46, 11/3а, 11/6а, 11/7а: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы, выполненные в котловане.

22) Сооружения 11/1-11-46, 11/3а, 11/6а, 11/7а: 

на участке Т1 - Т2: выполняются последующие         строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию  железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической  разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане,

на участке Т2 – Т3: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты,стен, покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемкипредыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане,

на участке ТЗ - Т4: выполняются последующие     строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты,стен до освидетельствования с составлением        соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане,

на участке Т4 - Т5: выполняются последующие земляные работы в котловане до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ погеодезической разбивке осей, 

на участке Т2 - сооружение 3: выполняются последующие  строительно-монтажные  работы по устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезическойразбивке    осей,    земляных    работ выполненных в котловане, результаты которых  влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятсянедоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

23) Сооружение 16, 16А: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей.

24) Сооружение 16, 16А: выполняются последующие земляные работы в котловане до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

25) Сооружение 21: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы, выполненные в котловане.

26) Сооружение 21: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, армированию стен до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

27) Сооружение 24: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по армированию, бетонированию, гидроизоляции фундаментов.

28) Сооружение 24: выполнены  последующие строительно-монтажные работы по армированию стен резервуаров до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию железобетонной плиты под резервуары, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

29) Сооружение Т1: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству стен, колон, балок, перекрытий и покрытия.

30) Сооружение Т1: выполнены последующие строительно-монтажные работы поармированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен,колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но всоответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля посленачала выполнения последующих работ.

31) Сооружение Т2: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству стен, колон, балок, перекрытий и покрытия.

32)  Сооружение Т2: выполнены последующие строительно-монтажные работы поармированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен,колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но всоответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля посленачала выполнения последующих работ.

33) Сооружение Т3: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия. 

34) Сооружение Т3: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия,  результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

35) Сооружение Т4: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия.

36) Сооружение Т4: выполнены последующие строительно-монтажные работы поармированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкцийфундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия,  результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

37) Сооружение Т5: отсутствует исполнительная документация на земляные работы, выполненные в котловане, устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки, строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия.

38) Сооружение Т5: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих    земляных работ, выполненных в котловане, работ  по устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки, армированию и  бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 

39) Сооружение Т6: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы выполненные в котловане, устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки, строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия.

40) Сооружение Т6: выполнены последующие строительно-монтажные работы поармированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане, устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки, армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

41) Сооружение Т7: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия.

42) Сооружение Т7: выполнены последующие строительно-монтажные работы поармированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок,   перекрытий до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют набезопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

43) Сооружение Т8: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы, выполненные в котловане, устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки, строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия.

44) Сооружение Т8: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия 2 этажа до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ, выполненных в котловане, устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки, по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия,  результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля посленачала выполнения последующих работ. 

45) Сооружение Т9: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы выполненные в котловане, устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки, строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты.

46)  Сооружение Т9: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, армированию стен 1 этажа, до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ, выполненных в котловане, устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки, по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

47) Сооружения 11/1-11-46, 11/3а, 11/6а, 11/7а: на участке Т4 - Т5: Не выполнены мероприятия по отводу поверхностных вод из траншеи. Произошло затопление и размокание основания. Дефект критический (Невыполнение предусмотренных проектом  водопонижения и мероприятий по отводу поверхностных вод, классификация дефектов по ГОСТ 15467-79).

Срок устранения выявленных предписанием  №42/28 нарушений определен до 30.08.2020.

Выявленные в ходе указанной проверки нарушения (не устранение указанных в предписаниях №157/55 от 02.12.2019, №23/15 от 20.03.2020, №42/28 от 23.07.2020 нарушений) отражены в акте проверки № 92/70 от 03.12.2020 и обществу выдано предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капительного строительства № 92/70 от 03.12.2020 со сроком исполнения до 28.02.2021.

Выполнение вышеуказанных строительно-монтажных работ на Объекте до составления актов об устранении нарушений подтверждается разделом 3 общего журнала работ, копии которого приложены к акту проверки.

Согласно акту проверки № 92/70 от 03.12.2020 обществом:

I. Не устранены нарушения по Предписанию № 157/55 от 02.12.2019, а именно:

3. Организация строительства: в подготовительный период, до начала основного периода строительства, не осуществлено строительство сооружения 24Б (установка очистки дождевых сточных вод УСВ-М-20) и сбросного коллектора во избежание нанесения вреда экологической обстановке, в том числе животному и растительному миру, загрязнению подземных и поверхностных вод (Нарушение проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 Проект организации строительства 860/1 А-ПОС Том 6, п.1, с.84-85; Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», Подраздел 2 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства» 860/1А-ООС2, Том 8.2 ПЗ п.5.22 с.20-21 (лист 8-9). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

4. Организация строительства: отсутствуют резервуары (объемом 10м3) на противопожарные нужды строящихся сооружений (Нарушение проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 Проект организации строительства 860/1 А-ПОС Том 6ПЗ , п. 12.4, с.74 (лист 61). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

10. Сооружение 3: не представлена исполнительная документация на строительно-монтажные работы по сооружению в отметках с -10.450 до -5.250). Строительные работы выполняются до освидетельствования предыдущих этапов работ (Нарушение Требований Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», статья 52 п.6). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

20. Сооружение 4: не представлена исполнительная документация на армирование фундаментов в осях 1-24/А-П в отметках с -5.150 до -0.800, бетонирование фундаментов в осях 1-27/А-П (по всему сооружению). Строительные работы выполняются до освидетельствования предыдущих этапов работ (Нарушение Требований Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», статья 52 п.6). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

II. Не устранены нарушения по Предписанию № 23/15 от 20.03.2020,  а именно:

1.       Продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А» до составления актов об устранении выявленных нарушений (п.п. 3, 4, 10, 14, 17, 20) по предписанию № 157/55 от 02.12.2019 (Нарушение требований ст.52 п.6, ст.53. п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

2.       Сооружение 1: выполняются последующие строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ,  результаты  которых  влияют  на безопасность  объекта,  но  в  соответствии с принятой  технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение    Требований   ст. 53    п.4    Федерального   закона   от.   29.12.2004   №   190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018 Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

3.      Сооружение 1: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки котлована (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте   объектов   капитального   строительства   и   требования,    предъявляемые   к   актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

4.       Сооружение 3, 3.1, 3.2: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы на сооружении 3 по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (плита перекрытия на отм.-5.650, стены на отм.-5.250, плита перекрытия на отм.-0.450, стены на отм.-0.050, плита покрытия на отм.4.350); на сооружении 3.1 и 3.2 выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные    работы    по    устройству    фундаментной    плиты    на   отм.-11.250,    по  армированию и бетонированию железобетонных конструкций (стены в отметках с -10.750 до -2.600, перекрытия на отм.-2.600, тоннели к сооружению 3, стены на отм.-2.000) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018. Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

5.      Сооружение 3. 3.1, 3.2: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по сооружению в отметках с -10.450 до -0.450. (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-Т1-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

6.       Сооружение 4: выполняются последующие строительно-монтажные работы по монтажу металлоконструкций в осях А-П/11-27 до отм. 10.060) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п. 4 Федерального закона от 29.12.2004. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018г, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

7. Сооружение 4: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментов (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 №9 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам, освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

8. Сооружение 7: выполняются последующие строительно-монтажные работы по обратной засыпке фундаментов до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п. 4 Федерального закона от 29.12.2004 №9 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018. Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

9. Сооружение 7: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментов (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

10. Сооружение 7.1: выполнены последующие строительно-монтажные работы по обратной засыпке фундаментов, монтажу резервуаров хранения кислорода и азота до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст. 53 п. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

11. Сооружение 7.1: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментов ФМ10, ФМ13, Флм1 (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам, освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

12. Сооружение 9Д: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-0.400, стены, колоны), устройству опалубки плиты покрытия резервуара до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст. 53 п. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018 Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

13. Сооружение 9Д: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

14. Сооружение 24: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментов, обратной засыпке фундаментов до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

16. Сооружение Т1: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию железобетонных конструкций (балки на отм.-5.100, стены до отм.-0.250) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном, ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

17. Сооружение Т1: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству стен, колон и балок до отм.-4.650 (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

18. Сооружение Т2: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-13.050, стены, колоны и балки до отм.-9.950, стены до отм.-0.500), гидроизоляции до отм.-10.200 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы М00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

19. Сооружение Т2: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы (Нарушение  Требований  ст.52 п.6,   ст.53 п.4  Федерального закона от  29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

20. Сооружение Т3: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (стены, колоны и балки до отм.-6.100 до отм.-6.350, стены до отм.-0.250), гидроизоляции до отм.-6.350 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ИЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

21. Сооружение Т3: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плита, стен, колон и балок до отм.-6.100 (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

22. Сооружение Т4: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-7.750, стены, колоны и балки до отм.-4.950, стены до отм.-0.250), гидроизоляции до отм.-5.200 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

23. Сооружение Т4: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

24. Сооружение Т5: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-9.150, стены, колоны и балки до отм.-6.250, стены до отм.-0.250), гидроизоляции до отм.-6.500 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ТВ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

25. Сооружение Т5: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

26. Сооружение Т6: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-7.250, стены, колоны и балки до отм.-4.450, стены до отм.-0.250), гидроизоляции до отм.-4.650 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-107 22/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6173 п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

27. Сооружение Т6: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

28. Сооружение Т7: выполнены и выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций (фундаментная плита на отм.-9.250, стены, колоны и балки до отм.-6.150, стены до отм.-0.250) до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-П-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

29. Сооружение Т7: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

30. Сооружение Т8: выполнены последующие строительные работы по разработке котлована до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

31.     Сооружение Т8: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования,  предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

III. Не устранены нарушения по Предписанию № 42/28 от 23.07.2020:

1. Продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А» до составления актов об устранении выявленных нарушений (п.п. 3, 4, 10, 14, 17, 20) по предписанию № 157/55 от 02.12.2019. (Нарушение требований ст.52 п.6, ст.53. п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

2.       Продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А» до составления актов об устранении выявленных нарушений (п.п. 1-31) по предписанию № 22/15 от 20.03.2020. (Нарушение требований ст.52 п.6, ст.53. п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

3.      Сооружение 1:

Блок А: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм. -20.750;

Блок Б: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм. -26.600;

Блок В: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм. -24.190. (Нарушение  Требований ст.52 п.6,   ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте   объектов   капитального   строительства   и   требования,    предъявляемые   к   актам      освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

4.      Сооружение 1:

Блок А: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен до отм. - 14.800 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки армирования и бетонирования конструкций фундаментной плиты до отм. -20.750, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ,

Блок Б: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм. - 24.600 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки армирования и бетонирования конструкций фундаментной плиты до отм. - 26.600, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после       начала выполнения последующих работ,

Блок В: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию железобетонных конструкций фундаментной плиты до отм. - 23.590 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки армирования и бетонирования конструкций фундаментной плиты до отм. -24.190, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение    Требований   ст.53   п.4    Федерального   закона   от   29.12.2004   №   190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы М00063-18/1ТЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

5.      Сооружение 2: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ,   выполненных в котловане (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

6. Сооружение 2: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию железобетонных конструкций приямков до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст..53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

7. Сооружение 3, 3.1, 3.2: Отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по сооружению с отм. -0.450 до отм. +4.950 (сооружение 3) и с отм. -2.000 до отм. +2.400 (сооружения 3.1, 3.2) (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

8. Сооружение 3, 3.1, 3.2.

На сооружении 3: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций плиты покрытия на отм.+4.350 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций стен с отм.-0.050 до отм. +4.350, выполняются   последующие   строительно-монтажные   работы   по   гидроизоляции   стен            до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций стен, выполняются последующие строительно-монтажные работы по обратной засыпке сооружения до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций стен, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

На сооружении 3.1 и 3.2: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен на отм.-2.000 до отм.+1.900 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций плиты перекрытия на отм.-2.600, выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций плиты покрытия на отм.+1.900 до освидетельствования с составлением   соответствующих   актов   приемки   работ   по   армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций стен с отм.-2.000 до отм.+1.900, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение   Требований ст. 53   п.4   Федерального   закона   от   29.12.2004   №   190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ИЗ п.К) с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

9.       Сооружение 4: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по монтажу металлических конструкций каркаса и железобетонной противопожарной стены (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

10.     Сооружение 4: выполняются последующие строительно-монтажные работы по монтажу металлоконструкций в осях А-П/1-27 до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций фундаментов, устройства гидроизоляции фундаментов, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

11.     Сооружение 6: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

12.     Сооружение 6: выполняются последующие строительно-монтажные работы по бетонированию фундаментов, обмазочной гидроизоляции, обратной засыпке котлована до освидетельствования с составлением  соответствующих  актов  приемки геодезической  разбивки  осей,  земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой   технологией   становятся   недоступными   для   контроля   после   начала   выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6113 п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

13. Сооружение 9А. 9.1: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

14. Сооружение 9А, 9.1: выполнены последующие строительно-монтажные работы: 9А - по армированию и бетонированию фундаментной плиты, стен и плиты перекрытия, 9.1 - устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по геодезической разбивки осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-107 2 2/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

15. Сооружение 9Б: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-Ф3 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

16. Сооружение 9Б: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты, стен, армированию плиты перекрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по геодезической разбивки   осей,   земляных   работ   выполненных   в   котловане,   результаты   которых   влияют   на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля   после   начала   выполнения   последующих   работ   (Нарушение   Требований   ст.53   п.4 Федерального   закона   от   29.12.2004   №   190-ФЗ   «Градостроительный   кодекс   Российской Федерации»;  п.   5.3  РД-11-02-2006  «Требования к  составу  и  порядку ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

17. Сооружение 9В: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

18. Сооружение 9В: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты, стен и плиты перекрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по геодезической разбивки осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

19. Сооружение 9Г: отсутствует исполнительная документация по освидетельствованию и приемки геодезической разбивки осей, земляных работ, выполненных в котловане (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

20. Сооружение 9Г: выполнены последующие строительно-монтажные работы по устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки геодезической разбивки осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст. 53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01   от   16.05.2018,   Раздел   6  «Проект   организации  строительства» 860/1А-ГЮС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

21.    Сооружения 11/1-11-46, 11/3а, 11/6а, 11/7а: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы, выполненные в котловане (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

22.    Сооружения 11/1-11-46, 11/3а, 11/6а, 11/7а:

на участке Т1 - Т2; выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане,

на участке Т2 – Т3: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане,

на участке Т3 - Т4: выполняются последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане,

на участке Т4 - Т5: выполняются последующие земляные работы в котловане до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей,

на участке Т2 - сооружение 3: выполняются последующие строительно-монтажные работы по устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-1'0722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

23.    Сооружение 16, 16А: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей (Нарушение  Требований ст.52  п.6,   ст.53 п.4  Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте   объектов   капитального   строительства   и   требования,    предъявляемые   к   актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

24.    Сооружение 16, 16А: выполняются последующие земляные работы в котловане до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

25. Сооружение 21: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы, выполненные в котловане (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

26. Сооружение 21: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, армированию стен до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам, освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018г, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

27. Сооружение 24: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по армированию, бетонированию, гидроизоляции фундаментов (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном, ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

28. Сооружение 24: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию стен резервуаров до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки работ по армированию и бетонированию железобетонной плиты под резервуары, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального   закона   от   29.12.2004   №   190-ФЗ   «Градостроительный   кодекс   Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

29. Сооружение Т1: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству стен, колон, балок, перекрытий и покрытия (Нарушение Требований ст.52 п. 6, ст. 53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

30. Сооружение Т1: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

31. Сооружение Т2: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству стен, колон, балок, перекрытий и покрытия (Нарушение Требований ст. 52 п. 6, ст. 53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

32.     Сооружение Т2: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального  строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

33. Сооружение Т3: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия (Нарушение Требований ст. 52 п. 6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004  № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

34. Сооружение Т3: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

35. Сооружение Т4: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия (Нарушение Требований ст. 52 п. 6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

36. Сооружение Т4: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения, исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы   №00063 -18/ГГЭ-10722/11-01 от  16.05.2018,  Раздел  6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

37.    Сооружение Т5: отсутствует исполнительная документация на земляные работы, выполненные в котловане, устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки, строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

38. Сооружение Т5: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих земляных работ, выполненных в котловане, работ по устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки, армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05:2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

39. Сооружение Т6: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы выполненные в котловане, устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки, строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх.№3774 от 01.09.2020);

40. Сооружение Т6: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ выполненных в котловане, устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки, армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ТВ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

41. Сооружение Т7: отсутствует исполнительная документация на строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытий и покрытия (Нарушение Требований ст. 5 2 п.6, ст. 53 п. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

42. Сооружение Т7: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций стен, колон, балок, перекрытий до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004  № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-107 22/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

43. Сооружение Т8: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы, выполненные в котловане, устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки, строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты, стен, колой, балок, перекрытий и покрытия (Нарушение Требований ст.52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

44. Сооружение Т8: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия 2 этажа до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ, выполненных в котловане, устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки, по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, стен, колон, балок, перекрытия, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте  объектов  капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

45.     Сооружение Т9: отсутствует исполнительная документация на геодезическую разбивку осей, земляные работы выполненные в котловане, устройство песчаной подсыпки и бетонной подготовки, строительно-монтажные работы по устройству фундаментной плиты (Нарушение Требований ст. 52 п.6, ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

46. Сооружение Т9: выполнены последующие строительно-монтажные работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, армированию стен 1 этажа, до освидетельствования с составлением соответствующих актов приемки предыдущих работ по геодезической разбивке осей, земляных работ, выполненных в котловане, устройству песчаной подсыпки и бетонной подготовки, по армированию и бетонированию железобетонных конструкций фундаментной плиты, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Нарушение Требований ст.53 п.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; п. 5.3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-10722/11-01 от 16.05.2018, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1А-ПОС, Том 6 ПЗ п.10 с.47 (лист 34). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму ООО «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020);

47. Сооружения 11/1-11-46, 11/3а, 11/6а. 11/7а:

на участке Т4 - Т5 не выполнены мероприятия по отводу поверхностных вод из траншеи. Произошло затопление и размокание основания. (Нарушение проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы №00063-18/ГГЭ-107'22/11-01 от 16.05.2018г, Раздел 6 «Проект организации строительства» 860/1 А-ПОС, Том 6 ПЗ п. 11.2.3 с.50-51 (лист 38). Дефект критический (Невыполнение предусмотренных проектом водопонижения и мероприятий по отводу поверхностных вод, классификация дефектов по ГОСТ 15467-79). Срок устранения нарушения продлен до 01.12.2020 (по письму 000 «ПСО «Казань» исх. № 3774 от 01.09.2020).

В связи с выявлением многочисленного количества не устраненных нарушений, в том числе и критических дефектов обществу вновь выдано предписание №92/70 от 03.12.2020, содержащее 152 нарушений отображенных в акте проверки.

Акт проверки и предписание об устранении нарушений согласно отчету об отслеживании отправлений получены обществом 11.12.2020.

Уведомлением от 03.12.2020 №197/119/784 ООО «ПСО «Казань» извещено о необходимости явиться для составления и подписания протокола об административном правонарушении, что подтверждается отчетом об отслеживании отправлений.

Определением от 25.12.2020 отказано в удовлетворении ходатайства общества о переносе даты составления протокола.

25.12.2020 начальником отделения 119 Отдела ГАСН МО РФ, в отсутствии представителя общества, составлен протокол об административном правонарушении №119/2020/34, в отношении ООО «ПСО «Казань» ввиду наличия в действиях данного юридического лица состава административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 9.5 КоАП РФ – продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Учитывая, что дела об административных правонарушениях предусмотренных ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ, рассматривают судьи арбитражных судов, в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ административный орган направил рассматриваемое заявление в арбитражный суд.

Рассмотрев материалы дела в полном объеме, оценив все представленные доказательства, суд счел требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно  пункту 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

В силу статьи 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению, при установлении наличия в действиях юридического лица  административного правонарушения, подлежат: наличие самого события административного правонарушения; сведения о лице, совершившим противоправные действия (бездействия), за которые КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность юридического лица в совершении административного правонарушения; наличие обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, если таковые имеются; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела,  причины и условия совершения административного правонарушения.

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела (статья 26.2 КоАП РФ).

119 Отдел ГАСН МО РФ обратился с требованием о привлечении ответчика к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 9.5 КоАП в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту: Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», Площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный на срок до 90 суток.

Согласно части 1 статьи 23.56 КоАП РФ органы, осуществляющие государственный строительный надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.5, статьей 9.5.1 (в части административных правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию объектов капитального строительства), частью 3 статьи 9.16, статьей 14.44 настоящего Кодекса. Следовательно, привлечение к административной ответственности по статье 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отнесено к подведомственности органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, и может быть рассмотрено судом только в случае, если оно передано суду на рассмотрение именно этим органом.

Вместе с тем статья 23.1 КоАП РФ наделяет арбитражный суд полномочиями рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.5 КоАП РФ, в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.

Таким образом, заявление о привлечении ответчика к административной ответственности по части 3 статьи 9.5 КоАП РФ подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Частью 3 статьи 9.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или технического заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечиватьведение исполнительной документации, извещать застройщика илитехнического заказчика, представителей органов государственногостроительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежатпроверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и неприступать к продолжению работ до составления актов об устранениивыявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемыхстроительных материалов.

В соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

В соответствии с частями 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.

Как указывалось выше, частью 3 статьи 9.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства - (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 263-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Применительно к изложенной норме, наступление ответственности по части 3 статьи 9.5 КоАП РФ в виде штрафа или административного приостановления деятельности не зависит от степени опасности и количества выявленных нарушений.

Вместе с этим судом учтено, что в ходе проведения проверки административным органом установлено, что в нарушение требований части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации ООО «ПСО «Казань» продолжило выполнение строительно-монтажных работ на объекте Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», Площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный до составления акта об устранении выявленных органом государственного строительного надзора недостатков.

В силу части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ общество обязано было обеспечить устранение выявленных недостатков и не имело право приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, лицо осуществляющее строительство обязано осуществлять строительство в соответствии с заданием застройщика (технического заказчика), проектной документации, требованиям технических регламентов. Не устранение нарушений, несоответствующих выполнению строительно-монтажным работам, проектным решениям, несоблюдению требований, или отклонению от требований проектной документации, технических регламентов, в том числе строительных норм и правил (СНиП), сводов правил (СП), влечет появление в конструкциях, узлах, элементах зданий и сооружений дефектов, в том числе и критических.

Критический дефект при выполнении строительно-монтажных работ - дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.

В соответствии с пунктом 3 Классификатора основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов, утвержденного Главной инспекцией Госархстройнадзор России 17.11.1993 критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой начатых работ.

Как следует из материалов дела, на Сооружении №11/1-11-46, 11/3а, 11/6а, 11/7а не были выполнены мероприятия по отводу поверхностных вод из траншеи, в связи с чем, произошло затопление и размокание основания, что является критическим дефектом (пункт 47 Предписания № 42/28 от 23.07.2020).

Как было указано выше, в соответствии с положениями пункта 7.2.1 контракта от 04.10.2018 № 413-СМР003/2018 общество обязано выполнять все работы по настоящему Контракту в соответствии с Техническим заданием, Проектной и Рабочей документацией, условиями Контракта, а также требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных документов в области проектирования и строительства.

Согласно пункту 16.1 контракта стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устранение обществом выявленных на объекте нарушений входит в его компетенцию и является его сферой ответственности.

При вынесении настоящего решения судом учтено, что ответчик не представил доказательств признания выданных Отделом предписаний недействительными. Большая часть нарушений указных в предписаниях обществом не устранена. Доказательств неисполнимости предписаний суду не представлено.

Согласно пояснениям третьего лица, в период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года в адрес ООО «ПСО «Казань» 119 отделом ГАСН МО РФ выдано 271 замечание, из них устранено 39 замечаний, не устранено 233 замечания (данные обстоятельства подтверждаются также материалами дела). В период с января по февраль 2021 г. ООО «ПСО «Казань» предоставила 13 актов об устранении замечаний 119 отдела ГАСН в части неведения общих и специальных журналов работ.

Основная часть перечисленных выше замечаний касается отсутствия исполнительной документации, а именно производства последующих строительно-монтажных работ без составления актов скрытых работ на предыдущие виды работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

По состоянию на дату вынесения решения ООО «ПСО «Казань» мероприятия по обследованию не выполнило.

Такое нарушение, как отсутствие резервуаров на противопожарные нужды строящихся сооружений влечет за собой недостаточный запас противопожарных нужд в случае в случае возникновения пожара.

Исполнительная документация отражает фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства. Отсутствие исполнительной документации, в том числе актов скрытых работ, результаты которых влияют на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ не позволяет проверить фактическое исполнение проектных решений на соответствие проектной документации прошедшей государственную экспертизу. Не ведение и не предоставление исполнительной документации при строительстве объектов капитального строительства не дает возможность органам строительного надзора контролировать соблюдение правильного выполнения строительных работ.

Строгое соблюдение проектных решений, подтвержденных оформленной в установленном порядке исполнительной документацией обеспечивает надежность и безопасность зданий и сооружений в полном объеме. Продолжение строительно-монтажных работ до освидетельствования с составлением и оформлением исполнительной документацией включая в себя акты на скрытые работы и протоколы испытаний несущих конструкций не гарантирует их соответствие проектной документации, в том числе надежности и прочности строительных конструкций, которые могут повлиять на возникновение деформаций (несущую способность зданий и сооружений).

Судом учтено, что на дату вынесения решения между ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» и ООО «ПСО «Казань» актуализированный график по устранению нарушений не согласован и не подписан, что является показателем ненадлежащего исполнения со стороны ООО «ПСО «Казань» своих обязательств.

В силу части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ предприятие обязано было обеспечить устранение выявленных недостатков и не имело право приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

Также, в соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, лицо, осуществляющее строительство обязано осуществлять строительство в соответствии с заданием застройщика (технического заказчика), проектной документации, требованиям технических регламентов. Неустранение нарушений, не соответствующих выполнению строительно-монтажным работам, проектным решениям, несоблюдение требований, или отклонение от требований проектной документации, технических регламентов, в том числе строительных норм и правил (СНиП), сводов правил (СП), влечет появление в конструкциях, узлах, элементах зданий и сооружений дефектов, в том числе и критических.

Зная о наличии обязанности обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, общество не предприняло такие меры и продолжало на момент выявления правонарушения нарушать порядок, установленный градостроительным законодательством.

Ответчиком не представлено объективных причин, которые бы препятствовали обществу осуществлять строительные работы только после составления актов об устранении выявленных недостатков при строительстве объекта капитального строительства.

Наличие неблагоприятных погодных условий в летний период 2020 года к таким причинам с учетом важности строящегося объекта судом признано быть не может.

При вынесении настоящего решения судом учтено, что ответчиком не опровергнуты  доводы заявителя о том, что выявленные нарушения напрямую влияют на безопасность, надежность и прочность строительных конструкций. В ходе рассмотрения дела ходатайств о проведении судебной экспертизы не заявлялось.

Выводы о том, что выявленные в ходе проверки нарушения в совокупности являются существенными, их наличие влияет на несущую способность конструкций сооружений и может повлиять на надежность и безопасность зданий и сооружений и объекта в целом сделаны уполномоченным органом. Оснований для признания их не соответствующими действительности у суда не имеется.

Судом рассмотрены доводы третьего лица о том, что приостановление деятельности ООО «ПСО «Казань», а вместе с тем и строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1» на длительный срок затруднит выполнение приоритетных задач государственной политики в области космической деятельности.

Однако, задачами государственной политики являются в том числе и обеспечение безопасности, предотвращение причинения вреда человеку, окружающей природе и иным хозяйствующим субъектам.

В рассматриваемом случае, ответчик своими действиями (бездействием) подвергает риску последующее использование объекта по его назначению. Выявленное административное правонарушение сопряжено с возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Оценивая доводы ответчика и третьего лица о том, что выявленные нарушения допущены на стратегическом объекте, судом учтено, что ООО «ПСО Казань» является коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

Само по себе осуществление коммерческой деятельности с грубыми нарушениями строительных норм на стратегически важном для государства объекте не освобождает ООО «ПСО Казань» от ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении выявленных административным органом недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства и не является обстоятельством, смягчающим ответственность общества.

Как видно из материалов дела, многочисленные нарушения, выявленные проверяющим органом,  при строительстве стратегически важного объекта, на момент обращения заявителя в суд общество не устранило.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «ПСО Казань» осуществляет строительную деятельность на спорном объекте, фактически игнорируя подлежащие обязательному исполнению предписания 119 отделом государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации об устранении многочисленных нарушений строительных норм, а также выводы суда (постановление отдела №119/2020/5 от 19.06.2020, оставленное в силе решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02 ноября 2020 года по делу № А65-16795/2020), о наличии в действиях общества состава правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 КоАП России.

Событие правонарушения подтверждено актом проверки, журналом работ, протоколом об административном правонарушении от 25.12.2020.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности факта продолжения работ до составления актов об устранении, и образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ.

В соответствии с положениями статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. При этом юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обществом доказательств тому, что совершенное правонарушение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, обстоятельств, лежащих вне пределов контроля ответчика, и при этом им были приняты меры все зависящие от него меры для соблюдения требований действующего законодательства, в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного суд признает доказанным наличие вины общества во вмененном правонарушении, в связи с чем следует признать доказанным наличие в действиях ответчика и состава административного правонарушения по ч.3 ст.9.5 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении соответствует требованиям статьи 28.2 КоАП РФ. Полномочия должностного лица на составление протокола судом проверены, соблюдены.

Процессуальных нарушений при производстве по делу, а также нарушений прав юридического лица допущено не было.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьёй 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела не истёк.

Процессуальных нарушений при производстве по делу об административном правонарушении в отношении общества административным органом не допущено.

Суд не находит оснований для применения в рассматриваемом деле положений о малозначительности (статья 2.9 КоАП РФ) в виду следующего.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Исходя из разъяснений пункта 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано. В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» малозначительность административного правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям, которые являются объектом административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9.5 КоАП РФ, заключается в неисполнении формальных требований публичного права. Состав рассматриваемого административного правонарушения является формальным, следовательно, наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношением может быть оценено судом только с точки зрения степени вреда (угрозы вреда), причиненного непосредственно установленному публично-правовому порядку деятельности. В частности, существенная степень угрозы охраняемым общественным отношениям имеет место в случае пренебрежительного отношения лица к установленным правовым требованиям и предписаниям (публичным правовым обязанностям).

Нарушение обществом требований градостроительного законодательства свидетельствует об отсутствии со стороны ответчика принятия надлежащих мер за соблюдением исполнения соответствующих публично-правовых обязанностей, характеризует пренебрежительное отношение заявителя к установленным правовым требованиям и предписаниям.

Также суд при вынесении решения по настоящему делу учитывает позицию Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», фактические и правовые обстоятельства рассматриваемого дела, и приходит к выводу  об отсутствии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 2.9 КоАП РФ, свидетельствующих о наличии по настоящему делу признаков малозначительности совершенного обществом административного правонарушения.

Рассмотрев вопрос о мере наказания, суд руководствуется следующим.

Согласно частям 1, 3 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение заинтересованного лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Санкцией части 3 статьи 9.5 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

При этом конкретную меру ответственности, подлежащую применению, назначает лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, в настоящем случае - суд, с учетом указанных обстоятельств.

Суд в ходе рассмотрения дела, установил обстоятельства отягчающие ответственность общества. Постановлением одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2021 по делу №А65-16795/2020 оставлено в силе решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.11.2020 по делу №А65-16795/2020, согласно которому отказано в удовлетворении требований ООО «ПСО «Казань» об изменении постановления №119/2020/5 от 19.06.2020, освобождении од административной ответственности и об ограничении устным замечанием. При этом постановлением №119/2020/5 от 19.06.2020 ООО «ПСО «Казань» привлечено к административной ответственности  предусмотренной частью 3 статьи 9.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 руб.

Таким образом, неэффективное выполнение строительно-монтажных и иных работ говорит о бездействии ООО «ПСО «Казань», влечет нарушение государственных интересов Российской Федерации в области космической деятельности. Бездействие ООО «ПСО «Казань» выражается в непринятии действенных мер направленных на исполнение в полном объеме в установленные сроки строительных работ, нарушений законодательства, проектной документации, строительных норм и правил, зафиксированных в актах проверки и предписаниях 119 отдела ГАСН МО РФ.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, характер допущенных нарушений, пренебрежительное отношение общества к исполнению предписаний проверяющего органа, претензиям ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный», особую важность объекта, на котором ведет свою деятельность ответчик, суд с целью предотвращения значительного ущерба государству, а также угрозы жизни и здоровью граждан в будущем, счел необходимым применить наказание в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту: Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», Площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный на срок до 90 суток.

При этом судом принято во внимание, что согласно пояснениям заявителя, период, определенный в 90 суток, является минимально необходимым для устранения всех выявленных  нарушений.

В соответствии со статьей 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их препаратов, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в области порядка управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, а также в области градостроительной деятельности. Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания (часть 1). Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста суток (часть 2).

Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания (часть 3 ст. 3.12 КоАП РФ).

Таким образом, в случае принятия действенных мер по устранению выявленных ранее нарушений, зафиксированного, в том числе с участием административного органа, общество не лишено возможности на основании части 3 статьи 3.12 КоАП РФ обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения административного наказания.

Согласно пункту 1 статьи 32.12 КоАП РФ постановление судьи, органа, должностного лица, назначивших административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Руководствуясь ст. 167-170, 180, 206 АПК РФ суд решил:

привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 КоАП России в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту: Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», Площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный на срок до 90 суток.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г.Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                                                                                П.А. Чумаков