АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-21948/2020

14 июля 2021 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 14 июля 2021 года.

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хлыновой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 18 813 933 руб. 03 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 по доверенности от 25.03.2021 сроком на 1 год;

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 17.08.2020 № 06-10/107юр сроком на 1 год;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Омскэлектро» о взыскании 19 609 027 руб. 30 коп., из которых 6 489 261 руб. 36 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-72/19, 274 242 руб. 21 коп. - неустойка по договору подряда от 17.10.2019 № 312-72/19, 11 832 084 руб. 98 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-73/19, 500 034 руб. 90 коп. - неустойка по договору подряда от 17.10.2019 № 312-73/19, 492 586 руб. 69 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-74/19, 20 817 руб. 18 коп. - неустойка по договору подряда от 17.10.2019 № 312-74/19.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил об уменьшении размера исковых требований - о взыскании 18 813 933 руб. 03 коп., из которых 6 489 261 руб. 36 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-72/19, 11 832 084 руб. 98 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-73/19, 492 586 руб. 69 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-74/19.

Руководствуясь статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным принять уменьшение размера исковых требований, поскольку это не противоречит закону, а также не нарушает права других лиц.

В судебном заседании, состоявшемся 07.07.2021, представитель истца исковые требования поддержал с учётом изменений.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, акционерное общество «Омскэлектро» проводило закупки в форме запроса предложений в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В результате проведения закупок между обществом с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» (подрядчик) и акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) заключены следующие договоры подряда от 17.10.2019 № 312-72/19, от 17.10.2019 № 312-73/19, от 17.10.2019 № 312-74/19.

В рамках заключённого договора подряда от 17.10.2019 № 312-72/19 подрядчик по поручению и заданию заказчика обязался выполнить работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ Южного Района Электрических Сетей и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его.

Стоимость договора, согласно сметной документации в составе локальных сметных расчётов на каждый объект, составила 15 305 448 руб. 13 коп.

На основании дополнительного соглашения от 30.12.2019 № 2 стороны согласовали изменение стоимости работ. В результате, цена договора, определяемая на основании сметной документации в составе локальных сметных расчётов по каждому объекту, составила 16 282 023 руб. 40 коп.

Подрядчиком работы по договору выполнены в соответствии с утверждённой сметной и проектной документацией в установленный договором (пункт 2.1 договора) срок. Работы приняты заказчиком, что подтверждается актами о приёмке выполненных работ унифицированной формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 (утверждённых Госкомстата России от 11.11.99 № 100), подписанными обеими сторонами.

17 марта 2020 года на основании счетов на оплату и выставленных счёт-фактур акционерное общество «Омскэлектро» произвело оплату выполненных работ в общей сумме 9 792 762 руб. 04 коп.

По состоянию на 04.12.2020 задолженность акционерного общества «Омскэлектро» перед обществом с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» по договору подряда от 17.10.2019 № 312-72/19 составила 6 489 261 руб. 36 коп.

В рамках заключённого договора подряда от 17.10.2019 № 312-73/19 подрядчик по поручению и заданию заказчика обязалось выполнить работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ Южного Района Электрических Сетей и сдан, их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его.

Стоимость договора, согласно сметной документации в составе локальных сметных расчётов на каждый объект, составила 16 221 762 руб. 53 коп.

На основании дополнительного соглашения от 30.12.2019 № 2 стороны согласовали изменение стоимости работ. В результате, цена договора, определяемая на основании сметной документации в составе локальных сметных расчётов по каждому объекту, составила 16 514 273 руб. 23 коп.

Подрядчиком работы по договору выполнены в соответствии с утверждённой сметной и проектной документацией в установленный договором (пункт 2.1 договора) срок. Работы приняты заказчиком, ЧТО подтверждается актами о приёмке выполненных работ унифицированной формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 (утверждённых Госкомстата России от 11.11.99 № 100), подписанными обеими сторонами.

17 марта 2020 года на основании счетов на оплату и выставленных счет-фактур акционерное общество «Омскэлектро» произвело оплату выполненных работ в общей сумме 4 682 188 руб. 25 коп.

По состоянию на 04.12.2020 задолженность акционерного общества «Омскэлектро» перед обществом с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» по договору подряда от 17.10.2019 № 312-73/19 составила 11 832 084 руб. 98 коп.

В рамках заключённого договора подряда от 17.10.2019 № 312-74/19 подрядчик по поручению и заданию заказчика обязалось выполнить работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ Южного Района Электрических Сетей и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его.

Стоимость договора, согласно сметной документации в составе локальных сметных расчётов на каждый объект, составила 16 652 963 руб. 30 коп.

На основании дополнительного соглашения от 30.12.2019 № 2 стороны согласовали изменение стоимости работ. В результате, цена договора, определяемая на основании сметной документации в составе локальных сметных расчётов по каждому объекту, составила 16 492 586 руб. 69 коп.

Подрядчиком работы по договору выполнены в соответствии с утверждённой сметной и проектной документацией в установленный договором (пункт 2.1 договора) срок. Работы приняты заказчиком, что подтверждается актами о приёмке выполненных работ унифицированной формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 (утверждённых Госкомстата России от 11.11.99 № 100), подписанными обеими сторонами.

07.02.2020 на основании счетов на оплату и выставленных счёт-фактур акционерное общество «Омскэлектро» произвело оплату выполненных работ в общей сумме 16 000 000 руб.

По состоянию на 04.12.2020 задолженность акционерного общества «Омскэлектро» перед обществом с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» по договору подряда от 17.10.2019 № 312-74/19 составила 492 586 руб. 69 коп.

Таким образом, в настоящее время общий размер задолженности акционерное общество «Омскэлектро» перед обществом с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» по основному долгу составляет 8 585 920 руб. 60 коп.

Согласно пункту 3.5 договоров подряда расчёты за выполненные работы производятся путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика по факту выполнения работ в полном объёме в течение 500 (пятисот) календарных дней после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, и справки стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Не смотря на то, что работы по указанным договорам были выполнены обществом с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» в полном объёме и приняты без замечаний, акционерное общество «Омскэлектро» в нарушение условий договоров и действующего законодательства оплату выполненных работ не произвело.

20.10.2020 общество с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» направило в адрес акционерного общества «Омскэлектро» досудебную претензию от 20.10.2020 (исх. № 243), досудебную претензию от 20.10.2020 (исх. № 244) и досудебную претензию от 20.10.2020 (исх. № 245), которые были вручены акционерному обществу «Омскэлектро» 23.10.2020, однако до настоящего времени ответ на указанную претензию не поступил, задолженность не погашена как полностью, так и частично, что явилось основанием обращения в суд.

Оценив предоставленные доказательства, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению на основании следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьёй 8 ГК РФ в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьёй 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в ГК РФ.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности.

В рассматриваемом случае правоотношения сторон регулируются положениями параграфа 1 главы 37 ГК РФ.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

В силу статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьёй 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Исходя из анализа данных норм права и пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

По правилам части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств оплаты выполненных работ в размере 18 813 933 руб. 03 коп. акционерное общество «Омскэлектро» в материалы дела не представлено, обоснованных возражений по существу спора не заявлено.

На момент рассмотрения дела по существу срок оплаты по договору уже наступил.

Поэтому требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 18 813 933 руб. 03 коп. являются правомерными, доказанными и подлежат удовлетворению.

В связи с удовлетворением исковых требований расходы по оплате государственной пошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 18 813 933 руб. 03 коп., из которых 6 489 261 руб. 36 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-72/19, 11 832 084 руб. 98 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-73/19, 492 586 руб. 69 коп. - задолженность по договору подряда от 17.10.2019 № 312-74/19, а также 117 070 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «ЭТА ТОК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 3 975 руб. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 04.12.2020 № 600.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, дом 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия настоящего решения на бумажном носителе может быть направлена в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                         С.В. Луговик