487/2023-291719(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А57-13552/2022

город Саратов

27 октября 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 24 октября 2023 года. Полный текст решения изготовлен 27 октября 2023 года. 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Бурганова Б.Р., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании материалы дела  

по исковому заявлению по исковому заявлению Федеральное государственное унитарное  предприятие «Главное военно-строительное управление специального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности,  

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО2, по доверенности № 42/21-546Д от 01.01.2022, иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось ФГУП «ГВСУ № 4» с исковым  заявлением, согласно которому просит взыскать с ООО «Арсенал» в пользу ФГУП «ГВСУ № 4»:  неосновательное обогащение (неотработанный аванс) по договору  1516187381632090942000000/МО-2015/15/ГАЗ/96 от 19.12.2017 в сумме 39 282 037,56 руб.;  неустойку за просрочку исполнения договора за период с 29.12.2018 по 30.03.2022 включительно  в размере 820 203 718,55 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами (авансом)  за период с 12.04.2022 по 06.05.2022 в размере 447 707,61 руб. и далее по дату фактического  исполнения ответчиком обязательства по возврату неотработанного аванса; судебные расходы  (оплата государственной пошлины) в сумме 200 000 руб.  

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  истцом представлено заявление об уточнении исковых требований, согласно которому просит  взыскать с ответчика неосновательное обогащение (неотработанный аванс) по договору  1516187381632090942000000/М0-2015/15/ГАЗ/96 от 19.12.17г в сумме 14 879 269,99 руб.;  неустойку за просрочку исполнения договора 1516187381632090942000000/М0-2015/15/ГАЗ/96 от  19.12.17г за период с 29.12.2018 по 30.03.2022 включительно в размере 820 203 718,55 руб.;  проценты за пользование чужими денежными средствами (авансом) за период с 02.10.2022 по  10.10.2023 в размере 1 266 368,55 руб. и далее по дату фактического исполнения ответчиком  обязательства по возврату неотработанного аванса; судебные расходы по оплате государственной  пошлины и проведение судебной экспертизы  

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела  по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной  инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Отказ от части исковых требований  принимается судом, поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.  

Частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  установлено право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до  принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить  основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.  

Соответствующие уточнения заявленных требований приняты арбитражным судом,  поскольку они не противоречат закону и нарушают права других лиц.  

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации был объявлен перерыв с 10.10.2023 по 12.10.2023, с 12.10.2023 по  19.10.2023, с 19.10.2023 по 24.10.2023.  

Лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом.  

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте  проведения судебного заседание, об объявленных перерывах в судебном заседании была так же  размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области -  http://www.saratov.arbitr.ru.  

Исследовав представленные доказательства, проверив доводы, изложенные в исковом  заявлении, суд приходит к следующему.  

Как следует из материалов дела, между ФГУП «ГВСУ № 5» (Истец, Генподрядчик) и  ООО «Арсенал» (Ответчик, Субподрядчик) заключен договор субподряда  1516187381632090942000000/МО-2015/15/ГАЗ/96 от 19.12.17г (далее - договор). ФГУП  «ГВСУ № 5» прекратило существование в результате присоединения к ФГУП «ГВСУ № 4».  

Пунктом 1.1. договора установлено, что генподрядчик осуществляет финансирование,  обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а субподрядчик обязуется  выполнить комплекс строительно-монтажных работ на сооружении 15/ГАЗ (Внешнее и  внутреннее газоснабжение объекта 15) объекта 15/ГАЗ по адресу Ивановская область  Тейковский район.  

Пунктом 2.1. договора установлена цена договора 690 407 170,50 руб.  

Пунктом 3.2. договора установлен срок окончания работ - 28.12.2018 г. Сроки  выполнения отдельных этапов работ по договору установлены приложением № 2 к договору -  График производства работ. Во исполнение условий договора истец перечислил ответчику  денежные средства в качестве аванса в размере 584820344 руб. 48 коп.  

Ввиду того, что срок исполнения субподрядчиком договора (срок окончания работ)  истек 28.12.2018 г., при этом ответчиком работы на объекте не завершены, что привело к  существенному нарушению условий государственного контракта, заключенного ФГУП  «ГВСУ № 4» с Минобороны России, истцом принято решение о расторжении договора в  связи с нарушением его условий со стороны ответчика (основания, предусмотренные ст. 715  ГК РФ).  

Уведомлением от 16.03.2022 г. № ИСХ42-405-1082 договор расторгнут по инициативе  истца (идентификатор почтового отправления 41003369053646). Согласно сведениям сайта  Почта России, уведомление получено ответчиком 30 марта 2022 года. Таким образом, с  указанной даты договор считается расторгнутым. В связи с расторжением договора у  ответчика возникла обязанность возвратить неотработанный аванс (пункт 15.3. договора) в  течение 10 календарных дней с даты расторжения договора.  

Неиспользованные денежные средства ответчик в установленный срок не возвратил, в  связи чем истец обратился в суд с исковыми требованиями.  

В соответствии с положениями статей 702, 708, 709 и 711 Гражднаского кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательственное правоотношение по договору  подряда состоит из встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства  подрядчика выполнить работы надлежащего качества в согласованные сроки и обязательства  заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой  (статья 328 ГК РФ).  

Из встречного характера таких обязательств и положений пунктов 1 и 2 статьи 328 ГК  РФ следует, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного  обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы  исполнил это обязательство должным образом (в том числе с соблюдением установленных  сроков).  

Основанием для возникновения обязательств заказчика по оплате выполненных работ  является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику (статьи 702, 720, 746 ГК  РФ).  

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе  одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается  другой стороной. Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом  недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им  обоснованными.  

Пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено,  что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора  подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно  предъявляемым к работам соответствующего рода.  

ФГУП «ГВСУ № 4» с Минобороны России, принято решение о расторжении договора  в связи с нарушением его условий со стороны ответчика (основания, предусмотренные ст. 715  ГК РФ).  

Уведомлением от 16.03.2022 г. № ИСХ42-405-1082 договор расторгнут по инициативе  истца (идентификатор почтового отправления 41003369053646). Согласно сведениям сайта  Почта России, уведомление получено ответчиком 30 марта 2022 года. Таким образом, с  указанной даты договор считается расторгнутым.  

В связи с расторжением договора у ответчика возникла обязанность возвратить  неотработанный аванс (пункт 15.3. договора) в течение 10 календарных дней с даты  расторжения договора.  

Таким образом, последним днем для возврата аванса следует считать 12.04.2022.  Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела  вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по  ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.  

В силу части 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым должна  быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле,  вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при  проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в  деле, суд обязан мотивировать.  

В соответствии с частью 3 статьи 82 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе  ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении  экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать  о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных  перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или  сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении  дополнительной или повторной экспертизы.  

Судом определением по делу назначена судебная экспертиза. 

Из содержания представленного в материалах дела экспертного заключения следует:  

 - при изучении документов, представленных в материалах дела было установлено, что  

ООО «Арсенал» (субподрядчик, ответчик) выполнены, а ФГУП «ГВСУ № 5» (Генподрядчик,  

истец) приняты следующие работы: 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 1 по форме КС-2 от 31 января 2018  

года: На объекте: линейная часть 15/155-1К Разработка грунта экскаватором в объёме 3190 кубж; Разработка грунту вручную в объеме 319 кубж; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 543 кубж;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 3190 кубж;  

Сварка полиэтиленовых труб в объёме 80 соединений; Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9мм в объёме 17 метров; 

Монтаогс колец опорно-направляющих в количестве 16 шт;  Монтаою маю/сет герметизирующих в количестве 4 шт.;  

Монтаж УЗМГ225*400 - 4шт; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,5мм в  

объёме 1017; Устройство контрольной трубки - 1шт.; Устройство врезки - 2шт; Установка муфт электросварных - 2шт; Устройство коверов - 2 шт; 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в объёме 1017м;  Укладка ленты сигнальной в объёме 1017м.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 2 по форме КС-2 от 28 февраля 2038  

года (с учетом корректировки по акту 2.1. от30.04.2018г.): Разработка грунта экскаватором в объёме 11880 куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 1188 кубж; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 198 кубж;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 11880 кубж;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 2178 кубж;  Сварка полиэтиленовых труб в объёме 241 соединений;  

Укладка трубопроводов полиэтиленовых диаметром 630мм в объёме 29 метров;  

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,5мм в  

объёме 3000; Укладка ленты сигнальной в объёме 3000м.; 

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 3 по форме КС-2 от 30 апреля 2018  

года Разработка грунта экскаватором в объёме 3520 куб.м.; Разработка грунту вручную в объеме 352 куб.м.; 

Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 3520 кубм.;  Водоотлив из котлованов в объёме 5280 куб.м.;  

Сварка полиэтиленовых труб в объёме 81 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых диаметром 630мм в объёме 16 метров;  Монтаж УЗМГ 225*400 - 4шт;  

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,5мм в  

объёме 1000; Устройство контрольной трубки - 1шт.; Устройство врезки - 2шт; Установка муфт электросварных - 2шт; Устройство коверов—2 шт; 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в объёме 1020м;  

Укладка ленты сигнальной в объёме 1020м.; 

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 4 по форме КС-2 от 30 апреля 2018  

года Временные дороги 

Разработка грунта в отвал в объёме 769,55 куб.м.; Устройство подстилающих слоев в  

объёме 2028,43 куб.м. 

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 5 по форме КС-2 от 30 апреля 2018  

года Монтаж крана фланцевого Ду 200мм - 1шт; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 6 по форме КС-2 от 30 апреля 2018  

года 

Временные дороги Разработка грунта в отвал в объёме 836 кубм.; Устройство  

подстилающих слоев в объёме 1520 кубм, 

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 7 по форме КС-2 от 30 апреля 2018  

года: 

Вдольтрассовый проезд Разработка грунта в отвал в объёме 1290 кубм.; Устройство  

подстилающих слоев в объёме 451,5 кубм. 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 8 по форме КС-2 от 31 мая 2018 года:  Разработка грунта экскаватором в объёме 8090,37 куб.м.;  

Разработка грунта вручную в объеме 809,037 кубм.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 1328,2 кубм.;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 8090,37 кубм.;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 1328,2 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 161 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых диаметром 630мм в объёме 16 метров;  Монтаж манжет герметизирующих в количестве 4 шт.;  

Монтаж УЗМГ225*400 - 4шт; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром  

225x20,5мм в объёме 1923; Устройство контрольной трубки - 1шт.; Устройство врезки - 2шт; Установка муфт электросварных - 2шт; Устройство коверов - 2 шт; 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в объёме 1923м;  Укладка ленты сигнальной в объёме 1923м.;  

Баластировка трубопровода текстильным контейнером КТ-300 в объёме 15 шт.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 9 по форме КС-2 от 31 мая 2018  

года: Разработка грунта вручную в объеме 15,78 куб.м.; Копание ям вручную в объёме 052 кубм.; 

Г

Устройство песчаного основания под фундаменты в объёме 8,11 куб.м.; Устройство бетонных фундаментов в объёме 8,11 кубм.; Установка анкерных болтов в количестве 60 шт.; Установка стальных закладных деталей в объёме 0,9т.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 10 по форме КС-2 от 31 мая 2018  

года: 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом в объеме 11390м; Подъём  

давлении при испытании газопровода - 11439м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 11 по форме КС-2 от 31 июля 2018  

года fc учётом Акта корректировки № 11 по форме КС-2 от 28 сентября 2018 года):  

Разработка грунта экскаватором в объеме 795,417 кубм.;  

Разработка грунта вручную в объеме 13,2 кубм.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 318,12 кубм.;  Засыпка траншеи и котлованов бульдозером в объёме 7694,7кубж;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 726,9 кубж;  Водоотлив из котлована в объёме 1714,03 куб.м.  

Сварка полиэтиленовых труб в объёме 156 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9 в объёме 70,42 метров;  Монтаж: манжет герметизирующих в количестве 6 шт.;  

Монтаяс УЗМГ 225*400-6шт; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,5мм в  

объёме 1995; Устройство скважин - 2 шт; Устройство врезки - Зшт; Устройство контрольной трубки - 1шт.; 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в объёме 1995м;  Укладка ленты сигнальной в объёме 1995м.;  

Баластировка трубопровода текстильным контейнером КТ-300 в объёме 30 шт.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 11 по форме КС-2 от 31 июля 2018  

года (с учётом акта корректировки № 12 от 28 сентября 2018 года:):  

Разработка грунта экскаватором в объёме 4201,5 куб.м.; Разработка грунта вручную в  

объеме 55 кубж; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 203,8 кубж; Засыпка  

траншей и котлованов бульдозером в объёме 4004 кубж; Уплотнение грунта  

вибротрамбовками в объёме 579 кубж; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 77 соединений;  Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,6 в объёме 1020 метров;  

Укладка ленты сигнальной в объёме 1000м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 13 по форме КС-2 от 28 сентября  

2018 года: Разработка грунта экскаватором в объёме 7455,96 кубж; Разработка грунта вручную в объеме 162,29 кубж.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 318,94 кубж;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 7222,35 кубж;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 733,85 кубж; Водоотлив из котлована в объёме 1793,21 кубж Сварка полиэтиленовых труб в объёме 156 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9 в объёме 184,6  метров;  

Монтаж: манжет герметизирующих в количестве 6 шт.; Монтаж УЗМГ225*400 - 6шт; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,5мм в  

объёме 1782; Бурение скважин ГНБ в объёме 173,8м; Устройство врезки ~ Зшт; Устройство контрольной трубки- 1шт.; 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в объёме 1977м;  Укладка ленты сигнальной в объеме 1977м.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 14 до форме КС-2 от 28 сентября  

2018 года: Разработка грунта экскаватором в объёме 2507,96куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 47,24 кубм.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 120,2 кубм.;  

Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 2389 кубм.;  Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 272 кубм.;  

Водоотлив из котлована в объёме 1793,21 куб.м. Сварка полиэтиленовых труб в объёме 47 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 560x50,8 в объёме 10,1 метров;  Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 560x62,5 в объёме 330,27 метров;  

Монтаж. УЗМГ315 - 2 шт; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 315x28,6мм в  

объеме 588,1; Бурение скважин ГНБ в объёме 327,15м; Устройство врезки - Зшт; Устройство контрольной трубки - 1шт.; Укладка ленты сигнальной в объёме 590,52м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 16 по форме КС-2 от 01 ноября 2018  

года: Разработка грунта экскаватором в объёме 4861,8 кубм.; Разработка грунта вручную в объеме 107,9 кубм; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объеме 246,288 кубм.;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 690,1 кубм.;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 690,1 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объеме 116 соединений; Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 580x50,8 в объёме 98,98 метров; Монтаж УЗМГ- 5 шт; Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 315x28,6мм в объёме 1312м; Бурение скважин ГНБ в объёме 91м; 

Устройство муфты электросварной - 4шт.; Устройство контрольной трубки - 1шт.;  

Укладка ленты сигнальной в объёме 1309м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 17 по форме КС-2 от 01 ноября 2018  

года: Разработка грунта экскаватором в объёме 10702 куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 226,32 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 403,211 куб.м.;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 403,211 куб.м,;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 403,211 кубж; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 198 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9 в объёме 100 метров;  Монтаж УЗМГ- 8 шт;  

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,6мм в  

объёме 2454; Бурение скважин ГНБ в объёме 100м; Устройство муфты электросварной - 4шт.; Устройство контрольной трубки - 1шт.; Укладка ленты сигнальной в объёме 1962м.; Баластировка трубопровода текстильным контейнером КТ-300 в объёме 186 шт.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 18 по форме КС-2 от 01 ноября 2018  

года: Сварка полиэтиленовыхтрубв объёме 11 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9 в объёме 132 метров;  Монтаж: УЗМГ- 4 шт;  

Бурение скважин ГНБ в объёме 132м;  

Устройство муфты электросварной - 2шт.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 21 по форме КС-2 от 10 декабря  

2018 года: Разработка грунта экскаватором в объёме 2962,329 куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 56 куб.м.; Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 136,884 куб.м.; Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 365,621 куб.м.; 

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 365,621 куб.м.;  Сварка полиэтиленовых труб в объёме 55 соединений;  

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,8 в объёме 700 метров; Монтаж. УЗМГ- 8 шт; Устройство контрольной трубки - 4шт; Укладка ленты сигнальной в объеме 700м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 50о по форме КС-2 от 28 декабря  

2018 года: 

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  Горелка комбинированная РГМГ-1М-АГ2р - 2 шт.  

Горелка OJLON ОРР-500МДу100 - 3 шт. 

Греющий электроаппарат (насос, сопло) более 250Сст+5~ 3 шт.  Электроподогрев топливных шлангов- 3 шт.  

Стабилизатор давления газа Ду 100- 3 шт. Газовый фильтр Ду100- 3 шт. Сильфонный компенсатор Ду 100- 3 шт. Шкаф управления OKI 00- 3 шт. - 3 шт. Клапан EVP/NC DN200 EVPS130036-1 шт Фильтр газовый Ду50 ФН-2-2- 2 шт Турбинный счетчик СГ16МТ-650-Р-2- 3 шт Турбинный счетчик СГ16МТ-100-Р-2- 2 шт 

Кран стальной фланцевый Breeze тип 11с32пДу200мм-1 шт  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 49о по форме КС-2 от 28 декабря  

2018 года: 

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  Насос циркуляции котлового контура WILOIL 150/305-30/4 - 2 шт  

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный РИДАН № 100-00975. 100-00976-2  

шт Затвор дисковый межфланцевый Ду250, Pyl 6 с ручным редуктором VFY-WG- 4 шт 

Затвор дисковый поворотный чугун дис нерж.сталь редуктор GROSS DN 200 Р^16- 

4шт; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 48о по форме КС-2 от 28 декабря  

2018 года: 

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  

Сигнализатор загазованности метанолом СЗ-1-2Г- Зшт Сигнализатор загазованности  

угарным газом СЗ-2-2В - Зшт 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 46о по форме КС-2 от 28 декабря  

2018 года: 

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  

Затвор дисковый поворотный чугун дис нерж.сталь редуктор GROSS DN 300  

PN16BVG30016HGSS- 2шт 

Затвор дисковый межфланцевый Ду250, Ру16 с ручным редукторным приводом  GROSSG-5uim  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 45о по форме КС-2 от 28 декабря  2018 года:  

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  

Кран шаровой ФланиееыйДуЮО Ру1511с22п Breeze- 4шт Кран шаровой фланиеЕый  Ду8(У65 Pvl611c22n Breeze- 4шт Кран шаровой (ФИО3 Лу5СХ40 Ру 1611222л Breeze4шт Фильтр газозыйДу80 Р/О.ЗМПа ФН-3-1- 4шт Фильтр ггзоаыйДу50 ФН-2-2- 2шт  Турбжнъй счетчик СП 8МТ-65С-Р-2- 4шт Турбинный счетчик СГ15МТ-100-Р-2- 2шт  Регулятор-стабилизатор FRS5080 Ду8Р- 4шт Регулятор-стабилизатор FRS5050Uy5O мм- 2шт  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 44о по форме КС-2 от 28 декабря  2018 года:  

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  

Сигнализатор загазованности метанолом СЗ-1-2Г- 4шт Сигнализатор загазованности  угарным газом СЗ-2-2В - 4шт Напоромер КМ-21 (0-40кПа) - 2шт Напоромер КМ-21 (0-10кПа)  - 6шт  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 43 по форме КС-2 от 28 декабря  2018 года:  

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  

Агрегат насосный лопастный центробеясный одноступенчатый, многоступенчатый  объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или  моноблочный, масса: 0,425 т - 2шт.;  

Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде.: горизонтальный —  5,22т.;  

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм- 4шт.;  

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  выступом на условное давление: Ру 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250  мм- 8шт.;  

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм- 4шт.;  

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200  мм- 8шт.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 38 по форме КС-2 от 28 декабря  2018 года:  

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм - 2шт.;  

Фланцы из стали марок 8СтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  выступом на условное давление: Ру 1.6 МПа (16 кгс/см2)диаметром условного прохода 300  

} 

мм — 4шт.; 

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  номинальное давление до 10 МПа. номинальный диаметр 250 мм- 5шт.;  

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2. ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250  мм — 10шт.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 36 по форме КС-2 от 28 декабря  2018 года:  

Было поставлено и смонтировано следующее оборудование:  

Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: П-  

8шт.; Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки. ТЭЗ). масса: до 10 кг- 1шт.; Блок сигнализации и управления БСУ-4- 10шт.; Установка манометров: с трехходовым краном- 1шт.; 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей  

длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг- 8шт.; 

Кабель силовой с медными оюилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,  

не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с  

числом оюил ~2и сечением 1.5мм2— 4,4шт.; 

Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроеолочными медными  

жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не  

распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 2x2x0.97- 

0,206шт.; Кабель (витая пара) UTP 4x2x0.52 категория 5- 0,25м.; 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или  

колонне, на ток до 25 А- Зшт.; 

Выключатель автоматический модульный 1 п С 6А 6кА S201 ABB 2CDS251001R0064-  

Зшт.; Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке- 0,8шт.; 

Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с- 0,8шт. с заземлением и  

крышкой- 10шт.; - согласно Акта о приёмке выполненных работ № 35 по форме КС-2 от 28 декабря 2018 года: Было поставлено и смонтировано следующее оборудование: 

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  

номинальное давление до 10 МПа. номинальный диаметр 100 мм- 4шт  

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2. ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  

выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100  

мм- 8шт 

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  

номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм - 4шт  

Фланцы из стали марок ВСтЗсл2, ВСтЗслЗ для трубопроводов, с соединительным  

выступом на условное давление: Ру 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80  

мм- 8шт 

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  

номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм - 4шт  

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2. ВСтЗслЗ для трубопроводов, с соединительным  

выступом на условное давление: Ру 1.6 МПа (16 кгс/см2). диаметром условного прохода 50  

мм- 12шт 

Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100  

мм-4шт 

Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром, до 50  

мм~ 2шт 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях,  

диаметр условного прохода: до 120 мм-4шт 

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2. ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  

выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100  

мм - 8шт 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях,  

диаметр условного прохода: до 50 мм- 2шт 

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50  мм- 4шт  

Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 80 мм4шт  

Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 50 мм2шт  

Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на  номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм- 7шт  

Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40  кгс/см2), диаметром: 15 мм (прим,Галлон) - 7шт  

Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на  номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 20 мм- 6шт  

Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40  кгс/см2), диаметром: 20 мм(прим.Галлоп) - 6шт  

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотеяьных и т.п.,  монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2.5 МПа.  диаметр труб наружный 25мм- 70,84м  

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные,  диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3.2 мм- 72,1м  

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные,  диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм- 20,6м  

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.,  монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа.  диаметр труб наружный 57мм- 8,45м  

Трубы стальные электросварные прямогиовные со снятой фаской из стали марок  БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм — 8,24м  

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2),  диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм —  4шт  

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного  прохода: 65x50 мм. наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5- 57x3 мм- 2 шт  

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.,  монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2.5 МПа.  диаметр труб наружный 89мм- 8,96м  

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок  БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм- 8,24м  

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2),  диаметром условного прохода: 80 мм. наруоюным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм  - 8 гит  

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.,  монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа,  диаметр труб наружный 108 мм -6м  

Переходы концентрические на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного  прохода: 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4- 89x3,5 мм-4 гит  

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2),  диаметром условного прохода: 100 мм, наруоюным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм  - 4 шт.  

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.,  монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2.5 МПа,  диаметр труб наружный 159 мм- 0,15м  

Трубы стальные ■ электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок  БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм. толщина стенки 4.5 мм - 15м.  

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2),  диаметром условного прохода: 150 мм. наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5  мм - 3 шт.  

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного  прохода: 150x50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5- 57x3 мм - 1 гит  

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотелъных и т.п.,  монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа.  диаметр труб наруэюный 219 мм- 0,064 шт.  

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок  БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6мм -0,515  шт.  

Переходы концентрические на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного  прохода: 200x150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219x6- 159x4.5 мм -1шт.  

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотелъных и т.п.,  монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа,  диаметр труб наружный 325 мм- 21,98 м.  

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок  БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм. толщина стенки 6мм -20,6м.  

Переходы концентрические на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного  прохода: 300x200 мм. наружным диаметром и толщиной стенки 325x10- 219x8 мм — 1шт.  

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2).  диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм4 шт.  

Монтаою опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и  сооруэюений массой до 0,1 т-О,0432т.  

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты-43,2 кг. 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 34 по форме КС-2 от 28 декабря 2018  года:  

Были смонтированы следующие элементы системы вентиляции: 

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю  зону, массой до 10кг- 5шт.;  

Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка: ВР  3, диаметр каркаса 315 мм-5 шт.;  

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н  (нормальные) толщиной: 0.9мм. периметром до 5200мм- 9,984 кв.м.;  

Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм -9,984  кв.м.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 33 по форме КС-2 от 28 декабря  2018 года:  

Были смонтированы следующие элементы системы автоматизации: Монтаж блока  сигнализации управления БСУ- 4-1 шт.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 30 по форме КС-2 от 29 декабря  2018 года:  

Было смонтировано следующее оборудование: Горелка газомазутная, масса: 0.6 т (РГМГ-1М~АГ2р; GRP-500M) -1 шт. 

Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый  объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите гит  моноблочный, масса: 0,17 т (Греющий электроаппарат) -0,875т.  

Узел обвязки приборов (Электроподогрев) - 3 шт. 

Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг (Стабилизатор  

давления газаДу50) ~ Зузла. 

Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг -3 гит.  

Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100  

мм -Зшт. Шкаф управления и регулирования - 3 шт. 

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  

номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм - 2 шт. 

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  

выступом на условное давление: Ру 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200  

мм- 2 шт. Клапан термозапорный, марка: КТЗ 001-200-Ф -1 шт. 

Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм  

-2 шт. 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях,  

диаметр условного прохода: до 120 мм - 3 шт. 

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  

выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100  

мм- 6 шт. 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях,  

диаметр условного прохода: до 50 мм- 2 шт. 

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  

выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50  

мм- 4 шт. 

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на  

номинальное давление до 10 МПа. номинальный диаметр 200 мм-1 шт.  

Фланцы из стали марок ВСтЗсп2. ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным  

выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200  

мм - 2 шт. 

Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на  

номинальное давление до 10 МПа. номинальный диаметр 15 мм - 5 шт. 

Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4  МПа (40 кгс/см2), диаметром: 15 мм - 5 шт.  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 22 по форме КС-2 от 10 апреля 2019  

года: Разработка грунта экскаватором в объёме 14000куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 245,7 куб.м.; Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 540 куб.м.; Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 1385,3 кубж; Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 1385,3 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 274 соединений; Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9 в объёме 35 метров; Монтаж УЗМГ- 10 шт; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,6мм в  

объёме 3500; Бурение скважин ГИБ в объёме 100м; Устройство муфты электросварной - 5шт.; Устройство контрольной трубки - 5шт.; Укладка ленты сигнальной в объёме 3500м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 20 по форме КС-2 от 19 апреля 2019  

года: 

Горизонтально-направленное бурение (ГИБ) в объёме 69м.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 56 по форме КС-2 от 30 апреля 2019  

года: Выполнены следующие электромонтажные работы: 

- прокладка кабелей силовых с медными жилами ВВГнг с числом жил 3 и сечением  

2,5мм2 в объёме 8 м. 

- прокладка кабелей силовых с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2x16 в объёме  

66 м; 

- монтаж стальных труб диаметром 50мм в объёме 4 метра;  - монтаж: ПВХ диаметром 50 мм в объёме 92 метра;  

-устройство песчаного основания под фундамент бетонный в объёме 8 куб.м.; 

- монтаж: выключателя автоматического на 16А - 1шт; -монтаж шкафа электрического  

-1 шт; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 17 по форме КС-2 от 28 июня  2019 года:  

Сварка полиэтиленовых труб в объёме 43 соединений 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 560x50,8 в объеме 561 м.; Монтаж  

УЗМГ315 - 4 шт; Бурение скважин ГНБ в объёме 593м; Устройство муфты электросварной5шт.; Устройство контрольной трубки - 2шт.;  

- согласно Акта о приемке выполненных работ № 60 по форме КС-2 от 09 апреля 2019  

года: Сварка полиэтиленовых труб в объёме 6 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,6мм в объёме 309 м.;  Устройство муфты электросварной - 1шт.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 63 по форме КС-2 от 07 июня 2019  

года: Разработка грунта экскаватором в объёме 5502куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 98 кубм.; Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 178,64 кубж; 

Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 459,128 кубм.;  Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 459,128 куб.м.;  

Сварка полиэтиленовых труб в объёме 114 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9 в объёме 17 метров;  Монтаж УЗМГ- 4 шт;  

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,6мм в  

объёме 1428; Устройство ковера - 2шт.; Укладка ленты сигнальной в объёме 1400м.; 

Балластировка трубопровода текстильным контейнером КТ-300 в объёме 96 шт.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 55 по форме КС-2 от 17 июля 2019  

года: 

Сторонами согласованы следующие ранее не учтённые работы и материалы по  

устройству наружного электроснабжения котельной 6Т: Демонтаж: опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных - 1шт; 

Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса ДО 1,6 кг  

Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе; кронштейн CS10.3,  

зажим PA150Q 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей  

стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N640 

Фиксатор дистанционный SO70  

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100  

мм2 Металлические конструкции Сталь полосовая: 40x4 мм, кипящая Сталь угловая: 75x75 мм Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм Болты анкерные 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или  

колонне, на ток до 25 А Ограничитель перенапряжения ОР 600/28 Монтаж опор СВ110 Комплект промежуточной подвески (СИП) ESI500E 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 66 по форме КС-2 от 17 августа 2019  

года: Сварка полиэтиленовых труб в объеме 10 соединений; Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 560x50,8 в объёме 174,6 м.; Бурение скважин ГНБ в объёме 185м; Устройство муфты электросварной — 1шт.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 66 по форме КС-2 от 17 августа 2019  

года: Разработка грунта экскаватором в объёме 3159,38куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 59,22 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 39,31 куб.м.;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 115,13 куб.м.;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 115,13 куб.м.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 63 соединений; Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,6 в объёме 804,65 метров; Укладка ленты сигнальной в объёме 804,65м.; Балластировка трубопровода текстильным контейнером КТ-300 в объёме 325шт.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 71 по форме КС-2 от 30 октября  

2019 года: Бурение скважин ГНБ в объёме 52м; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 72 по форме КС-2 от 30 октября  

2019 года: Разработка грунта экскаватором в объёме 4188куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 78,5 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 164,7 куб.м.;  

Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 409,613 кубм.; Уплотнение  

грунта вибротрамбовками в объёме 409,613 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 84  

соединений; Монтаж защитного футляра из трубы размером 450x40,9мм в объёме 25м.;  

Монтаж УЗМГ- 8 шт; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром  

225x20,6мм в объёме 1428; Укладка ленты сигнальной в объёме 1066,8м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 74 до форме КС-2 от 31 октября  

2019 года: 

Разработка грунта экскаватором в объёме 2662,1куб.м.; Разработка грунта вручную в  

объеме 49,9 кубм.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 104,683 кубж; Засыпка  

траншей и котлованов бульдозером в объёме 260,33 куб.м.; Уплотнение грунта  

вибротрамбовками в объёме 260,33 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 52  

соединений; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,6мм в  

объёме 678м.; Укладка ленты сигнальной в объеме 678м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 75 по форме КС-2 от 01 ноября 2019  

года: Разработка грунта экскаватором в объёме 2416,7куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 45,301 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 95,033 кубм;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 176,484 кубм.;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 176,484 кубм.;  Сварка полиэтиленовых труб в объёме 14 соединений;  

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,6 в объёме 10 метров; 

Укладка газопроводов из труб стальных диаметром 219мм, толщиной стенки 6мм в  

объёме 400м.; 

Укладка газопроводов из труб напорных полиэтиленовых диаметром 110x10мм, в  

объёме 583м.; Устройство муфты электросварной — 4шт.; Укладка ленты сигнальной в объеме 613м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 76 по форме КС-2 от 01 ноября 2019  

года: Бурение скважин ГНБ в объёме 175м; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 77 по форме КС-2 от 29 ноября 2019  

года: Разработка грунта экскаватором в объёме 3926,4куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 73,6 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 154,4 куб.м.;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 383,96 куб.м.;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 383,96 куб.м.;  Сварка полиэтиленовых труб в объёме 77 соединений;  

Укладка футляра из трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9 в объёме 7  

метров; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,6мм в  

объёме 989; Устройство муфты электросварной ~ 1шт.; Укладка ленты сигнальной в объёме 993м.; 

^согласно Акта о приёмке выполненных работ № 82 по форме КС-2 от 23 декабря 2019  

года: Разработка грунта экскаватором в объёме 1780 кубм.; Разработка грунта вручную в объеме 33,4 куб.м.; Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 70 куб.м.; Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 205 куб.м.; Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 205 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 39 соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,6мм в объёме 515,45  

метров; Укладка ленты сигнальной в объёме 453,4м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 85 по Форме КС-2 от 23 декабря  

2019 года: 

Разработка грунта экскаватором в объёме 4319,04 кубм.; Разработка грунта вручную в  

объеме 80,96 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 169,84 куб.м.; Засыпка  

траншей и котлованов бульдозером в объёме 497,43 куб.м.; Уплотнение грунта  

вибротрамбовками в объёме 497,43 куб.м.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 84  

соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,6мм в объёме 1100 метров;  Укладка ленты сигнальной в объёме 1100м.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 86 по Форме КС-2 от 23  декабря 2019 года:  

Разработка грунта экскаватором в объёме 3267 куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 61,3 кубм.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 128,5 кубж; Засыпка  

траншей и котлованов бульдозером в объеме 319,5 кубм.; Уплотнение грунта  

вибротрамбовками в объёме 319,5 кубм,; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 64  

соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 225x20,5мм в объёме 832,3 метров;  Укладка ленты сигнальной в объёме 832,3м.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 87 до форме КС-2 от 25 декабря  

2019 года: 

Были выполнены пуско-наладочные работы следующего оборудования котельной 6Т:  Горелка: газомазутная или газовая - 6шт.  

Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр,  

предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 мЗ/ч -6 шт.  

Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе,  

теплопроизводительность: до ЮГкал/ч (30% нагрузки) -4 шт 

Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе,  

теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч (60% нагрузки) -4 шт 

Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе,  

теплопроизводительность до 10 Гкал/ч (100% нагрузки) -4 шт 

Котел без пароперегревателя, ларопроизводительность: до 1 т/ч (60% нагрузки) -2 шт  Котел без пароперегревателя, ларопроизводительность: до 1 т/ч (100% нагрузки) -2 шт  Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы,  

система орошения), производительность: до 20Гкал/ч-2 шт 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 88 по форме КС-2 от 25 декабря  

2019 года: 

Были выполнены пуско-наладочные работы следующего оборудования котельной 6Т:  Горелка: газомазутная или газовая - 5шт.  

Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр,  

предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 мЗ/ч -5 шт.  

Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе,  

теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч (30% нагрузки) -3 шт 

Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе,  

теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч (60% нагрузки) -3 шт 

Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе,  

теплопроизводительность до 10 Гкал/ч (100% нагрузки) -3 шт 

Котел без пароперегревателя, ларопроизводительность: до 1 т/ч (60% нагрузки) -2 шт  Котел без пароперегревателя, ларопроизводительность: до 1 т/ч (100% нагрузки) -2 шт  Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы,  

система орошения), производительность: до 20 Гкал/ч-2 шт 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 79 по форме КС-2 от 17 января 2020  

года: Узел 13,14 

Надземная прокладка стального газопровода из стальных труб диаметром 219мм и  

толщиной стенки 6мм в объёме 17м.; 

Монтаж запорной арматуры (крана шарового Ду 200 YXJ11) в объёме 4шт.;  

Прокладка футляра из трубы стальной диаметром 273 мм толщиной стенки 8 мм, в  

объёме 6 м.; Монтаж стальных опор газопровода - 2 шт.; Укладка подземного трубопровода в объеме 10м.; Узел 15 

Надземная прокладка стального газопровода из стальных труб диаметром 219мм и  

толщиной стенки 6мм в объеме 3 м.; . 

Монтаж запорной арматуры (крана шарового Ду 200 УХЛ1) в объеме 2шт.;  

Прокладка футляра из трубы стальной диаметром 159 мм толщиной стенки 6 мм. в  

объёме 2 м.; Монтаж стальных опор газопровода - 4 шт.; Монтаж установки для редуцирования давления - 1шт.; Укладка подземного трубопровода 108x4мм в объёме 5,7м.; Узел 16 

Надземная прокладка стального газопровода из стальных труб диаметром 108мм и  

толщиной стенки 4мм в объеме 3 м.; 

Прокладка футляра из трубы стальной диаметром 159 мм толщиной стенки 6 мм. в  

объёме 1 м.; Укладка подземного трубопровода 108x4мм в объёме 2,85м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 101 по форме КС-2 от 27 марта 2020  

года: Сварка полиэтиленовых труб в объёме 13 соединений; 

Укладка футляра из трубопроводов полиэтиленовых размером 560x50,8 в объёме 171  

метров; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 315x28,6мм в  

объёме 171м.; Монтаж УЗМГ- 2 шт; Бурение ГНБ -183,1м.; Установка муфты электросварной - 1шт.; 0 года: Сварка полиэтиленовых труб в объёме 11 соединений; 

Укладка футляра из трубопроводов полиэтиленовых размером 450x40,9 в объёме 131,3  

метров; 

Укладка газопровода из трубы напорной полиэтиленовой диаметром 225x20,5мм в  

объеме 134м.; Бурение ГНБ- 145м..; Установка муфты электросварной - 1шт.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 91 по форме КС-2 от 12 марта 2020  

года: 

Разработка грунта экскаватором в объёме 342,42 куб.м.; Разработка грунта вручную в  

объеме 6,419 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 13,46 кубм.; Засыпка  

траншей и котлованов бульдозером в объёме 33,49 куб.м.; Уплотнение грунта  

вибротрамбовками в объёме 33,49 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 8  

соединений; 

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 225x20,5мм в объёме 86,61 метров;  Укладка ленты сигнальной в объёме 87,21м.;  

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 99 по форме КС-2 от 31 марта 2020  

года. 

Разработка грунта экскаватором в объёме 4354,65 куб.м.; Разработка грунта вручную в  

объеме 81,63 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 171,24 куб.м.; Засыпка  

траншей и котлованов бульдозером в объёме 501,53 кубм.; Уплотнение грунта  

вибротрамбовками в объёме 501,53 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 87  

соединений; Укладка футляра из трубы размером 560x50,8мм в объёме 7м.; Укладка  

трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,6мм в объёме 1131 м.; 

Установка муфты электросварной - 1шт.; Укладка ленты сигнальной в объёме 1109м.;  - согласно Акта о приёмке выполненных работ № 100 по Форме КС-2 от 27 июля 2020  

года. Разработка грунта экскаватором в объёме 3718,3 куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 69,699 кубм.; Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 146,217 кубм.; Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 271,536 куб.м.; 

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 271,536 кубж;  Сварка полиэтиленовых труб в объёме 9 соединений;  

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 110x10мм в объёме 943 м.; Укладка ленты сигнальной в объёме 947м.; 

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 106 по форме КС-2 от 27 июля 2020  

года. 

Сварка полиэтиленовых труб в объёме 4 соединений; Монтаж муфты электросварной1 шт.; Бурение ГНБ- 45м.;  

- согласно Акта о приёмке вьтолненных работ № 108 по форме КС-2 от 27 июля 2020  

года. Разработка грунта экскаватором в объёме 2288,62 куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 42,9 куб.м.; Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 90 куб.м.; Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 263,58 куб.м.; 

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 263,58 куб.м.;  Сварка полиэтиленовых труб в объёме 50 соединений;  

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 315x28,6мм в объёме 535 м.; Укладка ленты сигнальной в объёме 947м.; Установка УЗМГ 315/560-2шт.; Укладка сигнальной ленты - 535м.; 

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 114 по форме КС-2 от 15 августа  

2020 года: 

Котельная ЗК внутреннее и внешнее газоснабжение Установка регулятора давления  

газа -1 шт.; Установка крана шарового Ду 150 - 2шт.; Установка крана шарового 11Б27П1  

диаметром 20мм - 4шт.; Установка крана шарового 11Б27Ш диаметром 15мм - 2шт.; Монтаж:  

трубопровода из стальной трубы диаметром 89x3,5мм в объёме 0,2м.;  

Монтаж: трубопровода из стальной трубы диаметром 108мм в объёме Зм.; Монтаж:  

трубопровода из стальной трубы диаметром 159мм в объёме 5м.; Перенос арматуры  

фланцевой номинальным диаметром 150мм - 1шт.; 

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 102 по форме КС-2 от 15 августа  

2020 года: Установка рдтамеров, счётчиков газовых - 2шт.; Установка ротамеров, счётчиков газовых - Зшт.; 

Установка фильтров газовых Ду65 - 2шт.;  

Установка фильтров фланцевых волосяных:ФВ100, диаметром 100мм - 2шт.;  Установка крана шарового Ду150 - 1шт.;  

Установка крана шарового Галлоп диаметром 20мм - 20шт.;  Установка крана шарового Галлоп диаметром 15мм - 7шт.;  Монтаяс трубопровода из стальной трубы диаметром 32x3мм в объёме 5м.;  

Монтаж трубопровода из стальной трубы диаметром 25x2,5 в объёме 20,2м.;  Монтаж трубопровода из стальной трубы диаметром 57x3 в объёме 10,1м.;  

Монтаж: трубопровода из стальной трубы диаметром 76x3 в объёме 2м.;  Огрунтовка и окраска стальных поверхностей в объёме 19 кем.;  

Очистка и испытание воздухом смонтированных трубопроводов; Перенос арматуры фланцевой номинальным диаметром 150мм - 2шт. 

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 68 по форме КС-2 от 29 июня 2021  

года: 

' - выполнены работы по перевозке грузов 1 класса в объёме 12 927,24т.;  

- согласно Акта о приёмке вьшолненных работ № 109 по форме КС-2 от 29 июня 2021  

года: - установка знаков в объёме 53 шт.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 151 по форме КС-2 от 29 июня 2021  

года. Разработка грунта экскаватором в объёме 1191 куб.м.; Разработка грунта вручную в объеме 25,79 кубм.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 48,8 кубм.;  Засыпка траншей и котлованов бульдозером в объёме 120,9 куб.м.;  

Уплотнение грунта вибротрамбовками в объёме 120,9 кубм.;  Сварка полиэтиленовых труб в объёме 26 соединений;  

Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 225x20,5мм в объёме 310 м.; Укладка сигнальной ленты - 316,2м.; 

- согласно Акта о приёмке выполненных работ № 152 по форме КС-2 от 29 июня 2021  

года. 

Разработка грунта экскаватором в объёме 2697 куб.м.; Разработка грунта вручную в  

объеме 50,5 куб.м.; 

Устройство песчаного основания под трубопроводы в объёме 106,07кубм.; Засыпка  

траншей и котлованов бульдозером в объёме 263 кубм.; Уплотнение грунта  

вибротрамбовками в объёме 263 кубм.; Сварка полиэтиленовых труб в объёме 53 соединений;  Укладка трубопроводов полиэтиленовых размером 225x20,5мм в объёме 687 м.;  

Укладка сигнальной ленты - 687м.; 

По результатам проведённых обмеров было установлено, что подрядчиком выполнены  

следующие объёмы работ, не принятые заказчиком: - устроены временные дороги в объёме 2000 м.; 

- смонтированы предупреждающие знаки в объёме 183 шт.;  - выполнено устройство просек к котельным «ЗК», «1К»,  

- выполнены ПНР на котельной «6К»; - выполнены ПНР на котельной «3»; - частично устроен подводящий газопровод к котельной «ЗК»; - поставлено оборудование для котельной «3»; Объёмы по дополнительным работам указаны в сметных расчётах (Приложение 4) 

 - исходя из стоимости выполненных ООО «Арсенал» (субподрядчик, ответчик) и  принятых ФГУП «ГВСУ № 5» (Генподрядчик, истец) работ с учётом фактически  выполненных, но не принятых- заказчиком работ возможно определить, что стоимость  

фактически выполненных ООО «Арсенал» работ по договору субподряда №  1516187381632090942000000/МО-2015/15/ГАЗ/96 от 19.12.2017 с учетом порядка  ценообразования, предусмотренного договором составляет: 570 360 646,49 руб.  

 - все работы, выполненные ООО «Арсенал» (субподрядчик, ответчик) по договору  субподряда № 1516187381632090942000000/МО-2015/15/ГАЗ/96 от 19.12.2017,  перечисленные в выводах по первому вопросу, выполнены в соответствии с проектной  документацией и в соответствии с требованиями нормативно - технической документации.  

 - при проведении обследования работ, выполненных ООО «Арсенал» (субподрядчик,  ответчик) по договору субподряда № 1516187381632090942000000/МО-2015/15/ГАЗ/96 от  19.12.2017 некачественно не обнаружено.  

 - стоимость работ, выполненных ООО «Арсенал» (субподрядчик, ответчик) по  договору субподряда № 1516Ш381632090942000000/МО-2015/15/ГАЗ/96 от 19.12.2017 и  пригодных к использованию соответствует общей стоимости выполненных ООО «Арсенал»  по Договору работ н составляет 570 360 646,49 руб.  

Из содержания представленного в материалах дела экспертного заключения следует,  что эксперты дали ответы на все вопросы, поставленные перед ним судом. Выводы экспертов  основаны на результатах исследования документации и истцом не опровергнуты.  

Согласно частям 1 и 2 статьи 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте  заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее  исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза,  проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения  сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах  эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная  экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии  экспертов.  

Суд исходит из того, что представленное в материалы дела экспертное заключение  дает ясные и полные ответы на все поставленные вопросы, не содержит каких-либо  противоречий.  

Как следует из части 3 статьи 86 АПК РФ, заключение эксперта, являясь одним из  предусмотренных частью 2 статьи 64 названного Кодекса доказательств, исследуется наряду  с другими доказательствами по делу.  

Названное экспертное заключение исследовано и оценено судом при рассмотрении  дела в порядке статьи 71 АПК РФ. Экспертное заключение соответствует требованиям,  предъявляемым к доказательствам данного вида положениями статьи 86 АПК РФ.  

Бесспорных доказательств того, что заключение судебной экспертизы выполнено не в  соответствии с требованиями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ  «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,  не представлено.  

Ввиду расторжения договора по инициативе истца, у ответчика возникло  обязательство по возврату неиспользованной части аванса в размере 14 879 269,99 руб.  

Оснований для применений положений статьи 404 ГК РФ судом не установлено ввиду  недоказанности ответчиком приведенных обстоятельств.  

Истцом заявлено требование о взыскании договорной неустойки за просрочку  исполнения договоров.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По  требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Условиями договоров предусмотрена ответственность субподрядчика за просрочку  даты окончания работ по договору. Пунктом 13.3. договора установлено, что в случае  нарушения субподрядчиком сроков окончания работ, субподрядчик уплачивает неустойку в  размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.  

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки в порядке, предусмотренном  статьей 333 ГК РФ; кроме того заявлено ходатайство о пропуске сркоа исковой давности.  

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три  года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 указанного Кодекса.  

В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока  исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении  своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.  

Проверив расчет заявленной истцом неустойки, суд считает его неверным. 

Ответчиком было заявлено ходатайство о снижении размера неустойки в связи  с несоразмерностью ее последствиям нарушения обязательства.  

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд пришел к следующим выводам. 

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если  обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд  вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.  

Согласно пункту 69 Пленума № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств», подлежащая неуплате неустойка, установленная законом или договором, в  случае её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть  уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Согласно пункту 75 Пленума № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать  преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование  чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

В пункте 77 Пленум № 7 указано, что снижение размера договорной неустойки,  подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем,  а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение  кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). Установив основания  для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки (пункт 75).  

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, пункт 1 статьи 333 ГК  Российской Федерации в части, закрепляющей право суда уменьшить размер подлежащей  взысканию неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации,  в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно  нарушать права и свободы других лиц (определения от 27 марта 2018 года № 653-О,  от 28 ноября 2019 года № 3032-О и др.).  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  изложеной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000   № 263-О), предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее  чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из  правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления  правом свободного определения размера неустойки; в части первой статьи 333 ГК РФ речь  

идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не  возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Учитывая заявление ответчика о применении положений статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации при исчислении размера неустойки, суд, исходя из  фактических обстоятельств дела, явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства, пришел к выводу о наличии оснований для применения положений статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшения размера взыскиваемой  неустойки.  

Действующее гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве  способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их  неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки  предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения  обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.  

Не ограничивая сумму устанавливаемых договором неустоек, Гражданский кодекс  Российской Федерации предоставляет суду право устанавливать соразмерные основному  долгу их пределы с учетом действительного размера ущерба, причиненного стороне в  конкретном договоре.  

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо  и противоречит ее компенсационной функции.  

Таким образом, определив соотношение размера неустойки с последствиями  нарушения обязательства, суды должны учитывать компенсационную природу неустойки, а  также принцип привлечения к гражданско-правовой ответственности только за  ненадлежащим образом исполненное обязательство.  

Кроме того, в соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 13.01.2011 № 11680/10,  учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под  соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданского  кодекса Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его  потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств. К выводу о наличии оснований для снижения суммы  неустойки суд при рассмотрении конкретного дела приходит в каждом конкретном случае.  

Сложившаяся правоприменительная практика исходит из того, что договорная  неустойка не должна являться способом получения прибыли от контрагента и должна быть  направлена на соблюдение баланса интересов контрагентов гражданско-правовой сделки.  

Поэтому при определении подлежащей взысканию неустойки суд должен установить  баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и отрицательными  последствиями, наступившими для кредитора в результате нарушения обязательства.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки  суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность  неисполнения обязательства.  

Учитывая обстоятельства дела, заявленный истцом размер неустойки, явно не  соответствует последствиям нарушения обязательства, но и искажает содержание самого  правового института неустойки, создает дополнительный источник обогащения.  

Согласно пункту 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации», разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям  

нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для  компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок)  Банка России, существовавшей в период такого нарушения.  

В отсутствие доказательств причинения истцу убытков, вызванных нарушением  ответчиком обязательства, в сумме, сопоставимой с заявленной к взысканию договорной  неустойкой, принимая во внимание длительность нарушения обязательства, и исходя из  явной несоразмерности заявленной к взысканию неустойки последствиям нарушения  обязательства, суд считает возможным применить к спорным правоотношениям статью 333  Гражданского кодекса Российской Федерации, и снизить размер неустойки по договорам  

В связи с вышеизложенным, суд находит обоснованным начисление неустойки за  просрочку выполнения работ на стоимость невыполненного обязательства, то есть на  разность между ценой договора и стоимостью выполненных субподрядчиком работ  с применением однократной учетной ставки Банка России.  

Кроме того, суд полагает, что к расчету неустойки следует применить срок исковой  давности с учетом подачи заявления 31.05.2022 (период с 31.05.2019 по 30.03.2022).  

Судом сделан самостоятельный расчет неустойки по договору, который составил 21  565 735,09 руб.  

Снижение судом неустойки не противоречит принципу справедливой, равной,  разумной ответственности сторон и не нарушает баланс их интересов. Суд счел, что такой  размер ответственности достаточен для обеспечения восстановления нарушенных прав истца  и соответствует принципам добросовестности и разумности  

Наличие оснований для уменьшения размера неустойки суд установил с учетом  компенсационной природы неустойки; исходил из цели соблюдения баланса между  применяемой мерой ответственности и последствиями ненадлежащего исполнения  обязательства, а также во избежание превращения института неустойки в способ обогащения  кредитора вопреки ее компенсационной функции.  

Согласно пункту 1 статье 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных  средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на  сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей  в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не  установлен законом или договором.  

Договором предусмотрено (пункт 15.3.) что ответчик обязан возвратить  неиспользованные денежные средства (неотработанный аванс) в течение 10 календарных  дней с даты расторжения договора.  

 Уведомление о расторжении договора от 06.04.2022 № № ИСХ42-405-1082 от  16.03.22 вручено адресату 30.03.2022, что подтверждается отчетом об отслеживании  почтового отправления.  

С учетом 10-дневного срока на возврат аванса, последний день возврата аванса  приходится на выходной день - 10.04.2022 г. (воскресенье). Соответственно, последний день  возврата аванса-первый рабочий день понедельник 11.04.2022 г., а с 12.04.2022 г. истец  вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам  статьи 395 ГК РФ.  

Проверив расчет заявленной истцом, суд считает его не верным. 

Согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности (банкротстве)) для  обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных  ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и  подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий  на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок,  устанавливаемый Правительством Российской Федерации.  

Целью введения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Закона о несостоятельности  (банкротстве), является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки  отдельным хозяйствующим субъектам.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 с  01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на  возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении  юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за  исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).  

Постановление № 497 вступило в силу со дня его официального опубликования и  действует в течение шести месяцев (с 01.04.2022 по 01.10.2022).  

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о несостоятельности (банкротстве),  на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия,  предусмотренные абзацами 5 и 7 - 10 п. 1 ст. 63 настоящего Федерального закона, в частности  не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за  исключением текущих платежей.  

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1  Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами  (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или  сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые  санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу,  подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63  Закона о банкротстве).  

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного  Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до  30.09.2022) финансовые санкции не начисляются.  

Как разъяснено в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1  Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  (далее - Постановление № 44), в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона № 127-ФЗ на  лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской  Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории  независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности  имущества либо нет.  

Разрешение вопроса о применении положений Постановления Правительства РФ   № 497 в части взыскания финансовых санкций не зависит от момента возникновения  (просрочки исполнения) обязательств, то есть временный запрет на применение  соответствующих санкций распространяется на случаи ненадлежащего исполнения  обязательств, возникших как до введения моратория, так и в период его действия.  

Иное толкование ставит в неравное (худшее) положение те субъекты  предпринимательской деятельности, которые приняли на себя обязательства в период  действия моратория и не исполнили их, по сравнению с теми, кто не исполнил свои  обязательства в период, предшествовавший мораторию, то есть в докризисный период.  

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ответчик имеет право на  применение последствий, предусмотренных в пункте 3 статьи 9.1 Закона о несостоятельности  (банкротстве), поскольку должен находиться в равных экономических условиях с иными  субъектами хозяйственной деятельности.  

В связи с изложенным, в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022),  введенного Постановлением № 497 финансовые санкции не начисляются независимо от  периода (месяца) возникновения задолженности.  

Судом сделан самостоятельный расчет процентов за период с 02.10.222 по 19.10.2023,  который составил 1 314 063,74 руб.  

Требование о дальнейшем начислении признаются правомерными. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с  рассмотрением дела арбитражным судом.  

В соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения  арбитражными судами законодательства об экспертизе» по результатам судебного  разбирательства расходы по экспертизе распределяются между лицами, участвующими в  деле, в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации.  

Руководствуясь статьями 49, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арсенал» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное  военно-строительное управление № 4» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неосновательное обогащение (неотработанный аванс) по договору  1516187381632090942000000/МО-2015/15/ГАЗ/96 от 19.12.2017 в сумме 14 879 269 руб. 99 коп.;  неустойку в размере 21 565 735 руб. 09 коп; проценты за пользование чужими денежными  средствами в размере 1 314 063 руб. 74 коп. и далее по дату фактического исполнения ответчиком  обязательства по возврату неотработанного аванса; судебные расходы по оплате государственной  пошлины в сумме 200 000 руб.; судебные расходы по оплате экспертизы в размере 9 480 руб. 97  коп.; в удовлетворении остальной части требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд  Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области Б.Р. Бурганов