АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-13665/23-67-117

г. Москва

26 июля 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 20 июля 2023 года Полный текст решения изготовлен 26 июля 2023 года 

Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРМЕХСТРОЙ" (117420, 

<

...>, ЭТ 6 ПОМ I КОМ 16 17 20, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2019, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРЕМСТРОЙ-К"  (115114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ДАНИЛОВСКИЙ, ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., Д. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. I КОМ. 1-23, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2019, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 251 449 руб. 21 коп. при участии: от истца: ФИО2, дов. От 03.11.2022г. от ответчика: неявка, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРМЕХСТРОЙ"  (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРЕМСТРОЙ-К" (далее – ответчик) с  учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ:  

- о взыскании неустойки по Договору № 100621-ГМС-П от 10.06.2021 в размере  700 000 рублей;  

- об обязании ООО «СРС-К» передать ООО «ГорМехСтрой» следующие  документы по Договору № 100621-ГМС-П от 10.06.2021:  

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – в 1 (одном) экземпляре на  бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате  программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel  

- исполнительную документацию на фактически выполненные работы,  

указанные в соответствующем акте о приемке выполненны работ (форма № КС-2): общий журнал работ форме КС-6 журнал производства земляных работ журнал входного контроля журнал авторского надзора журнал сварочных работ журнал работ по монтажу строительных конструкций журнал антикоррозийной защиты сварных соединений журнал производства антикоррозийных работ исполнительный чертеж ливневой канализации 

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) геодезическая схема котлована, траншей 

паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, паспорта на заводские  

изделия и инструкции на русском языке, бирки, комплектовочные листы изготовителя 

акт визуального и измерительного контроля сварных швов акт гидравлических испытаний (напорная) акт испытания системы внутреннего водостока (не напорная) акт об окончании монтажных работ 

акт освидетельствования качества грунтового основания с лабораторным  

заключением по освидетельствованию дна и бортов котлована, по уплотнению грунтов  

основания, с ведомостью контрольных измерений 

акт освидетельствования ответственных конструкций с ведомостью  

контрольных измерений акт приемки защитного покрытия 

акты освидетельствоавания скрытых работ на антикоррозийные мероприятия  

(окраска, грунтовка) с ведомостью контрольных измерений с ведомостью контрольных  

измерений 

акты освидетельствования скрытых работ на засыпку, выемку, уплотнение  

грунта, проверку качества засыпанного грунта с ведомостью контрольных измерений  

акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) с  

ведомостью контрольных измерений с ведомостью контрольных измерений 

акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции с  

лабораторными испытаниями на гидроизоляцию с ведомостью контрольных измерений  

с ведомостью контрольных измерений акты промывки (продувки) трубопровода 

акты скрытых работ на засыпку пазух котлована, траншей с ведомостью  

контрольных измерений ведомость смонтированного оборудования и материалов заключение о качестве сварных швов (ВИК и УЗК) 

исполнительная схема нивелировки и смещения от разбивочных осей  

подкрановых балок 

исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонны от  

проектных 

исполнительная схема отклонения осей колонн от вертикали в верхнем сечении  исполнительная схема сварных соединений  

исполнительная схема смещения осей колонн относительно разбивочных осей в  

опроном сечении 

исполнительная схема смещения ферм, балок ригелей с осей на оголовках  

колонн из плоскости рамы копии сертификатов на метериалы и оборудования 

лицензии на проектирование и производство работ по огнезащите,  

свидетельство СРО протокол испытания уплотнения грунта протокол контроля сварных швов неразрушающим способом 

протокол проверки качества огнезащитного состава на металлические  

конструкции документы, подтверждающие квалификацию и аттестацию сварщиков 

- акт приема-передачи исполнительной документации (отдельно по каждому  

виду фактически выполненных работ) (по форме Приложения № 5 к Разделу № 21  

Приложения № 3) подписанный со стороны Подрядчика - в 2 (двух) экземплярах на  

бумажном носителе; 

- о взыскании неустойки в размере 700 000 рублей по Договору № 100621-ГМС- 

П2 от 10.06.2021; 

- об обязании ООО «СРС-К» передать ООО «ГорМехСтрой» следующие  

документы по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021: 

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – в 1 (одном) экземпляре на  

бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате  

программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel 

- исполнительную документацию на фактически выполненные работы,  

указанные в соответствующем акте о приемке выполненны работ (форма № КС-2): общий журнал работ (по форме КС-6) журнал авторского надзора журнал антикоррозийной защиты сварных соединений 

журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин и  

оболочек журнал входного контроля журнал производства антикоррозийных работ журнал производства земляных работ 

журнал работ по монтажу строительных конструкций  журнал сварочных работ  

исполнительный чертеж наружных сетей газопровода  акт визуального и измерительного контроля сварных швов  

акт и справка на обрезку газопровода 

акт и справка приемки места присоединения (врезки) вновь построенного  

наружного газопровода в действующий акт испытания газопровода на герметичность 

акт на очистку внутренней полости газопровода с использованием поршня  акт на приемку СМР по катодной защите и схемам расположения станций  акт на продувку газопровода  

акт на установку контрольных трубок акт на чеканку и герметезацию концов футляра 

акт освидетельствования ответственных конструкций  

акт приемки законченного строительством газопровода на право присоединение  

его к действующей газовой системе акт приемки защитного покрытия 

акты скрытых работ на засыпку грунта с ведомостью контрольных измерений и  

лабораторными испытаниями на плотность грунта геодезическая схема котлована, траншей заключение о качестве сварных швов (ВИК и УЗК) заключение о проверке качества изоляции исполнительгая схема покрановых путей 

исполнительная схема нивелировки и смещения от разбивочных осей  

подкрановых балок 

исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонны от  

проектных 

исполнительная схема отклонения осей колонн от вертикали в верхнем сечении  исполнительная схема сварных соединений  

исполнительная схема смещения осей колонн относительно разбивочных осей в  

опроном сечении 

исполнительная схема смещения ферм, балок ригелей с осей на оголовках  

колонн из плоскости рамы 

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) 

лицензии на проектирование и производство работ по огнезащите,  

свидетельство СРО паспорта и сертификаты на материалы, оборудование протокол испытания уплотнения грунта 

протокол контроля сварных швов неразрушающим способом  

протокол проверки качества огнезащитного состава на металлические  

конструкции протоколы проверки сварных стыков 

справка о выполнении технических условий договоров на технологическое  

присоединение 

строительный паспорт наземного газопровода, газового ввода  

- Акт приема-передачи исполнительной документации (отдельно по каждому  

виду фактически выполненных работ) (по форме Приложения № 5 к Разделу № 21  

Приложения № 3) подписанный со стороны Подрядчика - в 2 (двух) экземплярах на  

бумажном носителе; 

- об установлении неустойки за неисполнение обязательства в натуре (астрент) в  

пользу ООО «ГорМехСтрой» за непередачу документов по Договорам № 100621-ГМС- 

П от 10.06.2021 и № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021; 

- о произведении взаимозачет встречных однородных требований по Договорам  

 № 100621-ГМС-П от 10.06.2021 и № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021;  

 - о взыскании с ООО «СРС-К» в пользу ООО «ГорМехСтрой» задолженность  

по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021 в результате взаимозачета в размере  

251 449,21 рублей. 

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился,  отзыв не представил.  

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые  требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании  следующего.  

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с предметом договора,  Договор № 100621-ГМС-П Ответчик взял на себя обязательства о проведении СМР  Дождевой канализации 500 метров. (Договор 1).  

В соответствии с предметом договора, Договор № 100621-ГМС-П2 Ответчик  взял на себя обязательства о раскопке и обратной засыпке траншеи и котлована для  устройства наружного газопровода среднего давления. (Договор 2).  

По своему содержанию и приложениям Договоры тождественны 

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами  строительного подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися  в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

В соответствии с п.4.1 Договоров 1 и 2, Подрядчик формирует по каждому виду  фактически выполненных работ на основании сметы, утвержденной «В производство  работ», Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с формой,  установленной Разделом 25 Приложения № 3 к Договору, после чего направляет  заказчику:  

- указанный выше акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (отдельно  по каждому виду фактически выполненных работ) – в 9 (девяти) экземплярах на  бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате  программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel;  

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – в 1 (одном) экземпляре на  бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате  программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel;  

- исполнительную документацию на фактически выполненные работы,  указанные в соответствующем акте о приемке выполненны работ (форма № КС-2).  Исполнительная документация предоставляетя в 1 (одном) экземпляре на бумажном  носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате PDF, DWG на  электронном носителе. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с актом о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) по соответствующему виду фактически  выполненных работ исполнительную документацию по данному виду фактически  выполненных работ на основании отдельного акта приема-передачи исполнительной  документации (по форме Приложения № 5 к Разделу № 21 Приложения № 3),  подписанного сторонами;  

- Акт приема-передачи исполнительной документации (отдельно по каждому  виду фактически выполненных работ) (по форме Приложения № 5 к Разделу № 21  Приложения № 3) подписанный со стороны Подрядчика - в 2 (двух) экземплярах на  бумажном носителе;  

- сопроводительное письмо, содержащее реестр передаваемой документации. 

Согласно п.8.1.21 Договоров 1 и 2, для выполнения работ Подрядчик принимает  на себя обязательства передать Заказчику по окончании строительства Объекта и его  приемки Заказчиком-Генподрядчиком и Приемочной комиссией:  

- Объект (результат выполненных работ) 

- сохраненные знаки опорно-высотного полоения Объекта  

- по акту приема-передачи (по форме Приложения № 5 к Разделу № 21  Приложения № 3) исполнительную документацию о выполненных строительных и  монтажных работ, технические паспорта Объекта (при неоходимости)  

- место производства работ 

Согласно п.8.1.42 Договоров 1 и 2, для выполнения работ Подрядчик принимает  на себя обязательства оформлять исполнительную документацию и предоставлять ее  Заказчику по акту приема-передачи исполнительной документации (по форме  Приложения № 5 к Разделу № 21 Приложения № 3) в соответствии с требованиями,  установленными Регламентом по предоставлению исполнительной документации  (Раздел 21 Приложения № 3 к Договору).  

В соответствии с Приложением № 3 к договору 1, являющемуся неотъемлемой  частью договора, Раздел № 20 входит в перечень приложений к договору и является  обязательным для сторон – Регламент по предоставлению исполинтельной  документации подрядными организациями.  

В соответствии с Приложением № 3 к договору 2, являющемуся неотъемлемой  

частью договора, Раздел № 21 входит в перечень приложений к договору и является  

обязательным для сторон – Регламент по предоставлению исполинтельной  

документации подрядными организациями. 

Данный регламент утвержден Заказчиком работ – АО «Мосинжпроект»,  

заверенную копию прилагаю. 

Раздел 15 указанного Регламента посвящен составу передаваемой  

исполнительной документации, что соответствует предмету настоящего спора. 

Так, в соответствии с п.15.3 Регламента (л.49), исполнительная документация по  

по сетям инженерно-технического обеспечения «Дождевая канализация» состоит из: 15.3.1. Акты освидетельствования скрытых работ 

15.3.2. Ведомость изменений и отступлений от проекта  

15.3.3. Паспорта, сертификаты на материалы, оборудование, исполнительные  

схемы и протоколы испытаний 15.3.4. Акт технической приемки 15.3.5. Акт о подключении (технологическом присоединении) 

15.3.6. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при  

выполнении работ на территории города Москвы 15.3.7. Исполнительный чертеж со штампом эксплуатирующей организации 15.3.8. Документ о выполнении ТУ 

15.3.9. Копия реестра переданной исполнительной документации с отметкой о  

принятии в архив эксплуатирующей организации или иной документ, подтверждающий  

передачу исполнительной документации в эксплуатирующую организацию. 

15.3.10. Иные документы, предусмотренные законодательством и  

подтверждающие фактическое выполнение проектных решений 

Также в Регламенте представлен примерный перечень исполнительной  

документации по видам работ. 

Разработка грунта и крепления котлованов, траншей, устройство распорной  

системы (стр.60 Регламента) предусматривает следующие виды исполнительной  

документации (Раздел 1 к КС-2 от 31.01.2022 к Договору 1, пп.1-9 к КС-2 от 31.07.2021  

к Договору 2): 

- журнал входного контроля или акт входного контроля  - общий журнал работ  

- журнал производства земляных работ - журнал авторского надзора - паспорта и сертификаты на материалы - заключение о качестве сварных швов (ВИК и УЗК) - акты освидетельствования скрытых работ 

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) - геодезическая схема котлована, траншей 

БСС (буросекущие сваи) (пп.10-12 к КС-2 от 31.07.2021 к Договору 2, п.6 к КС-2  

от 30.11.2021 к Договору 2): - общий журнал работ - журнал входного контроля - журнал авторского надзора 

- журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин и  

оболочек - журнал сварочных работ - паспорта и сертификаты на материалы - акты освидетельствования скрытых работ - исполнительная схема 

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) 

Забутовка/засыпка пазух песком (стр.65 Регламента) (Раздел 1 к КС-2 от  

31.01.2022 к Договору 1, пп.1-5 к КС-2 от 30.11.2021 к Договору 2): 

- журнал входного контроля или акт входного контроля  - общий журнал работ  

- журнал производства земляных работ - журнал авторского надзора - акты скрытых работ на засыпку пазух котлована 

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) - исполнительная схема - паспорта и сертификаты на песок - протокол испытания уплотнения грунта 

Стальные металлоконструкции (стр.68 Регламента) (Раздел 2 к КС-2 от  

31.01.2022 к Договору 1, Раздел 2 к КС-2 от 31.07.2021 к Договору 2, Раздел 2 к КС-2 от  

30.11.2021 к Договору 2): - общий журнал работ 

- журнал работ по монтажу строительных конструкций  - журнал сварочных работ  

- журнал антикоррозийной защиты сварных соединений  - журнал производства антикоррозийных работ  

- журнал входного контроля  - журнал авторского надзора 

- исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонны от  

проектных 

- исполнительная схема смещения осей колонн относительно разбивочных осей  

в опроном сечении 

- исполнительная схема отклонения осей колонн от вертикали в верхнем сечении   -исполнительная схема смещения ферм, балок ригелей с осей на оголовках  

колонн из плоскости рамы 

- исполнительная схема нивелировки и смещения от разбивочных осей  

подкрановых балок - исполнительгая схема покрановых путей - исполнительная схема сварных соединений 

- акт освидетельствования ответственных конструкций  - акт приемки защитного покрытия  

- акт визуального и измерительного контроля сварных швов  - протокол контроля сварных швов неразрушающим способом  

- протокол проверки качества огнезащитного состава на металлические  

конструкции 

- лицензии на проектирование и производство работ по огнезащите,  

свидетельство СРО. Ливнево-дождевая канализация (стр.80 Регламента) (Договор 1): - акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) 

- акты освидетельствоавания скрытых работ на антикоррозийные мероприятия  

(окраска, грунтовка) - акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции - акты промывки (продувки) трубопровода 

- акт испытания системы внутреннего водостока (не напорная)  - акт гидравлических испытаний (напорная)  

- ведомость смонтированного оборудования и материалов 

- копии сертификатов на метериалы и оборудования  

- паспорта на заводские изделия и и нструкции на русском языке, бирки,  

комплектовочные листы изготовителя - исполнительные схемы 

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) - документы, подтверждающие квалификацию и аттестацию сварщиков - акт об окончании монтажных работ 

- иные документы, предусмотренные законодательством и подтверждающие  

фактическое выполнение работ Газопровод (стр.103 Регламента) (Договор 2) - паспорта на устанавливаемое оборудование - сертификаты соответствия - исполнительная схема 

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) 

- акт приемки законченного строительством газопровода на право  

присоединение его к действующей газовой системе 

- акт на приемку СМР по катодной защите и схемам расположения станций  - акт испытания газопровода на герметичнсоть  

- строительный паспорт наземного газопровода, газового ввода 

- акт и справка приемки места присоединения (врезки) вновь построенного  

наружного газопровода в действующий - акт и справка на обрезку газопровода - акт на установку контрольных трубок - акт на чеканку и герметезацию концов футляра - акт на продувку газопровода 

- акт на очистку внутренней полости газопровода с использованием поршня  - заключение о проверке качества изоляции  

- протоколы проверки сварных стыков 

- справка о выполнении технических условий договоров на технологическое  

присоединение 

П.14.4 Договоров 1 и 2 предусмотрено, что к актам освидетельствования  

скрытых работ прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная  

съемка и схемы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов,  

паспорта и сертификаты на применяемые материалы. 

Тиакм образом, журнал КС-6а предусмотрен п.4.1 Договоров 1 и 2, акты  

освидетельствования предусмотрены 14 разделом Договоров 1 и 2, приложения к нему  

поименованы в п.14.4. Остальной перечень исполнительной документации прямо  

поименован в Регламенте по предоставлению исполинтельной документации  

подрядными организациями – раздел 20 Приложения 3 к Договору 1 и раздел 21  

Приложения 3 к Договору 2, являющимся неотъемлемой частью договора, и как  

следствие, обязательный к применению. 

На основании статьи 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с  

результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования  

предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер  

информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для  

целей, указанных в договоре. 

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать, в том числе, ведение  

исполнительной документации. При этом состав и порядок ведения исполнительной  

документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых  

ведется учет выполнения работ, могут устанавливаться нормативными правовыми  актами Российской Федерации (часть 9 статьи 52 Градостроительного кодекса  Российской Федерации).  

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования об  обязании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "САНРЕМСТРОЙ-К" передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРМЕХСТРОЙ" документы по Договорам № 100621-ГМС- П от 10.06.2021 и № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021 подлежат удовлетворению.  

Определяя срок по передаче документов, суд руководствуется следующим. 

В силу части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные  действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества,  арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить  эти действия, а также место и срок их совершения.  

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено,  что, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в  натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно  быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока, суд  учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности  исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.  

С учетом изложенного, суд признает разумным и обоснованным срок по  передаче документов – 10 календарных дней с даты вступления решения в законную  силу.  

Истцом заявлено требование о взыскании судебной неустойки на случай  неисполнения судебного акта в части передачи документации в размере 500 рублей за  каждый день просрочки за каждый документ.  

Рассмотрев указанное требование суд считает возможным его удовлетворить в  силу следующего.  

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации в  случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду  исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом,  иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по  требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай  неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе  принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из  незаконного или недобросовестного поведения.  

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в  натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое  исполнение объективно возможным.  

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить  обязательство в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или  договора, но и существо соответствующего обязательства.  

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в  натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца  возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет  обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например,  обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика,  либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик  

(постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О  применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств").  

Согласно п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016  года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" исходя из  положений пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к  своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего  воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению  судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не  связанного с лишением владения, судом могут быть присуждены денежные средства на  случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора- взыскателя.  

 В пункте 31 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда РФ  разъяснено, что судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению  истца (взыскателя) как одновременно с вынесением решения о понуждении к  исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках  исполнительного производства.  

Учитывая изложенное, именно факт неисполнения судебного акта, вступившего  в законную силу по настоящему делу, в установленный судом срок станет причиной  возникновения у истца права требовать присуждения судебной неустойки на основании  ст. 308.3 ГК РФ.  

Закон N 42-ФЗ, которым введена судебная неустойка, вступил в силу с  01.06.2015.  

Мера ответственности за неисполнение судебного акта, предусмотренная  статьей 308.3 ГК РФ, связана с обязательством ответчика (должника) исполнить  решение суда, вступившее в законную силу, в сроки, установленные судебным актом, и  должна применяться вне зависимости от существа исковых требований и содержания  судебного акта.  

Взыскание судебной неустойки по смыслу ст. 308.3 Гражданского Кодекса  Российской Федерации является гражданско-правовой санкцией за неисполнение  решения суда, в силу чего момент применения данной нормы обусловлен моментом  совершения соответствующего правонарушения (неисполнения решения суда).  

В соответствии с п. 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 7  положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Закона N 42-ФЗ  применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления его в силу, если  иное не предусмотрено статьей 2 Закона N 42-ФЗ. По правоотношениям, возникшим до  дня вступления в силу Закона N 42-ФЗ, положения Гражданского кодекса РФ в  измененной редакции применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут  после дня вступления Закона N 42-ФЗ в силу (01.06.2015).  

Согласно пункту 2 статьи 2 Закона 42-ФЗ положения Гражданского кодекса  применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего  Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу  настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса применяются к  тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу  настоящего Федерального закона.  

По настоящему делу срок для исполнения ответчиком неденежных обязательств,  установленный судебным актом, после вступления в силу новых норм Гражданского  законодательства, введенных в действие Законом 42-ФЗ.  

Неустойка, предусмотренная ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской  Федерации, применяется не в отношении договора или обязательств по договору, а за  неисполнение решения суда в срок, установленный судебным актом (астрент).  

При определении размера астрента в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от  04.04.2014 N 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за  неисполнение судебного акта" рекомендовал судам учитывать следующие факторы:  степень затруднительности исполнения судебного акта, наличие возможности  ответчика добровольно исполнить судебный акт, имущественное положение ответчика  (например, размер его финансового оборота), иные обстоятельства, заслуживающие  внимания. Но самое важное, что в результате присуждения такой суммы исполнение  судебного акта для ответчика должно оказаться более выгодным, чем его  неисполнение.  

Это значит, что сумма астрента должна превосходить возможные выгоды от  неисполнения решения.  

При этом, размер присуждаемой суммы относится к оценочной категории и  может устанавливаться в любом размере, превышающем реальные затраты на  исполнение судебного акта. Вместе с тем, очевидно, денежная сумма не должна быть  чрезмерно обременительной для должника и в совокупности с иными мерами  ответственности за неисполнение обязательства приводить к прекращению его  деятельности.  

Определяя размер астрента, суд может учитывать ссылку должника на  уважительные причины, препятствующие исполнению, или иные обстоятельства.  

Согласно п. 1 ст. 308.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации суд  определяет размер астрента на основе принципов справедливости, соразмерности и  недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.  

В соответствии со статьей 308.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации в  случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду  исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,  иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по  требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи  330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом  судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости  извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи  1). Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов  справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного  или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

При этом предполагается, что в результате такого присуждения исполнение  судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его  неисполнение.  

Таким образом, действующее законодательство, исходя из вышеуказанных  разъяснений, позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения  судебного акта.  

С учетом названных положений и установленных фактических обстоятельств  при рассмотрении настоящего дела, суд приходит к выводу, что заявление истца  подлежит удовлетворению в части взыскания неустойки в размере 500 руб. за каждый  день в случае неисполнения обязанности по передаче исполнительной документации.  

Устанавливая судебную неустойку в названном размере, суд учитывает, что  ответчику предоставлен срок для исполнения вступившего в законную силу решения  суда. В такой ситуации, судебная неустойка в размере 500 руб. за каждый день  неисполнения решения суда отвечает принципу справедливости и соразмерности. В то  время, как установление судебной неустойки в более низком размере может привести к  тому, что ответчик утратит интерес в исполнении настоящего судебного акта, в то  время, как для его исполнения необходимы активные действия самого ответчика.  

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании неустойки по Договору   № 100621-ГМС-П от 10.06.2021 в размере 700 000 рублей, неустойки в размере 700 000  рублей по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021.  

Согласно п. 11.4 Договора, если другая ответственность не установлена  условиями Договора, Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает  заказчику:  

- за непредоставление и\или несвоевременной предоставление акта о  приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных  работ и затрат (форма № КС-3) и журнала учета выполненных работ (форма № КС-ба)  на электронном носителе в формате программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel  -неустойку в размере - 10 000 рублей за каждый день просрочки предоставления  указанных документов на электронном носителе, а в случае просрочки предоставления  документов более чем на 10 календарных дней, размер неустойки начиная с 11-го дня  просрочки состаляет 50 000 рублей за каждый день просрочки;  

за непредоставление и\или несвоевременное предоставление Подрядчиком  исполнительной документации отдельно по каждому виду фактически выполненных  работ в соответствии с п.4.1 Договора - штраф в размере 200 000 рублей за каждый  факт нарушения;  

- за непредоставление и\или несвоевременное предоставление  Подрядчиком каждого из документов, составляющих документацию, указанную в п.9.5  Договора и\или исполнительной документации по каждому виду фактически  выполненных работ в соответствии с п. 19.9 Договора - штраф в размере 500 000  рублей за каждый факт нарушения.  

Согласно п.11.9 Договора, Заказчик вправе удержать суммы штрафов, неустойки  а также убытков, подлежащих уплате или возмещению Подрядчиком, в счет погашения  обязательств Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ.  

Связи с тем, что Ответчик по настоящее время не передал исполнительную  документацию согласно пп.4.1, 8.1.21, 8.1.42 Договора, начислению подлежит штраф в  размере 200 000 рублей.  

В связи с тем, что Ответчик по настоящее время не передал документы по  Объекту, согласно п.9.5 Договора, начислению подлежит штраф в размере 500 000  рублей.  

Сумма штрафных санкций в размере 700 000 рублей, согласно п.11.9 Договора  удерживается в счет погашения обязательств Заказчика по оплате выполненных  Подрядчиком работ, о чем Ответчик был уведомлен в досудебной претензии.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение ею условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).  

В сил) ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в  случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также  период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по  существу ответчиком.  

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика неустойки по  Договору № 100621-ГМС-П от 10.06.2021 в размере 700 000 рублей, неустойки в  размере 700 000 рублей по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021 подлежат  удовлетворению в полном объеме.  

Также истцом заявлено требование о произведении взаимозачет встречных  однородных требований по Договорам № 100621-ГМС-П от 10.06.2021 и № 100621- ГМС-П2 от 10.06.2021; о взыскании с ООО «СРС-К» в пользу ООО «ГорМехСтрой»  задолженность по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021 в результате взаимозачета  в размере 251 449,21 рублей.  

Согласно п.4.11 Договора, Подрядчик в порядке статей 329 и 381.1  Гражданского Кодекса РФ вносит в пользу Заказчика в качестве способа обеспечения  обязательств по Договору (в том числе гарантийных) обеспечительный платеж в  размере 5% от цены Договора (включая НДС), указанной в п.3.1 Договора, на срок  выполнения работ и истечения гарантийного срока плюс 1 месяц. Подрядчик  предоставляет Заказчику право на удержание части цены Договора в общем размере 5%  от цены Договора (включая НДС), указанной в п.3.1 Договора, из платежей,  причитающихся Подрядчику за выполненные работы.  

Сумма гарантийного удержания в размере 118 300,26 рублей, согласно п.4.11  Договора, удерживается в счет погашения обязательств Заказчика по оплате  выполненных Подрядчиком работ, о чем Ответчик был уведомлен в досудебной  претензии  

На основании Соглашения об уступке права требования и зачете взаимных  требований от 04.04.2022, заключенного между ООО «СРС-К» и ООО  «ГорИнжПроект-Москва» Ответчик передал право требования по настоящем договору  ООО «ГорИнжПроект-Москва» в части требования на сумму 1 099 154,17 рублей.  

Таким образом, из причитающейся Ответчику задолженности в размере 1 266  851,05 рублей за выполненные работы за вычетом вышеуказанных сумм задолженность  в пользу Ответчика составила 448 550.79 рублей.  

Между ООО «СРС-К» и ООО «ГорИнжПроект-Москва» заключено Соглашение  об уступке прав требования и зачете взаимных требований от 18.10.2021 года, в  соответствии с которым Ответчик передал право требования в размере 9 268 789,57  рублей, вытекающих из подписанных КС-2 № 1 от 31.07.2021 года по Договору   № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021 ООО «ГорИнжПроект-Москва». Т.е. на указанную  суммы Ответчик прекратил кредиторские права.  

Между ООО «СРС-К» и ООО «ГорИнжПроект-Москва» заключено Соглашение  об уступке прав требования и зачете взаимных требований от 01.04.2022 года, в  соответствии с которым Ответчик передал право требования в размере 2 780 641,54  рублей, вытекающих из подписанных КС-2 № 2 от 30.11.2021 года (КС-3 № 2 от  30.11.2021 года) по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021 ООО «ГорИнжПроект- Москва». Т.е. на указанную суммы Ответчик прекратил кредиторские права.  

Согласно ст.410 ГК РФ, Обязательство прекращается полностью или частично  зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок  которого не указан или определен моментом востребования. В случаях,  предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования,  срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.  

В досудебной претензии Истец заявил о зачете встречных однородных  требований: задолженность перед Ответчиком по оплате выполненных работ в размере  448 550,79 рублей по Договору № 100621-ГМС-П от 10.06.2021, где Ответчик является  кредитором, зачитывается в счет образовавшейся задолженности перед Истцом по  Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021 в размере 700 000 рублей.  

Таким образом, в результате взаимозачета встречных однородных требований  задолженность Ответчика перед Истцом по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021  составляет 251 449,21 рублей, по Договору № 100621-ГМС-П от 10.06.2021 все  взаимные обязательства погашены.  

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на  исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле  доказательствам.  

 В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое  доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими  доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее  установленной силы.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Согласно п. 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от  11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при  рассмотрении дел в арбитражных судах" в тех случаях, когда до окончания  рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично  либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины,  увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд,  вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины  разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.  

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина  взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета  применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований  государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего  размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана  отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.  

Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 110 АПК РФ с ответчика подлежит  взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 27 485  рублей.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"САНРЕМСТРОЙ-К" (ИНН: 

<

***>) в срок не позднее 10 календарных дней со  

дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу передать  

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРМЕХСТРОЙ" (ИНН:  

<

***>) следующие документы: по Договору № 100621-ГМС-П от 10.06.2021: 

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – в 1 (одном) экземпляре на  

бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате  

программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel 

- исполнительную документацию на фактически выполненные работы,  

указанные в соответствующем акте о приемке выполненны работ (форма № КС-2): общий журнал работ форме КС-6 журнал производства земляных работ журнал входного контроля 

журнал авторского надзора  

журнал сварочных работ журнал работ по монтажу строительных конструкций журнал антикоррозийной защиты сварных соединений журнал производства антикоррозийных работ исполнительный чертеж ливневой канализации 

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) геодезическая схема котлована, траншей 

паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, паспорта на заводские  

изделия и инструкции на русском языке, бирки, комплектовочные листы изготовителя 

акт визуального и измерительного контроля сварных швов акт гидравлических испытаний (напорная) 

акт испытания системы внутреннего водостока (не напорная)  акт об окончании монтажных работ  

акт освидетельствования качества грунтового основания с лабораторным  

заключением по освидетельствованию дна и бортов котлована, по уплотнению грунтов  

основания, с ведомостью контрольных измерений 

акт освидетельствования ответственных конструкций с ведомостью  

контрольных измерений акт приемки защитного покрытия 

акты освидетельствоавания скрытых работ на антикоррозийные мероприятия  

(окраска, грунтовка) с ведомостью контрольных измерений с ведомостью контрольных  

измерений 

акты освидетельствования скрытых работ на засыпку, выемку, уплотнение  

грунта, проверку качества засыпанного грунта с ведомостью контрольных измерений  

акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) с  

ведомостью контрольных измерений с ведомостью контрольных измерений 

акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции с  

лабораторными испытаниями на гидроизоляцию с ведомостью контрольных измерений  

с ведомостью контрольных измерений акты промывки (продувки) трубопровода 

акты скрытых работ на засыпку пазух котлована, траншей с ведомостью  

контрольных измерений ведомость смонтированного оборудования и материалов заключение о качестве сварных швов (ВИК и УЗК) 

исполнительная схема нивелировки и смещения от разбивочных осей  

подкрановых балок 

исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонны от  

проектных 

исполнительная схема отклонения осей колонн от вертикали в верхнем сечении  исполнительная схема сварных соединений  

исполнительная схема смещения осей колонн относительно разбивочных осей в  

опроном сечении 

исполнительная схема смещения ферм, балок ригелей с осей на оголовках  

колонн из плоскости рамы копии сертификатов на метериалы и оборудования 

лицензии на проектирование и производство работ по огнезащите,  

свидетельство СРО протокол испытания уплотнения грунта 

протокол контроля сварных швов неразрушающим способом  

протокол проверки качества огнезащитного состава на металлические  конструкции  

документы, подтверждающие квалификацию и аттестацию сварщиков 

- акт приема-передачи исполнительной документации (отдельно по каждому  виду фактически выполненных работ) (по форме Приложения № 5 к Разделу № 21  Приложения № 3) подписанный со стороны Подрядчика - в 2 (двух) экземплярах на  бумажном носителе.  

по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021:  

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – в 1 (одном) экземпляре на  

бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате  

программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel 

- исполнительную документацию на фактически выполненные работы,  

указанные в соответствующем акте о приемке выполненны работ (форма № КС-2): общий журнал работ (по форме КС-6) журнал авторского надзора журнал антикоррозийной защиты сварных соединений 

журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин и  

оболочек журнал входного контроля журнал производства антикоррозийных работ журнал производства земляных работ 

журнал работ по монтажу строительных конструкций  журнал сварочных работ  

исполнительный чертеж наружных сетей газопровода  акт визуального и измерительного контроля сварных швов  

акт и справка на обрезку газопровода 

акт и справка приемки места присоединения (врезки) вновь построенного  

наружного газопровода в действующий акт испытания газопровода на герметичность 

акт на очистку внутренней полости газопровода с использованием поршня  акт на приемку СМР по катодной защите и схемам расположения станций  акт на продувку газопровода  

акт на установку контрольных трубок акт на чеканку и герметезацию концов футляра 

акт освидетельствования ответственных конструкций  

акт приемки законченного строительством газопровода на право присоединение  

его к действующей газовой системе акт приемки защитного покрытия 

акты скрытых работ на засыпку грунта с ведомостью контрольных измерений и  

лабораторными испытаниями на плотность грунта геодезическая схема котлована, траншей заключение о качестве сварных швов (ВИК и УЗК) заключение о проверке качества изоляции исполнительгая схема покрановых путей 

исполнительная схема нивелировки и смещения от разбивочных осей  

подкрановых балок 

исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонны от  

проектных исполнительная схема отклонения осей колонн от вертикали в верхнем сечении исполнительная схема сварных соединений 

исполнительная схема смещения осей колонн относительно разбивочных осей в  

опроном сечении 

исполнительная схема смещения ферм, балок ригелей с осей на оголовках  

колонн из плоскости рамы 

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам (исполинтельный чертеж) 

лицензии на проектирование и производство работ по огнезащите,  

свидетельство СРО паспорта и сертификаты на материалы, оборудование протокол испытания уплотнения грунта 

протокол контроля сварных швов неразрушающим способом  

протокол проверки качества огнезащитного состава на металлические  

конструкции протоколы проверки сварных стыков 

справка о выполнении технических условий договоров на технологическое  

присоединение 

строительный паспорт наземного газопровода, газового ввода  

- Акт приема-передачи исполнительной документации (отдельно по каждому  

виду фактически выполненных работ) (по форме Приложения № 5 к Разделу № 21  

Приложения № 3) подписанный со стороны Подрядчика - в 2 (двух) экземплярах на  

бумажном носителе. 

В случае несвоевременно исполнения судебного акта взыскать с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРЕМСТРОЙ-К" (ИНН: 

<

***>)  в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ГОРМЕХСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) судебную неустойку в соответствии со ст. 308.3  Гражданского кодекса Российской Федерации РФ в размере 500 (пятьсот) руб. 00 коп.  за каждый день неисполнения решения суда.  

Произвести взаимозачет встречных однородных требований по Договорам   № 100621-ГМС-П от 10.06.2021 и № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "САНРЕМСТРОЙ-К" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРМЕХСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) неустойку по  Договору № 100621-ГМС-П от 10.06.2021 в размере 700 000 (семьсот тысяч) руб. 00  коп., неустойку по Договору № 100621-ГМС-П2 от 10.06.2021 в размере 700 000  (семьсот тысяч) руб. 00 коп., задолженность по Договору № 100621-ГМС-П2 от  10.06.2021 в результате взаимозачета в размере 251 449 (двести пятьдесят одна тысяча  четыреста сорок девять) руб. 21 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 8 029  (восемь тысяч двадцать девять) руб. 00 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "САНРЕМСТРОЙ-К" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в  размере 27 485 (двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев