Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Пенза                                                                                          Дело № А49-9858/2019

«22» января  2020  года

Резолютивная часть решения  объявлена  «20»  января  2020 года

Решение в  полном объёме изготовлено «22» января  2020 года

Арбитражный  суд Пензенской области в составе судьи Кудрявцевой Ж.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Брыновой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Оттим» (440028, 

<

...>;  ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Мегастрой» (440008, 

<

...>; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)

о взыскании 3 109 338 руб. 25 коп.

при участии в заседании:

от истца: ФИО1 – генеральный директор;

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности;

установил:

общество  с ограниченной ответственностью «Оттим» обратилось  в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением   к Обществу с ограниченной ответственностью «Мегастрой» о взыскании 3 109 338 руб. 25 коп., в том числе долг в сумме 3 018 775 руб. по договору подряда от 07 февраля 2019 года, неустойка в сумме 90 563 руб. 25 коп., начисленная  за период с 24.05.2019 г. по 20.08.2019 г. 

Судебное разбирательство по делу  назначено  на 20  января  2020 года на 11 часов 00 мин. 

Представитель истца поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика  письменный мотивированный отзыв на иск суду не представил,  при этом, признал заявленные  исковые требования в полном объёме.

Исследовав материалы дела,  заслушав  представителей сторон, арбитражный суд установил следующее:

07  февраля 2019 года  между   ООО  «Оттим» (подрядчик, истец)  и   ООО  «Мегастрой» (заказчик, ответчик)  заключён  договор подряда по условиям которого,  истец принял на себя обязательство  выполнить работы по монтажу котельной  на  объекте «Наружные  инженерные сети к многоквартирным жилым домам стр. №7, №8 со встроенными административными помещениями в с. Засечное Пензенского района  Пензенской области (п.1.1).

Согласно п.1.2  договора объём работ, подлежащих выполнению, а также их стоимость, определяются сторонами в Приложении №1 к договору.

Цена работ по договору определяется на сновании Приложения №1 и составляет 3 818 775 руб. (п.2.1).

Оплаты работ  производится заказчиком  в следующем порядке (п.3.1.1-3.1.4): 

В течение пяти рабочих дней с даты  заключения  договора Заказчик оплачивает аванс в размере 30 % цены договора. 

В течение двадцати пяти рабочих  дней с момента подписания Заказчиком документов по форме КС-2 и КС-3, отражающих объём фактически выполненных  подрядчиком работ за отчётный месяц, заказчик уплачивает подрядчику фактически выполненные с надлежащим качеством работы. 

Окончательный расчёт  с Подрядчиком производится в течение двадцати пяти рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ, указанного в разделе 8 договора, передачи Заказчику счета – фактуры, а также подписания актов по форме КС-2 и КС-3. 

Согласно  п.11.2  договора  при нарушении договорных обязательств заказчик несёт ответственность за нарушение срока окончательного расчёта по договору более, чем на десять календарных  дней, заказчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы платежа, уплата которого просрочена за каждый день просрочки, но не свыше трёх процентов от суммы платежа, уплата которой просрочена.    

Как следует из искового заявления и признаётся ответчиком, истец выполнил для ответчика предусмотренные договором работы, что подтверждается  подписанными сторонами актом и справкой формы КС-2 и КС-3 от 15.04.2019 г. №1 на сумму 3 818 775 руб. 00 коп. (л.д.23-27).

При этом обязательство по оплате ответчиком исполнено частично, истец числит за ответчиком долг в сумме 3 018 775 руб., который признан   ответчиком в судебном заседании. 

В  соответствии  с п. 11.2  договора истцом  заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки  в сумме  90 563 руб. 25 коп., начисленной  за период с 24.05.2019 г. по 20.08.2019 г. 

Расчет неустойки проверен судом и признан верным, возражений по расчету неустойки от ответчика не поступило.

В судебном заседании  представитель ответчика признал исковые требования в полном объёме. 

С учетом изложенного, требования истца о взыскании задолженности и неустойки на основании ст. ст. 309, 310, 330, 702, 709  Гражданского кодекса РФ  подлежат удовлетворению полностью в сумме основного  долга  3 018 775 руб. 00 коп. и неустойки в сумме 90 563 руб. 25 коп.

Согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить полностью, судебные расходы отнести на ответчика.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МЕГАСТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОТТИМ»» сумму 3 109 338 руб. 25 коп., в том числе основной долг в сумме 3 018 775 руб. 00 коп. и неустойку в сумме 90 563 руб. 25 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 38 547 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его принятия.

 

     Судья                                                                                    Ж.В. Кудрявцева