СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-6378/2023-ГК

г. Пермь

22 августа 2023 года

Дело № А71-13/2023

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 22 августа 2023 года.

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего       Пепеляевой И.С.,

судей                                               Муталлиевой И.О., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, муниципального унитарного предприятия г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания – Спецдомоуправление»,

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19 апреля 2023 года

по делу № А71-13/2023        

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 320183200057696, ИНН 

<

***>)

к муниципальному унитарному предприятию г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания – Спецдомоуправление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

о взыскании задолженности по договору подряда

 

в отсутствие представителей участвующих в деле лиц, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец, ИП ФИО2, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к муниципальному унитарному предприятию г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания – Спецдомоуправление» (далее – ответчик, предприятие) о взыскании 873 865,08 руб. долга (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.01.2023 к участию в деле в порядке статьи 51 АПК РФ в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (далее – общество «Гарант», третье лицо).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19.04.2023 иск удовлетворен в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил обжалуемое решение отменить, принять новый судебный акт, ссылаясь на наличии недостатков работ, выявленных в процессе эксплуатации.

Истец и третье лицо направили письменные отзывы на апелляционную жалобу, в которых, ссылаясь на несостоятельность доводов апеллянта, просят решение суда первой инстанции оставить без изменения.

С отзывом на апелляционную жалобу в качестве дополнительного доказательства представлена копия акта сверки, которая к материалам дела приобщена, поскольку представлена в обоснование возражений на доводы апелляционной жалобы.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии со статьей 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, и верно установлено судом первой инстанции, между предприятием (заказчик) и обществом «Гарант» (подрядчик) заключен договор подряда от 24.07.2020 № 192/04/Т в редакции дополнительного соглашения от 25.03.2021 № 1 (далее – договор), в соответствии с условиями которого (пункт 1.1) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить текущий ремонт по устройству козырьков входных групп подъездов № № 1,2,3,4 в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его, в соответствии с условиями договора.

Сроки выполнения работ согласно пункту 2.1 договора составляют: со дня подписания договора до 30.09.2020.

Пунктом 3.1 договора определено, что цена работ по договору, согласно утвержденным локальным сметным расчетам № 02-01-01 (приложение №2 договора) составляет 144 619,20 руб. Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется на основании актов о приемке выполненных работ, в которых указана стоимость выполненных подрядчиком и согласованных заказчиком работ.

В соответствии с пунктом 3.2 договора оплата работ производится в течение 30 дней со дня получения заказчиком счета-фактуры, с приложением подписанных актов о приемке выполненных работ, любым не запрещенным способом.

В силу пункта 6.5 договора сдача результатов работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актами приёмки выполненных работ Акты о приемке выполненных работ, подписанные полномочным представителем сособственников МКД, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение заказчику представляет подрядчик. Подрядчик предъявляет заказчику на оплату счет-фактуру с подписанными актами о приемке выполненных работ по 14.12.2020.

Кроме того, между предприятием (заказчик) и обществом «Гарант» (подрядчик) заключен договор подряда от 24.07.2020 № 194/04/Т в редакции дополнительных соглашении от 22.10.2020 № 1, от 25.03.2021 № 2 (далее – договор), в соответствии с условиями которого (пункт 1.1) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить текущий ремонт по устройству козырьков входных групп подъездов № № 1,2,3,4 в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его, в соответствии с условиями договора.

Сроки выполнения работ согласно пункту 2.1. договора составляют: со дня подписания договора до 30.10.2020.

Пунктом 3.1 договора определено, что цена работ по договору, согласно утвержденным локальным сметным расчетам №02-01-01 (приложение №2 договора) составляет 144 619 руб. 20 коп. Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется на основании актов о приемке выполненных работ, в которых указана стоимость выполненных подрядчиком и согласованных заказчиком работ.

В соответствии с пунктом 3.2 договора оплата работ производится в течение 30 дней со дня получения заказчиком счета – фактуры, с приложением подписанных актов о приемке выполненных работ, любым не запрещенным способом.

Согласно пункту 6.5 договора сдача результатов работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актами приёмки выполненных работ Акты о приемке выполненных работ, подписанные полномочным представителем сособственников МКД, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение заказчику представляет подрядчик. Подрядчик предъявляет заказчику на оплату счет-фактуру с подписанными актами о приемке выполненных работ по 25.11.2020.

Также, между предприятием (заказчик) и обществом «Гарант» (подрядчик) заключен договор подряда от 24.07.2020 №195/04/Т в редакции дополнительного соглашения от 25.03.2021 №1, (далее – договор), в соответствии с условиями которого (пункт 1.1) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить текущий ремонт по устройству козырьков входных групп подъездов № № 1,2,3,4,5,6 в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его, в соответствии с условиями договора.

Сроки выполнения работ согласно пункту 2.1 договора составляют: со дня подписания договора до 30.09.2020.

Пунктом 3.1 договора определено, что цена работ по договору, согласно утвержденным локальным сметным расчетам № 02-01-01 (приложение №2 договора) составляет 216 928,80 руб. Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется на основании актов о приемке выполненных работ, в которых указана стоимость выполненных подрядчиком и согласованных заказчиком работ.

В соответствии с пунктом 3.2 договора оплата работ производится в течение 30 дней со дня получения заказчиком счета-фактуры, с приложением подписанных актов о приемке выполненных работ, любым не запрещенным способом.

В пункте 6.5 договора определено, что сдача результатов работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актами приёмки выполненных работ Акты о приемке выполненных работ, подписанные полномочным представителем сособственников МКД, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение заказчику представляет подрядчик. Подрядчик предъявляет заказчику на оплату счет-фактуру с подписанными актами о приемке выполненных работ по 27.11.2020.

Кроме того, 28.08.2020 между предприятием (заказчик) и обществом «Гарант» (подрядчик) заключен договор подряда №265/04/ВСТ (далее – договор), в соответствии с условиями которого (пункт 1.1) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить текущий ремонт по устройству козырьков входных групп подъездов № № 1,2,3,4,5,6 в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его, в соответствии с условиями договора.

Сроки выполнения работ согласно пункту 2.1 договора составляют: со дня подписания договора до 02.10.2020.

Пунктом 3.1 договора определено, что цена работ по договору, согласно утвержденным локальным сметным расчетам № 02-01-01 (приложение № 2 договора) составляет 219 535,20 руб. Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется на основании актов о приемке выполненных работ, в которых указана стоимость выполненных подрядчиком и согласованных заказчиком работ.

В соответствии с пунктом 3.2 договора оплата работ производится в следующем порядке: расчеты за услуги, оказанные заказчиком подрядчику, в соответствии с пунктом 1.3 договора, производятся путем проведения взаимозачета; окончательный расчет производится в течение 3  дней со дня получения заказчиком счета-фактуры, с приложением подписанного акта о приемке выполненных работ, любым не запрещенным способом.

В силу пункта 6.5 договора сдача результатов работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актами приёмки выполненных работ Акты о приемке выполненных работ, подписанные полномочным представителем сособственников МКД, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение заказчику представляет подрядчик. Подрядчик предъявляет заказчику на оплату счет-фактуру с подписанными актами о приемке выполненных работ, не позднее 5-го числа следующего за отчетным периодом месяца.

Также, между предприятием (заказчик) и обществом «Гарант» (подрядчик) заключен договор подряда от 09.09.2020 № 276/04/ВСТ в редакции дополнительных соглашений от 25.03.2021 № 1, от 26.04.2021 № 2 (далее – договор), в соответствии с условиями которого (пункт 1.1) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонт кровли (отделочные работы карнизной части и прокладка кабеля, регулирующего нагрев водосточной системы) в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его, в соответствии с условиями договора.

Сроки выполнения работ согласно пункту 2.1 договора составляют: со дня подписания договора до 02.11.2020.

Пунктом 3.1 договора определено, что цена работ по договору, согласно утвержденным локальным сметным расчетам №02-01-01 (приложение №2 договора) составляет 194 969,53 руб. Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется на основании актов о приемке выполненных работ, в которых указана стоимость выполненных подрядчиком и согласованных заказчиком работ.

В соответствии с пунктом 3.2 договора оплата работ производится в следующем порядке: расчеты за услуги, оказанные заказчиком подрядчику, в соответствии с пунктом 1.3 договора, производятся путем проведения взаимозачета; окончательный расчет производится в течение 3  дней со дня получения заказчиком счета-фактуры, с приложением подписанного акта о приемке выполненных работ, любым не запрещенным способом.

Сдача результатов работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актами приёмки выполненных работ Акты о приемке выполненных работ, подписанные полномочным представителем сособственников МКД, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение заказчику представляет подрядчик. Подрядчик предъявляет заказчику на оплату счет-фактуру с подписанными актами о приемке выполненных работ по 28.12.2020 (пункт 6.5 договора).

Общество «Гарант» выполнило предусмотренные договором работы, в подтверждение чего представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанными сторонами без возражений и замечаний, а также скрепленными печатями организаций (л.д.56-77).

Оплата заказчиком выполненных работ в нарушение условий договора произведена не была.

В последующем общество «Гарант» по договору уступки права требования от 01.11.2021 (л.д.9-10) передало ИП ФИО2 право требования долга к предприятию в размере 873 865,08 руб., в том числе НДС 20% 145 644,18 руб.

В нарушение условий договоров предприятием обязательства по оплате выполненных работ в полном объеме не исполнены, в связи с чем, ИП ФИО2 направил в адрес предприятия претензию (л.д.13-14), согласно которой просило оплатить образовавшуюся задолженность.

Оставление ответчиком претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения предпринимателя в суд с настоящим иском о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 873 865,08 руб.

Арбитражный суд первой инстанции признал заявленные истцом требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере, на основании статей 309, 310, 388, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта исходя из следующего.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 названного Кодекса.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», применяемом в рассматриваемом случае по аналогии, разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В материалы дела истцом представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанные сторонами без возражений и замечаний, а также скрепленными печатями организаций (л.д.56-77).

Учитывая, что акты об оказанных по договорам подряда подписаны ответчиком, подписи и печати предприятия не оспорены, суд первой инстанции обоснованно счел доказанным фактическое оказание данных услуг. Следовательно, на стороне заказчика возникла обязанность по их оплате.

Доказательств оплаты оказанных услуг со стороны ответчика в материалы дела не представлено.

Право требования уступлено обществом «Гарант» предпринимателю с соблюдением требований пункта 1 статьи 388 ГК РФ.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу об удовлетворении требований истца о взыскании задолженности по договорам в общем размере 873 865,08 руб.

Апелляционная жалоба не содержит мотивов и фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении вопроса о взыскании судебных расходов и имели бы правовое значение для вынесения судебного акта по существу.

Апелляционный суд принимает во внимание, что между истцом и ответчиком подписан акт сверки взаимных расчетов за 2021 год, в котором последний признал наличие долга в размере 873 865 рублей 08 копеек, и кроме того, направил в адрес истца письмо с подтверждением задолженности по уведомлению об уступке, а также с просьбой о рассмотрении вопроса о предоставлении рассрочки платежей (письмо №1154/01-06/10 от 31.03.2022).

С отзывом на апелляционную жалобу представлена копия акта сверки взаимных расчетов, подписанного между истцом и ответчиком по состоянию на 05.03.2022, где также ответчиком задолженность признана.

В связи с чем, доводы подателя жалобы о том, что в работах имеются недостатки, не могут быть приняты во внимание, в отсутствие каких-либо доказательств направления заказчиком в адрес подрядчика претензий по качеству выполненной работы.

В суде первой инстанции ответчиком не было представлено данных о том, что в процессе эксплуатации отремонтированных обществом «Гарант» козырьков предъявлялись претензии относительно качества работ.

В связи с изложенным, требования удовлетворены судом первой инстанции обоснованно.

Судом первой инстанции правильно установлены обстоятельства имеющие значение для дела, указанные обстоятельства исследованы полно и всесторонне, нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от                                                             19 апреля 2023 года по делу № А71-13/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

 

Председательствующий

 

И.С. Пепеляева

 

Судьи 

 

И.О. Муталлиева

 

О.В. Суслова