АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-2936/2019

г. Чебоксары

12 августа 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 08.08.2019.

Арбитражный суд в составе: судьи Васильева Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Михайловой А.В.,

рассмотрев в открытом заседании суда дело по иску 

индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП 318213000012127, ИНН 

<

***>, г. Чебоксары Чувашской Республики,

к обществу с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428038, 

<

...>,

о взыскании 46674 руб. 06 коп.,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест",

при участии:

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 16.03.2018,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент" (далее – ответчик, ООО "Волгастройдевелопмент") о взыскании 64041 руб. 16 коп. неустойки за период с 14.02.2016 по 12.04.2016.

Исковые требования основаны на нормах статей 309, 310, 382, 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 6, 10 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору участия в долевом строительстве от 07.11.2014 № П21-п в части своевременной передачи объекта строительства.

Определением суда от 26.03.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон; к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест", ФИО2.

Ответчик отзывом от 04.04.2019 исковые требования не признал. Заявил о пропуске истцом срока исковой давности в отношении требования о взыскании неустойки за период с 01.01.2016 по 21.03.2016. На основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации просил уменьшить сумму неустойки до 5000 руб., указав, что истец вступил в данное правоотношение не с целью восстановления своего нарушенного права, а исключительно в рамках своей предпринимательской деятельности и с целью получения прибыли, само по себе нарушение ответчиком своих обязательств по договору участи в долевом строительстве какого-либо ущерба истцу не причинило. Дополнительно указал, что просрочка сдачи дома в эксплуатацию произошла по вине генподрядчика - ООО "Стройинвест", который своевременно не исполнил своих обязательств по оплате за технологическое присоединение дома к системе холодного водоснабжения, к центральной системе водоотведения.

17.04.2019 в суд от истца поступили возражения на отзыв. Истец считает, что довод ответчика о пропуске срока исковой давности в заявленном размере несостоятелен. Согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного порядка урегулирования спора в срок исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его на это период времени. Истец также указал на неверность контррасчета ответчика и просил отказать в удовлетворении ходатайства ответчика о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявлением, поступившим в суд 14.05.2019, истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 46674 руб. 06 коп. неустойки за период с 14.02.2016 по 05.03.2016 и с 22.03.2016 по 12.04.2016 (л.д. 78).

Определением от 21.05.2019 суд на основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял к рассмотрению изменение истцом  размера иска; в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Истец, надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания, явку полномочного представителя в суд не обеспечил, представил пояснения от 07.08.2019, согласно которым поддержал свое требование о взыскании с ответчика 46674 руб. 06 коп. неустойки за период с 14.02.2016 по 05.03.2016 и с 22.03.2016 по 12.04.2016. По мнению истца, в отношении указанных периодов срок исковой давности не истек, а в отношении периода с 06.03.2016 по 21.03.2016 срок исковой давности истек, поэтому указанный период подлежит исключению из расчета периода просрочки.

Третьи лица, надлежаще извещенные о времени и месте судебного заседания, явку в суд не обеспечили. Суд в порядке статей  123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие истца и третьих лиц.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования в заявленном размере не признала по ранее изложенным доводам, поддержала ходатайство о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, суд установил следующее.

07.11.2014 обществом с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент" (застройщик) и ООО "Стройинвест" (участник долевого строительства) заключен договор участия в долевом строительстве №П21-п, в соответствии с которым застройщик обязался своими силами и с привлечением третьих лиц построить девятиэтажный жилой многоквартирный дом, расположенный по строительному адресу: 

<

...> поз. 21 в 6А микрорайоне ЮЗР (на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010801:6237) и передать участнику долевого строительства квартиры, расположенные в 1 подъезде указанного дома с характеристиками, указанными в пункте 1.2 договора, а участник долевого строительства обязался уплатить установленную договором цену квартиры и принять квартиру при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта.

Согласно пункту 1.2 договора застройщик обязуется передать участнику долевого строительства квартиры, в том числе №59, на 9 этаже, количество жилых комнат – 1, общей проектной площадью 40,49 кв.м., площадью балконов, лоджий – 2,47 кв.м.

Из справки ООО "Волгастройдевелопмент" от 01.12.2014 № 205 следует, что ООО "Стройинвест" действительно оплатило по Договору № П21-п стоимость однокомнатной квартиры под условным номером 59, находящейся на 9 этаже жилого многоквартирного дома по строительному адресу: 

<

...> поз. 21в 6А микрорайоне ЮЗР в размере 1480150 руб., в том числе:

- 1417150 руб. – за 40,49 кв.м. площади квартиры;

- 63000 руб. – за расходы согласно пункту 2.5 Договора (л.д. 42).

Согласно пункту 5.2 договора ответчик взял на себя обязательство передать участнику долевого строительства объект долевого строительства в срок – не позднее IV квартала 2015 года. 

Договор долевого участия от 07.11.2014 №П21-п зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Чувашской Республики 25.11.2014.

03.12.2014 ООО "Стройинвест" и ФИО2 заключен договор уступки права №11, согласно условиям которого последний принял на себя право на приобретение однокомнатной квартиры №59, на 9 этаже, общей проектной площадью 40,49 кв.м, площадью балконов, лоджий – 2,47 кв.м.

Договор уступки права требования от 03.12.2014 №11 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Чувашской Республики 17.12.2014.

Свои обязательства участник долевого строительства выполнил, оплатив по договору стоимость строящегося объекта в размере 1784380 руб., о чем свидетельствует справка ООО "Стройинвест" от 16.04.2016.

По акту приема-передачи от 13.04.2016 ООО "Волгастройдевелопмент" передало участнику долевого строительства в соответствии с договором от 07.11.2014 №П21-п объект долевого строительства – квартиру №59.

02.02.2019 между ФИО2 (цедент) и ИП ФИО1 (цессионарий) заключен договор уступки (цессии) № 14, согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает право требования с ООО "Волгастройдевелопмент" штрафа и неустойки за нарушение предусмотренного договором участия в долевом строительстве от 07.11.2014 № П21-п срока передачи квартиры № 59, расположенной по адресу: 

<

...>, строительный адрес: 

<

...> позиция 21, в 6 А микрорайоне ЮЗР  (пункт 1.1 договора уступки от 02.02.2019 № 14) (л.д. 46-49).

Договор уступки права требования от 02.02.2019 №14 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Чувашской Республики 08.02.2019.

Уведомлением от 02.02.2019, направленным ответчику 03.02.2019, участник долевого строительства известил ООО "Волгастройдевелопмент" о состоявшейся уступке прав (л.д. 51-52).

Таким образом, право требования от ответчика оплаты неустойки (пени) за нарушение предусмотренного договором от 07.11.2014 № П21-п срока передачи квартиры № 59 перешло от третьего лица ФИО2 к истцу.

Досудебная претензия истца № 05, направленная в адрес ответчика 14.02.2019, о выплате неустойки за нарушение условий договора участия в долевом строительстве от 07.11.2014 №П21-п, оставлена последним без ответа и удовлетворения (л.д. 53-54).

Оставление требований претензий без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Неисполнение ответчиком обязанности по передаче квартиры в установленный договором срок и неисполнение им требований о выплате неустойки за такую просрочку послужило основанием для предъявления в суд настоящего иска.

Часть 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает передачу права (требования), которое принадлежит кредитору на основании обязательства, другому лицу по сделке (уступка требования).

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. 

Данная норма является диспозитивной и допускает возможность установления договором регулирования, отличного от определенного ею общего правила. Поэтому первоначальный кредитор, если предмет обязательства, из которого уступается право (требование), делим, вправе уступить новому кредитору принадлежащее ему право (требование) к должнику как полностью, так и в части (пункт 5 Информационного письма от 30.10.2007 № 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского Кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (часть 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2014 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 214-ФЗ) застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором. Обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства (статья 12 Закона № 214-ФЗ).

На основании пункта 2 статьи 6 Закона № 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (что имеет место в рассматриваемом случае).

Как следует из материалов дела, ответчик нарушил срок передачи объекта, установленный пунктом 5.2 договора участия в долевом строительстве от 07.11.2014 №П21-п, передав его участнику долевого строительства лишь 13.04.2016. 

Обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства (статья 12 Закона № 214-ФЗ).

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. 

Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (часть 2 статьи 6 Закона № 214-ФЗ).

Таким образом, факт просрочки ответчиком своих обязательств перед третьим лицом подтверждается материалами дела и у третьего лица, в силу закона, есть право требования с ответчика установленной законом неустойки за просрочку исполнения договорных обязательств.

Согласно части 1 и 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации  право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Как было указано выше, ФИО2 по договору уступки права требования (цессии) от 02.02.2019 №14 уступил свое право требования неустойки, предусмотренной, в том числе, частью 2 статьи 6 Закона № 214-ФЗ, истцу.

В   сложившейся  правовой  ситуации, право требования указанной неустойки по договору уступки права требования перешло к истцу.

С учетом уточнения исковых требований истец просит взыскать с ответчика 46674 руб. 06 коп. неустойки за период с 14.02.2016 по 05.03.2016 и с 22.03.2016 по 12.04.2016.

Возражая относительно исковых требований, ответчик заявил о пропуске срока исковой давности за период по 21.03.2016. 

Исковой давностью в соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Кодекса (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пунктов 1, 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Назначение исковой давности - предоставление лицу, чье право нарушено, строго определенного, но вполне достаточного для защиты его права срока. По истечении срока исковой давности лицо лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но в тоже время не лишено возможности защищать свои права иным законным способом.

Согласно положениям статьи 201 Гражданского кодекса Российской Федерации  перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Как следует из материалов дела, исковое заявление по настоящему делу подано в Арбитражный суд Чувашской Республики 22.03.2019.

Вместе с тем, в данном случае следует учитывать нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о приостановлении течения срока исковой давности.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Пунктом 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

По смыслу указанной нормы соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного порядка в срок исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его на этот период времени (определение Верховного Суда РФ от 06.06.2016 по делу № 301-ЭС16-537).

Из системного толкования пункта 3 статьи 202 ГК РФ и части 5 статьи 4 АПК РФ следует правило, в соответствии с которым течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении), непоступление ответа на претензию в течение 30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день, либо в последний день срока, установленного договором. Таким образом, если ответ на претензию не поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил за их пределами, течение срока исковой давности приостанавливается на 30 дней либо на срок, установленный договором для ответа на претензию (определение Верховного Суда РФ от 16.10.2018 по делу N 305-ЭС18-8026).

Как следует из материалов дела, 14.02.2019 истец направил в адрес ответчика досудебную претензию с требованием об уплате задолженности, которая была вручена ответчику 18.02.2019 (л.д. 53, 54, 79).

Согласно пункту 7.1 договора срок ответа на претензию – 15 дней с момента ее получения.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что в пределах срока исковой давности находится период, начиная с 02.03.2016, поскольку течение срока исковой давности приостанавливалось на 20 дней (с момента направления претензии 14.02.2019 по 05.03.2019 – крайний срок для ответа на претензию).

В пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

За период с 14.02.2016 по 01.03.2016 срок исковой давности истцом пропущен, исходя из следующего расчета:

- за 14.02.2016 срок истек бы 14.02.2019, однако был продлен на 20 дней в связи с направлением участником застройщику претензии 14.02.2019 и истек такой срок 06.03.2019, тогда как с настоящим иском истец обратился лишь 22.03.2019;

- аналогичным образом истек и срок за 01.03.2016 – 01.03.2019 + 20 дней = 21.03.2019.

Позиция истца в данной части признается судом ошибочной, основанной на неверном толковании положений действующего законодательства. Вопреки мнению истца, в отношении более ранней календарной даты не может быть не пропущен срок исковой давности, если он пропущен в отношении более поздней календарной даты, поскольку исковая давность истекает последовательно.

С учетом уточнения исковых требований истец просит взыскать с ответчика 46674 руб. 06 коп. неустойки за период с 14.02.2016 по 05.03.2016 и с 22.03.2016 по 12.04.2016.

Следовательно, требование истца о взыскании неустойки за период с 14.02.2016 по 01.03.2016 подлежит отклонению ввиду пропуска истцом срока исковой давности; за период с 02.03.2016 по 05.03.2016 и с 22.03.2016 по 12.04.2016 – удовлетворению.

Как следует из расчетов истца, сумма неустойки за период с 02.03.2016 по 05.03.2016 составит 4341 руб. 77 коп. (1480150 руб. * 11% * 2/300 * 4 дня); сумма неустойки за период с 22.03.2016 по 12.04.2016 составит 23879 руб. 75 коп. (1480150 руб. * 11% * 2/300 * 22 дня), всего: 28221 руб. 52 коп.

Доводы ответчика о необходимости начисления неустойки только на сумму 1417150 руб. (произведение размера проектной площади квартиры на цену одного квадратного метра) судом не принимаются во внимание по следующим основаниям.

В соответствии с пункт 2.4 Договора цена договора определяется как общая сумма произведения размера проектной площади квартир долевого строительства на цену одного квадратного метра площади квартир долевого строительства и услуг застройщика с оплатой его расходов.

Участник долевого строительства оплачивает расходы застройщика, складывающиеся из погашения расходов на приобретение  следующего оборудования:

- газовый отопительный котел;

- приборы учета воды и газа;

- остекление фасада лоджии (балкона), устанавливаемых в каждую квартиру долевого участия в строительстве, при этом количество устанавливаемых приборов зависит от площади квартиры долевого строительства. Общая стоимость вышеперечисленного оборудования предварительно составляет 63000 руб., в случае увеличения указанной суммы, участник долевого строительства доплачивает застройщику разницу цены оборудования. Оплата указанных расходов производится в течение 10 дней со дня предъявления застройщиком соответствующего уведомления в письменной форме (пункт 2.5 Договора).

Таким образом, заключая спорный Договор, сторонами согласована стоимость передаваемых объектов долевого строительства, а именно спорной квартиры № 59 с учетом указанного пункта Договора, а именно 1480150 руб. (63000 руб. + 1417150 руб.). Более того, участник долевого строительства оплатил указанную сумму в полном объеме.

Доводы ответчика об отсутствии его вины в образовавшейся просрочке суд считает несостоятельными, в связи со следующим.

Пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 402 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.06.2012 № 3352/12 юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой силы возможна только при одновременном наличии совокупности ее существенных характеристик: чрезвычайности и непредотвратимости. Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы "нормального", обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она имеет в основе объективную, а не субъективную непредотвратимость.

В материалах дела отсутствуют доказательства наличия обстоятельств, являющихся по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации чрезвычайными и непредотвратимыми, которые могут служить основанием для освобождения ответчика от ответственности за нарушения срока передачи истцу объекта долевого строительства.

Суд считает, что обстоятельства, указанные ответчиком в отзыве на исковое заявление, не являются основанием для освобождения его от ответственности за нарушение срока передачи квартиры.

Ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении размера неустойки по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Пунктом 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения. Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Согласно разъяснениям, приведенным в пунктах 2 и 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем, для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 определения от 21.12.2000 № 263-О, положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. 

При таких обстоятельствах задача суда состоит в устранении явной несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив в совокупности представленные ответчиком в обоснование ходатайства об уменьшении размера неустойки доказательства, суд приходит к выводу о явной несоразмерности заявленной суммы штрафных санкций последствиям нарушения обязательства.

На основании изложенного в силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд удовлетворяет ходатайство ответчика и уменьшает размер неустойки (пени) до одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, примененной истцом при расчете пени, то есть до размера 14110 руб. 76 коп. неустойки за период с 02.03.2016 по 05.03.2016, с 22.03.2016 по 12.04.2016.

Расходы по государственной пошлине суд относит на стороны пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом суд учитывает правовую позицию, изложенную в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 №1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", согласно которой положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) не подлежат применению, в частности, при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 14110 (Четырнадцать тысяч сто десять) руб. 76 коп. неустойки за период с 02.03.2016 по 05.03.2016, с 22.03.2016 по 12.04.2016.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент" в доход федерального бюджета 1209 (Одна тысяча двести девять) руб. 30 коп. государственной пошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 790 (Семьсот девяносто) руб. 70 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяЕ.В. Васильев