АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Севпроектмонтаж», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь, 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ПожКрымТехнологя», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь, 

о взыскании,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Севпроектмонтаж» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ПожКрымТехнологя» о взыскании 91 240,38 рублей задолженности по договору подряда от 05.12.2018 № 00000000000000000000/246/01-12/18 и 1404095,39 руб. неустойки за период с 02.04.2019 по 20.04.2020; 194514,12 рублей задолженности по договору подряда от 05.12.2018 № 00000000000000000000/246/02-12/18 и 3321495,24 рублей неустойки за период с 02.04.2019 по 20.04.2020; 56642,04 рублей задолженности по договору подряда от 17.01.2019 № 00000000000000000000/246/03-01/19 и 3543230,82 рублей неустойки за период с 02.04.2019 по 20.04.2020.

Ответчик отзыв на иск не представил, явку представителей в судебные заседания не обеспечил, ходатайств не заявлял. 

Суд, изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.   

Как видно из материалов дела, ООО «Севпроектмонтаж» (заказчик) и ООО «ПожКрымТехнология» (подрядчик) заключили договор подряда от 05.12.2018 № 00000000000000000000/246/01-12/18 на выполнение полного комплекса работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации на объекте заказчика: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Ялта, пгт. Кацивели, ул. Академика В.В. Шулейкина, 13 (клуб-столовая «литер» Г).

С учетом дополнительного соглашения  от 10.01.2019 № 1 цена работ по договору составляет 1 827 102 рублей, в том числе НДС.

В пункте 5.1 договора установлен срок выполнения работ – не позднее 01 апреля 2019 года.

28.02.2019 стороны подписали документы по формам №№ КС-2 и № КС-3, подтверждающие выполнение подрядчиком работ на сумму 608 269,20 руб. 

Обязательства подрядчика на сумму 1 218 832,80 руб. не выполнены.

В соответствии с пунктом 8.4 договора в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору подрядчик уплачивает заказчику, если заказчик потребует, пеню в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки выполнения работ.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

За период с 02.04.2019 по 20.04.2020 истец начислил ответчику 1 404 095,39 рублей пени – 1 218 832,80 руб. (просрочка) х 0,3 % х 384 (кол-во дней просрочки).

Условиями дополнительного соглашения от 10.01.2019 № 1 стороны согласовали, что подрядчик по отдельно выставленным ему счетам производит соответствующие отчисления заказчику в процентах к сметной стоимости (далее – генподрядные услуги) в размере 15%. Оплата генподрядных услуг осуществляется Подрядчиком в течение пяти рабочих дней с даты получения счета.

Заказчик направил подрядчику счет от 15.06.2019 № 15 на оплату генподрядных услуг на сумму 91 240,38 руб. (608 269,20 х 15%), который не оплачен.

ООО «Севпроектмонтаж» (заказчик) и ООО «ПожКрымТехнология» (подрядчик) заключили договор подряда от 05.12.2018 № 00000000000000000000/246/02-12/18 на выполнение полного комплекса работ по монтажу и пуско-наладке структурированной кабельной системы на объекте заказчика: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Ялта, 

<

...> (клуб-столовая «литер» Г).

С учетом условий дополнительного соглашения  от 10.01.2019 № 1 цена работ по договору составляет 4 180 003,20 рублей, в том числе НДС.

В пункте 5.1 договора установлен срок выполнения работ – не позднее 01 апреля 2019 года.

28.02.2019 стороны подписали документы по формам №№ КС-2 и № КС-3, подтверждающие выполнение подрядчиком работ на сумму 1 296 760,80 руб.

ООО «ПожКрымТехнология» не выполнило обязательства по договору на сумму 2 883 242,40 руб. (4 180 003,20 - 1 296 760,80).

В соответствии с пунктом 8.4 договора в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору подрядчик уплачивает заказчику, если заказчик потребует, пеню в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки выполнения работ.

Размер пени, подлежащей уплате за нарушение сроков выполнения обязательств за период с 02.04.2019 по 20.04.2020 (за 384 дня) составляет 3 321 495,24 рублей:

2 883 242,40 руб. (просрочка) х 0,3 % х 384 (кол-во дней просрочки).

Условиями дополнительного соглашения от 10.01.2019 № 1 стороны согласовали, что подрядчик по отдельно выставленным ему счетам производит соответствующие отчисления заказчику в процентах к сметной стоимости (далее – генподрядные услуги) в размере 15%. Оплата генподрядных услуг осуществляется подрядчиком в течение пяти рабочих дней с даты получения счета.

Заказчик направил подрядчику счет от 25.06.2019  № 14 на оплату генподрядных услуг на сумму 194 514,12 руб. (1 296 760,80 х 15%), который не оплачен.

ООО «Севпроектмонтаж» (заказчик) и ООО «ПожКрымТехнология» (подрядчик) заключили договор подряда от 17.01.2019 № 00000000000000000000/246/03-01/19 на выполнение полного комплекса работ по монтажу и пуско-наладке системы комплексного телевидения на объекте заказчика: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Ялта, 

<

...> (клуб-столовая «литер» Г).

Согласно пункту 4.1 договора  цена работ по договору составляет 3 453 334,80 рублей, в том числе НДС.

В пункте 5.1 договора установлен срок выполнения работ – не позднее 01 апреля 2019 года.

28.02.2019 стороны подписали документы по формам №№ КС-2 и № КС-3, подтверждающие выполнение подрядчиком работ на сумму 377 613,60 руб.

ООО «ПожКрымТехнология» не выполнило обязательства по договору на сумму 3 075 721,20 руб. (3 453 334,80 - 377 613,60).

В соответствии с пунктом 8.4 договора в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору подрядчик уплачивает заказчику, если заказчик потребует, пеню в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки выполнения работ.

Размер пени, подлежащей уплате за нарушение сроков выполнения обязательств за период за период с 02.04.2019 г. по 20.04.2020 г. (за 384 дня) составляет 3 543 230,82 рублей:

3 075 721,20 руб. (просрочка) х 0,3 % х 384 (кол-во дней просрочки).

В пунктах 4.7 и 4.8 договора стороны согласовали, что подрядчик по отдельно выставленным ему счетам производит соответствующие отчисления заказчику в процентах к сметной стоимости (далее – генподрядные услуги) в размере 15%. Оплата генподрядных услуг осуществляется подрядчиком в течение пяти рабочих дней с даты получения счета.

Заказчик направил подрядчику счет от 25.06.2019 № 16  на оплату генподрядных услуг на сумму 56 642,04 руб. (377 613,60 х 15%), который не оплачен.

ООО «Севпроектмонтаж» направило на электронный адрес ООО «ПожКрымТехнология» (pkt2016@yandex.ru) претензии от 07.02.2020 с требованиями оплатить пеню и генподрядные услуги, направив их по почте 11.02.2020.

Неисполнение ответчиком договорных обязательств послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Ответчик факт образования и размер задолженности, а также расчет пени в ходе судебного разбирательства не оспорил, возражений по существу предъявленных требований не заявил, что расценивается судом как признание ответчиком обоснованности рассматриваемых требований.

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПожКрымТехнологя», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Севпроектмонтаж», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь, 91 240,38 рублей задолженности по договору подряда от 05.12.2018 № 00000000000000000000/246/01-12/18 и 1 404 095,39 руб. неустойки; 194 514,12 рублей задолженности по договору подряда от 05.12.2018 № 00000000000000000000/246/02-12/18 и 3 321 495,24 рублей неустойки; 56 642,04 рублей задолженности по договору подряда от 17.01.2019 № 00000000000000000000/246/03-01/19 и 3 543 230,82 рублей неустойки; 66 056 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.      

Судья 

А.Ю. Смоляков