ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-6887/2018

Дело № А40-51311/17

г. Москва

09 апреля 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2018 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Бодровой Е.В.,

Судей: Комарова А.А., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "МД Строй" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2017, принятое судьей Мищенко А.В. (шифр судьи 110-490) по делу № А40-51311/17 

по иску общества с ограниченной ответственностью "110 ССУ" (ОГРН 

<

***>, 143900, 

<

...> покровский,4 А) к обществу с ограниченной ответственностью "МД СТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, 117342,

<

...>) о взыскании 23 878 784,15 рублей, а также встречный иск 

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 04.07.2017,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 04.12.2017. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "110 ССУ" (деле также – ООО «110 ССУ») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МД СТРОЙ" (далее также – ООО «МД Строй») о взыскании 14 186 886 руб. 69 коп. задолженности по договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК от 22.10.2012, 4 911 660 руб. 73 коп. задолженности по договору подряда от 30.01.2013 № 1-30/01-2013, 4 780 236 руб. 73 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.

Ответчиком предъявлен встречный иск.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017 по делу № А40-51311/17, взыскано с общества с ограниченной ответственностью "МД СТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "110 ССУ" 19 098 547 руб. 42 коп. задолженности. 4 780 236 руб. 73 коп. процентов, 118 493 руб. в возмещение расходов по госпошлине, а также  в федеральный бюджет госпошлину в размере 200 000 руб. В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт; В удовлетворении исковых требований ООО «ПО ССУ» к ООО «МД Строй» о взыскании суммы долга - 19 098 547,42 рублей в заявленном размере - отказать; В удовлетворении исковых требований ООО «ПО ССУ» к ООО «МД Строй» о взыскании суммы процентов по ст.395 ГК РФ - 4 780 236,73 рублей в заявленном размере -отказать; Взыскать с ООО «ПО ССУ» в пользу ООО «МД Строй» сумму пени в размере 54 660 407,70 р.; Взыскать с ООО «110 ССУ» в пользу ООО «МД Строй» сумму госпошлины 200 000,00 р.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от  25.12.2017 по делу № А40-51311/17  не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 22 октября 2012 года между ООО «110 ССУ» и ООО «МД Строй» был заключен Договор подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

В соответствии с п. 1.1. указанного Договора ООО «110 ССУ» обязалось выполнить собственными или привлеченными силами и средствами на основании Технической   документации,   полученной   от   ООО   «МД   Строй»,   в   установленный   вДоговоре срок работы по устройству систем канализации, отопления, водоснабжения и вентиляции по корпусам № 1, 2, 3 жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее деревни Рассказова, первая очередь строительства, 1 квартал, 1-ый пусковой комплекс; подготовить (совместно с ООО «МД Строй») документы, необходимые для получения заключения о соответствии объекта проектной документации и требованиям нормативных документов, осуществить подготовку документов, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; передать смонтированные инженерные системы эксплуатирующей организации. ООО «МД Строй» обязалось создать условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить ООО «110 ССУ» стоимость выполненных работ в размере и на условиях, предусмотренных, заключенным Договором.

Согласно п. 3.1. заключенного Договора общая стоимость работ по Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК 173 000 000,00 рублей. Согласно п. 3.2. Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК стоимость выполнения работ является твердой, действует в течение всего срока действия договора и подлежит изменению только в случаях, предусмотренных Договором. Сторонами были согласованы и подписаны Приложения № № 1, 2 и 3 - Укрупненный расчет стоимости работ, предусматривающие конкретные виды работ, их объем и стоимость.

Согласно п. 3.3. заключенного Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 43 250 рублей. В соответствии с п. 3.4. Договора оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ производится ООО «МД Строй» ежемесячно, с зачетом ранее выплаченного аванса, удержания сумм, указанных в п. 3.5. и 3.6. Договора, в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами следующих документов:            Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Сторонами;      Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,подписанной Сторонами; при наличии у ООО «МД Строй»: Счета-фактуры ООО «110 ССУ»; Оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на скрытые работы (и пр. акты), паспортов и сертификатов на материалы.

Согласно п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК ежемесячная оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ осуществляется ООО «МД Строй» за вычетом 5% от стоимости работ указанной в соответствующем акте, предъявленном к оплате. Удержанная сумма подлежала перечислению ООО «110 ССУ» в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания ОАО «МИСК» (Генподрядчик проекта) и ЗАО «НДК» (Заказчик проекта) Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

В соответствии с п. 6.1. Договора отчетным признается период с 1-го числа по последнее число месяца выполнения работ. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2-х экземплярах предоставляется ООО «МД Строй» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. ООО «МД Строй» в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает указанные Акт и Справку, либо направляет ООО «110 ССУ» мотивированный отказ с указанием недостатков и сроками их исправления.

Как установлено судом первой инстанции, ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ. При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО   «110  ССУ»   указывалась  в   Справках   о   стоимости   выполненных   работ   и   затрат(форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Также между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 1 от 15.05.2013 по условиям которого ООО «110 ССУ» обязалось выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, по переносу стояков водопровода по корпусам №№ 1, 3 и изготовлению кронштейнов по корпусам №№ 1, 2, 3 объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее д. Рассказовка, Первая очередь строительства, 1-й квартал, 1-ый пусковой комплекс».

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 1 общая стоимость работ составляет 225 805,93 рублей. К Дополнительному соглашению № 1 Сторонами были согласованы и подписаны Приложения № № 1,2 и 3 - Укрупненный расчет стоимости работ, предусматривающие конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 1 - Акт о приемке выполненных работ № 46 от 30.11.2013 обязался выплатить аванс в размере 67 741,78 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Дополнительному соглашению № 1 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ. При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КC-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов. В частности, в подтверждение указанных обстоятельств в материалы дела представлены: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.10.2013 на сумму 214 515,63 руб., Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2013 на сумму 112 304,28 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 01.10.2013 на сумму 48 814,62 руб., Акт о приемке выполненных работ № 3 от 01.10.2013 на сумму 64 687, 03 руб.

Также между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2013, по условиям которого ООО «110 ССУ» обязалось выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, по монтажу систем вентиляции мусорокамер по корпусам №№ 1, 2, 3 объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее д. Рассказовка, Первая очередь строительства, 1-й квартал, 1-ый пусковой комплекс».

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 2 общая стоимость работ составляет 1 340 102,85 рублей. К Дополнительному соглашению № 2 Сторонами были согласованы и подписаны Приложения № № 1, 2 и 3 - Расчет стоимости работ, предусматривающие конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 2 ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 402 030,86 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Дополнительному соглашению № 2 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2014 на сумму 871 066,85 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2014 на сумму 446 700,95 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 446 700,95 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.02.2014 на сумму 446 700,95 руб.

При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 3 общая стоимость работ составляет 3 876 929,77 рублей. К Дополнительному соглашению № 3 Сторонами было согласовано и подписано Приложение № 1 - Укрупненный расчет стоимости работ, предусматривающий конкретных видов работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 3 Ответчик обязался выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 1 163 078,94 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложением № 1 по Дополнительному соглашению № 3 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2014 на сумму 2 520 004,34 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2014 на сумму 1 292 498,96 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 1 292 498,96 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.02.2014 на сумму 1 291 931,85 руб.

При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 4 общая стоимость работ составляет 2 605 384,14 рублей. К Дополнительному соглашению № 4 Сторонами были согласованы и подписаны Приложения №№ 1, 2, 3 - Расчет стоимости работ, предусматривающий конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 4 ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 781 615,24 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Дополнительному соглашению № 4 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2014 на сумму 1 693 499,70 руб., Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2014 на сумму 868 461,38 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 868 461,38 руб., Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.02.2014 на сумму 868 461,38 руб.

При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК у держаний и зачета ранее выплаченного аванса. А в Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 5 общая стоимость работ составляет 3 528 425,49 рублей. К Дополнительному соглашению № 5 Сторонами было согласовано и подписано Приложение № 1 - Укрупненный расчет стоимости работ, предусматривающий конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 5 ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 1 058 527,65 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложением № 1 по Дополнительному соглашению № 5 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2014 на сумму 2 293 476, 56 руб., Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2014 на сумму 1 176 141, 83 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 1 176 141,83 руб., Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.02.2014 на сумму 1 176 141, 83 руб.

При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 6 общая стоимость работ составляет 5 251 612,65 рублей. К Дополнительному соглашению № 6 Сторонами было согласовано и подписано Приложение № 1 - Расчет стоимости, предусматривающий конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 6 ООО «МД Строй» обязалось выплатить аванс в размере 1 575 483,80 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложением № 1 по Дополнительному соглашению № 6 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.01.2014 на сумму 2 092 185,15 руб., Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.01.2014 на сумму 2 202 300,15 руб., Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.02.2014 на сумму 2 896 846,87 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 3 049 312,50 руб.

При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Дополнительным соглашением № 7 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПКот     01.02.2014        Стороны     достигли     соглашения     о     признании     утратившими     силу

Приложений №№ 1, 2, 3 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК, утверждении их в новой редакции и определили общую стоимость работ по Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК и Дополнительным соглашениям к нему №№ 1-6. Согласно п. 4 Дополнительного соглашения № 7 Общая стоимость работ с учетом согласованных изменений составляет 176 286 987,02 рублей

Согласно данным бухгалтерского учета, подписанным Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, а также Актам о приемке выполненных работ, ООО «110 ССУ» выполнило работы по Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК и Дополнительным соглашениям к нему на общую сумму 176 356 876,18 рублей. В свою очередь, ООО «МД Строй» была оплачена только часть работ, а именно работы на сумму 162 169 989,49 рублей. Задолженность ООО «МД Строй» перед ООО «110 ССУ» по Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК и Дополнительным соглашениям к нему по состоянию на настоящий момент составляет 14 186 886,69 рублей.

Кроме того, 30 января 2013 года между ООО «110 ССУ» и ООО «МД Строй» был заключен Договор подряда № 1-30/01-2013. В соответствии с п. 1.1. указанного Договора ООО «110 ССУ» обязалось выполнить собственными или привлеченными силами и средствами на основании Технической документации, полученной от ООО «МД Строй», в установленный в Договоре срок работы по устройству систем электрооборудования и электроосвещения по корпусам № 1, 2, 3 жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее деревни Рассказова, первая очередь строительства, 1 квартал, 1 -ый пусковой комплекс; подготовить (совместно с ООО «МД Строй») документы, необходимые для получения заключения о соответствии объекта проектной документации и требованиям нормативных документов, осуществить подготовку документов, необходимых для получения решения на ввод Объекта в эксплуатацию; передать смонтированные инженерные системы эксплуатирующей организации. ООО «МД Строй» обязалось создать условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить ООО «110 ССУ» стоимость выполненных работ в размере и на условиях, смотренных, заключенным Договором.

Согласно п. 3.3. заключенного Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 16 322 380 рублей. В соответствии с п. 3.4. Договора оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ производится ООО «МД Строй» ежемесячно, с зачетом ранее выплаченного аванса, удержания сумм, указанных в п. 3.5. и 3.6. Договора, в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами следующих документов:            Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Сторонами;      Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,подписанной Сторонами; при наличии у   ООО «МД Строй»: Счета-фактуры ООО «110 ССУ»; Оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на скрытые работы (и пр. акты), паспортов и сертификатов на материалы.

Согласно п. 3.6. Договора подряда № 1-30/01-2013 ежемесячная оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ осуществляется ООО «МД Строй» за вычетом 5% от стоимости работ указанной в соответствующем акте, предъявленном к оплате. Удержанная сумма подлежала перечислению ООО «110 ССУ» в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания ОАО «МИСК» (Генподрядчик проекта) и ЗАО «НДК» (Заказчик проекта) Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

В соответствии с п. 6.1. Договора отчетным признается период с 1-го числа по последнее число месяца выполнения работ. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2-х экземплярах предоставляется ООО «МД Строй» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. ООО «МД Строй» в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает указанные Акт и Справку, либо направляет ООО «110 ССУ» мотивированный отказ с указанием недостатков и сроками их исправления.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Договору подряда № 1-30/01-2013, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.03.2013 на сумму 1 862 938,24 руб. (к оплате 1 294 742,08), Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.04.2013 на сумму 1 027421,73 руб. (к оплате 714 058,11), Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.02.2014 на сумму 50 660 016,12 руб. (к оплате 35 541 677,10). При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № 1-30/01-2013 удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Задолженность ООО «МД Строй» перед ООО «110 ССУ» по Договору подряда № 1-30/01-2013 и Дополнительным соглашениям к нему по состоянию на настоящий момент составляет 4 911 660,73 рублей.

Таким образом, общая сумма задолженности ООО «МД Строй» составила 19 098 547 руб. 42 коп., которая до настоящего времени не оплачена последним.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения ООО «110 ССУ» в Арбитражный суд города Москвы суд с настоящим иском.

ООО «110 ССУ» в материалы дела представлены надлежащие доказательства в обоснование требований о взыскании с ООО «МД Строй» задолженности по оплате работ на общую сумму 19 098 547 руб. 42 коп., которые ООО «МД Строй» не опровергнуты. ООО «МД Строй» не представлено документов, свидетельствующих об оплате денежных средств.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции посчитал факт наличия задолженности ООО «МД Строй» перед ООО «110 ССУ» подтвержденным, в связи с чем, сумму задолженности подлежащей взысканию с ООО «МД Строй» в полном объеме.

Заказчик надлежащим образом свои обязательства по договору не исполнил, выполненные работы на момент подачи иска в полном объеме не оплатил.

Соблюдая обязательный претензионный порядок урегулирования спора, Истец 20.01.2017 направил ООО «МД Строй» претензию б/н б/д, что подтверждается описью вложения в ценное письмо от 20.01.2017, кассовым чеком № 06459, описью вложения в ценное письмо от 20.01.2017 и кассовым чеком № 142036.

Относительно встречного иска ООО «110 ССУ» заявлено о пропуске ООО «МД Строй» трехлетнего срока исковой давности.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Претензия ООО «МД Строй» с исх. № МДСП/17 датирована 03.03.2017 и направлена в адрес ООО «110 ССУ» только 05.06.2017, то есть за истечением установленных ст. 196 ГК РФ срока исковой давности.

ООО «МД Строй» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «110 ССУ» только 09.08.2017, то есть за пределами установленного ст. 196 ГК РФ 3-х летнего срока подачи иска.

При указанных обстоятельствах встречный иск удовлетворению не подлежит.

Правильно установив данные фактические обстоятельства, суд первой инстанции правомерно вынес оспариваемое решение.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что в соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Процедура конкурсного производства в отношении ООО «МД Строй» была введена Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2017 года по делу № А40-147052/16. Процедура внешнего управления в отношении Ответчика не вводилась. Таким образом, доверенность представителя ФИО4 от 27.12.2016 года прекратилась 06.12.2017 года. До этого момента указанное лицо, принимавшее участие в заседаниях Арбитражного суда города Москвы и имело полномочия на представление интересов ООО «МД Строй».

Согласно ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Представитель Ответчика - ФИО4, действовавший по доверенности от 27.12.2016 года, принимал участие в судебных заседаниях 01.06.2017 г., 09.08.2017 г., 27.09.2017 г., 31.10.2017 г. Таким образом, ООО «МД Строй», чей уполномоченный представитель принимал участие в судебном заседании 31.10.2017 г., был надлежащим образом извещен о времени судебного заседания, назначенного на 15.12.2017 года.

Соблюдая обязательный претензионный порядок урегулирования спора,  Истец 20.01.2017 г. направил Ответчику Претензию б/н б/д, что удостоверяется описью вложения в ценное письмо от 20.01.2017 г., кассовым чеком № 06459 (номер РПО 11519105286277), описью вложения в ценное письмо от 20.01.2017 г. и кассовым чеком № 06458 (номер РПО 11519105286234).

Поскольку течение срока исковой давности для Истца приостанавливалось срок на обращение в суд с исковым заявлением истек не 13.03.2017 г., как на это указывает заявитель апелляционной жалобы, а по истечении срока, установленного для урегулирования спора в досудебном порядке. Истец обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к Ответчику 22.03.2017 г., что удостоверяется оттиском штампа Суда на копии искового заявления и Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2017 г. по делу № А40-51311/17-110-490. Таким образом, Истец обратился в Суд в пределах срока исковой давности.

Истец выполнил работы, предусмотренные Договором подряда № МДС/22-10/12-1ПК от 22.10.2012 г., а также работы, предусмотренные заключенными дополнительными соглашениями. Указанное обстоятельство удостоверяется Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, ранее приобщенными к материалам дела. Таким образом, обязательства ООО «ПО ССУ» перед ООО «МД Строй» по выполнению работ были выполнены в полном объеме.

Таким образом, апелляционный суд считает, что суд  первой инстанции правильно определил правоотношения сторон, предмет доказывания по спору, с достаточной полнотой выяснил, исследовал и оценил в совокупности все значимые обстоятельства по делу, правильно применив нормы материального права, регулирующие спорные отношения. 

С учетом того, что иных доводов, подлежащих оценке, апелляционная жалоба не содержит, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017 по делу № А40-51311/17  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

            Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                                   Е.В. Бодрова 

Судьи:                                                                                                           А.А. Комаров 

                                                                                                                       И.А. Титова 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.