Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-4540/2024

г. Хабаровск

24 апреля 2024 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 18.04.2024.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Михайленко К.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску                                       федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Паритет»                       (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 171 619 руб. 50 коп. (с учетом уточнения)

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 09.01.2024 № 03/2024;

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности                          от 14.12.2022

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг» (далее – ФГБУ «Рослесинфорг») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Паритет» (далее – ООО «Паритет») о взыскании задолженности по договору от 28.09.2020 № 04/123-2020 в размере 1 170 000 руб., неустойки за нарушение сроков оплаты в размере 151 027 руб. 50 коп., неустойки за нарушение сроков оплаты в размере 1/300 учетной ставки ЦБ РФ, начиная               с 14.03.2024 по день фактической оплаты суммы основного долга.

До вынесения итогового судебного акта по настоящему спору истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым ФГБУ «Рослесинфорг» просило взыскать с ООО «Паритет» неустойку за нарушение сроков оплаты по договору от 28.09.2020                         № 04/123-2020 в размере 171 619 руб. 50 коп. В части взыскания задолженности по договору от 28.09.2020 № 04/123-2020 в размере                          1 170 000 руб. истцом заявлено ходатайство об отказе от заявленных требований ввиду ее оплаты ответчиком в полном объеме.

Уточнения заявленных требований по иску и отказ от иска части судом приняты с учетом положений статьи 49 АПК РФ, в связи с чем в соответствующей части производство по делу подлежит прекращению применительно к положениям статей 150-151 АПК РФ.

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при отсутствии возражений участвующих в деле лиц, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ и пункта 27 Постановления Пленума ВАС РФ                     от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»                  суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой инстанции.

В судебном заседании ответчиком признаны исковые требования в полном объеме, с учетом уточнения к заявленным требованиям.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Паритет» (заказчик) и ФГБУ «Рослесинфорг» (исполнитель) заключен договор от 28.09.2020 № 04/123-2020,                            в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению лесоустроительных работ без организации территории (без прорубки квартальных просек и без постановки столбов) в части таксации лесных насаждений по третьему таксационному разряду и проектирование мероприятий по воспроизводству лесов на лесном участке в Северном лесничестве Хабаровского края для заготовки древесины в соответствии с договором аренды лесного участка              от 28.11.2008 № 0282/2008, на общей площади 68 311 га.

Местоположение лесного участка: Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, Северное лесничество, номера кварталов: 146-148, 157-162, 166-170, 186-198, 210-225, 235-243, 259, 260, 262-268, 299, 305-309, 340-342 Ванинского участкового лесничества; номера кварталов: 293, 340, 341, 379, 380, 411, 412, 451-453, 482-485, 487, 519-540 Хутинского участкового лесничества.

При лесоустроительных работах выполнить таксацию лесных насаждений: глазомерным способом на площади 15 000 га; дешифровочным способом на площади 53 311 га. 

Объем и перечень работ определены в техническом задании (приложение № 1 к договору), являющемся его неотъемлемой частью.

Согласно пункту 1.5 договора срок выполнения работ (этапов работ) определяется в соответствии с календарным планом выполнения и финансирования работ (приложение № 2 к договору).

В пункте 3.1 договора установлена общая стоимость работ, которая составляет 4 680 000 руб., включая НДС (20%) - 780 000 руб. 

В соответствии с пунктом 3.2 договора заказчик обязуется произвести предоплату (аванс) за первый этап работ (подготовительные работы) в размере 35% от стоимости выполняемых работ (пункт 3.1 договора) в течение 5 банковских дней с момента подписания договора и выставления исполнителем счета заказчику.

Дальнейшая оплата в размере 20% от стоимости работ по таксации лесов (пункт 3.1 договора) производится заказчиком за выполненный второй этап лесоустроительных работ (таксация глазомерным и дешифровочным способом) в срок до 31.03.2021. Основанием для оплаты является акт сдачи-приемки выполненных работ второго этапа, подписанный между исполнителем и заказчиком, и счет на оплату. Оплата производится с расчетного счета Заказчика в течение 10 календарных дней с момента подписания акта (пункт 3.3 договора).

Дальнейшая оплата в размере 20% от стоимости работ по таксации лесов (пункт 3.1 договора) производится Заказчиком за выполненный третий этап лесоустроительных работ (таксация глазомерным и дешифровочным способом) после проверки полевых работ лесничеством в срок до 12.08.2021. Основанием для оплаты является акт сдачи-приемки выполненных работ третьего этапа, подписанный между исполнителем и заказчиком, и счет на оплату. Оплата производится с расчетного счета заказчика в течение 10 календарных дней с момента подписания акта (пункт 3.4 договора в редакции дополнительного соглашения от 25.06.2021 № 1 к договору).

Согласно пункту 3.5 договора в редакции дополнительного соглашения от 25.06.2021 № 1, дальнейшая оплата в размере 15% от стоимости работ по таксации лесов (пункт 3.1 договора) производится заказчиком за выполненный четвертый этап лесоустроительных работ (таксация глазомерным и дешифровочным способом) после согласования материалов лесоустроительных работ заказчиком в срок до 11.10.2021. Основанием для оплаты является акт сдачи-приемки выполненных работ четвертого этапа, подписанный между исполнителем и заказчиком, и счет на оплату. Оплата производится с расчетного счета заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта.

Пунктом 3.6 договора предусмотрено, что окончательная оплата в размере 10% от стоимости работ по таксации лесов (пункт 3.1 договора) производится заказчиком за выполненные лесоустроительные работы после проведения второго лесоустроительного совещания в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ пятого этапа, на основании направленных Заказчику счета на оплату и счета-фактуры.

Порядок сдачи и приемки работ установлен в разделе 4 договора.

Согласно пункту 4.1 договора после завершения первого этапа работ (подготовительные работы), в соответствии с календарным планом выполнения и финансирования работ (приложение № 2 к договору), исполнитель направляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ первого этапа и счет-фактуру.

При завершении лесоустроительных работ по таксации глазомерным и дешифровочным способом (второго и третьего этапов работ в соответствии с календарным планом выполнения и финансирования работ приложение № 2 к договору) исполнитель уведомляет об этом заказчика и направляет ему отчеты о выполненной работе, акт сдачи приемки соответствующего этапа работ, счет на оплату и счет-фактуру. Заказчик обязан в 10-дневный срок подписать акт сдачи-приемки выполненного этапа работ и произвести оплату (пункт 4.2 договора).

После согласования материалов лесоустроительных работ заказчиком и при отсутствии замечаний исполнитель направляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ четвертого этапа, счет на оплату и счет-фактуру, согласно пункту 3.5 договора (пункт 4.6 договора).

В соответствии с пунктом 4.7 договора материалы лесоустроительных работ исполнитель направляет на проверку и согласование в Северное лесничество.

После согласования материалов лесоустроительных работ в лесничестве и предоставления акта проверки исполнитель направляет заказчику акт проверки лесоустроительных работ лесничеством, а также материалы лесоустроительных работ согласно пункту 1.2 договора (пункт 4.8 договора).

В силу пункта 4.9 договора после проведения второго лесоустроительного совещания исполнитель направляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ пятого этапа работ, счет на окончательную оплату и счет-фактуру (согласно пункту 3.6 договора). Заказчик обязан в 10-дневный срок подписать акт сдачи-приемки выполненных работ пятого этапа и произвести оплату.

Пунктом 5.4 договора предусмотрено, что за нарушение сроков оплаты (пункты 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 договора) исполнитель вправе требовать с заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Согласно пункту 8.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 19.04.2023 № 2) настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 31.12.2023, а в части исполнения сторонами взаимных обязательств по настоящему договору до полного исполнения обязательств.

Дополнительным соглашением от 19.04.2023 № 2 к договору стороны возобновили выполнение работ с 10.04.2023 (пункт 1).

Исходя из положений пунктов 4, 5 календарного плана выполнения и финансирования работ (приложение № 1 к указанному дополнительному соглашению), стороны согласовали выполнение работ: по четвертому этапу – до 20.04.2023 на сумму 702 000 руб., по пятому этапу – до 25.04.2023                на сумму 468 000 руб.

Во исполнение условий названной сделки исполнителем выполнены в полном объеме, а заказчиком приняты работы по четвертому и пятому этапу на сумму 1 170 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актами о выполненных работах от 20.04.2023 № 02723040028,                       от 25.04.2023 № 02723040030, а также актами сдачи-приемки лесоустроительной документации на выполненные работы, подписанными обеими сторонами и скрепленными соответствующими печатями, для оплаты которых исполнитель выставил заказчику счета.

В связи с неоплатой указанных работ истец направил в адрес ответчика претензию от 23.06.2023 № 27/1422 с требованием об оплате образовавшиеся задолженности, которая последним оставлена без удовлетворения.

Невозможность урегулировать возникшие между сторонами спора разногласия послужила причиной обращения истца в арбитражный суд с настоящими требованиями.

В процессе судебного разбирательства ответчиком полностью погашена сумма основного долга, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением от 15.04.2024 № 366, которым                ООО «Энергокомплектсервис» за ООО «Паритет» оплачено 1 170 000 руб.,               о чем сделана соответствующая отметка в назначении платежа, в связи с чем, истец отказался от исковых требований в соответствующей части.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.                         По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу положений пункта 1 статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае материалами дела подтверждается, что исполнителем работы по 4 и 5 этапу календарного плана выполнены в полном объеме в сроки, предусмотренные договором и дополнительным соглашением к нему, без претензий со стороны заказчика к качеству или объему. 

Вместе с тем, оплата за выполнены работы заказчиком осуществлена с просрочкой, за пределами сроков, согласованных сторонами.

Указанные обстоятельства ответчик по существу не отрицал, о фальсификации представленных истцом доказательств в установленном законом порядке не заявил, иным образом их содержание, а равно факт оплаты выполненных работ в полном объеме только 15.04.2024 не оспорил.

Более того, указанные обстоятельства принимаются судом в качестве обстоятельств, не требующих дальнейшего доказывания ввиду признания ответчиком исковых требований в полном объеме с учетом их уточнения, зафиксированным в протоколе судебного заседания от 18.04.2024 (статья 70 АПК РФ).

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд пришел к выводу о правомерности требований ФГБУ «Рослесинфорг» о привлечении ООО «Паритет» к договорной ответственности (пункт 5.4 договора) в виде начисления неустойки (пени) в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Проверив расчет неустойки, произведенный истцом, суд признает его верным, соответствующим условиям заключенного между сторонами договора, в связи с чем, констатирует правомерность соответствующих требований о взыскании неустойки в полном объеме.

Расходы истца по оплате государственной пошлины по иску возлагаются на ответчика с учетом итогового результата рассмотрения настоящего дела и положений статьи 110 АПК РФ.

Излишне оплаченная истцом государственная пошлина по иску с учетом признания ответчиком предъявленных к нему требований в соответствующей части после их уточнения подлежит возвращению последнему применительно к положениям статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Принять отказ истца от иска в части требования о взыскании с ответчика задолженности по договору от 28.09.2020 № 04/123-2020 в размере 1 170 000 руб., производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Паритет»                       (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг»                             (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков оплаты по договору от 28.09.2020 № 04/123-2020 в размере 171 619 руб.               50 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 21 905 руб.

Возвратить федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению от 15.03.2024 № 30547, в размере 4 305 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                          К.А. Полегкий