Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-314508/19-172-2325

г. Москва

18 февраля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена  06 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 18 февраля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего судьи Паньковой Н.М., (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску МИНОБОРОНЫ РОССИИ (119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЗНАМЕНКА, ДОМ 19, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 

<

***>)

к АО "НПП "ЗВЕЗДА" (140070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2002, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 3 738 478,34 руб.

при участии:

от истца – ФИО2  диплом,  доверенность от 22.07.2019;

от ответчика – ФИО3 диплом,   доверенность от 25.12.2019;

                          ФИО4 диплом, доверенность от 25.12.2019;

УСТАНОВИЛ:

МИНОБОРОНЫ РОССИИ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском, к АО "НПП "ЗВЕЗДА" о взыскании неустойки по государственному контракту от 24.10.2017 года № 1719187121822412208003963 в размере 3 738 478,34 руб.

Как следует из материалов дела,   в обоснование исковых требований истец указал на то, что между Министерством обороны Российской Федерации (Заказчик) и акционерным обществом «Научно - производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» (Поставщик) заключен государственный контракт от 24 октября 2017 года № 1719187121822412208003963 на поставку изделия УПАЗ-1.

Цена Контракта составляет 745 186 380,18 руб. (пункт 4.1 Контракта).

Согласно пп. 3.2.2 п. 3.2 Контракта Поставщик обязан осуществить доставку товара грузополучателю в 2018 году в срок до 10 ноября 2018 года т.е. срок поставки товара по 09 ноября 2018 года включительно.

Согласно пункту 7.6 Контракта датой поставки товара является дата подписания грузополучателем акта приёма-передачи товара.

Товар в 2018 году на сумму 60 319 441,49 руб. поставлен в срок, что подтверждает акт приёма-передачи товара № 1, подписанный грузополучателем 20 сентября 2018 г.

Товар в 2018 году на сумму 301 597 207,45 руб. поставлен с просрочкой, что подтверждают акты приёма-передачи товара № 2, № 3, № 4, подписанные грузополучателями 14 ноября 2018 года, 06 декабря 2018 года, 07 декабря 2018 года.

Просрочка исполнения обязательств за период с 10 ноября 2018 года по 07 декабря 2018года составляет 28 дней.

В соответствии с пунктом 11.2 Контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик требует уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Размер неустойки складывается из следующих показателей: (цена Контракта - сумма, пропорциональная объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком) х 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации х количество дней просрочки, что составляет:

(745 186 380,18 руб.-60 319 441,49 руб.) х 1/300 х 7,5% (ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации) х 5 дней (за период с 10 ноября 2018 г. по 13 ноября 2018 г.) = 856 083,67 руб.;

(745 186 380,18 руб. - 60 319 441,49 руб. - 180 958 324,47 руб. (акт сдачи-приёмки товара, подписанный грузополучателем 14 ноября 2018 г. № 2)) х 1/300 х 7,5% (ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации) х 22 дня (за период с 14 ноября 2018 г. по 5 декабря 2018 г.) = 2 771 497,38 руб.;

(745 186 380,18 руб. - 60 319 441,49 руб. - 180 958 324,47 руб. (акт сдачи-приёмки товара, подписанный Грузополучателем 14 ноября 2018 г. № 2) - 60 319 441,49 руб. (акт приёма-передачи товара, подписанный Грузополучателем 6 декабря 2018 г.)) х 1/300 х 7,5%) (ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации) х 1 день (за 6 декабря 2018 г.) = 110 897,29 руб.;

Общая сумма неустойки составляет:

856 083,67 руб. + 2 771 497,38 руб. + 110 897,29 руб. = 3 738 478,34 руб.

В соответствии с разделом 12 Контракта Минобороны России в адрес АО «НПП «Звезда» направлена претензия от 28 февраля 2019 г. № 207/8/441, которая оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В судебном заседании представитель истца исковое требование поддержал в полном объеме, дал устные пояснения по существу спора, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании с иском не согласился, дал устные пояснения,  просил в иске отказать по доводам письменного отзыва и произведенного контррасчета.

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы истца и возражения ответчика, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Как следует из материалов дела, между Истцом и Ответчиком заключен Государственный контракт № 1719187121822412208003963 от 24.10.2017  на поставку Товара. 

Контракт заключен во исполнение государственного оборонного заказа путем использования конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно п. 11.2. Контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Согласно пункту 3.2.2. Контракта Товар поставляется 2 партиями: 6 шт. - до 10.11.2018 и 6 шт.- до 10.11.2019.

В соответствии с пунктом 4.2.1. Контракта цена единицы Товара в 2018 году составила 60 319 441 рубль 49 копеек с НДС.

Таким образом, в 2018 году Ответчик обязался поставить Истцу Товар в количестве 6 штук на общую сумму 361 916 648 рублей 94 коп.

В исковом заявлении Истец заявил требование о взыскании неустойки, рассчитанной из общей суммы Контракта, то есть с учетом стоимости партии Товара, срок поставки которой должен был наступить только в 2019 году.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По смыслу ст. 330 ГК РФ неустойка может начисляться только в отношении той части обязательства, которая не исполнена (исполнена ненадлежащим образом).

В Постановлении № 5467/14 от 15.07.2014 ВАС РФ разъяснил, что включение в государственный контракт заведомо невыгодного для контрагента условия, от которого победитель размещения заказа не может отказаться, не может являться основанием для взыскания неустойки от всей суммы контракта и неустойку необходимо рассчитывать исходя не из общей суммы (цены) государственного контракта, а из суммы товара, поставленного с просрочкой. 

Включение в текст контракта условия о возможности начисления неустойки на общую сумму контракта, а не на стоимость просроченного обязательства, является злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).

Следовательно, при поставке товара партиями неустойку за просрочку поставки необходимо рассчитывать не от общей суммы Контракта, а от суммы просроченной партии Товара.

Стоимость первой партии товара, за просрочку поставки которой заявлена исковые требования, составляет 361 916 648 рублей 94 копейки.

Учитывая, что 1 шт. изделия УПАЗ-1 стоимостью 60 319 441 рубль 49 копеек была поставлена своевременно (Акт приема-передачи № 1 от 19.09.2018) неустойка должна быть рассчитана исходя из стоимости недопоставленного по состоянию на 10 ноября 2018 года Товара, которая составляет 301 597 207 рублей 45 копеек.

Кроме того, при расчете неустойки Истцом допущена счетная ошибка: за период с 10.11.2018 по 13.11.2018 (до подписания Грузополучателем 14.11.2018 Акта приема-передачи № 2) количество дней просрочки составляет 4(10, 11, 12, 13 ноября), а не 5 дней, как указано в иске.

Таким образом, неустойка (пени) за просрочку поставка Товара составляет:

-до подписания Грузополучателем Акта приема-передачи Товара № 2 (14.11.2018): (361 916 648, 94 руб.  (стоимость просроченной к поставке партии Товара) - 60 319 441, 49 руб. (стоимость Товара, поставленного в срок) х 1/300 х 7,5% х 4 дня просрочки (с 10.11.2018 по 13.11.2018) = 301 597.21 руб.

-до подписания Грузополучателем Акта приема-передачи Товара № 3 (06.12.2018): (361 916 648, 94 руб. - 60 319 441, 49 руб. - 180 958 324, 47 руб.) х 1/300 х 7,5% х 22 дня просрочки (с 14.11.2018 по 05.12.2018) = 663 513. 86 руб.

-До подписания Грузополучателем Акта приема-передачи Товара № 4 (07.12.2018): (361 916 648, 94 руб. - 60 319 441, 49 руб. - 180 958 324, 47 руб. - 60 319 441, 49 руб.) х 1/300 х 7,5% х 1 день просрочки (06.12.2018) = 15 079. 86 руб.

Общая сумма неустойки (пени) за просрочку поставки Товара по Государственному контракту № 1719187121822412208003963 от 24.10.2017 составляет: 980 190,93 руб.

Ответчик данную денежную сумму оплатил в добровольном порядке, что подтверждается платежным поручением № 4124 от 24.04.2019 на сумму 980 190,93 руб.

Учитывая совокупность установленных обстоятельств и выводов, к которым пришел суд по результатам судебного разбирательства, оснований для удовлетворения исковых требований не установлено.

При таких обстоятельствах исковое требование удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                           Н.М. Панькова