АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, 

<

...>

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

https://tatarstan.arbitr.ru

https://my.arbitr.ru

тел. 

<

***>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-13091/2025 

Дата принятия решения – 14 августа 2025 года 

Дата объявления резолютивной части – 06 августа 2025 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гильмутдиновой Г.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Линда", г. Казань (ОГРН 1021607153028, ИНН 1619001971) к Обществу с ограниченной ответственностью "Волгадорстрой", г.Казань (ОГРН 1081672001201, ИНН 1614009744) о взыскании 15 816 269 руб. 39 коп. долга, 

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - ФИО1 – временного управляющего ответчика и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»,

с участием:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 23.07.2025г.,

от ответчика - не явился, извещен,

от третьих лиц – не явились, извещены, 

УСТАНОВИЛ:

17.04.2025г. Общество с ограниченной ответственностью "Линда", г. Казань (далее - истец), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Волгадорстрой", г.Казань (далее - ответчик) о взыскании 15 816 269 руб. 39 коп. долга.

Определением от 21.04.2025г. в отношении ответчика по делу А65-6548/2025 введена процедура наблюдения. 

Определением от 28.05.2025г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1 – временный управляющий ответчика и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал, дал пояснения. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен согласно ст. 123 АПК РФ, возражений не представил. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено согласно ст. 123 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ч.3 ст. 156 АПК РФ определил рассмотреть дело без участия лиц, участвующих в деле.

Исследовав материалы дела, суд находит правовые основания для удовлетворения требований истца по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 25.11.2022 г. между ООО «Волгадорстрой» (генподрядчик) и ООО «Линда» (субподрядчик) был заключен Договор подряда Т-103-22-7, согласно которому Субподрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по переустройству сетей газоснабжения и этиленопровода при выполнении работ по строительству объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан 1 этап: строительномонтажные работы на участке км 0 – км 26+800. Этап 1.1 Автомобильная дорога. (Левый берег). Часть 1.», в соответствии с проектной документацией и Сметой Договора, а Генподрядчик обязался принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

Истцом все предусмотренные Договором подряда Т-103-22-7 работы были выполнены. 

15.01.2024 г. ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ «Нижнекамсказ» (эксплуатирующая организация) выдало справку ООО «Линда». Согласно справке технические условия № 17010 от 14.07.2021 г., № 17697 от 06.07.2021 г., № 17698 от 06.07.2021 по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа. Строительство автомобильной дороги М7 "Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов Республики Татарстан. 1 этап: строительно-монтажные работы на участке км 0 - км 26+800. 1.1 этап Автомобильные дорога» выполнены. 

11.06.2024 г. ООО «УЭТП-НКНХ» (эксплуатирующая организация) выдало справку ООО «Линда». Согласно справке выполненные работы по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан 1 этап: строительно-монтажные работы на участке км 0- км 26+800. Этап 1.1 «Реконструкция магистрального этиленопровода «Нижнекамск-Казань» и кабеля связи» при пересечении коммуникаций ООО «УЭТП-НКНХ» входящих в состав объекта: Линейное сооружение-имущественный комплекс «Управление этиленопроводов»: цех №2201 (лит. А-402, А-403, А-404, А-405, А-406, А-409, А-410, А-411, А-546, А-1539, А1540, А-1541, А-59630, 1-2, 2-4); цех № 2202 (лит. А-431, А-433, А-441, А-432, А-429, А444, А-428, А-434, Г1594, А-1596/1, А-1596/2, А-1595, А-430, 2-3); цех № 2203 (лит. А-506, А-507, А-508, А-509, А-510, А-511, А-1645, А-1646, 4-7, 5-6); цех № 2204 (А-457, А-458, А-459, А-460, А-461, А-1634, А-10318, 7-10, 8-9); цех № 2205 (лит. А-116, А-117, А-118, А-120, А-121, А-123, А-127, А-1130, А-1132, А-1182, А-1183, А-1184, А-1491, А-1729/1, А1729/2, А-10192, А-482, А-483, А-484, А-485, А-486, А-487, А-488, А-489, А-1131/1, А1131/2, А-1632, А-1633, А-10302), соответствуют требованиям ранее выданных технических условий №1143-УЭТП от 30.09.2022г. 

19.02.2023 г., 27.02.2023 г., 31.01.2023 г., 19.06.2023 г., между сторонами, эксплуатирующей организацией, заказчиком, проектной организацией были подписаны Акты приемки законченного строительного объекта сети газораспределения. Согласно данным актам работы выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиям СП, СНиПов. 

16.10.2023 г., 23.06.2023 г., между сторонами были подписаны Реестры исполнительной документации, согласно которым Истец передал исполнительную документацию по договору. 

17.02.2025 г. Истец направил письмом для подписания следующие документы: 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от «12» февраля 2025 г. на сумму 8 647 232,40 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от «12» февраля 2025 г. на сумму 182 701,20 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от «12» февраля 2025 г. на сумму 267 398,40 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от «12» февраля 2025 г. на сумму 259 737,60 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 5 от «12» февраля 2025 г. на сумму 31 662 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 6 от «12» февраля 2025 г. на сумму 171 621,60 рублей 2 экз. 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от «12» февраля 2025 г. на сумму 9 560 353,20 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 7 от «12» февраля 2025 г. на сумму 5 268 756,00 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8 от «12» февраля 2025 г. на сумму 1 072 686,82 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 9 от «12» февраля 2025 г. на сумму 848 403,60 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от «12» февраля 2025 г. на сумму 5 532,00 рублей 2 экз. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 11 от «12» февраля 2025 г. на сумму 196 930,46 рублей 2 экз. 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от «12» февраля 2025 г. на сумму 7 392 308,88 рублей 2 экз. 

Всего акты были направлены на сумму 16 952 662,08рублей. (8 647 232,40 + 182 701,20 + 267 398,40 + 259 737,60 + 31 662 + 171 621,60 + 5 268 756,00 + 1 072 686,82 + 848 403,60 + 5 532,00 + 196 930,46 = 16 952 662,08).

Возражений от подписания актов КС2 от ответчика не поступило.  

Согласно п. 4.9 Договора подряда Т-103-22-7 «4.9. Промежуточные платежи в рамках Договора осуществляются Генподрядчиком на основании предъявленных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Генподрядчику и объёмов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета». 

Ответчиком был перечислен аванс в следующем порядке: 

Платежным поручением №2087 от 29.12.2022 г. в размере 8 000 000 рублей; 

Платежным поручением №525 от 23.03.2023 г. в размере 5 000 000 рублей; 

Платежным поручением № 7480 от 09.08.2023 г. в размере 2 000 000 рублей. 

Итого Генподрядчик оплатил аванс в размере: 15 000 000 рублей. 

С учётом произведённого авансового платежа задолженность Генподрядчика по Договору подряда Т-103-22-7 составляет 1 952 862,08 рублей. (16 952 862,08 - 15 000 000 = 1 952 862,08)

16.12.2022 г. между ответчиком (покупатель) и истцом (поставщик) был заключен Договор поставки № 44/П/1222-ВДС (Т103-22), по условиям которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить на условиях, определенных Договором и Спецификациями к нему, Товар для объекта строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан I этап: строительно-монтажные работы на участке км 0 - км 26+800. Этап 1.1 Автомобильная дорога. (Левый берег) Часть 1, далее Объект». 

16.12.2022 г. Истец по УПД № 84 от 16.12.2022 г. поставил товар на сумму 19 423 801,46 рублей, по доверенности № 36 от 10.01.2022 г.

Согласно абз. 1 п. 2.2. договора поставки «Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами универсального передаточного документа и/или товарной-транспортной (товарной) накладной, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика» 

Покупатель произвел оплату по Договору поставки в следующем порядке: 

Платежным поручением № 2027 от 19.12.2022 г. в размере 15 000 000 рублей; 

Платежным поручением № 2077 от 28.12.2022 г. в размере 2 000 000 рублей. 

Итого Покупатель оплатил 17 000 000 рублей. 

С учетом оплаты задолженность Покупателя по Договору поставки № 44/П/1222- ВДС (Т-103-22) от 16.12.2022 г. составляет 2 423 801,46 рублей. (19 423 801,46 - 17 000 000 = 2 423 801,46) 

15.12.2022 г. между ответчиком (генподрядчик) и истцом (субподрядчик) был заключен Договор № 15/У/12-22-ВДС, по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по переустройству сетей газоснабжения (Участок 7) при выполнении работ по строительству объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан 1 этап: строительно-монтажные работы на участке км 0 – км 26+800. Этап 1.1 Автомобильная дорога.» (Далее –Объект) в соответствии с проектной документацией и Сметой Договора, а Генподрядчик обязался принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

15.01.2024 г. ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ «Нижнекамсказ» (эксплуатирующая организация) выдало справку ООО «Линда». Согласно справке технические условия № 17010 от 14.07.2021 г., № 17697 от 06.07.2021 г., № 17698 от 06.07.2021 по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа. Строительство автомобильной дороги М7 "Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов Республики Татарстан. 1 этап: строительно-монтажные работы на участке км 0 - км 26+800. 1.1 этап Автомобильные дорога» выполнены. 

05.05.2023 г. между сторонами, эксплуатирующей организацией, заказчиком, проектной организацией были подписаны Акты приемки законченного строительного объекта сети газораспределения. Согласно данным актам, работы выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиям СП, СНиПов. 

05.12.2023 г. между сторонами были подписаны Реестры исполнительной документации, согласно которым Истец передал исполнительную документацию по договору. Фактически Истцом работы были выполнены и сданы ФКУ «ВОЛГОВЯТСКУПРАВТОДОР» - Заказчику Ответчика. 

22.12.2023 г. сторонами были подписаны следующие документы: 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.12.2023 г. на сумму 21 022 159,60 рублей. 

Акт за декабрь 2023 г. о приемке выполненных работ № 1 от 22.12.2023 г. на сумму 21 022 159,60 рублей. 

17.02.2025 г. ООО «Линда» письмом направило Ответчику для подписания следующие документы: 

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от «12» февраля 2025 г. на сумму 8 043 376,80 рублей 2 экз.

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от «12» февраля 2025 г. на сумму 1 597 534,98 рублей 2 экз. 

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от «12» февраля 2025 г. на сумму 9 640 911,78 рублей 2 экз. 

Возражений от подписания КС2 от ответчика не поступило. 

Всего акты были направлены на общую сумму 9 640 911,78 рублей. 

Общий размер выполненных Истцом работ составляет 30 663 071,38 рублей. (21 022 159,60 + 8 043 376,80 + 1 597 534,98 = 30 663 071,38) 

Согласно п. 4.9 Договора подряда 15/У/12-22-ВДС «4.9. Промежуточные платежи в рамках Договора осуществляются Генподрядчиком на основании предъявленных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Генподрядчику и объёмов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета». 

Ответчиком были перечислены денежные средства в следующем порядке: 

Платежным поручением № 994 от 09.02.2023 г. в размере 16 223 465,53 руб. 

Платежным поручением № 1254 ОТ 29.12.2023 г. в размере 3 000 000 руб. 

Всего Ответчиком было перечислено: 19 223 465,53 рублей. 

С учетом оплаты задолженность Ответчика по Договору подряда 15/У/12-22-ВДС составляет 11 439 605,85 рублей. (30 663 071,38 - 19 223 465,53 = 11 439 605,85) 

Общая задолженность составила 15 816 269,39 рублей.

В связи с отсутствием оплаты, истец направил в адрес ответчика претензию от 10.03.2025 с требованием оплаты задолженности.

Оставление претензионных требований без удовлетворения послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

В соответствии со ст.307, 309 ГК РФ стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, исходя из требований закона и условий обязательства.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Из указанной нормы следует, что на подрядчика возложена обязанность по предъявлению выполненных работ заказчику для их приемки.

Статья 753 ГК РФ защищает интересы подрядчика, предусматривая возможность составления одностороннего акта в случае, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Мотивированные возражения по поводу подписания актов КС2 не поступили, следовательно работы являются принятыми. 

 Согласно ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая, что задолженность ответчика перед истцом подтверждается документально, требование истца о взыскании 15 816 269 руб. 39 коп. долга, в силу ст. ст. 307, 309, 486, 702 ГК РФ, подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины согласно ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Волгадорстрой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Линда", г. Казань; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 15 816 269 руб. 39 коп. долга и 383 163 руб. госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяЮ.Н. Галеева