АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

Дело № А43-26346/2023 

Нижний Новгород 07 апреля 2025 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-779) при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Пальцевой Я.В. 

при участии представителей от истца: ФИО1 (доверенность)  

от ответчика: ФИО2 (доверенность), 

от третьего лица: не явились  

рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  

к акционерному обществу "СМУ-Дондорстрой" 

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ˗  

акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 7" 

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) об обязании исполнить гарантийные обязательства  

Изучив материалы дела и руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

удовлетворить иск. 

Обязать акционерное общество "СМУ-Дондорстрой" (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) исполнить свои гарантийные обязательства по государственному контракту от 28.06.2019 № 162 и устранить дефекты, выявленные актом комиссионного освидетельствования гарантийных обязательств от 26.04.2022 № 1, в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу, а именно обязать ответчика произвести следующие работы:  

- выполнить санацию продольных, поперечных трещин (км 299+438-км 300+585 (7000 м.п.); 

- устранить просадку земляного полотна, выполнить восстановление покрытия (км 300+570 (лево (S=45 м2)), км 300+560 (лево (S-4 м2)), 299+450 (лево (S=10 м2));  

- выполнить санацию продольных, поперечных трещин (а.д. Вязники-Нововязники 5000 м.п.); 

- выполнить карточный ремонт (а.д. Вязники-Нововязники напротив д. 17 (64 м2));  

- выполнить восстановление высотного положения перильного ограждения на тротуарах, восстановление омоноличивания стоек (а.д. Вязники-Нововязники), окраска перильного ограждения на лестничных сходах;  

- выполнить восстановление вертикальности дорожных знаков (14 шт.); 

- выполнить восстановление откосов, планировку откосов, засев трав км 299+43 8-км 300+585 (лево, право); расчистку кюветов км 299+438-км 300+585 (лево, право);  

- выполнить восстановление водоотводных лотков и гасителей км 299+438-км 300+585 (лево, право) 24 шт.;  

- устранить размывы откосов на нагорной канаве км 299+460-км 300+000 (лево); выполнить  

восстановление монолитного быстротока на нагорной канаве км 299+460-км 300+00 (лево); 

- выполнить восстановление укрепления кювета км 299+460-км300+00 (лево (30 м.п.));  

- выполнить восстановление высотного положения звена водопропускной трубы км 299+470 (лево);  

выполнить обратную засыпку трубы с уплотнением грунта; выполнить укрепление на выходе;  

восстановить монолитный быстроток; вывезти строительный мусор, выполнить планировку и засев трав;  

- выполнить окраску перильного ограждения и закладных деталей на путепроводе км 300,  

восстановление ремонтной смесью и окраску монолитного бортика на путепроводе км 300; 

- выполнить окраску перильного ограждения на лестничных сходах на путепроводе км 300; - восстановить укрепление конуса, зачеканить швы на конусе опоры 1,3 путепровода км 300; 

- произвести очистку балок от ржавых подтеков с последующей окраской на путепроводе км 300;  

- выжечь участки тяжей, восстановить поверхность ремонтной смесью, выполнить окраску на  

ригели опоры 2 шкафных стенок и участков омоноличивания на опоре 1.3 путепровода км 300; 

- зачеканить трещины на открылке опоры 1 путепровода км 300; - восстановить ремонтной смесью стойки опоры 2 путепровода км 300; 

- восстановить ремонтной смесью бетонные элементы пандуса для маломобильных групп на км  

300+100 (право), произвести окраску перильного ограждения; - заделать места отбора кернов км 299+438-км 300+585. 

Взыскать с акционерного общества "СМУ-Дондорстрой" (ИНН: 

<

***>;  

ОГРН: 

<

***>) в пользу федерального казенного учреждения "Управление автомобильной  

магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" (ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>) 

<

***> руб. расходов по судебной экспертизе. 

Взыскать с акционерного общества "СМУ-Дондорстрой" (ИНН: 

<

***>;  

ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. расходов по государственной пошлине по  

делу. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  

суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья С.Г. Окутин