37_14685167  

 

Арбитражный суд Московской области 

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-60383/2023

24 октября 2023 года

г. Москва

 

Судья Арбитражного суда Московской области М.А. Миронова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассматривая в открытом судебном заседании дело по иску  

АО «ЦДС» к ФКУ «ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ» о внесении изменений в государственные контракты при участии в судебном заседании – согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести изменения в государственные контракты № 46/22-Р от 04.05.2022 и   № 45/22-Р от 04.05.2022 в Календарные графики производства подрядных работ)  Приложение № 1 к контрактам), в части сроков выполнения работ на объектах  «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо»  Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза -  Клин - Дмитров, Минско-Волоколамское шоссе км 36+800 - км 42+000, Московская  область», «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 «Московское большое  кольцо» Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново  -Руза - Клин - Дмитров, Минско-Волоколамское шоссе км 53+000 - км 59+420,  Московская область», а также изложив п. 6.1. вышеуказанных контрактов в новой  редакции: «Начало выполнения работ на Объекте: 4 мая 2022 года, окончание выполнения  работ на объекте 31 октября 2024 года.  

Взыскать с ФКУ «ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ» в пользу АО «ЦДС» расходы по  оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.  

Судья М.А. Миронова