228/2023-193068(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 07 декабря 2023 года 

по делу А33-9985/2023 Красноярск

07 декабря 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в течение 10 дней с момента вступления решения суда по  настоящему делу в законную силу, в соответствии с договором № 20.2400.6403.19 от  24.09.2019 осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям  энергопринимающих устройств по адресу: Красноярский край, Березовский район,  кадастровый номер земельного участка 24:04:0107001:4012, а именно:  

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих  электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" для  электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии  с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,  утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со  всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим  законодательством;  

- запроектировать и построить ТП 10 кВ. Тип и мощность силового трансформатора  определить проектом;  

- от ВЛ 10 кВ ф.44-4 до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1) запроектировать и построить  ЛЭП 10 кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение линии  определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на  отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.44-4;  

- От ТП 10 кВ (п. 10.2.1) до границы земельного участка Заявителя запроектировать и  построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки ЛЭП, марку и сечение линии определить  проектом;  

- осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при  участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его  Заявителю.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) 5000 руб. судебной неустойки за каждый день  просрочки исполнения решения суда по настоящему делу, по день его фактического  исполнения, а также 6 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья И.В. Слесаренко