АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-3041/2024

г. Владивосток

08 августа 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  25 июля 2024 года. 

Полный текст решения изготовлен  08 августа 2024 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Зайцевой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём  Мадихоновым М.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>)

 к обществу с ограниченной ответственностью «Верно Пасифик Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 21 811 191 рублей 38 копеек  

при участии

от истца - ФИО1, паспорт, доверенность от 04.07.2023 сроком на 1 год, диплом; 

ответчик не явился, извещен,

установил:

Некоммерческая организация «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (далее – истец, НКО «ФППК») обратилась с арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Верно Пасифик Групп» (далее – ответчик, ООО «Верно Пасифик Групп») о взыскании задолженности в сумме 18 804 141 рубль 84 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 007 049 рублей 54 руб. за период с 13.01.2022 по 16.01.2024.

От ответчика поступил письменный отзыв, дополнения к нему, а от истца поступили возражения на отзыв, дополнения к ним.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) объявлялся перерыв. Об объявлении перерыва лица, участвующие в деле, уведомлены в соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках» путём размещения на официальном сайте суда информации о времени и месте продолжения судебного заседания.

В соответствии со статьями 156, 163 АПК РФ судебное заседание после перерыва проведено и дело рассмотрено в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

29.06.2020 между НКО «ФППК» и ООО «Верно Пасифик Групп» заключено Соглашение № 3сф об осуществлении частичного финансирования (далее - Соглашение), по условиям пункта 2.1 которого Фонд принимает на себя обязательства направить денежные средства (далее - осуществить финансирование) для частичного финансирования мероприятий по завершению строительства Проблемных объектов, указанных в пункте 2.2 Соглашения (далее - Объект), а Застройщик обязуется осуществлять надзор за ходом производства работ на Объекте, принять выполненные работы, а также ввести проблемные объекты в эксплуатацию и осуществить возврат Фонду средств финансирования.

Согласно пункту 2.2 Соглашения о финансировании, характеристики Проблемных объектов: Наименование - Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап. Жилой дом № 1 и Жилой дом № 2, расположен по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Лесная. 

Целевое назначение: жилые здания с размещением в нижних этажах объектов делового и обслуживающего назначения; объекты розничной торговли; объекты предпринимательской деятельности; подземные или многоэтажные сооружения для хранения автомобильного транспорта (многоярусные парковки). 

Объекты возводятся на земельном участке с кадастровым номером 25:28:050049:5611, площадью 14 288 кв.м. из земель населенных пунктов, местоположение объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Лесная.

В соответствии с пунктом 2.3 Соглашения о финансировании (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 25.08.2020), средства финансирования являются целевыми и должны быть использованы Подрядчиком исключительно в целях выполнения комплекса работ по строительству внеплощадочных сетей 6 кВ, наружных сетей электроснабжения, общестроительных работ ТП, силового электрооборудования, внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, наружных сетей ливневой канализации, теплотрассы, благоустройства, наружного электроосвещения, устройства подпорной стенки ПС-2, внеплощадочных тепловых сетей, по восстановлению благоустройства теплотрассы, вертикальной планировке, устройству внутриплощадочных сетей (строительство ТНС и теплотрассы) для объектов.

Как следует из пункта  2.4 Соглашения о финансировании, финансирование, осуществляемое Фондом в рамках настоящего Соглашения, осуществляется за счет средств бюджета Приморского края, предоставляемых Фонду в качестве субсидии в целях осуществления финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирных жилых домов на территории Приморского края, признанных проблемными объектами в соответствии с Законом Приморского края от 6 марта 2019 года № 465-КЗ «О содействии развитию строительства в Приморском крае», а также за счет внебюджетных средств Фонда.

Пункт 2.5 Соглашения о финансировании предусматривает, что финансирование, осуществляемое Фондом в рамках настоящего Соглашения, рассматривается Сторонами как средства целевого финансирования, направляемого исключительно для оплаты мероприятий необходимых для строительства Объектов, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения и выполненных Подрядчиком на основании заключенного с Застройщиком договора подряда.

Согласно пункта 3.1 Соглашения о финансировании (в редакции дополнительного соглашения № 10 от 15.09.2022), цена Соглашения составляет 101 410 983 рубля 69 копеек и определяется сводным сметным расчетом стоимости строительства и расчетом стоимости услуг экспертов и экспертных организаций, а также стоимости работ/услуг, связанных с вводом объектов в эксплуатацию.

В рамках Соглашения о финансировании от 29.06.2020 №3сф между Фондом (Плательщик), ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), заключены договоры:

1. 29.07.2020  заключен договор подряда № 49/20 с подрядчиком ООО «Гамма-Технология», предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, наружных сетей ливневой канализации, теплотрассы, а также работ по благоустройству и устройству подпорной стенки ПС-2 для проблемных объектов, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 18 614 660 рублей 40 копеек, а также переданы Заказчику строительные материалы на сумму 960 103 рубля 32 копеек (письмо ООО «Верно Пасифик Групп» от 12.08.2021 (вх. Фонда № 1950 от 11.10.2021)), что подтверждается платежными поручениями на общую сумму 23 361 894 рубля 20 копеек: платежные поручения № 111 от 25.08.2020 на сумму 11 747 463 рубля 68 копеек; № 191 от 13.10.2020 на сумму 514 499 рублей 16 копеек; №230 от 21.10.2020 на сумму 962 940 рублей 72 копейки; № 290 от 11.11.2020 на сумму 549 614 рубля 52 копейки; № 333 от 24.11.2020 на сумму 763 158 рублей 48 копеек; №367 от 07.12.2020 на сумму 480 018 рублей; № 381 от 11.12.2020 на сумму 2 219 872 рубля 20 копеек; №413 от 23.12.2020 на сумму 1 284 113 рублей 88 копеек; №482 от 29.12.2020 на сумму 3 175 486 рублей 44 копеек; № 74 от 11.03.2021 на сумму 1 235 034 рубля 36 копеек; № 271 от 21.05.2021 на сумму 333 632 рубля 88 копеек; № 478 от 28.07.2021 на сумму 96 059 рублей 88 копеек (из которых сумма неотработанного аванса согласно вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-18211/2021 от 29.12.2021 составила 3 787 130 рублей 48 копеек). Общая сумма задолженности ООО «Верно Пасифик Групп» по договору подряда от 29.07.2020 № 49/20 - 19 574 763 рублей 72 копейки.

2. 11.08.2021 заключен договор подряда № 22/21 с подрядчиком ООО «ПримИнвестСтрой», предметом которого является выполнение комплекса строительно-монтажных работ по благоустройству, устройству подпорной стенки ПС-2, ПС-5, ПС-6, лестницы Л-3, устройству наружных сетей ливневой канализации, траншеи и восстановлению асфальтобетонного покрытия и лотков, устройству подъездной дороги к жилому комплексу для проблемных объектов, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат в размере 6 517 249 рублей 20  копеек за минусом давальческого материала, невозвращенного подрядчиком заказчику на основании акта зачета взаимных требований от 24.12.2021 на сумму 109 470 рублей 50 копеек, что подтверждается платежными поручениями на общую сумму 5 831 057 рублей 50 копеек: № 665 от 22.10.2021 на сумму 1 266 444 руб.; № 702 от 02.11.2021 на сумму 438 054 рубля; № 805 от 11.11.2021 на сумму 1 701 110 рублей 40 копеек; № 1033 от 30.12.2021 на сумму 2 425 449 рублей 10 копеек. Также Фондом оплачено подрядчику за работы на основании справки по форме № 5 от 07.02.2022 и акта о приемке выполненных работ по форме от 07.02.2022 в сумме 576 721 рубль 20 копеек  путем зачета в счет неотработанного аванса и убытков по договору поставки от 11.08.2021 № 21/21 в соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края от 09.06.2023 по делу № А51-14790/2022. Общая сумма задолженности ООО «Верно Пасифик Групп» по договору подряда от 11.08.2021 № 22/21 составляет 6 407 778 рублей 70 копеек.

3. 11.08.2021 заключен договор подряда № 21/21 с подрядчиком ООО «ПримИнвестСтрой», предметом которого является поставка строительных материалов для выполнения работ по благоустройству, во исполнение условий которого в пользу ответчика, Фондом на счет поставщика осуществлена оплата на основании подписанных УПД в размере 5 947 905 рублей 03 копеек, что подтверждается платежными поручениями на общую сумму 6 387 142 рубля 32 копейки: платежные поручения № 529 от 17.08.2021 на сумму 2 223 608 рублей 80 копеек; № 800 от 11.11.2021 на сумму 177 088 рублей 67 копеек; № 833 от 17.11.2021 на сумму 1 836 882 рубля 43 копеек; № 986 от 27.12.2021 на сумму 836 444 рубля  85 копеек; №987 от 27.12.2021 на сумму 1 313 117 рублей 57 копеек (из которых сумма неотработанного аванса согласно решению Арбитражного суда Приморского края от 09.06.2023 по делу № А51-14790/2022 составила 439 237 рублей 29 копеек).

4. 11.08.2021  заключен договор поставки № 20/21 с поставщиком ООО «СпецСтройРесурс ДВ», предметом которого является поставка строительных материалов для выполнения работ по благоустройству, во исполнение условий которого в пользу ответчика, Фондом на счет поставщика осуществлена оплата на основании подписанных УПД в размере 1 331 840 рублей 28 копеек, что подтверждается платежными поручениями на общую сумму 1 331 840 рублей 28 копеек (платежные поручения № 530 от 17.08.2021 на сумму 549 812  рублей 35 копеек, № 830 от 16.11.2021 на сумму 108 458 рублей 01 копейка, № 831 от 17.11.2021 на сумму 270 450 рублей 74 копейки; № 832 от 17.11.2021 на сумму 384 868 рублей 64 копейки; № 135 от 10.03.2022 на сумму 18 250 рублей 54 копейки).

5. 25.04.2022 заключен договор подряда № 12/22 с подрядчиком ИП ФИО2, предметом которого является выполнение комплекса строительно-монтажных работ по изготовлению и устройству МАФов для благоустройства проблемных объектов, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ на основании подписанного акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.07.2022 в размере 1 300 799 рублей, оплаченные платежными поручениями №№ 721 от 19.08.2022 на сумму 300 000 рублей, № 722 от 19.08.2022 на сумму 350 799 рублей, № 723 от 19.08.2022 на сумму 650 000 рублей.

Вместе с тем, учитывая, что 300 000 рублей оплачены за счет пожертвования сторонней организации по договору пожертвования от 23.09.2021 № 02/21Д, сумма задолженности ООО «Верно Пасифик Групп» по договору подряда от 25.04.2022 №12/22 по расчету истца составляет 1 000 799 рублей.

6. 26.08.2022 заключен договор подряда №36/22 с подрядчиком ООО «ДомоСтрой» от 26.08.2022, предметом которого является выполнение комплекса общестроительных работ ТП, включая наружную отделку и устройство кровли ТП, а также устройство ограждений ПС-2, ПС-5 и ПС-6 для благоустройства на проблемных объектах, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ на основании подписанного акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 02.11.2022 в размере 694 716 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 834 от 20.09.2022 на сумму 276 042 рубля 24 копейки, № 1065 от 24.11.2022 на сумму 418 673 рубля  76 копеек.

7. 26.08.2022 заключен договор  подряда №38/22 с подрядчиком ООО «ДомоСтрой», предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждения спортивной площадки для благоустройства на проблемных объектах, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ на основании подписанного акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 07.11.2022 в размере 448 703 рубля 46 копеек, что подтверждается платежными поручениями № 816 от 14.09.2022 на сумму 134 611 рублей; № 1061 от 23.11.2022 на сумму 314 092 рубля 46 копеек.

8. 29.07.2020 заключен договор  подряда № 50/20 с подрядчиком ООО «Гамма-Технология», предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству внеплощадочных сетей 6 кВт, наружных сетей электроснабжения, силового оборудования, а также выполнению общестроительных работ ТП и наружного электроосвещения для проблемных объектов, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму  10 696 204 рубля  80 копеек, оплаченные  на общую сумму 10 600 714 рублей 70 копеек платежными поручениями  № 110 от 25.08.2020 на сумму 4 408 952 рубля 86 копеек, № 192 от 13.10.2020 на сумму 46 950 рублей 16 копеек, № 459 от 25.12.2020 на сумму 876 849 рублей 12 копеек, № 67 от 10.03.2021 на сумму 601 800 рублей, № 68 от 10.03.2021 на сумму 1 094 524 рубля 56 копеек, № 174 от 14.04.2021 на сумму 100 000 рублей, № 175 от 14.04.2021 на сумму 207 244 рубля, № 176 от 14.04.2021 на сумму 682 498 рублей 60 копеек, № 225 от 30.04.2021 на сумму 2 581 895 рублей 40 копеек, а также зачетом на сумму 95 490 рублей 10 копеек на основании акта от 18.05.2022.

9. 18.09.2020 заключен договор  подряда  № 65/20 с подрядчиком ООО «ТЕХУКЛАД», предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству внеплощадочных тепловых сетей, восстановлению благоустройства теплотрассы и вертикальной планировке для проблемных объектов, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в размере 10 390 106 рублей 40 копеек, что подтверждается платежными поручениями № 205 от 15.05.2020 на сумму 3 250 896 рублей 13 копеек, № 49 от 25.02.2021 на сумму 3 860 980 рублей 67 копеек, №232 от 21.10.2020 на сумму 1 652 851 рубль 20 копеек,  № 276 от 26.05.2021 на сумму 136 632 рубля, № 347 от 22.06.2021 на сумму 618 992 рубля 40 копеек, № 502 от 05.08.2021 на сумму 869 754 рубля.

10. 14.12.2021 заключен договор  подряда № 57/21 с подрядчиком ООО «1КК», предметом которого является выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ в отношении объекта, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ в размере 26 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 10 от 27.01.2022.

11. 15.09.2022 заключен договор  подряда  № 44/22 с подрядчиком ООО «1КК», предметом которого является выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ в отношении объекта, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ в размере 26 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 869 от 28.09.2022.

12. 10.12.2020 заключен договор № 87/20 с проектировщиком ООО «АРГУС-APT», предметом которого является выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет проектировщика осуществлена оплата за выполнение работ в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 04.02.2021 № 28 на сумму 300 000 рублей (из которых к соглашению № 3сф относится сумма 100 000 рублей).

13. 10.12.2020 заключен договор № 86/20  с исполнителем ООО «ДальСтрой-Эксперт» на оказание услуг по проведению строительно-технического обследования теплотрассы и инженерно-технического сопровождения, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет исполнителя осуществлена оплата за выполнение работ в размере 1 950 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями  № 507 от 30.12.2020 на сумму 585 000 рублей, № 47 от 20.02.2021 на сумму 1 365 000 рублей.

14. 31.05.2018  заключен договор №3957-ТП-18 с сетевой организацией МУПВ «ВПЭС» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, во исполнение условий которого на основании Дополнительного соглашения от 28.01.2021 Фондом на счет сетевой организации осуществлена оплата за выполнение работ в размере 272 159 рублей 59 копеек, что подтверждается платежными поручениями  № 122 от 19.03.2021 на сумму 163 295 рублей 75 копеек, № 230 от 12.05.2021 на сумму 81 647 рублей 88 копеек, № 231 от 12.05.2021 на сумму 27 215 рублей 96 копеек.

15. 12.10.2020  заключен договор № 69/20 с ООО «СМАРТ-Проект» на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения и примыкания объекта, во исполнение условий которого в пользу ответчика Фондом на счет исполнителя осуществлена оплата за выполнение работ в размере 37 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 453 от 25.12.2020 на указанную сумму.

По условиям пункта 3.2 соглашения о финансировании, финансирование мероприятий по завершению строительства проблемного объекта осуществляется Фондом путем перечисления денежных средств непосредственно Подрядчику.

Общая сумма финансирования, перечисленная Фондом по Соглашению об осуществлении частичного финансирования № 3сф от 29.06.2020 составляет 58 903 976 рублей 98 копеек.

В Арбитражный суд Приморского края обратился ФИО3 с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Верно Пасифик Групп», которое принято к производству определением суда от 01.03.2021 по делу №А51-2236/2021.

25.01.2024 решением Арбитражного суда Приморского края по делу №А51-2236/2021 ООО «Верно Пасифик Групп» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверждена ФИО4

В период после 01.03.2021  (дата принятия заявления о банкротстве) в рамках Соглашения о финансировании НКО «ФППК» перечислило 24 809 460 рублей 24 копейки из вышеуказанных 58 903 976 рублей 98 копеек, что следует из представленных в материалы дела платежных поручений по указанным выше договорам: 

- по договору от 29.07.2020 № 49/20 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «Гамма-Технология» (Подрядчик) – платежное поручение № 74 от 11.03.2021 на сумму 1 235 034 рубля 36 копеек, №271 от 21.05.2021 на сумму 333 632 рубля 88 копеек, № 478 от 28.07.2021 на сумму 96 059 рублей 88 копеек;

- по договору от 11.08.2021 № 22/21 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «ПримИнвестСтрой» (Подрядчик) - платежные поручения № 665 от 22.10.2021 на сумму 1 266 444 рублей, № 702 от 02.11.2021 на сумму 438 054 рублей, № 805 от 11.11.2021 на сумму 1 701 110 рублей 40 копеек, № 1033 от 30.12.2021 на сумму 2 425 449 рублей 10 копеек, а также на основании произведенного зачета 576 721 рубля 20 копеек в счет неотработанного аванса и убытков по договору поставки от 11.08.2021 № 21/21 в соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края от 09.06.2023 по делу № А51-14790/2022;

- по договору от 11.08.2021 № 21/21 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «ПримИнвестСтрой» (Поставщик) - платежные поручения № 529 от 17.08.2021 на сумму 2 223 608 рублей 80 копеек  (из которых учеты подлежит 439 237 рублей 29 копеек  как сумма  неотработанного аванса по решению Арбитражного суда Приморского края от 09.06.2023 по делу № А51-14790/2022), № 800 от 11.11.2021 на сумму 177 088 рублей 67 копеек, № 833 от 17.11.2021 на сумму 1 836 882 рублей 43 копеек, № 986 от 27.12.2021 на сумму 836 444 рублей 85 копеек, №987 от 27.12.2021 на сумму 1 313 117 рублей 57 копеек;

- по договору от 11.08.2021 № 20/21 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «СпецСтройРесурс ДВ» (Поставщик) - платежные поручения № 530 от 17.08.2021, № 830 от 16.11.2021, №831 от 17.11.2021, № 832 от 17.11.2021, № 135 от 10.03.2022  на общую сумму 1 331 840  рублей 28 копеек; 

- по договору от 25.04.2022 № 12/22 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ИП ФИО2 (Подрядчик) - платежные поручения №№ 721, 722, 723 от 19.08.2022,  на общую сумму 1 300 799 рублей, за вычетом 300 000 рублей оплаты по договору пожертвования от 23.09.2021 № 02/21Д;

- по договору от 26.08.2022 №36/22 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «ДомоСтрой» (Подрядчик) - платежные поручения № 834 от 20.09.2022, № 1065 от 24.11.2022 на общую сумму 694 716 рублей;

- по договору от 26.08.2022 №38/22 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «ДомоСтрой» (Подрядчик) - платежные поручения № 816 от 14.09.2022, №1061 от 23.11.2022  на общую сумму 448 703 рубля 46 копеек;

- по договору от 29.07.2020 № 50/20 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «Гамма-Технология» (Подрядчик) - платежные поручения № 67 от 10.03.2021 на сумму 601 800 рублей,  № 68 от 10.03.2021 на сумму 1 094 524 рубля 56 копеек, № 174 от 14.04.2021 на сумму 100 000 рублей, №175 от 14.04.2021 на сумму 207 244 рубля, № 176 от 14.04.2021 на сумму 682 498 рублей 60 копеек,  № 225 от 30.04.2021 на сумму 2 581 895 рублей 40 копеек, акт зачета требований от 18.05.2022 на сумму 95 490 рублей 10 копеек;

- по договору от 18.09.2020 № 65/20 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «ТЕХУКЛАД» (Подрядчик) - платежные поручения № 276 от 26.05.2021 на сумму 136 632 рубля, № 347 от 22.06.2021 на сумму 618 992 рубля 40 копеек,  № 502 от 05.08.2021 на сумму 869 754 рубля.

- по договору от 14.12.2021 № 57/21 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «1КК» (Подрядчик) - платежные поручения №10 от 27.01.2022 на сумму 26 000 рублей;

- по договору от 15.09.2022 № 44/22 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «1КК» (Подрядчик) - платежные поручения №869 от 28.09.2022 на сумму 26 000 рублей;

- по договору от 31.05.2018 №3957-ТП-18 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и МУПВ «ВПЭС» (сетевая организация) - платежные поручения № 122 от 19.03.2021 на сумму 163 295 рубля 75 копеек, № 230 от 12.05.2021 на сумму 81 647 рублей 88 копеек,  №231 от 12.05.2021 на сумму 27 215 рубля 96 копеек.

Поскольку сумма 24 809 460 рублей 24 копейки перечислена ООО «Верно Пасифик Групп» после принятия заявления о признании ответчика несостоятельным (банкротом), соответственно, все вышеперечисленные платежи относятся к текущим. 

Согласно пункту 2.6 Соглашения о финансировании (в редакции дополнительного соглашения № 10 от 15.09.2022), предоставляемое в рамках настоящего Соглашения финансирование является возвратным. Срок возврата средств финансирования не позднее 12.01.2022. Срок возврата финансирования, предусмотренного пунктом 6 сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение № 1 к Соглашению), не позднее 15.10.2022.

Приложение № 1 к Соглашению действует в редакции дополнительного соглашения № 10 от 15.09.2022. 

Во исполнение условий Соглашения о финансировании Фонду платежным поручением №1464 от 10.08.2023 возвращено 6 035 000 рублей.  Оставшаяся сумма в размере 18 774 460 рублей 24 копеек вопреки принятым ООО «Верно Пасифик Групп» по Соглашению о финансировании обязательствам не возвращена. 

Также между Фондом и ООО «Верно Пасифик групп» заключен договор 25.10.2019 № 29/19 между ООО «Верно Пасифик Групп» (Заказчик), Фондом (Плательщик) и ООО «СЗ «ЭКО Квартал» (Подрядчик), предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству проблемного объекта «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г.Владивостоке. 1 этап. Жилой дом № 1», во исполнение условий которого в пользу ООО «Верно Пасифик Групп» Фондом на счет подрядчика осуществлена оплата за выполнение работ на основании подписанного акта о приемке выполненных работ № 18/1 от 02.08.2023 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № 18 от 02.08.2023 в размере 21 681 рубль 60 копеек, что подтверждается платежным поручением от 30.08.2023 № 20 на указанную сумму.

Данный договор заключен в рамках соглашения об осуществлении частичного финансирования № 12сф от 24.09.2019.

Согласно пункта 2.3 соглашения, средства финансирования являются целевыми и должны быть использованы подрядчиком исключительно в целях выполнения комплекса общестроительных работ объекта.

В соответствии с п. 2.4 соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 03.02.2020) финансирование, осуществляемое фондом в рамках настоящего соглашения, осуществляется за счет средств бюджета Приморского края, предоставляемых Фонду в качестве субсидии в целях осуществления финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирных жилых домов на территории Приморского края, признанных проблемными объектами в соответствии с Законом Приморского края от 6 марта 2019 года № 465-КЗ «О содействии развитию строительства в Приморском крае», а также за счет внебюджетных средств, полученных Фондом от предпринимательской деятельности.

Пункт 2.5 Соглашения о финансировании (в редакции дополнительного соглашения от 09.11.2020 №5) предусматривает, что финансирование, осуществляемое Фондом в рамках настоящего соглашения, рассматривается сторонами как средства целевого финансирования, направляемого исключительно для оплаты мероприятий необходимых для строительства объектов, указанных в п.2.3 настоящего соглашения, и выполненных подрядчиком на основании заключенных с застройщиком договоров подряда. 

Согласно абзаца 1 пункта 2.6 соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 16.03.2022 №13) предоставляемое в рамках настоящего соглашения финансирование мероприятий по завершению строительства проблемного объекта, в том числе мероприятий по строительству, мероприятий, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении проблемного объекта, является возвратным. Срок возврата средств финансирования не позднее 31.03.2022.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 26.07.2023 по делу №А51-2754/2023 с ООО «Верно Пасифик групп» взыскано 176 528 332 рубля 97 копеек основного долга по соглашению об осуществлении частичного финансирования №12сф от 24.09.2019.

При этом, согласно пояснений истца, в рамках дела  №А51-2754/2023 в расчете основной задолженности не учтено выполнение работ в рамках   договора 25.10.2019 №29/19 по акту о приемке выполненных работ № 18/1 от 02.08.2023, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 18 от 02.08.2023 на сумму  21 681 рубль 60 копеек.

Данная сумма  ООО «Верно Пасифик Групп» вопреки условиям соглашения об осуществлении частичного финансирования № 12сф от 24.09.2019 не возвращена.

Кроме того, между ООО «Верно Пасифик Групп» (Принципал) и Фондом (Агент) заключены Агентские договора № 2/21А от 03.03.2021, №4/21 от 09.08.2021, №5/21 от 09.08.2021, №6/21 от 15.11.2021, №1/22А от 22.04.2022, №2/22А от 20.07.2022 и №3/22А от 20.07.2022 на организацию и проведение за счет Принципала процедуры закупки на право заключать договора подряда на проблемном объекте: «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап. Жилой дом № 1 и Жилой дом № 2», в соответствии с пунктом 4.1 которых размер вознаграждения Агента по организации и проведению одной Закупки составляет 1 000 рублей.

Сторонами подписаны отчеты об исполнении агентского поручения и акты сдачи-приемки услуг от 12.04.2021 на сумму 1 000 рублей, от 24.08.2021 на сумму 2 000 рублей, от 24.08.2021 на сумму 1 000 рублей, от 29.11.2021 на сумму 1 000 рублей, от 25.04.2022 на сумму 1 000 рублей, от 26.08.2022 на сумму 1 000 рублей и от 26.08.2022 на сумму 1 000 рублей.

Оплата услуг на общую сумму 8 000 рублей не произведена.

В рамках досудебного урегулирования спора НКО «ФППК» направила в адрес ООО «ВЕРНО ПАСИФИК ГРУПП» претензию от 16.01.2024 исх. № 24 о возврате средств финансирования в размере 60 700 073 рублей 65 копеек в течение 10 рабочих дней с даты ее получения (пункт 7.4 соглашений о финансировании № 3сф и №12сф, и пункт 7.3. агентских договоров). 

Отсутствие возврата суммы задолженности явилось основанием для заявления настоящего иска.

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком принятых обязательств по возврату суммы целевого финансирования в рамках соглашения № 3сф об осуществлении частичного финансирования от  29.06.2020, соглашения № 12сф об осуществлении частичного финансирования от 24.09.2019, агентских договоров №2/21А от 03.03.2021, №4/21 от 09.08.2021, №5/21 от 09.08.2021, №6/21 от 15.11.2021, №1/22А от 22.04.2022, №2/22А от 20.07.2022 и №3/22А от 20.07.2022, нарушения их условий подтвержден материалами дела, и ответчиком не оспорен за исключением суммы 1 664 727 рублей 12 копеек, оплаченной Фондом подрядчику ООО «Гамма-Технология» по договору подряда от 29.07.2020 № 49/20, платежными поручениями №74 от 11.03.2021 на сумму 1 235 034 рубля 36 копеек, № 271 от 21.05.2021 на сумму 333 632 рубля 88 копеек и № 478 от 28.07.2021 на сумму 96 059 рублей 88 копеек.

Ответчик  в своем отзыве указывает, что данная сумму взыскана обратно с ООО «Гамма-Технология».

Вместе с тем, данный довод суд находит ошибочным поскольку в рамках условий заключенного договора подряда от 29.07.2020 № 49/20 ООО «Гамма-Технология» согласно представленных в материалы дела актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат выполнены работы на сумму 18 614 660 рублей 40 копеек, а также ООО «Верно Пасифик Групп» переданы заказчику строительные материалы на сумму 960 103 рубля 32 копейки. Соответственно, общая сумма задолженности ООО «Верно Пасифик Групп» перед Фондом по соглашению о финансировании в рамках договора подряда от 29.07.2020 № 49/20 составляет 19 574 763 рубля 72 копейки. Доказательств иного в нарушение положений статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

При этом платежными поручениями № 111 от 25.08.2020, № 191 от 13.10.2020, №230 от 21.10.2020,  № 290 от 11.11.2020, № 333 от 24.11.2020, №367 от 07.12.2020, № 381 от 11.12.2020, №413 от 23.12.2020, №482 от 29.12.2020, № 74 от 11.03.2021, № 271 от 21.05.2021, № 478 от 28.07.2021 Фондом оплачено подрядчику на общую сумму 23 361 894 рубля 20 копеек. При этом, из указанной необходимо исключить 3 787 130 рублей 48 копеек неотработанного ООО «Гамма-Технология» аванса (установлено в рамках вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-18211/2021 от 29.12.2021).

Таким образом, сумма подлежащих возврату денежных средств составляет 19 574 763 рубля 72 копейки (23 361 894 рубля 20 копеек - 3 787 130 рублей 48 копеек).

Но поскольку 01.03.2021 в отношении ответчика возбуждена процедура банкротства в рамках дела №А51-2236/2021, решением Арбитражного суда Приморского края от 25.01.2024  по делу №А51-2236/2021 ООО «Верно Пасифик Групп» признано несостоятельным (банкротом), истец из 19 574 763 рубля 72 копейки выделил ту сумму, которая относится к текущим требованиям и, соответственно, может быть взыскана в рамках искового производства. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, в частности: возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ. 

Из содержания данной нормы следует, что текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве»).

Как следует из материалов дела, сумма в  1 664 727 рублей 12 копейки, уплачена в рамках договора подряда от 29.07.2020 № 49/20 платежными поручениями  № 74 от 11.03.2021, № 271 от 21.05.2021, № 478 от 28.07.2021 после  возбуждения производства по делу №А51-2236/2021 о банкротстве ООО «Верно Пасифик Групп». Соответственно, задолженность в размере 1 664 727 рублей 12 копейки относится к текущим платежам и обоснованно предъявлена истцом к взысканию в рамках настоящего дела. 

Довод ответчика о том, что ООО «Гамма-Технология» не выполнило работы на сумму 1 664 727 рублей 12 копейки документально не подтвержден, противоречит имеющимся в материалах дела справкам о стоимости выполненных работ №9 от 16.02.2021, №11 от 28.04.2021, №12 от 30.06.2021, подписанные ответчиком,  платежным поручениям  № 74 от 11.03.2021, № 271 от 21.05.2021, № 478 от 28.07.2021, в которых указано за что производится оплата. 

Таким образом, на дату судебного разбирательства задолженность по соглашению у ответчика перед истцом  составила 18 804 141 рублей 84 копеек. Доказательств погашения долга ответчик не представил. Поскольку материалы дела не содержат доказательств оплаты ответчиком задолженности, требования истца подлежат удовлетворению.

Наряду с этим, истец просит взыскать с ответчика 3 007 049 рублей 54 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.01.2022 по 16.01.2024 (за вычетом периода моратория).

В соответствии со статьей 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты, предусмотренные указанной нормой права, являются мерой гражданско-правовой ответственности, которая наступает вследствие ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства. Ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе, признается его исполнение с нарушением установленного срока, в таком случае имеет место неправомерное удержание денежных средств кредитора. Право на предъявление требования о взыскании процентов в силу статьи 395 ГК РФ возникает с момента, когда соответствующее денежное обязательство у ответчика возникло.

Учитывая то, что судом установлено неисполнение ответчиком правомерного требования истца о возврате спорных денежных средств на совершение мероприятий по завершению строительства (финансированию) проблемного объекта, указанного в спорном соглашении, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами согласно представленному в материалы дела расчету (в уточненной редакции)  является обоснованным. Расчет, представленный истцом,  судом проверен и является законным, обоснованным, подтвержден материалами дела. 

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Верно Пасифик Групп» (ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (ИНН 

<

***>) 18 804 141 рублей 84 копеек задолженности, 3 007 049 рублей 54 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 132 056 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

             Исполнительный лист выдается после вступления решения суда в законную силу по заявлению взыскателя. 

            Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

            Судья                                                                                      Зайцева Л.В.