48_10007864  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-35066/20

09 сентября 2020 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов к обществу с ограниченной ответственностью  "Проектирование инженерных сетей и объектов" о безвозмездном устранении недостатков  работ по договору подряда, взыскании штрафа,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Проектирование инженерных  сетей и объектов» в соответствии с рекламационным актом от 31 октября 2019 года по  договору № 1222-К от 07 июля 2016 года устранить недостатки (дефекты), выявленные в  период гарантийного срока после проведения капитального ремонта в многоквартирном  доме, расположенном по адресу: 

<

...>, в  течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу, а именно:  устранить отслоение, разгерметизацию межпанельных швов по всей площади здания  локальными участками, устранить срыв отлива из оцинкованной стали на торце здания,  устранить разрушение штукатурного слоя на торце здания.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектирование инженерных  сетей и объектов» в пользу Фонда капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов штраф в размере 1566525 рублей 68 копеек, в возмещение расходов  по уплате государственной пошлины 34665 рублей, а всего 1601190 рублей 68 копеек.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья Е.В. Дубровская