именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

18.03.2019 года.                                                       Дело № А40-266672/18-43-2060

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

ООО Строительная Фирма «МетКон» (ОГРН 

<

***>)

к ООО «ДЛ «Холдинг» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 273 048 руб. 01 коп. – долга, пени,

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

у  с  т  а  н  о  в  и  л  :

Иск заявлен о взыскании 273 048 руб. 01 коп. – долга, пени.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.11.2018 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.

Ответчик не представил возражения на исковое заявление.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

В обоснование исковых требований, истец ссылается на то, что «29» августа 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью Строительная фирма «МетКон» («ООО «СФ «МетКон», «Подрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «ДЛ Холдинг» («Заказчик») был заключен Договор подряда №10/17 от 29.08.2017г. (Договор подряда), в соответствии с условиями которого Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства осуществить работы: по изготовлению и монтажу металлоконструкций (в том числе обработка металлоконструкций антикоррозионной грунтовкой за 1 раз); по монтажу кровельных и стеновых ограждающих конструкций из сэндвич-панелей, с монтажом доборных элементов, на объекте: «Демонстрационный центр, расположенный на трассе «Уфа-Охлебинино» в Октябрьском районе городского округа г. Уфа РБ» («Объект»), в объеме, согласованном сторонами в Калькуляции №1 («Калькуляция»), являющейся неотъемлемой частью Договора подряда, а Заказчик в свою очередь обязался принять и оплатить результат работы.

В соответствии с пунктом 2.1 Договора подряда общая стоимость работ составляет 489 179 (Четыреста восемьдесят девять тысяч сто семьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18%.

Согласно пункта 7.1 Договора подряда Заказчик обязался уплатить аванс в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей до начала работ. Очередной авансовый платеж в размере 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей Заказчик должен внести по готовности металлоконструкций и факту поставки сэндвич-панелей на Объект Заказчика. Окончательная оплата производится Заказчиком в течение 3 (Трех) календарных дней со дня подписания всех актов приемки выполненных работ и актов формы №КС-3, КС-2.

В ходе выполнения работ «по изготовлению и монтажу металлоконструкций (в том числе обработка металлоконструкций антикоррозионной грунтовкой за 1 раз» их объем был увеличен на сумму 31 936 (Тридцать одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей, таким образом, стоимость работ по «изготовлению и монтажу металлоконструкций (в том числе обработка металлоконструкций антикоррозионной грунтовкой за 1 раз» с 138464 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рублей 00 коп. увеличилась до 170 400 (Сто семьдесят тысяч четыреста) рублей 00 коп., а стоимость работ по Договору подряда составила 521 115 (Пятьсот двадцать одна тысяча сто пятнадцать) рублей 00 копеек.

«19» октября 2017 года между Подрядчиком и Заказчиком было подписано Дополнительное соглашение №1 к вышеназванному Договору подряда, согласно которого Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, возникшие в ходе производства работ, по устройству подшивов и монтажу перегородок из сэндвич-панелей на объекте «Демонстрационный центр, расположенный на трассе «Уфа-Охлебинино» в Октябрьском районе городского округа г. Уфа РБ». Стоимость дополнительных работ составила 80 074 (Восемьдесят тысяч семьдесят четыре) рубля 86 копеек.

Пунктом 4.1 Дополнительного соглашения установлено, что Заказчик производит оплату в размере 50%, что составляет 40 037 (Сорок тысяч тридцать семь) рублей 43 копейки в течение 3 рабочих дней со дня передачи Подрядчику материалов, необходимых для выполнения работ. Оставшиеся 50% оплачиваются не позднее 3 рабочих дней, со дня полного завершения работ, на основании акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Таким образом, полная стоимость работ по Договору подряда и Дополнительному соглашению составила 601 189 (Шестьсот одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 86 копеек.

Подрядчик выполнил свои обязательства перед Заказчиком по Договору подряда и Дополнительному соглашению к нему надлежащим образом и в полном объеме, результаты работ переданы Заказчик; подтверждается подписанными Подрядчиком и Заказчиком Актом о приемке выполненных работ от  26.09.2017 года, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 26.09.2017г., Актом о приемке выполненных работ №2 от 18.01.2018г., Актом о приемке выполненных работ №3 от 18.01.2018г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 18.01.2018г. Претензий по качеству и срокам выполнения работ Заказчика не поступало.

Заказчик же, в свою очередь, обязательства перед Подрядчиком по Договору подряда и Дополнительному  соглашению к нему выполнил не в полном объеме и ненадлежащим образом, а именно:

Заказчиком была внесена первая сумма аванса по Договору подряда в размере 75 000 рублей 00  (платежное поручение №276 от 29.08.2017г.);

внесена сумма по Договору подряда в размере 175 357 рублей 50 копеек (платежное поручение №: 02.10.2017г.);

внесена сумма по Договору подряда в размере 95 400 рублей 00 копеек (платежное поручение N 25.10.2017г.);

внесена сумма аванса по Дополнительному соглашению к Договору подряда в размере 40 000 pyб. (платежное поручение №172 от 29.11.2017г.); таким образом, сумма платежей, уплаченных Заказчиком выполненные работы по Договору подряда и Дополнительному соглашению к нему составляет 385 757  рублей 50 копеек.

Сумма задолженности Заказчика перед Подрядчиком по Договору подряда и Дополнительному  соглашению к нему составляет 215 432 (Двести пятнадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля 36 коп.,  а именно:

- сумма задолженности Заказчика перед Подрядчиком по Договору подряда составляет 175 357  рублей 50 копеек;

- сумма задолженности Заказчика перед Подрядчиком по Дополнительному соглашению к Договору  подряда составляет 40 074 рубля 86 копеек.

Сумма задолженности Заказчика перед Подрядчиком по Договору подряда и Дополнительному   соглашению к нему в размере 215 432 (Двести пятнадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля 36 к подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между ООО «СФ «МетКон» и ООО «ДЛ Холдиг  по Договору подряда №10/17 от 29.08.2017г.

Так же истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 57 615,65 руб. 

Согласно пункту 8.1 Договора подряда, если Заказчик не выполнил в срок свои обязательства по оплате,  Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0.1% от стоимости выполненных, оплаченных в срок работ за каждый день просрочки оплаты. 

В соответствии с п.7.1 Договора подряда заказчик производит окончательную оплату за выполненные работы в течение 3 календарных дней со дня подписания актов приемки выполненных работ и актов формы №КС-3, КС-2. 

Указанные акты подписаны сторонами 18.01.2018г., соответственно 3-х-дневный срок оплаты истек 20.01.2018г., на 15.10.2018г. количестве просрочки составляет 268 день.

В соответствии с пунктом 4.1 Дополнительного соглашения установлено, что Заказчик производит оплату  размере 50%, что составляет 40 037 (Сорок тысяч тридцать семь) рублей 43 копейки в течение 3 рабочих д дня передачи Подрядчику материалов, необходимых для выполнения работ. 

Оставшиеся 50% оплачиваю позднее 3 рабочих дней, со дня полного завершения работ, на основании акта о приемке выполненных работ, и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Указанные акты подписаны сторонами 18.01.2018 г.,  соответственно 3-х-дневный срок оплаты истек 23.01.2018г., на 15.10.2018г. количество дней просрочки составляет 265 дней.

Согласно ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Учитывая наличие просрочки в исполнении обязательств ответчика по оплате задолженности, требования истца о взыскании с  ответчика неустойки подлежит удовлетворению  в заявленной  сумме 57 615 руб. 65 коп.

Учитывая отсутствие доказательств оплаты 215 432 руб. 36 коп. – долга, 57 615 руб. 65 коп. – пени, требование истца  обосновано,  законное и подлежит удовлетворению. 

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Расходы по госпошлине распределены в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 401, 420-425, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 740, 742, 746, 753 ГК РФ, руководствуясь статьями  41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО «ДЛ «Холдинг» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО Строительная Фирма «МетКон» (ОГРН 

<

***>) 273 048 руб. 01 коп., в том числе: 215 432 руб. 36 коп. – долга, 57 615 руб. 65 коп. – пени, а также почтовые расходы в сумме 433 руб. 16 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 8 461 руб. 00 коп.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле соответствующего заявления.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет ».

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцать дней со дня его принятия.

Судья                                             О.В. Романов