АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru   

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А29-14486/2023

30 января 2024 года

г. Сыктывкар

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 января 2024 года, полный текст решения изготовлен 30 января 2024 года.

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Безносиковой М.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

об обязании выполнить работы, 

без участия представителей сторон,

установил:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – истец, Министерство) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением об обязании общества с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК» (далее – ответчик, Общество) в срок до 31.05.2024 выполнить на лесном участке, арендованном по договору аренды от 14.01.2019 № 45, мероприятия по охране лесов, предусмотренные проектом освоения лесов и соглашением  от 10.04.2023 № 16-23, а именно: прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление в объеме 3,3 км.

Ответчик представленным отзывом исковые требования отклонил.

Руководствуясь ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражный суд рассматривает дело без участия представителей истца и ответчика.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

14.01.2019 между Министерством (арендодатель) и Обществом (арендатор) заключен договор аренды лесного участка № 45 (далее – Договор), во исполнение п. 1.1. которого арендатору передан лесной участок площадью 21865 га, расположенный в Республике Коми, МО МР «Сысолський», ГУ «Сысольское лесничество», Исаневское участковое лесничество, кварталы №№ 24-29,39-44, 60-65, 80-92, 105-119, 134-148, 161-177, 198-205, 227-232, 256, 263 (кадастровые номера 11:03:0000000:33/88, 11:03:0000000:33/89, 11:03:0000000:33/41, 11:03:0000000:33/42, 11:03:0000000:33/50) в целях заготовки древесины.

В соответствии с подпунктом «к» пункта 3.4. Договора арендатор обязан осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением № 7 к Договору.

10.04.2023 между сторонами заключено Соглашение № 16-23 (далее – Соглашение) об объемах мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2023 году на лесном участке, арендованном Обществом по Договору. 

Соглашением предусмотрено, в том числе, выполнение арендатором в срок до 30.06.2023 работ по прочистке противопожарных минерализованных полос и их обновление в объеме 3,3 км.

Как указывает Министерство, Обществом указанные мероприятия не выполнены, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Находящиеся в государственной или муниципальной собственности лесные участки могут быть переданы юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование; к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено настоящим Кодексом (части 1, 3 ст. 71 Лесного кодекса Российской Федерации).

По договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для использования в целях, предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса, то есть, в том числе для заготовки древесины (ч. 1 ст. 72 Лесного кодекса Российской Федерации).

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов в соответствии со ст. 12 настоящего Кодекса (ч. 1 ст. 88 Лесного кодекса Российской Федерации).

Исходя из положений ст. 12 Лесного кодекса Российской Федерации, освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются, в том числе создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 

В силу ч. 4 ст. 51 Лесного кодекса Российской Федерации охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

В соответствии с ч. 3 ст. 53 ЛК РФ меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

Согласно ч. 2 статьи 53.1 ЛК РФ меры противопожарного обустройства лесов включают в себя, в том числе, прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос.

В соответствии с п. 2.1. Соглашения и таблицей спорные работы должны быть выполнены в срок до 30.06.2023.

Однако ответчиком в материалы дела представлено письмо от 04.08.2023, которым Общество просило заменить работы по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос на устройство новых противопожарных минерализованных полос.

Письмом от 14.08.2023 № 02-10-5726 Министерство согласовало Обществу проведение работ по устройству новых противопожарных минерализованных полос взамен работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос.

11.09.2023 Общество направило в ГУ «Сысольское лесничество» письмо с просьбой принять работы по охране лесов по Договору, а именно: устройство минерализованной полосы в объеме 4,62 км.

Пунктом 2.4. Соглашения допускается изменение видов, местоположения, объемов, сроков проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов по письменному обращению арендатора.  

В соответствии с положениями ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В связи с тем, что стороны согласовали проведение иных работ взамен работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос, суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд            

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья                                                                                               М.В. Безносикова