107_5263757  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск  «27» июня 2022 года Дело № А19-7720/2022  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Зыряновой А.Э.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ  МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО  АГЕНТСТВА" (664007, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, БАБУШКИНА  УЛИЦА, 14, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙПРОЕКТ"  (660130, 

<

...>, -, -, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании выполнить работы по устранению дефектов, о взыскании 635 035 руб. 00  коп., а также судебной неустойки в сумме 100 000 руб. 00 коп. за неисполнения решения  суда,  

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СИБСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) выполнить работы по  безвозмездному устранению дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта –  Ремонт моста через реку Бекетка на км 1285+000 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»  Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, Иркутская область, в течение одного месяца  с момента вступления в законную силу решения суда, а именно, устранить:  

- Разрушение зоны деформационного шва: - Разборка переходной зоны деформационного шва - объем 0,35 куб.м; : 

- Ремонт переходной зоны деформированного шва ПУГМК - объем 8,33/682,5 м/кг  (5 кв.м, шириной 0,6 м (расход 1950 кг/куб м.));  

- Устранение просадок на подходах к мосту: - Фрезерование а/б покрытия на толщину 5см - объем 84,00 кв.м.; 

- Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h =50 мм - объем 784/10,12  кв.м./т;  

-Устранение просадки обочины справа у стоек МБО: 

- Устройство укрепления обочин из ЩПС С-5, толщиной 10 см - объем 6/0,6 кв м/  куб. м.  

В случае неисполнения ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) решения суда в течение установленного срока, предоставить  ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ  МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО  АГЕНТСТВА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) право самостоятельно либо с  привлечением третьих лиц осуществить соответствующие действия за счет ответчика со  взысканием с него необходимых расходов в размере 635 350 руб. 00 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СИБСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ  МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО  АГЕНТСТВА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) за неисполнение решения суда  судебную неустойку в сумме 100 000 руб. 00 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СИБСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.Э. Зырянова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 22.04.2022 0:59:00

 Кому выдана Зырянова Анна Эдуардовна