АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-5959/2022

г. Белгород

18 января 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 января 2023 года. Полный текст решения изготовлен 18 января 2023 года.

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "Профстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 3 532 725,83 руб., 

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, ходатайство;

от ответчика: не явился, извещён надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

ФОНД ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО "Профстрой" о взыскании денежных средств по договору №РТС231А210477-Д от 06.08.2021 в размере 3 532 725, 83 руб., расходов по уплате государственной пошлины. 

Представитель истца в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом, заявил ходатайство о проведении судебного заседания без участия своего представителя. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии своего представителя не заявил, отзыв на иск не представил. 

Суд, руководствуясь ст. 121-123, 156 АПК РФ, а также учитывая то, что стороны извещены надлежащим образом, доказательства извещения приобщены к материалам дела, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежащим образом уведомленных сторон.

Исследовав собранные по делу доказательства, арбитражный суд считает, что  иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 06.08.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор № РТС231А210477-Д, согласно п.1.1. которого ответчик принял на себя обязательства своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс услуг по разработке проектной и (или) сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и проведению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: Белгородская область, г. Белгород, 

<

...>, включая выполнение строительно-монтажных работ на объектах, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу объектов по Акту приемки в эксплуатацию на каждом объекте, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ и возмещение ущерба третьим лицам.

В соответствии с п. 2.1. Договора, работы по проведению капитального ремонта выполняются в II этапа, в соответствии с графиком производства работ (приложение №1).

Графиком производства работ установлено, что работы по первому этапу выполняются, начиная с момента подписания настоящего договора, и должны быть выполнены не позднее 28 календарных дней с момента подписания договора. 

Начало выполнения работ по второму этапу – со следующего дня со дня сдачи этапа проектирования, окончание выполнения работ – не позднее 30.11.2021 (утепление фасада, облицовка фасада полимерной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120-150 кг/кВ. м толщиной 80-100 мм без устройства лесов и защитной сетки). 

Сроки сдачи исполнительной и технической документации, в том числе актов формы КС-2, КС-3, Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией – не позднее 30.12.2021 г.

Согласно п. 3.1., цена Договора в соответствии с результатами аукциона составляет 16 941 301 руб. 09 коп.

Пунктом 3.4. Договора установлен следующий порядок оплаты работ по договору:

- аванс за I этап не выплачивается;

- оплата фактически выполненных работ по I этапу осуществляется в течение 56 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем предоставления подрядчиком в адрес заказчика и подписанных со стороны заказчика актов приемки выполненных работ;

- аванс за II этап выполнения работ в размере 30% от стоимости работ II этапа выдается в течение 60 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем заключения договора об оказании услуг (выполнении работ) при наличии письменной заявки на его финансирование;

- оплата фактически выполненных работ по II этапу осуществляется по видам работ II этапа в течение 365 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем предоставления в адрес заказчика следующих документов: актов о  приемке выполненных работ по форме КС-2; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; заявки на финансирование видов работ; актов приемной комиссии по приемке выполненных работ и/или объекта; исполнительной документации.

В силу п. 7.2. Договора, сдача-приемка работ по договору осуществляется в следующем порядке:

- I этап: в срок, указанный в приложении №1 к договору на основании акта выполненных работ;

 - II этап: не позднее 3-х рабочих дней до окончания сроков выполнения работ, подрядчик уведомляет заказчика о необходимости создания рабочей комиссии в составе представителей заказчика, представителя строительного контроля, представителя подрядчика на предмет осмотра объекта, соответствия проектной и/или сметной документации фактически выполненной работе, уточнении объемов выполненных работ. Вместе с уведомлением с уведомлением подрядчик направляет заказчику всю исполнительную техническую документацию, в том числе, Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Заказчик в течении (трех) рабочих дней с момента получения от подрядчика вышеуказанных документов, создает рабочую комиссию;

- при отсутствии у рабочей комиссии замечаний к выполненным работам и представленной документации, заказчик уведомляет подрядчика о проведенном осмотре объекта и о соответствии заявленных в договоре видам работ фактически выполненным;

- в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления подрядчика о соответствии заявленных в договоре видам работ фактически выполненных, заказчик организует приемку каждого вида работ и/или объекта в целом по договору комиссией по приемке объекта, для чего формирует указанную комиссию;

- комиссией по приемке объекта составляется и подписывается акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта.

16.02.2022 сторонами подписано дополнительное соглашение №2 к указанному договору, в котором стороны договорились внести изменения в п. 3.1. Договора, установив цену договора в размере 5 165 548,31 руб.

Кроме того, в п. 3 дополнительного соглашения установлена обязанность подрядчика произвести возврат денежных средств в размере 3 532 725 руб. 83 коп. в течение 15-ти календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения.

Ответчик в нарушение принятых на себя обязательств возврат денежных средств не произвел. В результате чего, у ответчика образовалась задолженность в размере 3 532 725 руб. 83 коп.

24.03.2022 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о погашении образовавшейся задолженности в срок до 18.04.2022. Претензия истца осталась без ответа и удовлетворения со стороны ответчика.

В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заключенный между сторонами договор по своей правовой природе является договором строительного подряда, правовое регулирование которого предусмотрено нормами параграфов 1, 3 и 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 758 ГК РФ установлено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно части 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Истцом в адрес ответчика перечислен аванс в сумме 3 532 725, 83 руб. в счет оплаты работ по договору № РТС231А210477-Д от 06.08.2021.

Ответчик доказательств того, что им выполнены работы по спорному договору в полном объеме и на спорную сумму, в материалы дела не представил.

В соответствии с п. 3 дополнительного соглашения № 2 от 16.02.2022, ответчик принял на себя обязательство произвести возврат денежных средств в размере 3 532 725 руб. 83 коп. в течение 15-ти календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса. Правила о неосновательном обогащении применяются к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством поскольку иное не установлено иными законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений (статья 1103 ГК РФ).

Обязательства из неосновательного обогащения возникают в тех случаях, когда действия или события приводят к противоправному результату - ничем юридически не обоснованному возникновению имущественных выгод на стороне одного лица за счет другого.

Обязательство из неосновательного обогащения возникает при наличии трех условий: наличия приобретения или сбережения имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица; отсутствуют правовые основания для приобретения или сбережения имущества. 

Ответчиком, допущены существенные нарушения условий договора в части не исполнения предусмотренных договором работ в полном объеме, где с учетом предоставленного аванса, имело место сбережение ответчиком денежных средств в заявленной истцом сумме.    

Согласно информационному письму президиума ВАС РФ от 11.09.2000 г. № 49 сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Ответчик не представил суду доказательств, свидетельствующих о выполнении им своих обязательств по договору подряда на спорную  сумму либо о возврате спорной суммы истцу, в связи с чем, суд приходит к выводу о возникновении неосновательного обогащения на стороне ответчика. 

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению.

Сторонам в определениях суда разъяснены положения части 2 статьи 268 АПК РФ о том, что дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

С учетом изложенного, государственная пошлина в размере 40 664 руб. 00 коп., уплаченная истцом при предъявлении иска, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с ООО "Профстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму задолженности по договору №РТС231А210477-Д от 06.08.2021 в размере 3 532 725 руб. 83 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 40 664 руб., всего 3 573 389 руб. 83 коп.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

  А.В. Петряев