114/2022-1117(1) 

 

Арбитражный суд Республики Карелия 

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru 

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-7863/2021

г. Петрозаводск

12 декабря 2022 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики  Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично.  

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН:  1191001003962, ИНН: 1001341012) в течение 60 календарных дней со дня  вступления решения в законную силу устранить недостатки выполненных работ по  капитальному ремонту главных фасадов многоквартирных жилых домов:  

1) В многоквартирном доме № 25 по пр. Ленина: 

- выполнить ремонт штукатурно-окрасочного слоя балконных плит со  стороны пр. Ленина и ул. Герцена, в количестве 15 штук (в местах видимых  разрушенных балконных плит отсутствует проектная металлическая сетка-рабица);  

- восстановить штукатурно-окрасочной слой балконных плит со стороны пр.  Ленина под цветниками, а также очистить поверхность от высолов;  

- восстановить штукатурно-окрасочной слой между 1-3 этажами в районе  вывески ювелирного магазина;  

- выполнить ремонт штукатурно-окрасочного слоя между 3-4 этажами со  стороны пр. Ленина в районе вывески «Газпромбанк»;  

- выполнить ремонт штукатурно-окрасочного слоя между 3-4 этажами со  стороны ул. Герцена, а также восстановить кирпичную кладку;  

- выполнить ремонт штукатурно-окрасочного слоя вокруг входных групп и  оконных проемов первого этажа со стороны пр. Ленина и ул. Герцена;  

- восстановить сопряжение водосточных труб со стороны пр. Ленина,  дополнить отсутствующие части водосточной трубы. Восстановить сопряжение  водосточных труб в верхней части водосточной системы со стороны ул. Герцена;  

- выполнит ремонт штукатурно-окрасочного слоя над цокольным  металлическим пояском по периметру фасада;  

- на торцевой части фасада со стороны ул. Герцена в части цоколя  восстановить отслоившееся лакокрасочное покрытие в районе электрощитовой.  

2) В многоквартирном доме № 35 по пр. Ленина: 

- на лицевой части фасада восстановить сопряжение между водосточными  трубами (дополнить элементы водосточной трубы). Дополнить элемент  водосточной трубы со стороны ул. Анохина, над входом в нежилое помещение  (левая сторона);  

- выполнить ремонт штукатурно-окрасочного слоя в районе цоколя, колонн,  

карниза со стороны пр. Ленина и ул. Анохина; - выполнить очистку оконных рам подъездов от строительной грязи и пыли; 

- выполнить ремонт штукатурно-окрасочного слоя вокруг входных групп и  

оконных проемов первого этажа по периметру здания; 

- на торцевой части фасада восстановить штукатурно-окрасочный слой  

цоколя (со стороны дома № 37 по пр. Ленина); 3) В многоквартирном доме № 36 по пр. Ленина: 

- восстановить штукатурно-окрасочный слой балконной плиты третьего  

этажа размером 10*15 см.; 

- выполнить крепление водосточной трубы по правой стороне в районе  

карниза; 4) В многоквартирном доме № 37 по пр. Ленина: 

- выполнить очистку оконных рам подъездов от строительной грязи и  

пыли; 

- выполнить замену трех нерабочих светильников (ламп) подсветка  

колонн на лицевой фасада (7, 10, 15). 

В удовлетворении остальной части исковых заявлений отказать.  

3. Присудить муниципальному казенному учреждению Петрозаводского  городского округа «Служба заказчика» (ОГРН: 1031000012449, ИНН:  1001033191) ко взысканию с общества с ограниченной ответственностью  «Стройивест» (ОГРН: 1191001003962, ИНН: 1001341012) судебную  неустойку в размере 2 000 рублей в день до дня фактического исполнения  обществом с ограниченной ответственностью «Стройивест» вступившего в  законную силу решения суда, в случае неисполнения обществом с  ограниченной ответственностью «Стройивест» решения суда в течение 60  календарных дней со дня вступления в законную силу решения.  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройивест» (ОГРН:  1191001003962, ИНН: 1001341012) в пользу муниципального казенного  учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика»  расходы по государственной пошлине в размере 6 000 руб.  

5. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект 65);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  г.Санкт-Петербург, ул. Якубовича,4) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

 Судья Моисеенко А.Б.  Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 02.03.2022 9:06:00

Кому выдана Моисеенко Анастасия Борисовна