АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-12739/2024

г. Владивосток

19 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  05 сентября 2024 года . 

Полный текст решения изготовлен  19 сентября 2024 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Зайцевой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём    Мадихоновым М.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  акционерного общества «Комплекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 63 435 457 рублей 35 копеек

при участии

от истца - ФИО1 по доверенности  от 01.07.2024, паспорт, диплом. 

от ответчика в онлайн режиме  - ФИО2 по  доверенности от 14.10.2023, паспорт, диплом,

установил:

Акционерное общество «Комплекс» (далее – истец, АО «Комплекс») обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края к обществу с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» (далее – ответчик, ООО «СДС – Строй») о взыскании 63 435 457 рублей 35 копеек задол.

В судебном заседании истец поддержал свои требования.

Ответчик в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) признал исковые требования. 

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

АО «Комплекс» (далее - Субподрядчик) выполнило комплекс строительно-монтажных работ для ООО «СДС-Строй» в лице СДС-Строй ДВ - филиала ООО «СДС-Строй» (далее - Генподрядчик) на объекте «Строительство нового специализированного порта на Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий», начиная с 25.01.2019 по 20.07.2023 включительно.

В рамках выполнения комплекса работ, между сторонами были заключены следующие договора субподряда от 09.01.2019 №208-19, от 27.03.2019 №249-2019, от 29.04.2019 №263-2019, от 06.05.2019 № 557-19, от 22.05.2019 № 561-19, от 13.06.2019 № 805-19, от 14.06.2019 № 807-19, от 20.07.2019 № 1060-19, от 14.11.2019 № 1464-19, от 09.01.2020 № 123-20, от 06.02.2020 № 138-20, от 02.03.2020 № 181-20, от 02.03.2020 №183-20, от 04.03.2020 № 182-20, от 05.03.2020 № 188-20, от 10.04.2020 №704-20, от 01.09.2020 № 53-20-СМР, от 01.11.2020 № 117-20-СМР, от 30.11.2020 № 154-20-СМР, от 22.03.2021 № 069-21-СМР,  от 01.04.2021 №093-21-СМР, от 15.05.2021 № 138-21-СМР, от 20.05.2021 № 150-21-СМР, от 06.06.2021 № 154-21-СМР, от 21.06.2021 № 149-21-СМР, от 10.08.2021 №238-21-СМР, от 20.08.2021 №241-21-СМР, от 17.09.2021 № 269-21-СМР, от 14.10.2021 №303-21-СМР, от 03.06.2022 № 115-22-СМР. 

Общая стоимость выполненного комплекса строительно-монтажных работ, составляет 1 102 711 766 рублей 48 копеек.

Согласно условиям договоров от 09.01.2019 № 208-19, от 27.03.2019 № 249-2019, от 24.04.2019 № 263-2019, от 06.05.2019 № 557-19, от 22.05.2019 № 561-19, от 13.06.2019 № 805-19, от 14.06.2019 № 807-19, от 20.07.2019 № 1060-19, от 14.11.2019 № 1464-19, от 09.01.2019 № 123-20, от 06.02.2020 № 138-20, от 02.03.2020 № 181-20, от 02.03.2020 № 183-20, от 04.03.2020 № 182-20, от 05.03.2020 № 188-20, от 10.04.2020 № 704-20, от 01.09.2020 № 53-20-СМР, от 01.11.2020 № 117-20-СМР, от 30.11.2020 № 154-20-СМР, от 22.03.2020 № 069-21-СМР, от 01.04.2021 № 093-21-СМР, установленным в п. 5.1 Раздела 5, оплата работ производится Генподрядчиком за фактически выполненные объемы работ на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) и предоставленной Субподрядчиком счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 календарных дней с даты подписания актов приемки выполненных работ (форма КС-2).

В договорах от 15.05.2021 № 138-21-СМР, от 20.05.2021 № 150-21-СМР, от 06.06.2021 № 154-21-СМР, от 21.06.2021 № 149-21-СМР, от 10.08.2021 №238-21-СМР, от 20.08.2023 № 241-21-СМР, от 17.09.2021 № 269-21-СМР, от 14.10.2021 № 303-21-СМР, от 03.06.2022 № 115-22-СМР, в п. 5.1 в Разделе 5 установлено, что оплата производится Генподрядчиком за фактически выполненные объемы работ на основании подписанных обеими сторонами форм КС-2, КС-3, актов переработки давальческих материалов и предоставленной Субподрядчиком счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 45 календарных дней с даты подписания формы КС-2.

За нарушение сроков оплаты работ, Генподрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки (Раздел 17 договоров).

Вместе с тем, установлено ненадлежащее исполнение Генподрядчиком условий договоров субподряда.

Согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанным представителями обеих сторон, общая стоимость выполненного комплекса строительно-монтажных работ составляет 1 102 711 766 рублей 48 копеек.

Кроме того, между сторонами заключен договор оказания услуг спецтехникой и автотранспортом от 01.03.2021 № 074-21-У.

Пунктом 2.3.1. договора предусмотрена обязанность Ответчика принимать и оплачивать оказанные услуги в размере, сроке и в порядке, предусмотренные договором.

Согласно Разделу 3 договора, размер оплаты устанавливается в Приложении №1, цена указана за час работы техники по фактически отработанному времени.

Оплата оказанных услуг производится на основании выставленного счета-фактуры за фактически отработанное время в течение 45 календарных дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг.

Согласно выставленных счетов-фактур всего оказано услуг на общую сумму 26 020 517 рублей 97 копеек: от № 128 на сумму 1 340 779,39 рублей, от 30.04.2021 № 175 на сумму 4 435 960,12 рублей, ot 31.05.2021 №237 на сумму 879 067,15 рублей, от 30.06.2021 №293 на сумму 39 611,40 рублей, от 31.07.2021 №331 на сумму 12 000 рублей, от 31.08.2021 №380 на сумму 614 012,40 рублей, от 30.09.2021 №409 на сумму 542 701,50 рублей, ot 31.10.2021 №477 на сумму 1 527 352,02 рублей, от 30.11.2021 №519 на сумму 2 450 118,90 рублей, от 30.11.2021 №521 на сумму 66 919,44 рублей, от 31.12.2021 №567 на сумму 2 042 316,18 рублей, от 31.05.2022№ 172 на сумму 192 452,82 рублей, от 30.06.2022№210 на сумму 27 960 рублей, от 31.07.2022 №242 на сумму 689 626,98 рублей, от 31.08.2022 №304 на сумму 624 156,48 рублей, от 30.09.22 №421 на сумму 450 350,71 рублей, от 31.10.22 №467 на сумму 262 069,50 рублей, от 30. 11.22 №508 на сумму 2 059 747,74 рублей, от 31.12.2022 № 545 на сумму 2 133 578,09 рублей, от 31.01.23 № 34 на сумму 1 468 900,07 рублей, от 28.02.23 №73 на сумму 2 118 438,60 рублей, от 31.03.23 № 121 на сумму 1 697 141,80 рублей, от 30.04.23 № 137 на сумму 161 371,14 рублей, от 31.05.23 № 187 на сумму 183 885,54 рублей. Всего услуг оказано на сумму 26 020 517 рублей 97 копеек. 

Таким образом, общая сумма с учетом выполненного комплекса строительных работ и оказанных услуг спецтехникой и автотранспортом составила 1 128 732 284 рубля 45 копеек. 

Генподрядчиком осуществлена частичная оплата, а также сторонами заключались  акты взаимозачета:

1. По договору от 09.01.2019 № 208-19 всего выполнено работ на сумму 552 156 146 рублей 40 копеек.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании следующих платежных поручений: в 2019 году общая сумма составляет 359 108 093 рубля 38 копеек  (платежные поручения №№ 2045, 2403, 2868, 2981, 3199, 3335, 3776, 3777. 4203, 4383, 4826, 5152, 5441, 5821, 5928, 6240, 6722, 7356, 7758, 8236, 8433, 8654, 8655, 9291, 10670, 12102, 15349, 16435, 17545, 17546); в 2020 году общая сумма составляет 140 724 470 рублей 73 копейки (платежные поручения №№ 573, 3477, 5962, 5963, 5964, 8507, 12865, 12863, 53, 157, 377); в 2021 году общая сумма составляет 12 204 161 рубль 96 копеек (платежные поручения  №№ 467, 468, 469, 520, 5907, 5906).

Итого произведенная оплата в общей сумме оставляет 512 036 726 рублей 07 копеек.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами, в 2019 году произведен зачет взаимных требований на сумму 18 074 358 рублей 11 копеек (№№ 91, 160, 198. 318, 417, 506, 547, 719, 800, 904, 984, 1072). В 2020 году взаимозачет произведен на сумму 5 480 377 рублей 82 копейки (№№ 54, 104, 214, 342, 398, 539, 5, 30, 77). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 23 554 735 рублей 93 копейки.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 535 591 462 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 16 564 684 рубля 40 копеек.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.12.2020.

2. По договору от 27.03.2019 № 249-2019 всего выполнено работ на сумму 985 228 рублей 80 копеек.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 31.07.2019 № 8664 на сумму 758 835,07 рублей платежные поручения; от 12.05.2020 № 8516 на 186 984,57 рублей платежные поручения. Всего 945 819,64 рублей платежные поручения.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами от 30.12.2019 №1072 произведён взаимозачет на сумму 1 947,76 рублей; от 25.04.2019 № 317 взаимозачет на сумму 7 904,53 рублей платежные поручения. Итого взаимозачет произведен на общую сумму 9 852,29 рублей платежные поручения.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 955 671,93 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 29 556,87 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.12.2019.

3. По договору от 29.04.2019 № 263-2019 всего выполнено работ на сумму 2 006 990,40 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 31.07.2019 № 8660 на сумму 628 088,83 руб.; от 31.07.2019 №6881 на 1 298 621,95 руб. Всего 1 926 710,78 руб.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами от 25.06.2019 №505 произведён взаимозачет на сумму 13 527,31 рублей; от 25.05.2019 № 416 взаимозачет на сумму 6 452,59 рублей. Итого взаимозачет произведен на общую сумму 20 069,90 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 1 946 780,68 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 60 209,72 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.06.2019.

4. По договору от 06.05.2019 № 557-19 всего выполнено работ на сумму 37 861 957,20 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании следующих платежных поручений: в 2019 году общая сумма составляет 15 958 812,99 рублей (№№ 8663, 9293. 12105, 12106. 17548. 17547); в 2020 году общая сумма составляет 18 700 581,58 рублей (№№ 6137, 6138, 8537, 158, 159,379,378; в 2021 году общая сумма составляет 1 688 084,36 руб. (№№ 5908, 2168, 2170). Итого произведенная оплата в общей сумме оставляет 36 347 478,93 рублей. Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами, в 2019 году произведен зачет взаимных требований на сумму 303 280,98 рублей. (№№ 1072, 984, 904, 800, 721, 504). В 2020 году взаимозачет произведен на сумму 75 338,58 рублей (№№ 77, 30, 5, 539). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 378 619,56 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 36 726 098,49 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 1 135 858,71 рублей. 

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.12.2020.

5. По договору от 22.05.2019 № 561-19 всего выполнено работ на сумму 771 672  рубля.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежного поручения от 12.05.2020 № 8518 на сумму 740 805,12 рублей.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами от 30.12.2019 № 1072 произведён взаимозачет на сумму 4 537,54 рублей; от 31.10.2019 № 904 взаимозачет на сумму 3 179,18 рублей. Итого взаимозачет произведен на общую сумму 7 716,72 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 748 521,84 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 23 150,16 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.12.2019.

6. По договору от 13.06.2019 № 805-19 всего выполнено работ на сумму 26 579 844 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 15.08.2019 № 9294 на сумму 11 533 382,26 рублей; от 11.10.2019 № 12108 на 2 341 027,49 рублей, № 12107 на 9 077 989,88 рублей; от 12.05.2020 № 8508 на 2 564 250,63 рублей. Всего 25 516 650,26 руб.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами, в 2019 году произведен зачет взаимных требований на сумму 265 798,43 рублей (№№ 904, 800, 721).

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 25 782 448,69 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 797 395,31 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.10.2019.

7. По договору от 14.06.2019 № 807-19 всего выполнено работ на сумму 13 794 003,79 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 15.08.2019 № 9295 на сумму 1 652 862,81 рублей; от 11.10.2019 № 12110 на 1 395 981,63 рублей, № 12109 на 4 077 980,84 рублей; от 13.12.2019 № 16437 на 902 401,88 рублей, № 16436 на 4 863 258,47 рублей; от 12.05.2020 № 8520 на 349 758,01 рублей. Всего 13 242 243,64 рублей.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами, в 2019 году произведен зачет взаимных требований на сумму 137 940,03 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 13 380 183,67 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 413 820,12 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.12.2019.

8. По договору от 20.07.2019 № 1060-19 всего выполнено работ на сумму 8 624 458,80 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 12.09.2019 № 10669 на сумму 209 019,57 рублей; от 11.10.2019 № 12099 на 1 956 255,56 рублей; от 25.10.2019 № 12100 на 3 573 737,24 рублей; от 12.05.2020 № 8509 на 2 626 712,66 рублей. Всего 8 365 725,03 рублей.

Задолженность по договору составляет в общей сумме 258 733,77 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.02.2020.

9. По договору от 14.11.2019 № 1464-19 всего выполнено работ на сумму 8 529 607,20 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 12.05.2020 № 8512 на сумму 4 414 988,16 рублей; от 02.09.2020 № 168 на 355 237,63 рублей; от 05.10.2020 № 373 на 321 061,25 рублей, №374 на 341 675,13 рублей; от 24.11.2022 № 701856 на 1 144 559,23 рублей; от 29.12.2022 № 703104 на 382 761,21 рублей; от 19.05.2022 № 705046 на 93 767,04 рублей, № 705050 на 1 134 373,25 рублей. Всего 8 188 422,90 рублей.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами, в 2023 году произведен зачет взаимных требований на сумму 976,74 рублей (№ 84). В 2022 году произведён взаимозачет на сумму 27 725,98 рублей (№№ 36, 37, 237). В 2020 году произведён взаимозачет на сумму 10 603,90 рублей (№№ 5, 539). В 2019 году произведён взаимозачет на сумму 45 989,46 рублей (№№ 1072, 984). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 85 296,08 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 8 273 718,98 рублей.

Задолженность по договору составляет в общей сумме 255 888,22 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.02.2023.

10. По договору от 09.01.2020 № 123-20 всего выполнено работ на сумму 7 529 625,60 рублей.

Оплата по данному договору произведена частично на основании платежных поручений от 12.05.2020 № 8511 на сумму 2 566 962,43 рублей; от 02.09.2020 № 167 на 1 603 441,87 рублей; от 05.10.2020 № 369 на 286 558,13 рублей, от 06.10.2020 № 443 на 2 771 478,15 рублей. Всего 7 228 440,58 рублей.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами, в 2020 году произведён взаимозачет на сумму 75 296,25 рублей  (№№ 5, 539, 54).

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 7 303 736,83 рублей.

Задолженность по договору составляет в общей сумме 225 888,77 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.07.2020.

11. По договору от 06.02.2020 № 138-20 всего выполнено работ на сумму 12 252 314,40 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 12.05.2020 № 8506 на сумму 8 026 463,24 рублей; от 28.07.2020 № 14120 на 1 009 072,51 рублей; от 20.08.2020 № 44 на 1 194 031,87 рублей; от 02.10.2020 № 371 на 316 153,73 рублей; № 372 на 389 305,73 рублей; от 20.10.2020 № 651 на 246 790,65 рублей; от 12.05.2021 № 10443 на 580 404,09 рублей. Всего 11 762 221,82 рублей.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами, в 2020 году произведён взаимозачет на сумму 122 253,15 рублей (№№ 77, 30, 5, 398, 342, 214, 104).

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 11 884 744,97 рублей.

Задолженность по договору составляет в общей сумме 367 569,43 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.11.2020.

12. По договору от 02.03.2020 № 181-20 всего выполнено работ на сумму 11 788 692 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 08.07.20 № 12861 на сумму 11 670 805,08 рублей.

Задолженность по договору составляет в общей сумме 117 886,92 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.04.2020.

13. По договору от 02.03.2020 № 183-20 всего выполнено работ на сумму 1 946 138,40 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 12.05.2020 № 8514 на сумму 392 457,54 рублей; от 20.08.2020 № 48 на 16 524.53 рублей; от 20.10.2020 № 652 на 918 175,50 рублей; от 11.06.2021 №2167 на 285 690,24 рублей; от № 2166 на 313 829,21 рублей. Всего 1 926 677,02 рублей.

Задолженность по договору составляет в общей сумме 19 461,38 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.11.2020.

14. По договору от 04.03.2020 № 182-20 всего выполнено работ на сумму 2 560 410 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 12.05.2020 № 8513 на сумму 1 562 797,50 рублей; от 21.08.2020 № 45 на 65 802 рублей; № 47 на 164 526,12 рублей; № 46 на 741 680,28 рублей. Всего 2 534 805,90 рублей.

Задолженность по договору составляет в общей сумме 25 604,10 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.06.2020.

15. По договору от 05.03.2020 № 188-20 всего выполнено работ на сумму 53 164 698 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании следующих платежных поручений: в 2020 году общая сумма составляет 23 595 638,22 рублей (№№ 8515, 49, 50, 51, 52, 375.376, 653); в 2021 году общая сумма составляет 26 379 177,90 рублей (№№ 52, 1043, 2994, 3181, 3180, 466, 10446, 10445).

Итого произведенная оплата в общей сумме оставляет 49 974 816,12 рублей.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами. В 2020 году взаимозачет произведен на сумму 1 594 940,95 рублей (№№ 1, 77, 30, 5, 539, 398, 342, 214).

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 51 569 757,07 рублей. 

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 1 594 940,93 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.02.2021.

16. По договору от 10.04.2020 № 704-20 всего выполнено работ на сумму 18 117 036 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 25.08.2020 № 98 на сумму 2 074 419,10 рублей; № 96 на 2 640 825,39 рублей; № 97 на 5 284 755,51 рублей; от 02.10.2020 № 381 на 1 804 818,63 рублей; от 05.10.2020 № 380 на 2 897 805,06 рублей; от 24.03.2021 № 5910 на 306 464,76 рублей; № 5909 на 1 839 755,01 рублей. Всего 16 848 843,46 рублей.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами. В 2020 году взаимозачет произведен на сумму 724 681,44 рублей (№№ 77, 5, 539, 398, 342).

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 17 573 524,90 рублей. 

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 543 511,10 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.12.2020.

17. По договору от 01.09.2020 № 53-20-СМР всего выполнено работ на сумму 1 055 473,20 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежного поручения от 20.10.2020 № 667 на сумму 992 144,80 рублей.

Согласно акту взаимозачета, составленным между сторонами от 30.09.20 № 30. взаимозачет произведен на сумму 31 664,20 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 1 023 809 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 31 664,20 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.09.2020.

18. По договору от 01.11.2020 № 117-20-СМР всего выполнено работ на сумму 705 481,20 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежного поручения от 12.05.2021 № 10442 на сумму 663 152,32 рублей.

Согласно акту взаимозачета, составленному между сторонами от 31.12.2020 №77, взаимозачет произведен на сумму 21 164,44 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 684 316,76 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 21 164,44 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 25.11.2020.

19. По договору от 30.11.2020 № 154-20-СМР всего выполнено работ на сумму 74 472 586,80 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании следующих платежных поручений: в 2021 году (№№ 5904, 990, 996, 993, 994, 10444, 2162, 2161, 2163, 2164, 2165, 3322, 4285, 4283, 4284, 7757, 7755, 7821); в 2022 году (№№187, 188, 5423, 700142, 700141).

Итого произведенная оплата в общей сумме оставляет 68 912 404,27 рублей.

Согласно актам взаимозачета, составленным между сторонами от 20.04.2023 № 139, произведен зачет взаимных требований на сумму 34 845,55 рублей. В 2022 году взаимозачет произведен на сумму 269 227,13 рублей (от 31.12.2022 № 41). В 2021 году взаимозачет произведен на сумму 1 781 115,30 рублей (акт от 31.12.2021 № 16, от 31.05.2021 № 34). В 2020 году взаимозачет произведен на сумму 148 989,64 рублей (акт от 31.12.2020 № 77). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 2 234 177,62 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 71 146 581,89 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 3 326 004,91 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.04.2023.

20.  По договору от 22.03.2021 № 069-21-СМР всего выполнено работ на сумму83 459 510,29 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании следующих платежных поручений: в 2021 году (№№ 2158, 3315, 3321, 3320, 3316, 5171, 5534, 5535, 6251, 7125, 7126, 8205); в 2022 году (№№ 308, 581, 580, 1678, 2688, 4173, 6479); в 2023 году (№№ 705049, 705052, 705053, 705048).

Итого произведенная оплата в общей сумме оставляет 74 116 068,62 рублей.

В 2023 году между сторонами произведен взаимозачет на сумму 284 953,98 рублей (акты №№ 238, 141, 95, 85,14). В 2022 году взаимозачет произведен на сумму 478 065,06 рублей (акты №№ 44, 14). В 2021 году взаимозачет произведен на сумму 3 397 916,52 рублей (акты №№ 7, 34). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 4 160 935,56 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 78 277 004,18 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 5 182 506,11 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.07.2023.

21. По договору от 01.04.2021 № 093-21-СМР всего выполнено работ на сумму 3 499 837,20 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 11.06.2021 № 2160 на сумму 3 219 850,22 рублей.

Согласно акту взаимозачета, составленному между сторонами от 31.05.21 № 34, произведен зачет взаимных требований на сумму 174 991,86 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 3 394 842,08 рублей.

Задолженность по договору составляет в общей сумме 104 995,12 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.04.2021.

22. По договору от 15.05.2021 № 138-21-СМР всего выполнено работ на сумму21 739 616,40 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 29.09.2021 № 5532; от 16.08.22 № 6480; от 05.10.22 № 700140; от 16.11.2022 №№ 701552, 701553; от 29.12.22 № 703103, всего на 20 000 446,97 руб.

В 2022 году между сторонами произведен взаимозачет на сумму 993 094,74 руб. (акты №№ 35, 237). В 2021 году взаимозачет произведен на сумму 93 886,20 руб. (акт № 10). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 1 086 980,94 руб.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 21 087 427,91 руб. "

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 652 188,49 руб. (21 739 616,40 руб.- 21 087 427,91 руб. =652 188,49 руб.).

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.11.22.

23. По договору от 20.05.2021 № 150-21-СМР всего выполнено работ на сумму 15 621 877,20 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 11.08.2021 № 4282; от 29.09.2021 № 5529; от 02.11.2021 №№ 6659, 6658; от 16.11.2021 № 7127; от 26.01.2022 № 583; от 27.01.2022 №№ 585, 584, всего на 12 739 664,44 рублей.

Согласно акту взаимозачета, составленному между сторонами от 31.12.2021 № 9, взаимозачет произведен на сумму 679 286,16 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 13 418 950,60 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 2 202 926,60 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.11.2022.

24. По договору от 06.06.2021 № 154-21-СМР всего выполнено работ на сумму

1 928 226 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 29.09.2021 № 5526 на сумму 138 302,99 рублей; от 16.11.2021 № 7128 на 799 067,38 рублей; от 01.04.2022 № 2416 на 484 676,80 рублей; от 13.07.2022 №№ 5425, 5524 на 351 920,86 рублей, всего на 1 773 968,03 рублей.

Согласно акту взаимозачета, составленному между сторонами от 31.12.2021 № 8, взаимозачет произведен на сумму 96 411,30 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 1 870 379,33 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 57 846,67 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.11.2021.

25. По договору от 21.06.2021 № 149-21-СМР всего выполнено работ на сумму4 034 851,20 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 27.01.2022 № 582 на сумму 776 350,72 рублей; от 31.03.2022 №2404 на 2 138 428,98 рублей; от 01.04.2022 № 2424 на 158 411,94 рублей; от 13.07.2022 №5422 на 638 871,47 рублей, всего на 3 712 063,11 рублей.

Согласно акту взаимозачета, составленному между сторонами от 31.12.21 № 11, взаимозачет произведен на сумму 201 742,56 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 3 913 805,67 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 121 045,53  рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.09.2021.

26. По договору от 10.08.2021 № 238-21-СМР всего выполнено работ на сумму 24 823 329,60 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 01.04.2022 №№ 2425, 2406 на сумму 3 462 840,64 рублей; от 13.07.2022 №№ 5427, 5430, 5426, 5429, 5428 на 2 496 795,34 рублей; от 15.08.22 № 6481 на 415 328,11 рублей; от 29.12.22 № 703105 на 55 717,78 рублей, всего на 6 430 681,87 рублей.

В 2023 году между сторонами произведен взаимозачет на сумму 891 672,90 рублей (акты №№ 237, 140, 94, 83, 14). В 2022 году взаимозачет произведен на сумму 76 796,94 рублей (акты №№ 38, 15, 237). В 2021 году взаимозачет произведен на сумму 272 696,64 рублей (акт № 12). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 1 241 166,48 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 7 671 848,35 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 17 151 481,25 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.07.2023.

27. По договору от 20.08.2021 № 241-21-СМР всего выполнено работ на сумму8 791 362 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 07.04.2022 №№ 2692, 2691, 2689, 2690; от 19.05.23 №№705045, 705044, всего на 8 088 053,04 рублей.

В 2023 году между сторонами произведен взаимозачет на сумму 89 403,66 рублей. (акты №№ 81,82). В 2021 году взаимозачет произведен на сумму 350 164,44 рублей  (акт № 13). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 439 568,10 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 8 527 621,14 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 263 740,86 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.02.2023.

28. По договору от 17.09.2021 № 269-21-СМР всего выполнено работ на сумму56 929 224 рублей.

Оплата по данному договору произведена частично на основании платежных поручений от 18.01.2022 № 307; от 22.02.2023 № 1282; от 31.03.2022 № 2417; от 04.04.2022 №№ 2418, 2407; от 07.04.2022 №№ 2693, 2694, 2695; от 28.04.2022 № 3382; от 02.06.2022 № 4184; от 16.08.2022 № 6482, всего на 52 433 500,96 рублей.

В 2022 году между сторонами произведен взаимозачет на сумму 1 431 440,64 рублей (акты №№ 42, 13). В 2021 году взаимозачет произведен на сумму 1 415 020,56 рублей (акт № 15). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 2 846 461,20 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 55 279 962,16 рублей. 

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 1 649 261,84 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.04.2022.

29. По договору от 14.10.2021 № 303-21-СМР всего выполнено работ на сумму46 842 310,80 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 02.06.2022 №№ 4185, 4186, 4174; от 28.07.2022 № 5868; от 15.08.2022 № 6483; от 23.09.2022 № 7504; от 05.10.2022 №№ 700145, 700144, 700143; от 16.11.2022 № 701554; от 29.12.2022 № 703106; от 19.05.2023 №№ 705051, 705047, всего на 42 159 333,47 рублей.

В 2023 году между сторонами произведен взаимозачет на сумму 130 448,34 рублей. (акты №№ 93, 86). В 2022 году взаимозачет произведен на сумму 2 114 469,18 рублей (акты №№ 40, 39, 16, 237). В 2021 году взаимозачет произведен на сумму 97 198,02 рублей (акт № 14). Итого взаимозачет произведен на общую сумму 2 342 115,54 рублей.

Таким образом, с учетом взаимозачета, оплата по договору составляет в общей сумме 44 501 449,01 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 2 340 861,79 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.03.2023.

30. По договору от 03.06.2022 № 115-22-СМР всего выполнено работ на сумму 139 257,60 рублей.

Оплата по данному договору не произведена Ответчиком.

Согласно акту взаимозачета от 20.03.2023 № 96, составленному между сторонами, взаимозачет произведен на сумму 6 962,88 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 132 294,72 рублей.

Согласно акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, весь объем был сдан 20.03.2023.

Таким образом, задолженность по вышеперечисленным договорам субподряда, с учетом частичной оплаты и взаимозачета, составила 55 672 142,44 рублей.

Кроме того, Ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору оказания услуг спецтехникой и автотранспортом от 01.03.2021 № 074-21-У.

По данному договору всего оказано услуг на сумму 26 020 517,97 рублей.

Оплата по данному договору произведена Ответчиком частично на основании платежных поручений от 11.06.2021 №№ 2155, 2156; от 14.07.2021 № 3318; от 15.07.2021 № 3375; от 16.11.2021 №№ 7122, 7123, 7124; от 26.01.2022 №№ 577, 575, 576; от 01.03.2022 №№ 1610, 1612, 1611, 1609, 1613; от 31.10.2022 №№ 700972, 700971; от 24.11.2022 №№ 701850, 701854, 701852; от 29.12.2022 № 703077, всего на 18 257 202,73 рублей.

Учитывая вышеизложенное, задолженность по договору составляет 7 763 315,24 рублей.

Таким образом, из подлежащей оплате всего суммы 1 128 732 284 рубля 45 копеек, согласно выставленным счетам-фактурам, Генподрядчиком, с учетом актов взаимозачёта, оплачено  1 065 296 826 рублей 77 копеек, задолженность составляет 63 435 457 рублей 68 копеек, из них сумма 55 672 142 рубля 44 копейки составляет задолженность по договорам субподряда; сумма 7 763 315 рублей 24 копейки - задолженность по договору на оказание услуг спецтехникой и автотранспортом.

Наличие задолженности по неисполненным обязательствам Ответчик признал и подтвердил в полном объеме, что подтверждается подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.08.2023.

Исходя из вышеизложенного, сумма долга за выполненные работы и оказанные услуги на день предъявления иска составила 63 435 457 рублей 68 копеек.

30.11.2023 исх. № 580 Генподрячику направлена претензия с требованием погасить задолженность в сумме 63 435 457 рублей 68 копеек. 

19.02.2024 исх. № 154 повторно направлялась претензия о погашении задолженности. 

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

К правоотношениям сторон настоящего спора подлежат применению нормы главы 37 и 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статье 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором возмездного оказания услуг. 

Как указано в статье 783 ГК РФ, общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

В силу статей 720, 753  ГК РФ доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

В силу указанных статей, а также положений Договора, истец обязался выполнить определенные договором работы,  а ответчик, в свою очередь, обязался принять результат работ и оплатить его.

Согласно статьям 309, 310 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Материалами дела подтверждается факт выполнения Субподрядчиком работ по договорам  субподряда и договору оказания услуг спецтехникой и автотранспортом. В связи с чем у ответчика возникла обязанность оплатить работы.

Доказательства оплаты в полном объеме выполненных работ ответчиком не представлены в нарушение статьи 65 АПК РФ, задолженность согласно проверенному судом расчету истца составила  63 435 457 рублей 35 копеек.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела ответчик признал исковые требования в части суммы основного долга по обоим договорам. Признание иска принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ. 

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований истца о взыскании основного долга по договорам в размере  63 435 457 рублей 35 копеек.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения спора, понесенные истцом расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, в части признания ответчиком суммы основного долга, возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, а также подлежит возврату излишне оплаченная госпошлина. Остальная часть понесенных истцом судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

            Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» (ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Комплекс» (ИНН 

<

***>) 63 435 457 рублей 35 копеек задолженности, 60 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

            Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по заявлению взыскателя. 

            Возвратить акционерному обществу «Комплекс» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 140 000 рублей государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению №  1227 от 01.07.2024.

            Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                      Зайцева Л.В.