АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

Дело №А48-4416/2021

г. Орёл

30 августа 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 23.08.2021, решение в полном объеме изготовлено 30.08.2021.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Аксеновой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Драчевым Г.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>) в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» (Орел г, пл. Мира, д. 2) к обществу с ограниченной ответственностью «СтройПремиум» (302005, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) 

1) о взыскании задолженности по договору № 41717150 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.10.2018 в размере             160 629 руб.19 коп., неустойки за период с 24.10.2019 по 20.05.2021 в размере 33 271 руб. 20 коп., всего 193 900 руб. 39 коп.;

2) о  расторжении договора № 41717150 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.10.2018,

при участии  в судебном заседании:

от истца - представитель ФИО1 (паспорт, постоянная доверенность от 02.06.2021), 

от ответчика - представитель не явился, извещен надлежащим образом, 

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (переименовано в ПАО «Россети Центр») в лице филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» (далее – истец, ПАО «Россети Центр») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СтройПремиум» (далее – ответчик, ООО «СтройПремиум») о взыскании задолженности по договору №41717150 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.10.2018 в размере 160 629 руб.19 коп., неустойки за период с 24.10.2019 по 20.05.2021 в размере 33 271 руб. 20 коп., всего 193 900 руб. 39 коп., а также о  расторжении договора № 41717150 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.10.2018.

В судебном заседании 23.08.2021 представитель истца поддержал исковые требования в  полном объеме.

Ответчик письменный отзыв на иск не представил, возражений по существу требований не заявил, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

Учитывая, что у арбитражного суда имеются доказательства надлежащего извещения ООО «СтройПремиум» о рассмотрении дела в порядке ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), спор рассмотрен по существу в отсутствие ответчика по правилам ст. 156 АПК РФ.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, оценив представленные арбитражному суду доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат  удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом, 23 октября 2018 года между филиалом ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» (исполнитель по договору) и ООО «СтройПремиум» (заявитель по договору) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41717150, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимаюших устройств заявителя ТП-10/0,4кВ для электроснабжения стройплощадки бетонного завода, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 250,0 кВт; категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения для электроснабжения стройплощадки бетонного завода, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, Сабуровское с/п, п. Дружный.

В силу пунктов 4, 5 договора от 23.10.2018 №41717150 технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

Прав и обязанности сторон содержатся в разделе 2 настоящего договора. 

В соответствии с пунктом 8 вышеуказанного договора заявитель обязуется:

-  надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); 

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; 

- получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; при этом, в случае технологического присоединения объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), объектов в целях временного технологического присоединения, объектов физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя не требуется; 

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации; 

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; 

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

В редакции дополнительного соглашения № 1 от 09.08.2019, заключенного между сторонами, установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом от 25.12.2017 №494-т Управления  по тарифам и ценовой политике Орловской области и составляет 36 968 руб. 38 коп., в т. ч. НДС 20%     6 161 руб. 40 коп.

В силу пункта 11 вышеуказанного договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В силу пункта 17 договора №41717150 от 23.10.2018 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (пункт 21 договора).

Поскольку документов, свидетельствующих об исполнении мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика, в адрес истца не поступало, истец направил в адрес ООО «СтройПремиум» письмо от 18.11.2020 №МР1-ОР/22-1/5359, в котором предложил ответчику в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления: 

- в случае выполнения мероприятий по договору для завершения процедуры технологического присоединения и оформления необходимых документов, предусмотренных Правилами ТП, письменно уведомить филиал о выполнении мероприятий, приложив заполненную форму уведомления о выполнении технических условий; 

- в случае отсутствия необходимости технологического присоединения подписать соглашение о расторжении Договора и направить его в филиал; 

- оплатить неустойку в соответствии с условиями договора.

Также истцом в адрес ответчика направлено соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41717150 от 23.10.2018.

Претензионное письмо истца ответчиком в добровольном порядке не удовлетворено.

Ссылаясь на вышеизложенные обстоятельства, ПАО «Россети Центра» в лице филиала ПАО «Россети Центра – «Орелэнерго» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 5 статьи 453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В данном случае исковые требования в части возмещения фактически понесенных расходов в размере 160 629 руб. 19 коп. обоснованы и подлежат удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки в сумме 33 271 руб. 00 коп. за период с 24.10.2019 по 20.05.2021.

За нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению истец на основании статьи 330 ГК РФ и пункта 17 договора № 41717150 от 23.10.2018 вправе требовать уплаты неустойки, расчет которой арбитражным судом проверен и признан верным.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло - и энергоснабжения.

Так, применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила № 861).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 №861 (далее - Правила техприсоединения), определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Частью 2 статьи 452 ГК РФ установлено, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

При расторжении договора в судебном порядке обязательства сторон прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора (статья 453 ГК РФ).

Как установлено в ходе рассмотрения дела, стороны не достигли взаимного соглашения расторгнуть договор.

В силу статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В качестве основания для расторжения спорного договора истец ссылается на то, что ООО «СтройПремиум» не выполнены возложенные на него мероприятия, перечисленные в технических условиях.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, ответчик, в силу п. 8 договора, обязан был уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Ответчик своих обязательств по договору не исполнил. Доказательств обратного суду не представлено.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора об осуществлении технологического присоединения.

Следовательно, ответчиком  допущено существенное нарушение обязательств по договору, что в силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для его расторжения.

Кроме того, в дело не представлено доказательств заинтересованности ответчика в продолжении с истцом договорных отношений и исполнения условий договора.

С учётом вышеизложенного, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41717150 от 23.10.2018.

Таким образом, с учетом вышеизложенных обстоятельств, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройпремиум» (302005, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>) в лице филиала ПАО «Россети Центр» -«Орелэнерго» (Орел г, пл. Мира, д. 2) фактические расходы по договору № 41717150 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.10.2018 в размере 160 629 руб.19 коп., неустойку за период с 24.10.2019 по 20.05.2021 в размере                33 271 руб. 20 коп., всего 193 900 руб. 39 коп, а также 12 817 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству истца после вступления решения в законную силу.

Расторгнуть договор № 41717150 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.10.2018, заключенный между ПАО «МРСК Центра» и ООО «СтройПремиум».

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области.

Судья           Аксенова Т.В.