Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Тамбов

«16» декабря 2019 г.                                             Дело №А64-7367/2019

Резолютивная часть решения объявлена «11» декабря  2019 г.

Полный текст решения изготовлен «16» декабря 2019 г.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Захарова

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Е.В. Китаевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Муниципального образования город Кирсанов - городской округ Тамбовской области в лице администрации города Кирсанова Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

к ООО «Вперёд», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

о  взыскании 337 462,31 руб.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1, доверенность № 02-09/1185 от 12.04.2019, 

от ответчика –  не явился, надлежаще извещен.

Отводов составу суда не заявлено.

установил:

Муниципальное образование город Кирсанов-городской округ Тамбовской области, в лице Администрации города Кирсанова Тамбовской области  обратилось в суд с исковым заявлением к ООО "Вперёд"  с требованием о взыскании по муниципальному контракту №0164200003018003077 от 28.12.2018 на выполнение работ  по строительству нового корпуса МБДОУ «Детский сад  «Ромашка» для детей  раннего возраста по ул. 50 лет Победы, д. 43 в г.Кирсанове Тамбовской области штраф в размере 337 462,31 руб.

Дело рассматривается в Арбитражном суде Тамбовской области в соответствии с п. 13.5 муниципального контракта №0164200003018003077 от 28.12.2018 (договорной подсудности), на основании ст.37 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 13.09.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 30.10.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Истец в заседании суда исковые требования поддержал.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве, в заседание суда не явился, извещен надлежаще.

С учетом ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося  ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте судебного разбирательства. 

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статей 65, 66 АПК РФ, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, суд выяснил, что между администрацией города Кирсанова (Заказчик) и ООО "Вперёд" (Подрядчик) по итогам аукциона  в электронной форме (протокол от 17.12.2018 №0164200003018003077) был заключен муниципальный контракт №0164200003018003077 от 28.12.2018 на выполнение работ  по строительству нового корпуса МБДОУ «Детский сад  «Ромашка» для детей раннего возраста по ул. 50 лет Победы, д. 43 в г.Кирсанове Тамбовской области  ИКЗ 183682400109968240100100190014120414 от 28.12.2018  (далее – Контракт).

Согласно п. 1.1  предмет Контракта: выполнение работ по строительству нового корпуса МБДОУ «Детский сад «Ромашка» для детей раннего возраста по ул. 50 лет Победы, д. 43 в г.Кирсанове Тамбовской области (далее - Работы).

Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику Работы на условиях, предусмотренных Контрактом, извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) Подрядчика (участника закупки), а Заказчик обязуется принять и оплатить их (п. 1.2 Контракта).

П. 1.4 Контракта установлены виды и объемы, подлежащих выполнению работ, содержатся в приложении №1 к контракту (проектно-сметная документация за исключением видов и объемов работ, предусмотренных локальной сметой № 02-01-03).

В соответствии с п. 2.1 цена Контракта составляет 49 499 220,20 руб. (включая НДС 7 550 728,51 руб. 

Цена контракта включает общую стоимость всех работ и строительных материалов, предусмотренных приложением №1 к контракту (проектно-сметная документация за исключением видов и объемов работ, предусмотренных локальной сметой № 02-01-03), оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению контракта, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату налоговых и других обязательных платежей, гарантийные обязательства по контракту, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением работ (п. 2.1 Контракта).

Согласно п. 3.2 Контракта оплата работ (отдельного этапа работ) производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

П. 3.3 Контракта установлено, что оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ, за вычетом ранее выплаченного аванса, в течение не более чем 30 дней после подписания обеими Сторонами документации, подтверждающей выполнение работ (акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

Авансовый платеж: предусмотрен. Сумма авансового платежа составляет 53,27% от цены контракта (п. 3.7 Контракта).

В соответствии с п. 3.8 Контракта авансовый платеж производится в течение 30 рабочих дней с момента заключения Контракта в размере, не превышающем сумму авансового платежа, указанную в пункте 3.7 Контракта в пределах, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств.

При этом в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения аванса, Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую выполнение работ (акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на сумму полученного авансового платежа (п. 3.8 Контракта).

П. 4.1 Контракта установлено место выполнения работ: ул. 50 лет Победы, д. 43 в г.Кирсанове Тамбовской области.

Согласно п. 4.2 Контракта сроки выполнения работ: в течение 10 месяцев с момента заключения контракта в соответствии с графиком производства работ Приложение № 2 к Контракту.

В соответствии  с п. 7.5 Контракта работы по Контракту считаются принятыми, а контрактные обязательства Подрядчика выполненными после подписания обеими Сторонами:

актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

П. 9.3 Контракта установлено, что размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в размере, установленном в Приложении № 2 к контракту.

Контракт вступает в силу с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе подписанного обеими Сторонами Контракта и действует до полного исполнения Сторонами контрактных обязательств (п. 12.1 Контракта).

28.12.2018 Заказчик перечисли Подрядчику авансовый платеж в размере  26 368 234,60 руб., что подтверждается платежным поручением №626656 от 28.12.2018.

С учетом пункта  3.8 Контракта Подрядчик обязан  представить документацию, подтверждающую выполнение работ, до 28.04.2019.

Подрядчик выполнил работы по Контракту стоимостью 6 822 140 руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 28.02.2019, №2 от 28.02.2019, №3 от 29.03.2019, актами о приемке выполненных работ №1 от 28.02.2019, №2  от 28.02.2019, №3 от 29.03.2019, подписанными представителями  сторон без возражений и скрепленными их печатями, согласно которым выполнены: рекультивация земли, общестроительные работы ниже нуля, общестроительные работы выше нуля.

Дополнительным соглашением №1 от 24.10.2019 к Контракту (далее – Соглашение №1) по предложению Заказчика стороны увеличили объем работ,  предусмотренный проектно-сметной документацией на выполнение работ по строительству нового корпуса МБДОУ «Детский сад  «Ромашка» для детей раннего возраста по ул. 50 лет Победы, д. 43 в г.Кирсанове Тамбовской области, в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются  неотъемлемым  приложением к дополнительному соглашению.

Согласно локальному сметному расчету от 24.10.2019 стоимость работ составляет 1 443 626  руб.

Соглашением №1 стороны установили, что стоимость дополнительного объема работ составляет 4 917 919 руб., общая цена контракта с учетом  дополнительных работ – 54 417 139,20 руб.

Дополнительные работы выполнены Подрядчиком, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №9 от 14.10.2019, актом о приемке выполненных работ №9 от 14.10.2019, подписанными представителями  сторон без возражений и скрепленными их печатями.

Дополнительные работы были оплачены Заказчиком, что подтверждается платежным поручением  №502298 от 12.11.2019 на сумму 1 443 626 руб.

Согласно Графику производства работ (приложение №2 к Контракту) в период с января 2019г. по апрель 2019г. Подрядчику в числе прочего необходимо было  выполнить работы:

- водопровод (02-01-04) -  февраль 2019г. март 2019г.;

-  водоотведение (02-01-05) -  февраль 2019г. март 2019г.;

- внешние сети электроснабжения  (04-01) – январь 2019г. - февраль 2019г.;

- кабельная канализация (04-02) – апрель 2019г.;

- наружные сеты водоснабжения (06-01) - январь 2019г. - февраль 2019г.

Однако указанные работы не вошли в  акты о приемке выполненных работ №1 от 28.02.2019, №2  от 28.02.2019, №3 от 29.03.2019.

В соответствии с  Графиком производства работ (приложение №2 к Контракту) сторонами установлены следующие штрафы за неисполнение или ненадлежащее  исполнение  подрядчиком обязательств:

- водопровод (02-01-04) –  147 139,70 руб.;

-  водоотведение (02-01-05) – 93 890,49 руб.;

- внешние сети электроснабжения  (04-01) – 42 859,92 руб.;

- кабельная канализация (04-02) – 5065,25  руб.;

- наружные сеты водоснабжения (06-01) – 48 506,95 руб.

Ссылаясь на то, что исполнение вышеуказанных работ не произведено в сроки,  установленные Контрактом, истец  в соответствии с приложением №2 к  Контракту  начислил штраф  в общем размере 337 462,31 руб.  

Претензия истца  №02-09/1699 от 23.05.2019 о необходимости  оплаты неустойки оставлена ответчиком без удовлетворения.

Поскольку штраф в сумме 337 462,31 руб. ответчиком в добровольном порядке  не был уплачен, истец обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Ответчик в отзыве на иск  от 04.10.2019 исковые требования не признал,  пояснил, что в процессе производства работ Ответчик столкнулся с рядом проблем, от него не зависящих:

- необходимость выполнения работ по расчистке территории строительства, не учтенных проектно-сметной документацией: валка деревьев с выкорчевкой пней, разборка сараев, извлечение кирпичных стен, погрузка и перевозка строительного мусора в количестве 3 687 т;

- реперы переданы Заказчиком 25.02.2019 г. (с опозданием на два месяца);

- не решен вопрос со стороны администрации г. Кирсанова по переносу действующей канализационной ямы от спортивной школы, расположенной на территории строительства детского сада;

- не решен вопрос со стороны администрации г. Кирсанова по демонтажу недействующей дымовой трубы, препятствующей проведению работ по замене теплотрассы;

- подпорная стенка в осях 3-4 запроектирована на расстоянии 10 см от существующего частного гаража.

Ответчик указал, что решение вышеперечисленных вопросов привело к смещению графика производства работ, в связи с чем, у Ответчика не было возможности выполнить свои обязательства по Контракту согласно графику производства работ. По мнению ответчика, поскольку у Ответчика не было возможности выполнять работы по Контракту согласно графику производства работ по причинам, не зависящим от него, то полагаем, что штраф в размере 337 462,31 руб. не подлежит взысканию с Ответчика.

Оценив представленные документы, суд находит иск подлежащим удовлетворению в полном объеме.

При этом суд исходил из следующего:

В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – также Гражданский кодекс РФ, ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности из договоров.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в период спорных правоотношений) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Обязательства сторон возникают из муниципального контракта №0164200003018003077 от 28.12.2018 на выполнение работ по строительству нового корпуса МБДОУ «Детский сад «Ромашка» для детей раннего возраста по ул. 50 лет Победы, д. 43 в г.Кирсанове Тамбовской области ИКЗ 183682400109968240100100190014120414 от 28.12.2018.

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из контракта, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса РФ о договорах подряда.

Муниципальный контракт №0164200003018003077 от 28.12.2018 заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

Согласно ст. 3 Федерального закона №44-ФЗ государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договорах.

Ч.1 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (ч.2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не  предусмотрена  предварительная  оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с п. 3.8 Контракта авансовый платеж производится в течение 30 рабочих дней с момента заключения Контракта в размере, не превышающем сумму авансового платежа, указанную в пункте 3.7 Контракта в пределах, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств.

При этом в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения аванса, Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую выполнение работ (акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на сумму полученного авансового платежа (п. 3.8 Контракта).

28.12.2018 Заказчик перечисли Подрядчику авансовый платеж в размере  26 368 234,60 руб., что подтверждается платежным поручением №626656 от 28.12.2018.

С учетом пункта  3.8 Контракта Подрядчик обязан  представить документацию, подтверждающую выполнение работ, до 28.04.2019.

Подрядчик выполнил работы по Контракту стоимостью 6 822 140 руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 28.02.2019, №2 от 28.02.2019, №3 от 29.03.2019, актами о приемке выполненных работ №1 от 28.02.2019, №2  от 28.02.2019, №3 от 29.03.2019, подписанными представителями  сторон без возражений и скрепленными их печатями, согласно которым выполнены: рекультивация земли, общестроительные работы ниже нуля, общестроительные работы выше нуля.

- водопровод (02-01-04) -  февраль 2019г. март 2019г.;

-  водоотведение (02-01-05) -  февраль 2019г. март 2019г.;

- внешние сети электроснабжения  (04-01) – январь 2019г. - февраль 2019г.;

- кабельная канализация (04-02) – апрель 2019г.;

- наружные сеты водоснабжения (06-01) - январь 2019г. - февраль 2019г.

Однако работы, а именно: водопровод (02-01-04), водоотведение (02-01-05), внешние сети электроснабжения  (04-01), кабельная канализация (04-02), наружные сеты водоснабжения (06-01), скор выполнения которых январь 2019г. – апрель 2019г., не вошли в  акты о приемке выполненных работ №1 от 28.02.2019, №2  от 28.02.2019, №3 от 29.03.2019.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

В соответствии со ст. 331 Гражданского кодекса РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

П. 9.3 Контракта установлено, что размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в размере, установленном в Приложении № 2 к контракту.

В соответствии с  Графиком производства работ (приложение №2 к Контракту) сторонами установлены следующие штрафы за неисполнение или ненадлежащее  исполнение  подрядчиком обязательств:

- водопровод (02-01-04) –  147 139,70 руб.;

-  водоотведение (02-01-05) – 93 890,49 руб.;

- внешние сети электроснабжения  (04-01) – 42 859,92 руб.;

- кабельная канализация (04-02) – 5065,25  руб.;

- наружные сеты водоснабжения (06-01) – 48 506,95 руб.

Материалами дела подтверждается, нарушение установленного Контрактом срока внесения денежных средств.

Ссылка ответчика на отсутствие возможности выполнять работы по Контракту согласно графику производства работ по причинам, не зависящим от него, и как следствие  необоснованное начисление штрафа в размере 337 462,31 руб., судом отклоняется.

Ст. 716 ГК РФ установлено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок (ч. 1).

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (ч.2 ст. 716 ГК РФ).

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (ч. 3).

П. 5.3.7 Контракта установлено, что Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный Контрактом срок.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 30.10.2019 ответчику было предложено представить доказательства невозможности выполнения работ по контракту по причинам, указным в отзыве; доказательства уведомления ответчика о возникновении препятствий при производстве работ; доказательства приостановления производства работ и уведомления истца о приостановке работ;  документы в обоснование своих доводов.

В материалы дела были представлены: Дополнительные соглашение №1 от 24.10.2019 к Контракту, локальный сметный расчет от 24.10.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат №9 от 14.10.2019, акт о приемке выполненных работ №9 от 14.10.2019, платежное поручение  №502298 от 12.11.2019.

Дополнительным соглашением №1 от 24.10.2019 к Контракту (далее – Соглашение №1) по предложению Заказчика стороны увеличили объем работ,  предусмотренный проектно-сметной документацией на выполнение работ по строительству нового корпуса МБДОУ «Детский сад  «Ромашка» для детей раннего возраста по ул. 50 лет Победы, д. 43 в г.Кирсанове Тамбовской области, в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются  неотъемлемым  приложением к дополнительному соглашению.

Согласно локальному сметному расчету от 24.10.2019 стоимость работ составляет 1 443 626  руб.

Соглашением №1 стороны установили, что стоимость дополнительного объема работ составляет 4 917 919 руб., общая цена контракта с учетом  дополнительных работ – 54 417 139,20 руб.

Дополнительные работы выполнены Подрядчиком, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №9 от 14.10.2019, актом о приемке выполненных работ №9 от 14.10.2019, подписанными представителями  сторон без возражений и скрепленными их печатями.

Дополнительные работы были оплачены Заказчиком, что подтверждается платежным поручением  №502298 от 12.11.2019 на сумму 1 443 626 руб.

Из содержания Соглашения №1  не следует, что стороны изменили срок выполнения работ по Контракту.

Доказательств, подтверждающих приостановление работ со стороны подрядчика ввиду невозможности их завершения в установленный Контрактом срок по причинам, не зависящим от ООО «Вперёд», в материалы дела так же не представлено.

Доказательств приостановления подрядчиком работ либо отказа от исполнения договора в порядке ч. 2, 3 ст. 716 ГК РФ, в материалы дела сторонами не представлено.

Таким образом, поскольку ответчиком нарушен срок окончания работ, истцом правомерно был начислен штраф в общей сумме 337 462,31 руб.

Исковые требования в части взыскания штрафа в сумме 337 462,31 руб. заявлены обоснованно, подлежат удовлетворению. 

В соответствии с ч.1 ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав обстоятельства дела, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате госпошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ следует отнести на ответчика. 

Истец действующим законодательством освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражным судом. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вперёд», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу Муниципального образования город Кирсанов - городской округ Тамбовской области в лице администрации города Кирсанова Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), штраф в размере 337462,31 руб.; в доход федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 9749 руб. 

2. Истцу и налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

3. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу 394006, 

<

...>  через Арбитражный суд Тамбовской области.

СудьяА.В. Захаров