АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-40819/2019

г. Уфа

18 августа 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 13.08.2020 года

Полный текст решения изготовлен 18.08.2020 года

         Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П., 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "ДомСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 1 027 128 руб. 50 коп.

с учетом принятых уточнений

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАДСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 944 940руб.01коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.04.2019 г. по 04.08.2020 г. в размере 82 188 руб. 51 коп. 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика представил отзыв, в котором указал, что исковые требования не признает, считает их необоснованными, незаконным и не подлежащими удовлетворению. 

Представитель третьего лица  представил отзыв, в котором указал, что исковые требования не признает, считает их необоснованными, незаконным и не подлежащими удовлетворению. (л.д. 117-118)

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 28.06.2017 между Обществом с ограниченной ответственностью "ДомСтрой" (застройщик) и Обществом с ограниченной ответственностью "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" (технический заказчик) заключен договор № 1-9/17 на выполнение функций технического заказчика. (л.д. 89-94)

Согласно п. 1.1  договора № 1-9/17 техзаказчик по поручению застройщика обязуется на возмездной основе выполнять функции технического заказчика на объекте « Многоквартирный 4-х этажный  дом строительный номер 9, расположенный по адресу : РБ, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, 

<

...> литер 12» в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе:

Заключать договоры с подрядчиками о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации о строительстве объектов капитального строительства, подготавливать задания на выполнение указанных застройщиком видов работ;

Утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства;

За счет и от имени застройщика подготовить и содержать строительную площадку на период строительства, заключать договоры с подрядчиками по строительству ОКСа, принять работы, выполненные подрядчиками, приобретать строительные материалы и оборудование для установки и монтажа подрядчиками;

Осуществлять иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ.

22.05.2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ  и Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) заключен договор подряда №5-НБ-9, согласно которого технический заказчик поручает подрядчику выполнение отделочных работ на объекте «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом строительный номер 9, расположенный по адресу: РБ, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, 

<

...> литер 12» (далее по тексту - ОКС). Применяемые материалы подрядчик обязан согласовать с техническим заказчиком. Застройщиком ОКСа является Общество с ограниченной ответственностью  «ДомСтрой».

Виды работ, их наименование, объем определяются проектом строительства ОКСа (п.1.1. договора). 

Календарный график работ, определяющий сроки выполнения работ и этапов работ может являться приложением к настоящему договору. Общие сроки выполнения работ указаны в п. 4.1. настоящего договора.

Согласно п.1.4. договора подрядчик осуществляет строительные работы с применением собственных  инструментов, оборудования, строительных материалов и комплектующих, соответствующих требованиям сертифицирования и ГоСТам. 

Работы производятся в соответствии с утвержденной проектной документацией, определяющей объем и содержание работ (п.1.5. договора).

Согласно пункта 3.1 договора, оплата выполненных объемов работ производится по окончании этапа работ на основании:

представленных Подрядчиком и подписанных Техническим заказчиком унифицированных форм КС-2 (акт выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости работ);

 - отчета об использовании материалов и комплектующих, переданных подрядчику (если материалы передавались на давальческой основе),

- переданной техническому заказчику исполнительной документации в полном объеме.

Оплата производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ, с зачетом выданных авансов на долю выполненных работ стоимости переданных материалов и комплектующих в размере 95% от стоимости выполненных подрядчиком работ, при этом резервируемые средства (гарантийный резерв) в размере 5% выплачиваются после в течение 30 календарных дней с даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, указанного в п.1.1. Договора.

В соответствии с пунктом 3.2 договора, по согласованию с Техническим заказчиком может быть принята часть этапа Работ на основании унифицированных актов выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3, передачи техническому заказчику отчета об использовании материалов и комплектующих, переданных подрядчику (если материалы передавались на давальческой основе), исполнительной документации в полном объеме по выполненному этапу Работ. Размер оплаты по принятым работам, составляющим часть этапа Работ, производится в размере 95% от стоимости выполненных Подрядчиком работ в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ, при этом резервируемые средства (гарантийный резерв) в размере 5% выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, указанного в п.1.1. договора.

В случае согласования сторонами дополнительных объемов работ (не предусмотренных проектной документацией или настоящим договором) технический заказчик оплачивает подрядчику стоимость этих работ на условиях настоящего договора и соответствующего дополнительного соглашения. (пункт 3.3 договора)

Предоставление аванса (авансов) подрядчику может быть согласовано сторонами в дополнительных соглашениях. (пункт 3.4 договора)

Согласно п. 4.1. договора общие сроки выполнения работ по выполнению работ определены сторонами следующим образом:

Дата начала работ - 28 мая 2018 г.

Дата окончания работ - 31 августа-2018 г.

Сроки выполнения промежуточных этапов работ могут быть уточнены согласованным сторонами календарным графиком выполнения работ, который может быть оформлен в качестве приложения к настоящему договору.

Во исполнение условий договора ответчиком для истца по договору № 5-НБ-9 от 22.05.2018 выполнены работы на общую сумму 3 786 600 руб. Сторонами на указанную сумму подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1-2 от 23.08.2018г., а также справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 1 от 23.08.2018г. на сумму 3 036 600 рублей и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2-1 от 25.03.2019г., а также справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 2 от 25.03.2019г. на сумму 750 000 рублей (т. 1 л.д. 60-63).

Во исполнение условий договора № 5-НБ-9 от 22.05.2018 Общества с ограниченной ответственностью "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" внесло на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью  «ПРОГРЕСС» денежные средства в сумме 2 550 000 руб. в качестве предварительной оплаты стоимости, в подтверждение чего в материалы дела представлено платежные поручения № 356 от 25.05.2018 на сумму 50 000 рублей, № 421 от 27.06.2018 на сумму 50 000 рублей, № 454 от 03.07.2018 на сумму 200 000 рублей, № 490 от 23.07.2018 на сумму 200 000 рублей, № 527 от 01.08.2018 на сумму 200 000 рублей, № 612 от 17.09.2018 на сумму 950 000 рублей, № 636 от 09.10.2018 на сумму 200 000 рублей, № 678 от 19.10.2018 на сумму 200 000 рублей, № 693 от 23.10.2018 на сумму 50 000 рублей, № 701 от 24.10.2018 на сумму 100 000 рублей, № 719 от 25.10.2018 на сумму 100 000 рублей, № 742 от 31.10.2018 на сумму 100 000 рублей, № 759 от 09.11.2018 на сумму 100 000 рублей, с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика (л.д. 65-77), а также акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2019. (л.д. 25)

Согласно акту сверки взаимных расчетов, по данным истца в кредите отражены денежные средства в сумме 294 540 руб. 01 коп. (поставка, УПД № 9 от 21.08.2018г), которая была зачтены сторонами в качестве оплаты выполненных работ по договору подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018.

Кроме того, согласно акту сверки, подписанному сторонами, оплата Обществом с ограниченной ответственностью  "Автоградстрой-Инвест" в сумме 1 887 000 руб. принята ООО «ПРОГРЕСС» и отражена в графе "Кредит/приход".

Акт сверки подписан обеими сторонами, скреплен печатями.

Итого, по мнению истца, оплачено за выполненные работы 4 731 540 руб. 01 коп. (2 550 000+294 540 руб. 01 коп+1 887 000)

Поскольку договор подряда №5-НБ-9 от 22 мая 2018 года фактически прекращен с 04.04.2019года, так как между обществом "Автоградстрой-Инвест" (техзаказчик) и обществом «ДомСтрой» (застройщик) заключено соглашение от 04.04.2019 о расторжении договора от 28.06.2017 № 1-9/17 на выполнение функции технического заказчика, а между обществом «ДомСтрой» (застройщик) и обществом «ПРОГРЕСС» (подрядчик) заключен аналогичный договор подряда №5-НБ-9, согласно которого застройщик поручает подрядчику выполнение отделочных работ на объекте «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом строительный номер 9, расположенный по адресу: РБ, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, 

<

...> литер 12», истец полагает, что на стороне отвечика возникло неосновательное обогащение в размере 944 940,01 руб., исходя из того, что стоимость выполненных и принятых работ составляет 3 786 600 руб., тогда как техзаказчиком за выполненные работы оплачено 4 731 540 руб. 01 руб.

В адрес ответчика была направлена претензия (л.д. 12) с  просьбой вернуть сумму неосновательного обогащения в размере 944 940 руб. 01 коп., которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Сумма денежных средств ответчиком возвращена истцу не была, что явилось основанием для обращения истца о взыскании неосновательного обогащения в арбитражный суд.

Возражая по существу исковых требований (отзыв - л.д. 38-39), ответчик указал на выполнение работ по договору подряда №5-НБ-9 от 22 мая 2018 года, в подтверждение чего в материалы дела представлен, акт выполненных работ № 6-1 от 31.05.2019, а также справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 3 от 25.03.2019г. на сумму 904 000 рублей (л.д. 42).

Акт № 6-1 от 31.05.2019 на сумму 904 000 руб. подписан только со стороны ООО «ПРОГРЕСС».  Ответчик, не имея другой возможности сдать результаты выполненных работ, после многочисленных попыток выйти на связь с техзаказчиком направил посредством почты акт о приемке работ за май 2019 года (л.д.43-46). До настоящего времени ответ на акты в адрес Ответчика не поступал. Доказательств, что истец в одностороннем порядке отказался от договора подряда №5-НБ-9 от 22 мая 2018 не представлено. Таким образом, неосновательное обогащение на заявленную сумму отсутствует.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск необоснованным, неправомерным и не подлежащим удовлетворению на основании следующего. 

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой основании приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В силу пункта 1 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Таким образом, законом установлено основание для признания полученных средств неосновательным обогащением - их получение или сбережение без законных оснований за счет другого лица.

С учетом выбора истцом способа защиты своих прав исходя из норм о неосновательном обогащении, он должен доказать отсутствие оснований для получения либо сбережения ответчиком денежных средств за счет истца, сам факт такого сбережения или получения, и то, что такое получение или сбережение денежных средств произошло за счет истца.

При этом сбережение имущества одним лицом за счет другого означает сохранение в прежнем виде количества и объема имущества, которое при обычных обстоятельствах должно было уменьшиться, то есть в данном случае лицо должно было израсходовать свои собственные средства, но не израсходовало их в результате невыплаты положенного (использование чужой вещи без должных правовых оснований и без выплаты вознаграждения).

Приобретение имущества одним лицом за счет другого означает количественное увеличение размера имущества должника с одновременным уменьшением его у кредитора, то есть приобретение предполагает количественное приращение имущества, повышение его стоимости без произведения соответствующих затрат. При этом необходимым условием является отсутствие правовых оснований, то есть приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке.

В силу изложенного, иск о взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны факт получения или сбережения ответчиком имущества, отсутствие для этого правового основания, а также то, что неосновательное обогащение ответчика произошло за счет истца.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В качестве основания искового заявления Общества с ограниченной ответственностью "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" указано на получение ответчиком суммы 944 940,01 руб. на выполнение работ в отсутствие подтверждения факта фактического выполнения работ подрядчиком (ответчиком) работ на полученную сумму.

Как следует из материалов дела и установлено судом, по состоянию на 23.08.2018 года по договору подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018 выполнено работ на сумму   3 036 600 рублей. (акт выполненных работ № 1-2)

По состоянию на 19.12.2018 года выполненные работы на сумму   3 036 600 рублей оплачены частично в размере 2 844 540,01 руб., а именно оплата по вышеуказанным платежным поручения на сумму 2 550 000 рублей и 294 540 руб. 01 коп денежные средства (поставка, УПД № 9 от 21.08.2018г), которая была зачтены сторонами в качестве оплаты выполненных работ по договору подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018, что также подтверждается соглашением № 12 о взаимозачете от 19.12.2018 года. (л.д. 78)

Задолженность по акту выполненных работ № 1-2 от 23.08.2018 года составляла 192 059 руб. 99 коп.

Дополнительным соглашение № 2 от 19 декабря 2018 года к договору № 5-НБ-9 от 22.05.2018 стороны (истец и ответчик) пришли к соглашению о предоставлении подрядчику аванса в размере 1 886 940,01 руб. для приобретения строительных материалов для дальнейшей работы. Аванс должен быть предоставлен в течении 3 дней с даты подписания настоящего соглашения. Аванс может быть предоставлен взаимозачетом или векселями.

19.12.2018 между ООО "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" (сторона -1), ООО "ДомСтрой" (сторона-2) и ООО "Прогресс" (сторона-3) было заключено трехстороннее соглашение о зачете взаимных требований, по условиям которого:

 ООО "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" имеет непогашенную задолженность перед ООО "Прогресс" по оплате стоимости выполненных работ по договору подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018 в сумме 192 059 руб. 99 коп, а также неисполненную обязанность по оплате аванса в сумме 1 886 940 руб. 01 коп. обществу «Прогресс» для приобретения строительных материалов для дальнейшей работы. 

ООО "Домстрой" имеет задолженность перед ООО "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" по договору № 1-9/17 от 28.06.2017 на выполнение функций технического заказчика в общей сумме до 65 136 480 руб. Сумма текущих обязательств превышает 2 079 000 рублей., 

ООО "Прогресс" имеет задолженность перед ООО "ДомСтрой" по договору № 25-30/9 от 30.11.2018г. об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по оплате цены договора в сумме 2 079 000 рублей. 

В соответствии с положениями пункта 4 названного соглашения о зачете стороны прекратили обязательства друг перед другом в пределах суммы задолженности в размере 2 079 000 рублей. 

Следовательно, данное соглашение является основанием для прекращения обязательств по оплате обществом "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" суммы задолженности перед ООО "Прогресс" по договору подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018 в сумме 192 059 руб. 99 коп, а также для прекращения обязательств по дополнительному соглашению № 2 от 19 декабря 2018 года по оплате аванса в сумме 1 886 940 руб. 01 коп. обществу «Прогресс» для приобретения строительных материалов для дальнейшей работы  в порядке ст. 410 ГК РФ.

На основании вышеизложенного суд отклоняет, довод истца, о то, что сумма в размере 1 886 940 руб. 01 коп. является авансом за предусмотренные договором подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018 работы, исходя из буквального толкования условий дополнительного соглашения № 2 от 19 декабря 2018 года к договору № 5-НБ-9 от 22.05.2018.

Таким образом,  выполненные работы по договору подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018 по акту выполненных работ № 1-2 от 23.08.2018 года оплачены полностью, а также обязательство по дополнительному соглашению № 2 от 19 декабря 2018 года о предоставлении подрядчику аванса в размере 1 886 940,01 руб. для приобретения строительных материалов для дальнейшей работы исполнено в порядке ст. 410 ГК РФ.

Как указано выше, предметом договора подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018 является выполнение отделочных работ на объекте «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом строительный номер 9, расположенный по адресу: РБ, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, 

<

...> литер 12».

Между тем выполненные обществом "Прогресс" перед обществом "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" на основании представленного акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 от 25.03.2019г. на сумму 750 000 рублей, образовалась из договора подряда  № 4-НБ-9 от 10.05.2018. Из указанного акта о приемке выполненных работ от 25.03.2019г следует, что обществом "Прогресс" фактически выполнены электромонтажные работы по тому же объекту, что не является предметом договора подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018.

Таким образом, факт исполнения договора подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018 на сумму 750 000 рублей не может быть подтвержден актами выполненных работ по формам КС-2, КС-3 от 25.03.2019г.

В силу указанного доводы ответчика о выполнении работ по данному договору в мае 2019 года, не имеют правового значения для рассмотрения настоящего спора.

Изложенные обстоятельства и сделанные по результатам их исследования выводы приводят суд к заключению об отсутствии на стороне ответчика неосновательного обогащения неотработанного аванса за выполненные работы по договору подряда № 5-НБ-9 от 22.05.2018.

На сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств (статья 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку арбитражный суд пришел к выводу, что неосновательного обогащения между истцом и ответчиком как в денежной, так и в неденежной форме не возникло, требование истца о взыскании с ответчиков процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит отклонению.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания для удовлетворения иска. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АВТОГРАДСТРОЙ-ИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 22 850 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П. Кузнецов