АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д.74, 

<

...>,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-26325/2022

г. Тюмень

17 июля 2025 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации Тюменского муниципального района, Муниципального автономного учреждения Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга «Юность» к обществу с ограниченной ответственностью строительно – производственная компания «Вектор» об обязании исполнить гарантийные обязательства,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью строительно – производственная компания «Вектор» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, за счет собственных средств безвозмездно устранить следующие недостатки:  

- демонтировать кровельный пирог на поврежденном фрагменте кровли, до плит перекрытия и произвести восстановительные работы по устройству кровельного покрытия на поврежденном фрагменте кровли;  

- восстановить разрушенные участки кирпичной кладки парапета, устранить образовавшуюся плесень;  

- обеспечить примыкание водоизоляционного слоя к кирпичной кладке парапета, в местах где, такое примыкание не герметично;  

- обеспечить выступ крышки парапета за боковую грань парапета на расстояние не менее 60 мм, в местах крыши парапета где имеется недостаточный выступ, обеспечив полное закрывание отливом элементов механического крепления, которыми водоизоляционный слой закреплен на парапете;  

- устранить складки и не проклейки сварных швов; 

- осуществить наклеивание водоизоляционного слоя по всей поверхности к отливу карнизного свеса, обеспечить герметичность соединения водоизоляционного слоя с отливом;  

- обеспечить герметичность мембраны в месте установки металлического колпака, закрывающего парапет и обеспечить его гидроизоляцию;  

- установить водосточный желоб вдоль парапета кровли, предусмотренный проектной документацией;  

 - передать работы по безвозмездному устранению недостатков по акту выполненных работ.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно – производственная компания «Вектор» в пользу Администрации Тюменского муниципального района 210 000 руб. расходов по оплате стоимости экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно – производственная компания «Вектор» в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительные листы. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области.  

 Судья Шанаурина Ю.В.  

Код для входа в режим ограниченного доступа: