АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-129129/23-110-1053

г. Москва

01 ноября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2023 года  Решение в полном объеме изготовлено 01 ноября 2023 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФМОНТАЖ" (125445,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОВРИНО,  СМОЛЬНАЯ УЛ., Д. 24А, ПОМЕЩ. 1/11, ОГРН: 

<

***>) к акционерному  обществу "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО" (119021,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ,  ЗУБОВСКИЙ Б-Р, Д. 11А, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 3 235 530,17 руб.,  

при участии: от истца – ФИО2 по додв. от 13.09.2022, от ответчика- не явился, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  ПРОФМОНТАЖ" обратилось с иском к акционерному обществу  "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО" о взыскании 3 219 433 руб.  задолженности по договору № 01/ССК/22-2 от 01.07.2022, 16 097,17 руб. неустойки,  неустойки на сумму 3 219 433 руб., исходя из расчета 0,1% за каждый день просрочки с  24.05.2023 по дату фактического исполнения обязательства, но не более 10% от суммы  договора.  

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен  надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом  своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на  официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в их  отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 17.02.2011г. № 12 «О некоторых вопросах применения АПК  РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в  АПК РФ».  

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные  доказательства, суд пришел к следующим выводам:  

Как усматривается из материалов дела, между АО "ТЭК МОСЭНЕРГО" (далее -  Заказчик, Ответчик) и ООО «СК ПРОФМОНТАЖ» (далее – Исполнитель, Истец) 01  июля 2022г. был заключен договор № 01/ССК/22-2 на выполнение комплекса работ по  демонтажу, перевозке и монтажу (сборке и установке) бывшего в употреблении  модульного здания (далее - Договор). Заказчик в свою очередь обязался принять и  оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.  

В соответствии с п. 2.1. Дополнительного соглашения № 1 от 31.03.2023г. к  Договору стоимость работ по договору составляет 52 396 886,26 руб., в т.ч. НДС.  

01.11.2022г. в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ и  затрат ф. КС-3 № 1 и акта ф. КС-2 № 1, Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы на  сумму 49 177 453,26 руб., в т.ч. НДС 20%. Указанные работы были оплачены  Заказчиком своевременно.  

03.04.2023г. Заказчиком и Исполнителем были подписаны акты ф. КС-2, КС-3   № 2 на сумму 1 654 254,96 руб., в т.ч. НДС 20 % и акты ф. КС-2, КС-3 № 3 на сумму 1  565 178,04 руб., в т.ч. НДС 20 %. До настоящего времени оплата за выполненные  работы по указанным актам Заказчиком не осуществлена.  

Как указано в п. 2.1.4. Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 1  от 31.03.2023г.), Заказчик осуществляют оплату выполненных и принятых объемов  работ в течение 30 рабочих дней с даты предоставления Исполнителем оригиналов  следующих документов: актов о приемке выполненных работ, счета на оплату и счета  фактуры.  

Согласно сопроводительному письму Исполнителя от 03.04.2023г., исх. № 30,  Исполнитель предоставил Заказчику подписанный акт ф. КС-2 № 2 от 03.04.2023г. и  справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 03.04.2023г. на сумму  1 654 254,96 руб., в т.ч. НДС 20 % - 275 709,16 руб. и акт ф. КС-2 № 3 от 03.04.2023г. и  справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 03.04.2023г. на сумму 1 565  178,04 руб., в т.ч. НДС 20 % - 260 863,01 руб. Также согласно указанного  сопроводительного письма были предоставлены документы, указанные в п. 2.1.4.  Договора и необходимые Заказчику для оплаты.  

Срок оплаты выполненных работ – 30 рабочих дней и истек 18 мая 2023г. До  настоящего времени работы не оплачены.  

Согласно ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются.  

В соответствии с ч.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В соответствии с п. 6.3. Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков  оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы  просроченного платежа.  

Период просрочки 

Задолженность с по дней Формула Неустойка 

3 219 433,00 

19.05.2023  

23.05.2023  

5 

3 219 433,00 × 5 × 0.1% 

16 097,17 р. 

Итого: 

16 097,17 руб. 

Сумма основного долга: 3 219 433,00 руб. 

Сумма неустойки по всем задолженностям: 16 097,17 руб. 

Кроме того, с ответчика подлежит взысканию неустойка на сумму 3 219 433  

руб., исходя из 0,1% за каждый день, с 24.05.2023 по день фактической оплаты, но не  более 5 239 688,63 руб.  

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  МОСЭНЕРГО" (ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФМОНТАЖ" (ОГРН:  

<

***>) 3 219 433 руб. задолженности, 16 097 руб. 17 коп. неустойки,  неустойку на сумму 3 219 433 руб., исходя из 0,1% за каждый день, с 24.05.2023 по  день фактической оплаты, но не более 5 239 688,63 руб., 39 178 руб. в возмещение  расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: А.В. Мищенко