РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А60-40356/2023

04 октября 2024 года

г. Екатеринбург

 

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкспресс»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 30 июня 2025 года исполнить  гарантийные обязательства в рамках муниципального контракта № 20-04/22 от 04  апреля 2022 года в соответствии с ГОСТ и СНиП, а именно безвозмездно  устранить следующие недостатки и дефекты:  

1) фрезеровка покрытия до щебня основания с последующим  восстановлением до проектных отметок 490*8,3=4067 м2 на участке  автомобильной дороги по ул.Набережная в городе Качканар (участок от начала  здания № 2А 8 микрорайона до съезда с перекрестка со стороны стадиона  «Горняк» 9 микрорайона);  

2) поверхностная обработка дорожными пропиточными материалами  (ДПМ) согласно ГОСТ Р 58422.1-2021 «Защитные слои и слои износа дорожных  одежд» на площади 12434-4064=8370 м2 для укрепления верхнего слоя по  водонасыщению по всей длине участка автомобильной дороги по ул.Набережная  в городе Качканар (участок от перекрестка с автодорогой «спуск с улицы  Свердлова на улицу Набережная» между 7 и 8 микрорайонами до перекрестка у  дома № 15 9 микрорайона), за исключением участка автомобильной дороги по  ул.Набережная в городе Качканар (участок от начала здания № 2А 8 микрорайона  до съезда с перекрестка со стороны стадиона «Горняк» 9 микрорайона);  

3) восстановление трещин согласно ГОСТ Р 59201-2021. п.11.3.35, продувка  сжатым воздухом, прогрев трещины, заливка битумной эмульсией или мастикой с  высокой проникающей способностью - 42 м.п.: на участке от 50 до 100 м. от  спуска с ул.Свердлова на ул.Набережная между 7 и 8 микрорайонами, с общим  количеством трещин 4 шт. длиной 7м.п. и общей длиной 28м.п.; возле дома №  18 9 микрорайона восстановление 2 шт. поперечных трещин общей длиной 14м.  

4) демонтаж, повторная установка, восстановление примыкания  асфальтового покрытия 8 штук крышек колодцев № 1, № 3, № 4, № 5, № 8, № 9,   № 10, № 13 подземных коммуникаций дороги по направлению участка  автомобильной дороги по ул.Набережная в городе Качканар от начала дома №  

24 8 микрорайона до участка автомобильной дороги по ул.Набережная в городе  Качканар в сторону дома № 18 9 микрорайона;  

5) устройство разметки термопластиком в соответствии с ГОСТ на участке  автомобильной дороги по ул.Набережная в городе Качканар (участок от начала  здания № 2А 8 микрорайона до съезда с перекрестка со стороны стадиона  «Горняк» 9 микрорайона).  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройэкспресс»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального учреждения  «Управление городского хозяйства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000  (шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по оплате государственной  пошлины.  

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья А.Г. Манакова