6/2018-30801(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-18347/2017

г. Тюмень

06 апреля 2018 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев  единолично в открытом судебном заседании исковое заявление Управления строительства  и архитектуры Администрации муниципального образования Шурышкарский район  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 629640, Ямало-Ненецкий  автономный округ, 

<

...>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Правильное и Экономическое Строительство  Тюмени» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 625048, 

<

...>) о взыскании 6 688 779,81 рублей  и обязании устранить недостатки работ, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Правильное и экономичное  

строительство Тюмени» в пользу Управления строительства и архитектуры  

Администрации муниципального образования Шурышкарский район пени в размере  

2 249 170,99 рублей, штраф в размере 3 875 802,75 рублей. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Правильное и экономичное  

строительство Тюмени» безвозмездно устранить недостатки работ, обнаруженных в  

пределах гарантийного срока, выполненных по следующим муниципальным контрактам:  

 № 20-15 от 20.12.2016, № 86-15 от 30.06.2015, № 101-15 от 15.07.2015, № 50-15 от  

15.06.2016, № 53-15 от 16.06.2015, № 21-15 от 05.06.2015, № 65-15 от 22.06.2015, № 73-15 от  

22.06.2015 в многоквартирном жилом доме № 14, корпус № 2 по ул. Совхозная, с. Мужи  

Шурышкарского района, Ямало-Ненецкого автономного округа по следующим квартирам:  Квартира № 26:  

 - заменить стекло в окне по всей высоте; 

- устранить трещину в ограждающей конструкции в штукатурке над окном, в связи с  

поступлением наружного воздуха; - устранить трещины штукатурки по местам сопряжения стен и потолка в комнатах; - устранить отслоение штукатурки от ригеля в комнате; - устранить трещину над дверным проемом кладовой; - устранить мокрые, грязные пятна на потолке в кладовой; - устранить отслоение штукатурки от ригеля внутри кладовой; - устранить трещины по всему потолку квартиры в местах штукатурных швов; - заменить межкомнатную дверь комнаты; - устранить дефекты обоев в углу комнаты, обои (наклеить/заклеить). 

Квартира № 25  

в комнате (спальня): - устранить трещину по наружной стене от пола до потолка (слева от окна); 

- устранить трещины справа от окна от перемычки до ригеля по сухой штукатурке;  в комнате (детская):  

- устранить трещины в детской комнате от потолка к полу; 

- устранить отклонение пола возле наружной стены (поднят вверх);  в комнате (гостиная):  

- устранить трещины слева от окна от перемычки до ригеля по сухой штукатурке;  - устранить трещины между окнами на уровне 1 метра от пола;  

- устранить трещины по всей квартире и по местам сопряжения стен и потолка; - устранить трещины в комнатах; 

- утеплить полы квартире, в связи с деформационными процессами;  Квартира № 24:  

- устранить трещину по наружной стене от пола вверх на 1,3 метра, а также от пола к  

нижнему углу окна, далее, по диагонали окна от верхнего угла; - устранить отслоение штукатурки от ригеля в комнате; Квартира № 23: 

- устранить трещины штукатурки по местам сопряжения стен и потолка в коридоре и  

на кухне; 

- устранить промерзание стены между с/у и помещением общего пользования  

(коридор), при температуре наружного воздуха -40 градусов. Квартира № 30: - устранить в комнате трещину от пола до подоконника. Квартира № 31: - устранить в комнате трещину от пола до подоконника. - устранить на кухне трещину от пола до подоконника. Квартира № 32: 

- устранить трещину в комнате слева от окна перемычки до ригеля;  - устранить трещину на кухне справа от угла окна до ригеля.  

Квартира № 35: - устранить трещину в комнате на потолке; 

- устранить конденсат, который попадает в виде воды через чердачное помещение на  

потолки комнат и коридора. 

Устранить трещины по фасаду корпуса № 2 многоквартирного жилого дома № 14 по  

ул. Совхозная, с. Мужи, Шурышкарского района, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Правильное и экономичное  

строительство Тюмени» в доход федерального бюджета 57 686 рублей государственной  

пошлины. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  

апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  

суд Тюменской области. 

 Судья Михалева Е.В.