ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-140313/20-12-937

05 ноября 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения суда изготовлена 12 октября 2020 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 05 ноября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Чадова А. С. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

истца: Госкорпорация «Роскосмос» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: АО «НИИФИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки по государственному контракту № 783-8412А/17/230 от 27.12.2017 г. в размере153.266,67 рублей,

руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 333 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Госкорпорация «Роскосмос» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с АО «НИИФИ» (далее – ответчик) в пользу общества неустойки по государственному контракту № 783-8412А/17/230 от 27.12.2017 г. в размере153.266,67 рублей.

Определением от 17.08.2020 г. исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчиком в установленный определением от 17.08.2020 г. срок представлен отзыв на иск.

12.10.2020 г. Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования по иску обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании следующих обстоятельств.

Согласно материалам дела, между Госкорпорацией «Роскосмос» (далее - Заказчик, Истец) и АО «НИИФИ» (далее - Головной исполнитель, Ответчик) был заключен государственный контракт от 27.12.2017 № 783-8412А/17/230 (шифр: СЧ ОКР «Преображение» (КА)) (далее - государственный контракт), согласно которому Головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта составную часть опытно-конструкторской работы на тему «Создание датчикопреобразующей аппаратуры нового поколения для отработки, испытаний и эксплуатации перспективных космических аппаратов» (далее - СЧ ОКР) и своевременно передать Заказчику полученные при выполнении СЧ ОКР результаты (в том числе опытные образцы новых изделий и документацию на них) в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить СЧ ОКР в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом (пункты 1.1 и 1.2 государственного контракта).

Согласно пункту 3.4 государственного контракта оплата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на лицевой счет Головного исполнителя с учетом ранее выплаченного аванса.

Истцом обязательства по оплате этапа № 2 государственного контракта выполнены своевременно и в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2.1 государственного контракта СЧ ОКР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания на СЧ ОКР (приложение № 1 к государственному контракту).

Согласно пункту 2.2 государственного контракта содержание этапов СЧ ОКР и сроки выполнения установлены в ведомости исполнения (приложение № 2 к государственному контракту).

В соответствии с ведомостью исполнения к государственному контракту срок окончания выполнения работ по этапу № 2 - 31.03.2020, цена этапа № 2 - 15 200 000,00 рублей.

Согласно пункту 5.2 государственного контракта Головной исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акт приемки этапа СЧ ОКР, согласованный с ВП, и отчетные документы.

В установленный государственным контрактом срок обязательство по государственному контракту Головным исполнителем не выполнено, акт приемки этапа СЧ ОКР и отчетные документы по этапу № 2 поступили Заказчику 30.03.2020 № 80-18365. Заказчик направил 10.04.2020 № МХ-3686 и 27.04.2020 № МХ-4256 замечания по результатам выполнения этапа СЧ ОКР. Акт приемки этапа СЧ ОКР и отчетные документы по этапу № 2 повторно поступили Заказчику 08.05.2020 № 80-24746 (акт приемки этапа СЧ ОКР по этапу № 2 утвержден Заказчиком 25.05.2020).

Таким образом, срок просрочки исполнения обязательства по этапу № 2 составляет 55 дней (с 01.04.2020 по 25.05.2020).

В связи с тем, что Ответчиком нарушен срок исполнения обязательства, Истец в адрес Ответчика направил требование исх. от 18.06.2020 № МХ-6071 об уплате пени за просрочку исполнения обязательства по государственному контракту.

В соответствии с пунктом 8.3.2 государственного контракта в случае просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Заказчик направляет Головному исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 8.3.3 государственного контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем.

В соответствии с указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» с 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования Банка России приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.

Согласно информации Банка России, с 27 апреля 2020 г. значение ставки рефинансирования Банка России установлено в размере 5,5 % годовых. Расчет пени по этапу № 2: цена этапа № 2 - 15 200 000,00 рублей; размер неустойки 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты пени от цены этапа за каждый день просрочки исполнения обязательства; срок просрочки по этапу № 2 - 55 дней (с 01.04.2020 по 25.05.2020); сумма пени складывается из следующих показателей: (цена этапа) х (1/300) х (5,5 %) х (количество просроченных дней), что составляет: 15 200 000,00 х (1/300) х (5,5 %) х 55 = 153 266,67 рубля (Сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Согласно ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с ч. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Факт нарушения ответчиком обязательств по контракту подтверждается материалами дела.

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Доказательств надлежащего выполнения обязательств по договору ответчиком не представлено.

Таким образом, факт нарушения ответчиком обязательств по контракту доказан представленными в материалы дела документами. Оснований полагать, что нарушение сроков было допущено вследствие ненадлежащего исполнения заказчиком встречных обязательств, судом не усматривается.

В соответствии с пунктом 2.1 госконтракта СЧ ОКР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (ТЗ) на СЧ ОКР (приложение № 1 к государственному контракту).

Согласно пункту 2.2 государственного контракта содержание этапов СЧ ОКР и сроки выполнения установлены в ведомости исполнения (приложение № 2 к государственному контракту).

Ведомостью исполнения к госконтракту для каждого этапа установлены срок сдачи отчетных документов и срок окончания выполнения работ (приемки).

В связи с тем, что Головным исполнителем был нарушен срок сдачи отчетных документов (02.03.2020), Заказчик письмом от 27.03.2020 № 57-7797 уведомил АО «НИИФИ», что по состоянию на 27.03.2020 отчетные документы в адрес Госкорпорации «Роскосмос» не поступали, в связи с чем просил Головного исполнителя обеспечить преставление Заказчику детального план-графика завершение выполнения работ по этапу № 2 госконтракта с отражением всех необходимых организационных мероприятий по согласованию отчетных документов.

В соответствии с пунктом 5.2 госконтракта Головной исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акт приемки этапа СЧ ОКР и отчетные документы, подтверждающие выполнение работ исполнителями.

После указанного обращения в адрес АО «НИИФИ», Головной исполнитель сопроводительным письмом вх. от 30.03.2020 № 80-18365 (исх. № 400/158) представил Заказчику акт приемки этапа СЧ ОКР и отчетные документы по этапу № 2 госконтракта.

Пунктом 5.4 госконтракта установлено, что Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения акта приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и отчетных документов принимает выполненные работы или в случае обнаружения факта отступления Головным исполнителем от условий государственного контракта и требований ТЗ предъявляет Головному исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

Заказчик в порядке, установленном пунктом 5.4 госконтракта, осуществляя проверку представленных документов, установил отсутствие оригинала акта сдачи-приемки, ряда отчетных документов, поименованных в сопроводительном письме, а также отсутствие CD-диска № 101/6-20, указанного Головным исполнителем в качестве приложения к сопроводительному письму.

В этой связи Заказчик пришел к выводу о том, что проведение приемки работ не представляется возможным и сообщил об этом Головному исполнителю письмом от 10.04.2020 № МХ-3686, в котором указал о необходимости обеспечить представление в Госкорпорацию «Роскосмос» полного комплекта отчетных документов по этапу № 2 в соответствии с условиями государственного контракта.

Дополнительно Заказчик 27.04.2020 (в пределах срока, установленного на приемку работ) письмом № МХ-4256 сообщил Головному исполнителю, что в результате рассмотрения представленных письмом вх. от 30.03.2020 № 80-18365 (исх. № 400/158) отчетных материалов выявлены следующие несоответствия техническому заданию на СЧ ОКР:

В «технических условиях СДАН. 405219.025РЭ, руководстве по эксплуатации СДАЙ. 405219.025РЭ, заключении № 15/9 по результатам метрологической экспертизы предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в условиях эксплуатации датчиков ТК 1-06..ТК 1-08 изложен в размере ± 4 °С, однако в условиях ТЗ на СЧОКР «Преображение (КА) для унифицированного ряда датчиков температуры с нагревательным элементом для обеспечения теплового режима конструкции КА (космического аппарата) с длительными сроками активного существования погрешности в условиях эксплуатаиии должна составлять не более ± 2°С»

Кроме того, «в составе представленных электронных версий документов отсутствуют заключение по результатам экспертизы РКЦ на ТК 1 на технологичность, отчет о выполнении ПОИ датчиков давления ДАВ 110, отчет по выполнению ПОСТ датчиков давления ДАЭ 115, конструкторская документация на деталь СДАЙ. 754141.215-Прокладка».

Согласно пункту 5.5 госконтракта замечания и претензии устраняются Головным исполнителем за счет собственных средств в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт приемки этапа СЧ ОКР утверждается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. Доработанные Головным исполнителем результаты СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) с описью произведенных изменений в установленный срок представляются Заказчику и рассматривается им в соответствии с пунктами 5.2 - 5.4 государственного контракта, при этом устранение недостатков Головным исполнителем не является основанием для увеличения сроков выполнения СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР) и/или освобождения Головного исполнителя от ответственности за несвоевременное выполнение результатов СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

Головной исполнитель, согласившись с замечаниями Заказчика, сопроводительным письмом вх. от 08.05.2020 № 80-24746 (исх. от 07.05.2020 № 400/188) повторно направил Заказчику на рассмотрение и утверждение акт сдачи-приемки этапа СЧ ОКР и отчетные материалы с устраненными замечаниями.

Одновременно Головной исполнитель представил: «справки об устранении замечаний,   изложенных  в  заключениях по результатам метрологической

ПИ 1, справки об устранении замечаний по результатам экспертизы РКД датчиков давлений ДАВ ПО, ДАЭ 115, датчика температуры ТК 1, преобразователя ПИ 1 на соответствие требованиям стандартизации и унификации».

В повторно представленных отчетных документах Головным исполнителем устранены, в частности Головным исполнителем были устранены замечаниями в разработанных в рамках государственного контракта Технических условиях СДАИ.405219.025РЭ и Руководстве по эксплуатации СДАИ.405219.025РЭ (приложения 12 ЛЗ к настоящим объяснениям).

В целях приемки повторно представленных отчетных документов Заказчиком в соответствии с пунктом 5.6 госконтракта создана комиссия по экспертизе выполненных работ.

По результатам экспертизы комиссия Заказчика подтвердила соответствие повторно представленных Головным исполнителем отчетных материалов требования ТЗ на СЧ ОКР Преображение (КА) (Заключение от 21.05.2020 № 87-закл).

В соответствии с пунктом 4.3 госконтракта акт приемки этапа СЧ ОКР по этапу № 2 утвержден Заказчиком 25.05.2020.

Таким образом, срок просрочки исполнения обязательства по этапу № 2 составляет 55 дней (с 01.04.2020 по 25.05.2020).

Учитывая изложенное, доводы Ответчика о том, что он выполнил работы по этапу № 2 госконтракта своевременно и без замечаний к качеству и объемам работ не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным по делу доказательствам.

В материалы дела Ответчиком не представлено доказательств того, что первоначально предоставленные Головным исполнителем отчетные материалы (30.03.2020 т.е. с просрочкой) соответствовали условиям госконтркта.

Соответственно просрочка Головным исполнителем выполнения работ по этапу № 2 государственного контракта согласно статье 330 ГК РФ и пункту 8.3. госконтракта является основанием для начисления пени.

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд взыскивает с ответчика в пользу истца сумму пени, поскольку заявитель не исполнил свои обязательства в установленный договором срок, хотя должен был это сделать в силу ст.ст. 309 - 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 314, 330, 333, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по государственному контракту № 783-8412А/17/230 от 27.12.2017 г. в размере153.266,67 (сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят шесть рублей 67 копейки) рублей.

Взыскать с акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлин в размере 5.598 (пять тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяА.С. Чадов