Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-84349/24-96-587

24 сентября 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 10.09.2024

Полный текст решения изготовлен  24.09.2024

 

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛ" 150006, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ЖУКОВСКОГО, Д.15/13, КВ.2 Ярославская область, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.05.2007, ИНН: 

<

***>, КПП: 760401001

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭНЕРГОГАЗ" 109052, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, УЛ СМИРНОВСКАЯ, Д. 25, СТР. 7, ЭТ. 2, КОМ. 24 Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.04.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 772201001

о взыскании 18 118 386 руб. 85 коп.

третье лицо МУП ГОРОДА КОСТРОМЫ "ГОРОДСКИЕ СЕТИ"

при участии:

от истца: ФИО1 ген. директор; ФИО2 по дов. От 01.03.2024 г.

от ответчика: ФИО3 по дов. от 30.01.24г., диплом;

от третьего лица: не явился, извещен,

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛ"  (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭНЕРГОГАЗ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы по договору субподряда № 1.08-2023 от 14.08.2023г., договору субподряда № 2.08-2023 от 28.08.2023г., договору субподряда № 3.08-2023 от 31.08.2023г.. в размере 18 118 386 (восемнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) руб., 85 коп.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика по иску возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Представитель третьего лица, надлежащим образом извещённый, в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Между Обществом с ограниченной ответственностью Торгово-стороительная компания «СОКОЛ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) (далее по тексту - ООО ТСК «СОКОЛ», Субодрядчик, Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление «ЭНЕРГОГАЗ» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) (далее по тексту - ООО СМУ «ЭНЕРГОГАЗ», Подрядчик, Ответчик) заключены договора субподряда № 1.08-2023 от 14.08.2023г., договор субподряда № 2.08-2023 от 28.08.2023г., договор субподряда № 3.08-2023 от 31.08.2023г (далее по тексту -Договор). Вышеуказанные договора заключены на основании Контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей № Ф.2023.5 от 24.07.2023г., № Ф.2023.6 от 31.07.2023г., № Ф.2023.4 от 24.07.2023г., заключенных между Муниципальным унитарным предприятии города Костромы «Городские сети» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) (далее по тексту - МУП г. Костромы «Городские сети», Заказчик, Третье лицо) и Ответчиком, вышеуказанные контракты заключены с соблюдением требований Гражданского Кодекса РФ , ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок-товаров, работ, услуг государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона, объявленного извещением № 0541300000523000006 о проведении электронного аукциона на основании протокола проведения итогов.

На основании п. 1.1. Договора Субподрядчик по заданию Подрядчика в установленные Договором срок выполнить следующие работы:

 

Договор субподряда № 1.08-2023 от 14.08.2023г„ - Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 2-ТК-19 (1 этап), 2-ТК-21 (1 этап), 2-ТК-25 (1 этап), 2-ТК-29 (1 этап), 2-ТК-7 (1 этап))».

Стоимость договора субподряда № 1.08-2023 от 14.08.2023г. составляет 34 700 397 (Тридцать четыре миллиона семьсот тысяч триста девяносто семь) рублей, 27 копеек, в том числе НДС 20%, а именно: 5 783 399,55 рублей., включает:

1 этап - 910 935 (Девятьсот десять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 54 копейки, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 151 822 рублей 59 копеек.

2 этап - 1 739 381 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 289 896 рублей 93 копейки.

3 этап - 1 054 084 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 175 680 рублей 78 копеек.

4 этап - 1 297 638 (Один миллион двести девяносто семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 13 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 216 273 рублей 02 копейки.

5 этап - 1 421 083 (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча восемьдесят три) рубля 80 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 236 847 рублей 30 копеек.

6 этап - 1 381 156 (Один триста восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 230 192 рублей 78 копеек.

7 этап - 1 527 300 (Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч триста) рублей 56 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 254 550 рублей 09 копеек.

8 этап - 2 651 951 (Два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят один) рубль 61 копейка, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 441 991 рубль 93 копейки.

9 этап - 3 155 812 (Три миллиона сто пятьдесят пять тысяч восемьсот двенадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 525 968 рублей 71 копейка.

10 этап - 542 940 (Пятьсот сорок две тысячи девятьсот сорок) рублей 60 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 90 490 рублей 10 копеек.

11 этап - 613 925 (Шестьсот тринадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 102 320 рублей 94 копеек.

12 этап - 1 316 079 (Один миллион триста шестнадцать тысяч семьдесят девять) рублей 98 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 219 346 рублей 66 копеек.

13 этап - 2 031 222 (Два миллиона тридцать одна тысяча двести двадцать два) рубля 27 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 338 537 рублей 04 копейки.

14 этап - 4 799 604 (Четыре миллиона семьсот девяносто девять тысяч шестьсот четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 799 934 рубля 01 копейка.

15 этап - 691 704 (Шестьсот девяносто одна тысяча семьсот четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 115 284 рубля 08 копеек.

16 этап - 8 702 237 (Восемь миллионов семьсот две тысячи двести тридцать семь) рублей 49 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 1 450 372 рубля 92 копейки.

17 этап - 863 337 (Восемьсот шестьдесят три тысячи триста тридцать семь) рублей 81 копейка, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 143 889 рублей 63 копейки.

 

Договор субподряда № 2.08-2023 от 28.08.2023г.

Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-38 (2 этап), 6-ТК-15-2)».

Стоимость договора субподряда № 2.08-2023 от 28.08.2023г. составляет 23 257 986 (двадцать три миллиона двести пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 20%, а именно: 3 876 331,00 рублей. Включает:

1 этап - 3 449 101 (три миллиона четыреста сорок девять тысяч сто один) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 574 850 рублей 17 копеек.

2 этап - 2789 643 (два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок три) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 464 940 рублей 50 копеек.

3 этап - 1 658 383 (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 276 397 рублей17 копеек.

4 этап - 3 296 451,90 (три миллиона двести девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят один) рублей 90 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 549 408 рублей 65 копеек.

5 этап - 5 791 700 (пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 965 283 рублей ЗЗкопеек.

6 этап - 112 770 (сто двенадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 18 795 рублей 00 копеек.

7 этап - 6 159 937 (шесть миллионов сто пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 1 026 656 рублей 17 копеек.

 

Договору субподряда № 3.08-2023 от 31.08.2023г. - Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-38 (2 этап), 6-ТК-15-2)».

Стоимость договора субподряда № 3.08-2023 от 31.08.2023г. составляет 7 712 834,8 (семь миллионов семьсот двенадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля, 80 копеек, в том числе НДС 20%, а именно: 1 542 566,95 рублей. Включает:

6 этап - 2 158 690 (два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 35978 L рублей 67 копеек.

7 этап - 1 943 712 (один миллион девятьсот сорок три тысячи семьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 323 952 рублей 00 копеек.

9 этап - 2 835 898 (два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 472 649 рублей 67 копеек.

10 этап - 774 534,8 (семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 12 922 рублей 47 копеек, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 2.5 договоров субподряда Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика платежными поручениями. При этом датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Оплата Работ по Контракту производится в следующем порядке: - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета, выставленного Субподрядчиком, Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены отдельного этапа, указанной в п.2.2. договора субподряда

Однако Ответчик по большинству этапов авансовые платежи не произвел, работы по вышеуказанным договорам субподряда Истец выполнил в части и за свои денежные средства.

 

По Договор субподряда № 1.08-2023 от 14.08.2023г.

2 этап - 1 739 381 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 289 896 рублей 93 копейки.

3 этап - 1 054 084 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 175 680 рублей 78 копеек. 4 этап - 1 297 638 (Один миллион двести девяносто семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 13 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 216 273 рублей 02 копейки. 6 этап - 1 381 156 (Один триста восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 230 192 рублей 78 копеек. 15 этап - 691 704 (Шестьсот девяносто одна тысяча семьсот четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 115 284 рубля 08 копеек.

Согласно доводам иска, работы выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком что подтверждается Актами выполненных работ размещенных ЕИС в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг государственных и муниципальных нужд». Стоимость выполненных работ составила 6 163 965 (шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят пять) руб. 65 коп.

Подрядчиком внесены авансовые платежи на сумму 1 232 793 (один миллион двести тридцать две тысячи семьсот девяносто три) руб. 12 коп., таким образом за Подрядчиком числится задолженность в размере 4 931 172 (четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча сто семьдесят два) руб., 53 коп.

 

По Договору субподряда № 2.08-2023 от 28.08.2023г.:

4 этап - 3 296 451,90 (три миллиона двести девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят один) рублей 90 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 549 408 рублей 65 копеек.

5 этап - 5 791 700 (пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 965 283 рублей 33 копеек.

 

Согласно доводам иска, работы выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком что подтверждается Актами выполненных работ размещенных ЕИС в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг государственных и муниципальных нужд».

Стоимость выполненных работ составила 9 088 151 руб. 90 коп.

Как указывает истец, Подрядчиком внесены авансовые платежи на сумму 1 238 460 (один миллион двести тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) руб. 38 коп., таким образом за Подрядчиком числится задолженность » размере 7 849 691 (семь миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто один) руб., 52 коп.

По Договору субподряда 3.08-2023 от 31.08.2023г.

6 этап - 2 158 690 (два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 359781 рублей 67 копеек

9 этап - 2 835 898 (два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 472 649 рублей 67 копеек.

10 этап - 774 534,8 (семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % 12 922 рублей 47 копеек.

Работы выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком что подтверждается Актами выполненных работ размещенных ЕИС в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг государственных и муниципальных нужд». Стоимость выполненных работ составила 5 769 122 (пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто двадцать два) руб. 80 коп.

Согласно исковому заявлению, Подрядчиком внесены авансовые платежи на сумму 431 600 (четыреста тридцать одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., таким образом за Подрядчиком числится задолженность в размере 5 337 522 (пять миллионов триста тридцать семь тысяч пятьсот двадцать два) руб., 80 коп.

Данные обстоятельства и послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Рассматривая данный спор по существу, суд исходит из следующего.

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в полном объеме, суд исходит из следующего.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Действующим законодательством не предусмотрена обязанность суда по самостоятельному сбору доказательств или установлению их соответствия действительности, в противном случае были бы нарушены основополагающие принципы состязательности и равноправия сторон, закрепленные в статьях 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, обязанности по сбору доказательств и их представлению суду в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, возлагается на лиц, участвующих в деле (в данном случае - на истца).

Истцом фактически работы не выполнялись, в связи с чем Акты выполненных работ Подрядчиком подписаны не были.

Договор субподряда №1.08-2023 от 14 августа 2023 года заключен на основании Контракта от 27.07.2023 №Ф 2023.5 (номер извещения в ЕИС 0541300000523000005), заключенного между ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ» (Подрядчик) и МУП города Костромы «Городские сети» (Заказчик). ^ Во исполнение условий Договора субподряда ООО «Сокол» обязалось выполнить работы на объекте «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 2-ТК-19 (1 этап), 2-ТК-21 (1 этап), 2-ТК-25 (1 этап), 2-ТК-29 (1 этап), 2-ТК-7 (1 этап)», в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с техническим заданием, графиком выполнения работ и расчетом стоимости Контракта.

ООО «Сокол» обязалось выполнить работы по 17 этапам, с 1 по 17 этапы.

В иске указано о выполнении работ по 2, 3, 4. 6, 15 этапам на сумму 6 163 965 руб. 65 коп.

Из них:

- по 2 этапу на сумму 1 739 381 руб. 60 коп.,

- по 3 этапу на сумму 1 054 084 руб.70 коп.,

- по 4 этапу на сумму 1 297 638 руб. 13 коп.,

- по 6 этапу на сумму 1 381 156 руб. 71 коп.,

- по 15 этапу на сумму 691 704 руб. 50 коп.

При этом работы были проавансированы на сумму 1 232 793 руб. 12 коп. В связи с неисполнением Субподрядчиком принятых на себя обязательств, 07 февраля ~- 2024 года между Заказчиком и Подрядчиком подготовлено Соглашение о расторжении Контракта, которое подписано Заказчиком 04 марта 2024 года.

В Соглашении указано, что работы по 6 и 15 этапам не выполнялись. По 2 этапу работы выполнены на сумму 566 601 руб. 23 коп. По 3 этапу работы выполнены на сумму 1 527 700 руб. 32 коп. По 4 этапу работы выполнены на сумму 1 058 075 руб. 46 коп.

В Соглашении указано о выполнении работ по 1, 5, 9, 11 этапам, что подтверждает выполнение работ самим Подрядчиком.

Договор субподряда №2.08-2023 от 28 августа 2023 года заключен на основании Контракта от 31.07.2023 №Ф 2023.4 (номер извещения в ЕИС 0541300000523000006), заключенного между ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ» (Подрядчик) и МУП города Костромы «Городские сети» (Заказчик).

Во исполнение условий Договора субподряда ООО «Сокол» обязалось выполнить работы на объекте «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-38 (2 этап), 6-ТК-15-2», в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с техническим заданием, графиком выполнения работ и расчетом стоимости Контракта.

ООО «Сокол» обязалось выполнить работы по 7 этапам, с 1 по 7 этапы. В иске указано о выполнении работ по 4, 5 этапам на сумму 9 088 151 руб. 90 коп. Из них:

- по 4 этапу на сумму 3 296 451 руб. 90 коп.,

- по 5 этапу на сумму 5 791 700 руб. 00 коп.

Работы были проавансированы на сумму 1 238 460 руб. 38 коп.

07 февраля 2024 года между Заказчиком и Подрядчиком подготовлено Соглашение о расторжении Контракта, которое подписано Заказчиком 04 марта 2024 года.

В Соглашении указано, что работы по 4 этапу не выполнялись.

По 5 этапу работы выполнены на сумму 2 138 264 руб. 63 коп.

В то же время в Соглашении указано о выполнении работ по 1, 6, 7 этапам, что подтверждает выполнение работ силами ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ».

Договор субподряда №3.08-2023 от 31 августа 2023 года заключен на основании Контракта от 31.07.2023 №Ф 2023.4 (номер извещения в ЕИС 0541300000523000004), заключенного между ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ» (Подрядчик) и МУП города Костромы «Городские сети» (Заказчик).

Во исполнение условий Договора субподряда ООО «Сокол» обязалось выполнить работы на объекте «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-48 (1 этап), 1-ТК-53.4 (1 этап), 1-ТК53-9 (1 этап), 1-ТК-55 (1 этап), 1-ТК-58 (1 этап)» в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с техническим заданием, графиком выполнения работ и расчетом стоимости Контракта.

ООО «Сокол» обязалось выполнить работы по 4 этапам (6,1,9, 10 этапы).

В иске указано о выполнении работ по 6, 9, 10 этапам на сумму 5 769 122 руб. 80 коп.

Из них:

- по 6 этапу на сумму 2 158 690 руб. 00 коп.,

- по 9 этапу на сумму 2 835 898 руб. 00 коп.,

- по 10 этапу на сумму 774 534 руб. 80 коп.

Работы были проавансированы на сумму 431 600 руб. 00 коп.

07 февраля 2024 года между Заказчиком и Подрядчиком подготовлено Соглашение о расторжении Контракта, которое подписано Заказчиком 20 февраля 2024 года.

В Соглашении указано, что работы по 10 этапу не выполнялись.

По 6 этапу работы выполнены на сумму 2 374 342 руб. 96 коп.

По 9 этапу работы выполнены на сумму. 129 785 руб. 50 коп.

В то же время в Соглашении указано о выполнении работ по 1,2, 3, 4, 5, 7, 8 этапам, что подтверждает выполнение работ силами ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ».

Арбитражный суд отклоняет доводы иска о сдаче результата работ ответчику.

В силу ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Исходя из анализа вышеуказанных правовых норм следует, что односторонний отказ от подписания актов по форме №КС-2, №КС-3 при отсутствии выставленных в установленном Законом и Договором порядке мотивированных отказов от такого подписания, не является основанием для отказа от приемки, а, следовательно, и оплаты выполненных Работ.

В частности, в соответствии с положениями Информационного письма ВАС РФ:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Указанная норма означает, что оформленный в таком порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ».

Согласно п. 4.1.8. Контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей № Ф.2023.5 от 24.07.2023г., № Ф.2023.6 от 31.07.2023г., № Ф.2023.4 от 24.07.2023г. в ходе выполнения работ подрядчик обязан составлять акты освидетельствования скрытых работ с организацией уполномоченной на проведение строительного контроля, уведомлять «Заказчика» и организацию, уполномоченную на проведение строительного контроля по Контракту о начале и окончании выполнения скрытых работ и не приступать к выполнению предыдущего вида работ до принятия скрытых работ и подписания актов освидетельствования.

Разделом 5 договоров, заключённых между истцом и ответчиком установлен порядок сдачи выполненных работ. Пунктом 4.1.8. договоров установлены правила идентичные правилам Контрактов.

Разделом 12 договоров установлен адрес электронной почты ответчика.

Вопреки указанным положениям, истец направлял акты выполненных работ по адресу, не указанному в договорах, сведения о принадлежности указанного адреса электронной почты ответчику не представлены, поручение ответчика осуществлять сдачу выполненных работ по данному адресу также отсутствует. Посредством Почты России акты выполненных работ не направлялись.

Иные представленные истцом доказательства не являются относимыми, не подтверждают факт выполнения работ. Исполнительная документация истцом не представлена.

В силу п. 11.5. Договоров уведомления, претензии, требования, запросы и иные документы, связанные с исполнением контракта, стороны направляют друг другу нарочно, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. Реквизиты указаны в договорах.

В соответствии со ст. ст.  65, 66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Согласно п. 1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В силу ст. ст. 67, 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами, арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В соответствии с пп. 1, 3 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Относимые и допустимые доказательства выполнения работ истцом не представлены.

При таких обстоятельствах, исходя из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, арбитражный суд отказывает в удовлетворении исковых требований.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     П.С. Гутник