АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Воронеж                                                                            Дело №А14-8834/2022

« 16 » января  2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16.01.2023.

Решение изготовлено в полном объеме 16.01.2023.                                            

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-95», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к акционерному обществу «Деловой центр Воронеж», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 360 496 148, 37 руб. задолженности по договору № 322/1 от 20.05.2014  

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 07.11.2022;

от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен;  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-95» (далее – истец) обратилось арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Деловой центр Воронеж» (далее – ответчик) о взыскании 360 496 148, 37 руб. задолженности по договору № 322/1 от 20.05.2014.

В судебное заседание  ответчик не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежаще. На основании статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводилось в отсутствие ответчика.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

От ответчика поступило ходатайство о приобщении к материалам дела документов.

На основании ст. 159 АПК РФ, при отсутствии возражений со стороны истца, судом приобщены к материалам дела представленные ответчиком документы.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 11.01.2023 по 16.01.2023.

Из материалов дела следует, что 01.06.2012 между  ОАО «ЦУМ-Воронеж»  и ООО «СМУ-95» заключен договор генерального строительного подряда №322, в соответствии с предметом которого, генподрядчик в сроки, установленные договором выполнит в соответствии со СНиП, утвержденным заданием на проектирование (Приложение №4 к договору), исходно-разрешительной и технической документацией, переданной заказчиком: Разработку рабочей документации на объект в соответствии с заданием на проектирование (Приложением № 4), архитектурной и инженерной концепций, утвержденных технических условий и противопожарных мероприятий, архитектурно-планировочных решений; Необходимые подготовительные работы (установка временных сооружений, ограждений строительной площадки и прочее); Поэтапное строительство объекта с выполнением функции генподрядчика в соответствии с условиями договора, СНиП (в т.ч. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»), рабочей документацией, в объеме: полной отделки зон общего пользования, в том числе паркинг, рекреационные зоны, туалеты, технические помещения, лестничные пролеты, лифтовые зоны и т.д., в соответствии с утвержденным заказчиком дизайн-проектом интерьеров и экстерьеров, внешние инженерные сети, благоустройство в пределах генерального плана объекта; Своевременное устранение любых несоответствий в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет.

В силу пп.3.2, 3.3 договора генподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.3.1 договора, своим иждивением: из своих материалов, своими средствами, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной заказчиком рабочей документацией, утвержденной заказчиком штампом «К производству работ» с учетом возможных изменений объемов работ и сдать объект заказчику в порядке и сроки, установленные договором. Заказчик обязуется создать генподрядчику необходимые условия, для выполнения работ, принять их результат в установленном настоящим договором порядке и оплатить обусловленную договором цену.

20.05.2014 между  ОАО «ЦУМ-Воронеж»  и ООО «СМУ-95» заключен договор генерального строительного подряда №322-1, в соответствии с условиями которого в редакции дополнительного соглашения № 19 от 01.09.2016 генподрядчик о сроки, усыновленные договором обязуется выполнить в соответствии со СНиП, архитектурной и инженерной концепцией, утвержденными техническими условиями и противопожарными мероприятиями, архитектурно-планировочными решениями, исходно-разрешительной и технической документацией, переданной заказчиком и Приложениями №1, 2, 3, 4  к договору: разработку рабочей документации на строительство и реконструкцию объекта  - «ЦУМ-Воронеж» с пристройкой и газовой котельной по адресу: 

<

...>, а также прилегающая территория и внешние инженерные сети, в границах, указанных в  генплане; строительство объекта ориентировочной площадью  76 460, 41 кв.м., в том числе площадь подземной парковки 16 264, 80 кв.м, на основании разрешения на строительство №RU-3630200-04, выданного отделом  подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства Администрации городского округа город Воронеж 25.01.2013.

В силу п. 1.2 договора №322-1 стороны согласовали, что с момент подписания настоящего договора ранее заключенный Договор № 322 от 01 июня 2012 г. теряет свою юридическую силу. Оплата, произведенная по договору №  322 от  01 июня 2012 г. засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.

Сроки выполнения работ по договору: с даты подписания до 01 июля 2017 (п.2.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 19 от 01.09.2016.).

В соответствии с п.2.1 договора в редакции Дополнительного соглашения № 24 от 13.04.2017 общая стоимость работ выполняемых генподрядчиком по настоящему договору составляет 3 389 619 000 руб., в том числе НДС 18% в соответствии с расчетом общей стоимости строительства объекта (приложение № 4 к договору).

Решением Арбитражного суда Воронежской области по делу №А14-22637/2019  от 17.02.2021 (резолютивная часть решения объявлена 10.02.2021) Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-95» (ранее- ОАО «ЦУМ-Воронеж») было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден ФИО3, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».

Определением суда от 09.08.2022 по делу №А14-22637/2019 срок конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 95», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) продлен на 6 (шесть) месяцев, начиная с 09.08.2022.

Ссылаясь на информацию из книг покупок-продаж, выписок по расчетным счетам ООО «СМУ-95» конкурсный управляющий полагает, что   ОАО «ЦУМ-Воронеж»   выполнены работы на сумму 3 071 748 934, 37 руб., а ответчиком оплачено 2 711 252 786 руб.

Претензией № 207 от 22.12.2021 конкурсный управляющий потребовал уплаты задолженности в размере 360 496 148, 37 руб.

Неисполнение требований претензии послужило основаниям для обращения  истца в Арбитражный суд Воронежской области с настоящими требованиями. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив все в совокупности, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Исходя из существа заявленных исковых требований и правовой природы отношений сторон, вытекающих из договора № №322-1,  к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 ГК РФ о договорах подряда (строительного подряда). 

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746  ГК РФ  оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно п. 4.7. договора окончательный  расчет за все выполненные работы  производится не позднее 60 рабочих дней с даты ввода объекта в эксплуатацию (подписания акта государственной приемочной комиссией), при условии, что работа выполнена надлежащим образом, после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных  при приемке результата работ, при предоставлении заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструируемого объекта   капитального строительства требованиям технических  регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и подписания заказчиком акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

Согласно статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом первичной документации (актов выполненных работ), подтверждающей факт выполнения работ на общую сумму 3 071 748 934, 37 руб. не представлено.

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 12.11.2019 N 77-КГ19-17 и от 30.07.2015 N 305-ЭС15-3990, согласно которой акты выполненных работ, хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств.

Определением суда от 23.06.2022,  в ходе судебного заседания 06.09.2022, а также в  протокольных определениях от 25.10.2022, от 29.11-05.12.2022 (в виду отсутствия представителей истца в данных заседаниях)  судом разъяснялась возможность исследования спорных обстоятельств- определение объема и стоимости фактически выполненных строительных работ путем проведения судебно-строительной экспертизы.

Соответствующего  ходатайства истцом заявлено не было.

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в постановлении Президиума от 25.07.2011 N 5256/11, суд не несет обязанность по сбору доказательств по делу, рассматриваемому в порядке искового производства, а лишь оказывает содействие лицам, участвующим в деле, в получении доказательств, которые не могут быть предоставлены ими самостоятельно.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления негативных последствий несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Ссылка конкурсного управляющего на книги покупок и продаж, не могут быть приняты судом, поскольку таковых в материалы дела не представлено, и более того, они  не являются доказательством исполнения сторонами гражданско-правовой сделки.

Книга покупок и продаж в отсутствие первичных документов, не является надлежащим доказательством выполнения работ или поставки товара и не подтверждает размер задолженности, поскольку содержащиеся в данной книге сведения используются для иных, не связанных с гражданско-правовыми обязательствами сторон настоящего спора, правоотношений.

Книга покупок и продаж является документом налогового учета, формируемым налогоплательщиком для целей расчета налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет.

Сама по себе книга покупок и продаж не может являться подтверждением наличия между сторонами гражданско-правовых отношений без подтверждения первичной документацией.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа  от 14.10.2022 по делу №А65-22432/2021.

Ответчиком же в соответствии со ст. 65 АПК РФ представлены документы, подтверждающую оплату, выполненных в рамках спорного договора работ в объеме, признаваемом ответчиком.

С учетом изложенного, основания для удовлетворения иска у суда отсутствуют. 

Размер государственной пошлины по делу составляет 200 000 руб. 

Истцу при подаче иска предоставлялась отсрочка уплаты государственной пошлины.

На основании статьи 110 АПК РФ, с истца в доход федерального бюджета следует взыскать 200 000 руб. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-95», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 200 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение. 

 

Судья Арбитражного суда

Воронежской области                                                   Е.С. Завидовская