А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д Г О Р О Д А М О С К В Ы 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 г. Москва дело № А40-112091/24-151-865  11.11.2024 года  

Резолютивная часть решения объявлена 07.10.2024 года 

Решение в полном объеме изготовлено 11.11.2024 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе Судьи Вольской К.В. при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» (ОГРН  

<

***>)  

к ответчику: ООО «ГСП РЕМОНТ» (ОГРН 

<

***>) о взыскании 5 356 211,67 руб. при участии от истца: ФИО1 по доверенности от 21.02.2024 от ответчика: представитель не явился 

У С Т А Н О В И Л:

С учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, иск заявлен о  взыскании процентов за период с 10.01.2024 по 07.10.2024 в размере 5 356 211 руб. 67  коп.  

Представитель истца требования поддержал. Надлежащим образом извещенный  представитель ответчика в судебное заседание не явился, в порядке ст. 123, 156 АПК  РФ, суд считает возможным провести судебное заседание в его отсутствие.  

Выслушав доводы истца, исследовав письменные доказательства, суд пришел к  следующим выводам.  

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, между ООО  «Газпром трансгаз Чайковский» и ООО «ГСП Ремонт» заключён договор № Х04230297  от 26.04.2023 на выполнение работ по аварийно-восстановительным ремонтам  газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и приводных газотурбинных двигателей  стационарного типа.  

Дополнительным соглашением № 1 от 05.07.2023 стороны согласовали  Спецификацию № I на аварийно-восстановительный ремонт стационарной  

газотурбинной установки ГТН-25/76, зав. № 1452 в составе объекта инв. № 142752  Газоперекачивающий агрегат ГПА-25/76 № 1 КЦ-2 КС «Гремячинская» газопровод  «Ямбург-Западная граница».  

Спецификацией № I согласованы следующие сроки проведения работ.  Дата начала работ по этапу № 1 - 10.01.2023.  

Дата начала работ по этапу № 2 - 10.04.2023, срок выполнения работ 180 дней,  следовательно, срок окончания работ 06.10.2023.  

Дата начала работ по этапу № 3 -по окончании работ по этапу № 2, окончания  работ по этапу № 3 - 30 дней. Таким образом, весь комплекс по аварийно-восстановительному ремонту газотурбинной установки должен был быть выполнен не  позднее 07.11.2023.  

Однако, в нарушение условий договора № Х04230297 от 26.04.2023 ООО «ГСП  Ремонт» работы по этапу № 2 не выполнило до сих пор, акты по форме КС-2 не  подписаны.  

26.09.2023 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» перечислило авансовый платеж  в размере 45 076 703 руб. 64 коп. В соответствии с п. 5.5 договора № Х04230297 от  26.04.2023 предельный срок использования полученного аванса устанавливается исходя  из срока окончания работ по спецификации, плюс 2 календарных месяца.  

Поскольку работы ООО «ГСП Ремонт» по спецификации № 1 не выполнены, то  срок правомерного использования аванса истек 08.01.2024. ООО «Газпром трансгаз  Чайковский» в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  имеет право начислить проценты за пользование чужими денежными средствами.  

26.09.2023 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» перечислило авансовый платеж  в размере 45 076 703 руб. 64 коп.  

Спецификацией № 1 согласованы следующие сроки проведения работ.  Дата начала работ по этапу № 1 - 10.01.2023.  

Дата начала работ по этапу № 2 - 10.04.2023, срок выполнения работ 180 дней,  следовательно, срок окончания работ 06.10.2023.  

Дата начала работ по этапу № 3 -по окончании работ по этапу № 2, окончания  работ по этапу № 3 - 30 дней.  

Таким образом, весь комплекс по аварийно-восстановительному ремонту  газотурбинной установки должен был быть выполнен не позднее 07.11.2023.  

В соответствии с п. 5.5 договора № Х04230297 от 26.04.2023 предельный срок  использования полученного аванса устанавливается исходя из срока окончания работ по  спецификации, плюс 2 календарных месяца. Следовательно, предельный согласованный  сторонами срок правомерного использования аванса 08.01.2024.  

Однако, в нарушение условий договора № Х04230297 от 26.04.2023 ООО «ГСП  Ремонт» работы по этапу № 2 не выполнило до сих пор, акты по форме КС-2 не  подписаны.  

В исковом заявлении от 24.04.2024 № 23и-200/3432 Истец произвел расчет  процентов за пользование чужими денежными средствами за период времени с  09.01.2024 по 15.04.2024.  

Однако, и на сегодняшний день работы выполнены только по первому этапу. 

В связи с этим Истец произвел перерасчет процентов за пользование чужими  денежными средствами на дату рассмотрения искового заявления и с учетом  выполнения работ по 1 этапу.  

С учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, истец просит  взыскать проценты за период с 10.01.2024 по 07.10.2024 в размере 5 356 211 руб. 67  коп.  

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307310, 395 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.  

Проверив представленный истцом расчет процентов, суд признает его  методологически и арифметически верным, суд учитывает, что уточнения требований в  порядке ст. 49 АПК РФ, истцом сделаны с учетом возражений ответчика.  

Изучив материалы дела, учитывая в том числе предмет и основание заявленного  иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в  материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на  всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив  также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в  отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности,  находит требования истца обоснованными, подлежащими удовлетворению.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации расходы по госпошлине относятся на истца.  

На основании статей 8, 10, 12, 307-310, 395 Гражданского кодекса Российской  Федерации, руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ГСП РЕМОНТ» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» (ОГРН 

<

***>) проценты за  пользование чужими денежными средствами в размере 5 356 211 руб. 67 коп., а также  расходы по оплате госпошлины в размере 32 312  

Взыскать с ООО «ГСП РЕМОНТ» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета РФ госпошлину в размере 17 469 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем  подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья К.В. Вольская