Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-1925/2020

30 марта 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  11 марта 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  30 марта 2020 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (адрес:  Россия 188691, г. Кудрово, Ленинградская область, пр-кт Строителей, здание 39, пом 63-Н, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА-СЕРВИС" (адрес:  Россия 194064, 

<

...> лит. А, пом. 4.2, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

 

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.10.2019,

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 26.06.2019, 

 

установил:

Автономная некоммерческая организация "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА-СЕРВИС" о взыскании 1 994 136 руб. 20 коп. долга.

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, суд установил следующее.

14.06.2018 между сторонами заключен договор генерального подряда № 14-06/18 на выполнение Подрядчиком в установленный договором срок своими и/или привеченными силами выполнить в соответствии с Проектной документацией и/или иной Технической документацией, переданной на момент подписания настоящего договора Генподрядчику с отметкой «В производство работ», комплекс работ по строительству Объекта - «Пожарное депо V типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда)» по адресу: Ленинградская область. Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», дер. Янино-1, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:3761.

В соответствии с п. 7.6. Договора Генподрядчик обязуется поставить на Объект все необходимые для выполнения Работ, предусмотренных проектной документацией, материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, имеющие соответствующие паспорта и сертификаты, и обеспечивающие эффективное проведение работ.

В соответствии с п. 5.4. Договора в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 06.02.2019 срок фактического выполнения обязательств - дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

21.03.2019 объект введен в эксплуатацию на основании Разрешения Главы Администрации ми «Заневское городское поселение» № 47-RU47504109-19-201.

На основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, общая стоимость работ по Договору согласована сторонами в размере 82 045 300 руб. 98 коп.

От Генподрядчика в адрес Заказчика поступил проект Дополнительного соглашения № 4 от 14.06.2019 к Договору генерального подряда № 14-06/18 от 14.06.2018. Редакция, предложенная Генподрядчиком не была принята Заказчиком, в соответствии с исходящим письмом №230/19 от 11.07.2019 Генподрядчику направлен Протокол разногласий от 28.06.2018 к Дополнительному соглашению № 4 от 14.06.2019 года к Договору генерального подряда № 14-06/18 от 14.06.2018, а также предложена для согласования редакция Дополнительного соглашения № 4 к Договору генерального подряда № 14-06/18 от 14.06.2018, подписанная Заказчиком.

Редакции дополнительного соглашения № 4 содержали в себе корректировку ставки НДС в размере 20%, влекущее соответствующее изменение стоимости работ, юридического адреса Заказчика, кроме того Протоколом разногласий и редакцией ДС со стороны Заказчика было предложено урегулировать вопрос оплаты Генподрядчиком потребленных Генподрядчиком за время строительства объекта энергоресурсов. 

Как указал истец, генподрядчик уклонился от подписания указанного дополнительного соглашения с учетом замечаний Генподрядчика, а также от каких-либо переговоров в отношении урегулирования вопроса потребляемых энергоресурсов.

В течение всего срока действия договора Заказчик никаким образом не санкционировал потребление Генподрядчиком энергоресурсов для производства строительных работ за счет Заказчика.

При этом обеспечение строительной площадки энергоресурсами за счет истца подтверждается следующим:

В адрес АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» поступило претензионное письмо № 169/ДЯ от 11.07.2019 от Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС Девелопмент» о том, что при производстве работ по строительству объекта - «Пожарное депо V типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда по адресу: Ленинградская область. Всеволожский муниципальный район, МО «3aHeBcicW городское поселение», уч. Янино-1 ООО «ЕСЗ-Сервис», как генподрядная организация на объекте строительства, использовало электроэнергию для нужд строительства.

Подключение строительной площадки было осуществлено к временным сетям электроснабжения ООО «Специализированный застройщик «КВС Девелопмент». Расчет за потребленную электроэнергию представлен в приложении и составляет                         1 726 111 руб. Расчет проверен и подтвержден, оплата со стороны ООО «ЕСЗ-Сервис» за фактически потребленную электроэнергию не произведена.

Договор № 38/18 холодного водоснабжения (временный) от 01.09.2018,заключенный между Заказчиком и ООО «СМЭУ «Заневка», в соответствии с п. 1.2которого ООО «СМЭУ «Заневка», обеспечивает холодным водоснабжением строительную площадку по адресу МО «Заневское городское поселение», дер. Янино-1, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:3761.

Оплата по настоящему договору произведена Заказчиком на основании платежных поручений на сумму 8 035 руб. 67 коп.

Договор теплоснабжения (на строительные нужды) № 46-ТС/01.19 от 01.01.2019, заключенный между Заказчиком и ООО «ТК Северная», в соответствии с п. 1.1.которого ООО «ТК Северная» обеспечивает подачу тепловой энергии на периодпроизводства пуско-наладочных работ на объекте, указанном в п. 1.2 и Приложении № 1 к договору, а именно: Пожарное депо V типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда)» по адресу: Ленинградская область. Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», дер. Янино-1, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:3761.

Оплата по настоящему договору произведена Заказчиком на основании платежных пооручений на сумму 259 989 руб. 53 коп.

В соответствии с п. 7.8 Договора Генподрядчик несет полную ответственность за деятельность своего персонала при выполнении работ, вытекающих из условий настоящего Договора.

Таким образом, как указал истец, потребленные энергоресурсы были необходимы для строительства объекта в рамках договора генерального подряда № № 14-06/18 от 14.06.2018 и использованы Генподрядчиком без уведомления и согласования со стороны Заказчика. 

Общая стоимость потребленных Генподрядчиком энергоресурсов составляет 1 994 136 руб. 20 коп.

19.11.2019 года в адрес Ответчика направлена претензия, которая согласно отслеживанию по сайту Почты России получена 29.11.2019 года.

Оставление данной претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно статье 747 ГК РФ заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водопровода и паропровода и оказывать другие услуги (пункт 2). Оплата предоставленных заказчиком услуг осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда (пункт 3).

В соответствии со статьей 309 Кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оплата услуг Заказчика по обеспечению строительства Объев коммунальными ресурсами возможна только в случаях и на условиях, предусмотрена договором строительного подряда.

Договор, заключенный между Сторонами, не предусматривает оплаты предоставленных Заказчиком услуг по обеспечению строительства Объекта коммунальными ресурсами.

С учётом изложенного в иске следует отказать. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.