ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А57-8390/2017

г. Саратов

12 января 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января  2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 января  2018 года.

     Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего – судьи Т.Н. Телегиной,

судей О.В. Лыткиной, М.Г. Цуцковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСТАЛЬИНДУСТРИЯ», г. Саратов,

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 25 октября 2017 года                       по делу № А57-8390/2017, принятое судьей Ю.С. Святкиной, 

по иску общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСТАЛЬИНДУСТРИЯ», г. Саратов, (ОГРН 

<

***>,                              ИНН 

<

***>), 

к обществу с ограниченной ответственностью «Гидравика», г. Саратов,                       (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

о взыскании 106000 руб.,

при участии в заседании: от истца – ФИО2, представителя, доверенность от 24.04.2017 (ксерокопия в деле),  ордер от 10.01.2018 № 4441, ФИО3 – представителя, доверенность от 08.06.2017 (ксерокопия в деле), ответчик извещен о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке части 1, 6 статьи 121, части 1 статьи 122, пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления от 12.12.2017 № 67085, отчетом о публикации судебных актов от 13.12.2017, 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСТАЛЬИНДУСТРИЯ»  с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Гидравика»  о взыскании 106000 руб. излишне уплаченных денежных средств по договору подряда от 20 декабря 2015 года.

     Решением от 25 октября 2017 года Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-8390/2017 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, с истца взыскано в доход федерального бюджета 4180  руб. государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции. 

     Не согласившись с принятым по делу судебным актом, общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСТАЛЬИНДУСТРИЯ» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, как незаконное и необоснованное, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить иск в полном объеме.

     Заявитель апелляционной жалобы считает, что арбитражным судом первой инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы, содержащиеся в решении, не соответствуют обстоятельствам дела: выполнение работ не подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ, не приняты во внимания показания свидетеля ФИО4, не приведены мотивы, по которым данное доказательство отвергнуто. 

     Общество с ограниченной ответственностью «Гидравика»  не  представило отзыв на апелляционную жалобу.

     Арбитражный апелляционный суд в порядке части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам. 

     Решение суда является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права (пункт 10 раздела «Разрешение споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Судебная коллегия по гражданским делам. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2015 года № 1 (2015).

     Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, выступлениях присутствующих в судебном заседании представителей истца, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд не считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.

     Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСТАЛЬИНДУСТРИЯ» (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью «Гидравика» (подрядчик)   заключили договор  подряда от                   20 декабря 2015 года, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика произвести ревизию технического состояния крана МКАТ-40, выполнить комплекс работ по его ремонту, сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить его.

     Предмет договора определен в разделе 1, права и обязанности сторон – в разделе 2 заключенного договора, цена договора и порядок расчетов, сдача-приемка выполненных работ – в разделе 3, ответственность сторон – в разделе 4, порядок разрешения споров – в разделе 5, срок действия договора, заключительные положения – в разделе 6, адреса, реквизиты и подписи сторон – в разделе 7 договора.    

     В системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от                     23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

     В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

     Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное  действие,  как-то:  передать  имущество,  выполнить  работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

     Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

     На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

     В силу положений пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

     Эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена своевременным заявлением возражений или встречного иска.  Арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск. При подготовке к судебному разбирательству дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства о соблюдении правил его заключения, наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших (пункты 1, 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств»). 

     Заключенный сторонами договор от 20 декабря 2015 года является договором подряда и регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в параграфе 1 главы 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации.

     В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

     Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.

     Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами. 

     В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

     Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах»). 

     По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

    Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

     К заключенному договору сторонами согласован и подписан заказ-наряд от                   31 декабря 2015 года № 62 на общую сумму 188600 руб., в том числе стоимость узлов (деталей) – 113600 руб., стоимость работ – 75000 руб.

     Истец оплатил выполненные работы с учетом замены узлов (деталей) в сумме 230600 руб. платежными поручениями от 23 декабря 2015 года № 468, от                             29 декабря 2015 года № 476, от 2 марта 2016 года № 491.

     Истец утверждает, что подрядчик не произвел работы по замене гидроцилиндра вывешивания вертикального автокрана МКАТ-40, следовательно, стоимость этих работ и узла 106000 руб. излишне перечислена подрядчику по заключенному договору подряда от 20 декабря 2015 года. 

     Письмом-претензией от 14 марта 2017 года № 2 общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСИТАЛЬИНДУСТРИЯ» просило ответчика возвратить названную сумму. Неисполнение требований истца по возврату излишне уплаченной суммы послужило основанием для предъявления настоящего иска. 

     Истец утверждает, что по результатам исполнения заключенного договора сторонами не оформлялся акт приемки выполненных работ, заслушанный в судебном заседании свидетель ФИО4 также не подтвердил выполнение данных работ.

     Положения статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

     Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

     Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

     При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

     Истец, указывая на невыполнение работ по заказу-наряду от 31 декабря                   2015 года № 62 в полном объеме, считает, что работы произведены некачественно и ссылается при этом на нормы пункта 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

     Согласно части 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

     Представитель истца в судебном заседании пояснил, что уплатил подрядчику 230600 руб. в связи с удорожанием узлов (деталей), уплаченные 42000 сверх цены договора не считает неосновательным обогащением. Вместе с тем, утверждает, что работы на сумму 8000 руб. вместе с заменой узла – цилиндра вывешивания вертикальной автокрана МКАТ-40 на сумму 98000 руб. не выполнялись, т.е. работы выполнены некачественно, акт приемки выполненных работ отсутствует.

     По условиям раздела 3 заключенного договора стороны согласовали, что заказчик производит предварительную оплату в размере 100000 руб., в течение трех банковских дней с даты подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний производит с подрядчиком окончательный расчет.

     В материалы дела действительно не представлен акт сдачи-приемки выполненных работ. В то же время истец представил платежные документы, подтверждающие оплату выполненных работ в полном объеме и даже сверх согласованной цены. Предварительная оплата была произведена платежным поручением от 23 декабря 2015 года № 468 в сумме 100000 руб., затем заказчик еще дважды оплачивал выполненные работы платежными поручениями от                        29 декабря 2015 года № 476 в сумме 90600 руб., от 2 марта 2016 года № 491 в сумме 40000 руб., т.е. произвел окончательный расчет по заключенному договору.  Таким образом, конклюдентные действия заказчика подтверждают, что работы по заключенному договору были выполнены в полном объеме.

     По ходатайству истца в арбитражном суде первой инстанции в судебное заседание был вызван и опрошен свидетель ФИО4 об обстоятельствах выполнения работ ответчиком.

     Допрошенный свидетель  ФИО4 пояснил, что в спорный период являлся сотрудником  общества с ограниченной ответственностью «Волгостальиндустрия», работал в должности крановщика, ремонт крана осуществлялся ответчиком в зимний период времени. Эксплуатация отремонтированного автокрана после ремонта была начата в летний период, но его эксплуатация была невозможна в связи с неисправностью гидроцилиндра, последний был возвращен ответчику. 

     В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

     Процессуальные нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, содержащиеся в статьях 67, 68, предусматривают относимость и допустимость представленных сторонами арбитражного процесса доказательств: арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу; обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

     Свидетель ФИО4, как работник истца, является заинтересованным лицом, тем не менее, он показал, что после произведенного ремонта кран начал использоваться только в летний период. Материалы дела не содержат сведений, как осуществлялось хранение крана до начала эксплуатации.

     Положения  части 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены, возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

     В силу части 1 статьи 724 Гражданского кодекса российской Федерации, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

     При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции истцу предлагалось представить сведения о соблюдении предусмотренного законом порядка уведомления подрядчика об обнаружении недостатков, совместной фиксации наличия недостатков и предложения устранить недостатки.            

     Указанные доказательства истцом не были представлены, отсутствуют также доказательства самого факта некачественного выполнения работ и замены узлов (деталей) крана ответчиком. Факт возврата гидроцилиндра ответчику не подтвержден материалами дела. При таких обстоятельствах, заказчик, принимая самостоятельное решение об устранении недостатков при отсутствии совершения действий по обращению к подрядчику с требованиями об их устранении, лишается права требовать компенсации стоимости устранения недостатков в работах.

     Определением Арбитражного суда Саратовской области от                                              14  сентября 2017 года по настоящему делу истцу была  разъяснена возможность назначения судебной экспертизы по делу для определения качества выполненных работ.      

     Поскольку истец в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции путался в своих пояснений: некачественно были выполнены подрядные работы по договору или работы по замене гидроцилиндра не выполнялись, также было предложено истцу рассмотреть вопрос о проведении судебной экспертизы для подтверждения объемов выполненных работ, факта некачественно выполненных работ и определения их причин. 

     Представители истца отказались от заявления данного ходатайства, пояснив, что ремонт крана уже произведен, проведение экспертных исследований невозможно.     

     Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

      Суд апелляционной инстанции обращает внимание, что в гражданском законодательстве закреплена презумпция разумности и добросовестности участников гражданских, в том числе, корпоративных правоотношений (пункт 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются (пункт 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

     В соответствии с частью 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

     Согласно статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

     В соответствии с положениями статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на представление доказательств, участие в их исследовании, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

     В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в деле, их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

     В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств.

     При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения.

     В ходе рассмотрения спора арбитражный суд первой инстанции предоставил сторонам достаточно времени для подготовки своей позиции по делу, представлении доказательств в обоснование своих требований и возражений.

     Процессуальные права лиц, участвующих в деле, определены в части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

     Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

     Поскольку на основании части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности, то непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно, как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего  поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 12505/11). 

    Учитывая вышеизложенное, истец не доказал, неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств ответчиком.

     Всем доводам, содержащимся в апелляционной жалобе, арбитражный суд первой инстанции дал надлежащую правовую оценку при разрешении спора по существу заявленных исковых требований в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив все доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности. У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов о недоказанности истцом своих доводов.

     Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 62 «О внесении дополнений в пункт 61.9 главы 12 Регламента арбитражных судов Российской Федерации» считается определенной практика применения законодательства по вопросам, разъяснения по которым содержатся в постановлениях Пленума и информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».

     В порядке пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или статьей 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд должен определить, из какого правоотношения возник спор, и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела.

     По смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают стороны, и должен рассматривать заявленное требование по существу, исходя из фактических правоотношений, определив при этом, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, какие законы и иные нормативные правовые акты подлежат применению в конкретном спорном правоотношении (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 8467/10, Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2013 года № ВАС-1877/13).

     Представленные в материалы дела доказательства исследованы полно и всесторонне, оспариваемый судебный акт принят при правильном применении норм материального права, выводы, содержащиеся в решении, не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, не установлено нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта.

    При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.             

     Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 25 октября 2017 года  по делу             № А57-8390/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСТАЛЬИНДУСТРИЯ» без удовлетворения.

     Направить копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями части 4 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

     Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

     ПредседательствующийТ.Н. Телегина               

     СудьиО.В. Лыткина

 

    ФИО5