АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул, д.  8,  Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 58-37-05

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-20874/2020

город Кемерово

16 ноября    2020 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Переваловой О.И., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Соловьевай Е.В.,   рассмотрев в  открытом   судебном  заседании   дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ", г.Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>

к Администрации Тисульского муниципального района, район Тисульский, поселок городского типа Тисуль, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>

о взыскании 217 623 руб. долга,

 при участии:  от истца – ФИО1, представитель, доверенность от 10.09.2020, паспорт, диплом;  от ответчика – ФИО2, представитель, доверенность №1 от 09.01.2020, паспорт, диплом;

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ" обратилось в арбитражный суд с иском к Администрации Тисульского муниципального района о взыскании 217 623 руб. долга по  муниципальному контракту №39 от 10.10.2019,  принятом к производству, с назначением предварительного заседания на 16.11.2020.

 В настоящем предварительном заседании, суд, с согласия сторон, завершил подготовку дела к судебному разбирательству и перешел к рассмотрению спора по существу.

 Иск поддержан представителем истца, требование мотивировано неисполнением ответчиком обязанности по оплате принятого результата работы по муниципальному контракту.

 Согласно представленному отзыву, поддержанному представителем в настоящем судебном заседании, сторона в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса   признает иск, указывая на выполнение работ по договору и отсутствие претензий по объему и качеству выполненных работ.

Как следует из материалов дела, 10.10.2019 между истцом (поставщик) и ответчиком (заказчик) заключён муниципальный контракт №39, по которому  истец принял на себя обязательство выполнить  капитальный ремонт  наружных стен здания и отмостки  по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53, в соответствии с перечнем работ, указанном в приложении №1,  которые должны соответствовать требованиям, указанным в приложении №2, со сроком выполнения 45 дней с даты заключения контратак (пункт 1.1., 1.2, 1.3 контракта), стоимостью работ 217629руб. (пункт 2.1 контракта), оплата которых должна быть произведена в течение 30 календарных дней с даты приемки выполненных работ (пункт 2.4 контракта).

Доказательством исполнения истцом принятых на себя обязательств является акт сдачи приемки  работ от 20.10.2019 №1, подписанный сторонами без возражений. Стоимость принятого результата отражена в акте и составляет 217629руб.

С учетом положений статьи 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий заключённого договора следует считать наступившей обязанность заказчика оплатить принятый результат работы в полном объеме.

Вместе с тем, заказчиком  оплата по договору не произведена в полном объеме.

Наличие предъявленной ко взысканию задолженности  в размере 217629руб. подтверждено истцом документально и признано ответчиком в порядке статьи 49 АПК РФ, что отражено в представленном отзыве,  подписанном   представителем ФИО2,  имеющей полномочие на признание иска, согласно представленной доверенности.

С учетом документально подтверждённого факта выполнения работ, их принятие ответчиком и отсутствие доказательств оплаты, признание иска не нарушает права и законные интересы других лиц, принимается арбитражным судом, в связи с чем, требование о взыскании 217629руб.  признано судом  обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уплата государственной пошлины за рассмотрение иска относится на ответчика в полном объеме, при этом суд учитывает положения  абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, в части признанных ответчиком требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодека Российской Федерации, в связи с чем, размер подлежащей  отнесению на ответчика  размер расходов от уплаты государственной пошлины составит 2205,60руб., что соответствует 30% от размера государственной пошлине, подлежащей уплате при подаче иска  (7325 руб.)  оставшаяся сумма подлежит возврату из федерального  бюджета.

Руководствуясь   статьями110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Администрации Тисульского муниципального район в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ» 217 623 руб. долга, 2205,60руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, всего 219828,60руб. 

Обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ» возвратить из федерального бюджета 1470,40 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №208 от 20.08.2020.

Решение может быть обжаловано в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                    О.И. Перевалова